「캄보디아 질병통제예방센터 건립사업」

F/S(타당성조사) 용역을 위한

제 안 요 청 서 (RFP)

2021. 10.

－ 목   차 －

Ⅰ. 제안 안내

1. 용역 개요

2. 사업 추진 일정

Ⅱ. 제안 일반사항

1. 입찰 및 계약 방법

2. 입찰공고

3. 입찰 참가자격

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

5. 입찰시 유의사항

6. 제안서 평가방법

7. 협상대상자 선정 및 협상 절차

8. 최종낙찰자 유의사항

9. 기타사항

Ⅲ. F/S 대상사업 및 과업범위

1. 당행 발주 F/S 추진배경 및 목적

2. 본 사업 추진배경

3. F/S 대상 사업개요

4. F/S 과업범위

5. 과업 수행방법

6. 성과품 납품 및 보고서 관련 사항

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

2. 제안서 목차

3. 항목별 작성방법

4. 가격제안서 작성방법

5. 제안서 작성지침

[별첨] : 제출서류 목록

Ⅰ. 제안 안내

용역개요

과 업 명 :「캄보디아 질병통제예방센터 건립사업」F/S(타당성조사) 용역

과업기간 : 착수일로부터 8개월

사업예산 : 1,085,000,000원(부가세, 손해배상보험공제료 포함)

사업 추진 일정

제안요청 설명회

◦ 해당 사항 없음(코로나19로 인해 생략)

◦ 단, 입찰 참여 의향자는 아래와 같이 사업자등록증 사본을 제출해야 함

- 제출기한 : 2021. 11. 12(금) 17:00시

- 제출서류 : 사업자등록증 사본

- 제출방식 : E-mail 송부 (chaewon.yang@koreaexim.go.kr)

- 담 당 자 : 사업협력부 양채원 심사역(02-3779-6781)

- 메일제목 : [용역사명] ‘사업명’ F/S 참여의향서 제출

◦ 상기 입찰 참여 의향자에 한하여, 유의사항 E-mail 송부 예정

기술제안서 제출

제출기한 : 2021. 11. 26(금) 17:00시

제출장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비 (고객접견실)

제출서류 : 입찰참가신청서 및 관련 서류 (붙임 참조)

※ 직접 방문하여 제출할 것 (우편접수 불가)

가격입찰

입찰기간 : 2021. 11. 19(금) 10:00 ~ 2021. 11. 26(금) 17:00

입찰장소 : 조달청 나라장터

가격입찰 시 가격산출근거서 파일(서식 10 및 11)을 첨부

개찰일시 : 제안서 기술평가 후 개찰

면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함한 금액으로 제출

※ 본 입찰의 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 기술제안서를 제출한 입찰자만 가격입찰서를 제출할 수 있음

Ⅱ. 제안 일반사항

입찰 및 계약 방법

□ 입찰 방법 : 제한경쟁입찰

□ 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약방식

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제43조 및 "협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규 제538호, 2021. 12. 28)”에 의거, “협상에 의한 계약방식”을 적용

입찰공고

□ 공고방법 : 조달청 나라장터와 당행 홈페이지 공고

□ 공고기간 : “입찰공고”에 의함

입찰 참가자격

□「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 유자격자

□「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조 규정에 의한 부정당업자에 해당하지 않는 업체 또는 기관

□ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(‘21. 6. 1. 폐지제정)에 의하여 입찰일 전일까지 조달청 경쟁입찰참가자격 등록을 마친 업체 또는 기관

□ 당행 담당자 앞 기한 내 입찰 의사를 전달한 업체 또는 기관(단, 공동도급의 경우 대표업체만 입찰 의사를 전달해도 입찰참가자격 부여)

◦ 공동도급이 가능하며, 이 경우 기획재정부 계약예규 제539호(공동계약운용요령, ’20. 12. 28. 일부개정)에 명시된 공동이행방식 적용

□ 입찰공고 일자 기준(2021. 10. 26) 최근 5년 이내에 완료된 국내·외 하기 조건을 만족하는 사업의 타당성조사, 기본설계, 상세설계 컨설팅 수행실적 보유 업체 및 기관

◦ (질병예방통제) 감염병 관리 또는 대응 체계 구축 컨설팅*

◦ (병원운영 또는 의료계획) 병원 운영계획 또는 의료계획 수립 컨설팅**

◦ (건축) 타당성조사, 기본설계, 상세설계 컨설팅**

◦ (의료장비) 의료장비 설계 컨설팅**

* 마스터플랜, 타당성조사, 연구용역 등도 유사사업 정의 만족시 인정

** 병원 건립사업 의료계획 수립, 병원운영계획 수립, 의료장비 선정 또는 병원건축 업무의 타당성조사, 기본설계 또는 상세설계 등(감리, 교육, 발전방안 또는 성능개선 컨설팅, 연구용역 등은 제외)

주) 각 평가 대상사업에 대한 정의(세부 과업 명세)는 ‘유사사업 수행 실적’ 평가기준(9페이지, 2. 항목별 정량평가 기준)에 따름

※ 공동도급으로 용역실적 상호보완 가능

□ 입찰등록(제안서 제출) 마감일 기준 당행 컨설턴트 Pool의 ‘보건’ 또는 ‘건축’ 분야에 등록된 업체 또는 기관

◦ 당행 EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) -「사업정보」-「해외원조시장 입찰정보」-「컨설턴트 신청/관리」메뉴 이용

□ 당행 계약관련 내규에 의거하여 계약의 투명성 및 공정성을 위하여 아래 각 호에 해당하는 업체는 계약상대자가 될 수 없음. (단, 사업목적 달성을 위한 불가피한 경우는 예외로 함)

당행을 퇴직한 후 2년이 지나지 않은 퇴직자를 고용한 업체로서, 퇴직자가 당행의 입찰 또는 계약과 직접 관련된 업무를 담당하고 있는 업체

당행의 현직 임직원이 설립한 업체

◦ 위에 따라 계약 상대자의 자격이 제한되는 기간은 아래와 같음.

퇴직자가 당행을 퇴직한 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체와의 고용관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

현직 임직원이 당행을 퇴직하는 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체에 대한 지배관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

※ 서식 15 「퇴직자 영입현황 확인서」제출

◦ 본 용역에 고용된 업체(관계회사 포함)는 당해 사업의 공급자 참여에 제한될 수 있음. 다만, 일괄수주방식의 사업에 컨설턴트로서의 역할만을 수행할 목적으로 참여하는 경우에는 그러하지 아니함.

□ 본 입찰은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함

□ 당행이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자는 입찰참가자격이 결격 처리됨

□ 기타 입찰등록 마감일 현재 당행 규정 및 국가계약법상 하자가 있거나, 전국은행연합회의 “신용정보관리규약”에서 정하는 연체, 대위변제･대지급, 부도, 관련인에 의한 신용거래정보 및 금융질서문란정보의 등록대상자, 국세 및 지방세 체납기관 등은 입찰에 참가할 수 없음

입찰참가 등록 및 제안서 제출

□ 제출기한 : “입찰공고”에 의함

□ 접수장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비(고객접견실)

□ 구비서류 : “입찰 참가서류” 및 “제안서류” 참조

□ 제출방법 : 참가서류를 구비하여 직접 방문접수 (우편접수 불가)

□ 문    의 : 사업협력부 양채원 심사역

(02-3779-6781, chaewon.yang@koreaexim.go.kr)

입찰시 유의사항

□ 입찰보증금의 납부 및 귀속

◦ 입찰보증서의 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전일부터 입찰서 제출마감일 30일 이후 일자이어야 함

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조(입찰보증금) 제2항에 따라 입찰보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부해야 하며, 동시행령 제3항에 해당하는 기관은 지급각서(서식 3) 제출로 입찰보증금 면제 가능

◦ 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정기일 내에 계약을 체결하지 않을시 입찰보증금은 당행으로 귀속됨

□ 입찰무효 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제11조에서 정한 유효한 입찰이 성립되지 않거나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 동법 시행규칙 제44조의 규정에 해당하는 입찰은 무효로 함

□ 제안기관은 본 사업에 대한 제반사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

□ 제안요청서의 내용과 상이하거나 제안요청서에 누락되어 있어도 본 사업의 수행에 필수적인 요건 또는 중요한 내용이라고 판단될 경우 제안자는 제안서에 그 내용을 기술하고 보완 대책 또는 해결방안을 제시하여야 함. 이 경우 구체적인 시행방안을 제시하여야 하며 이에 대한 제반비용은 제안자가 부담함

□ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

□ 제안서는 허위나 단순예상으로 작성하여서는 아니 되며, 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 경우 심사대상에서 제외될 수 있음

□ 당행의 사전 승인을 득한 기준 소요인력으로 사업을 시행하여야 하며, 변동이 있을시 필히 사전에 승인을 얻은 후 참여시켜야 함

제안서 평가방법

□ 평가위원회 구성

◦ 당행 내규에 따라 평가위원회를 구성(정량평가는 제안서 및 증빙서류를 기반으로 입찰 담당부서에서 평가)

□ 평가분야별 배점

◦ 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하며, 기술ㆍ가격평가 비중은 기술평가(90%) + 입찰가격 평가(10%)임

□ 기술평가

◦ 기술능력평가는 세부항목별로 5등급(A, B, C, D, E)으로 평가하고, 이를 합산하여 제안서별로 점수 산정

◦ 평가등급별 점수

구 분	A	B	C	D	E
점 수	배점의 100%	90%	80%	70%	60%
(예시) 배점 10점	10	9	8	7	6

◦ 정량평가는 유사사업 수행실적, 참여인력의 경력 등에 대해 항목별   정량평가 세부평가기준을 적용

◦ 정성평가는 참여기관수에 따른 등급배분표(참고1)를 이용하여 상대평가

※ PM 대면평가는 제출한 입찰제안서 각 항목에 대해 사업이해도, 수행계획 등에 관한 질의응답을 실시하여 평가위원들이 절대평가함

※ PM 대면평가 항목 중 ‘영어구사능력’ 항목(대면평가 총 10점 중 2점 배정),  PM의 영어 Presentation(별도 PPT 불필요) 실시 후 질의응답으로 진행

입찰제안서 세부평가기준

1) 기술능력평가 세부평가항목 및 배점

구분	평가항목	세부평가항목		배점	비 고
정량 평가	업체의 사업수행 실적	용역수행 건수		4.0	최근 5년간 유사용역 수행 건수
		용역수행 금액		4.0	최근 5년간 유사용역 수행 금액
		해외용역수행 건수		2.0	최근 5년간 해외용역 수행 건수
		소 계		10.0
	참여인력의 경험	사업수행책임자 자격		1.0	기술자등급 평가
		사업수행책임자 경력		2.0	해당분야 업무수행 년수
		사업수행책임자 실적		2.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		참여기술자 경력		5.0	해당분야 업무수행 년수
		참여기술자 실적		5.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		소 계		15.0
	재무구조 및 경영상태	신용평가등급		5.0	신용조회사* 또는 신용평가사**가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음), 또는 기업신용평가등급 *「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호의 업무를 영위하는자 **「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3의 업무를 영위하는 자
	가점	중소기업		(1.0)	중소기업 지분율에 따라 최대 1.0점 가점
		신규 입찰자		(0.5)	EDCF F/S 계약실적이 있되,입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
				(1.0)	입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점
		약자 기업1)	장애인기업 및 사회적기업2)	(0.3)	장애인기업, 장애인고용 우수기업 또는 사회적기업 인증을 받은 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.3점 가점
			여성기업2)	(0.3) (0.5)	존속기간 3년 미만의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.3점 가점 존속기간 3년 이상의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		창업기업1)		(0.5)	창업기업 확인서를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		MDB 유사사업 경험		(1.0)	최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여실적에 따라 최대 1.0점 가점
	감점	EDCF 부정당업자 제재(MDB제재 포함)		(△3.0)	입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자로 제재를 받고 있는 입찰자는 지분율에 따라 최대 3.0점 감점
				(△3.0)	입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF 부정당업자 제재 또는 경고이력이 있는 입찰자는 지분율에 따라 건별 최대 1.0점 감점(최대 3.0점 감점)
		제안서 작성지침 미준수		(△2.0)	입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 건별 0.25점(최대 2.0점) 감점
	가감점	F/S용역평가결과		(4.0~ △4.0)	입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가 결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점
	정량평가3) 소계			30.0

정성 평가 4)	사업내용 및 대상국의 이해	사업내용 이해	2.5	사업의 목적, 범위, 기대효과 등
		사업대상국 이해	2.5	대상국 현황, 관련계획, 대상지역 기능/특성 등
		소 계	5.0
	F/S 수행 계획5)	F/S 실행계획	8.0	F/S 추진전략 및 운영계획, 추진일정, 용역 기본골격
		항목별 조사방법	7.0	분야별 조사계획 및 방법, 타당성분석 방안, 현장조사 방안
		현지 협력사 활용계획	2.0	유사사업 실적 보유 현지 하도급자 활용 계획
		위험요소 분석/대책	3.0	예상 위험요소 분석 및 대응방안
		F/S 관리방안	3.0	보고계획, 사후관리, 보안준수 방안 등
		영문보고서 작성계획	1.0	영문보고서 전문인력 활용계획 및 영문보고서 감수계획
		영문보고서 전문인력	1.0	영문 통번역전문가 자격 및 경력6)
		소 계	25.0
	조직·인력 현황 및 운용 계획7)	인력운용계획	5.0	참여조직도 및 전문가 투입계획
		투입인력의 경험 및 능력	5.0	유사사업 수행경험, 대상국 경험 등
		소 계	10.0
	원조효과성 제고를 위한 독창적 아이디어 및 방안 등		10.0	완공후 사업의 지속가능성 향상방안, 원조의 효과성 제고방안, TOR에 대한 의견/제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적․독창적 제안/과업수행방안, 사업별 특수사항 등
	PM 대면평가	사업이해도	2.0	사업의 목적, 범위, 대상국에 대한 이해 등
		수행역량	2.0	사업 수행역량 등
		위험요소관리능력	2.0	위험요소 대응 역량 등
		창의적 수행계획	2.0	사업 성공을 위해 필요한 독창적 수행계획 등
		영어구사능력	2.0	영어 Presentation 진행
		소 계	10.0
	정성평가 소계		60.0
기술능력평가 합계			90.0
주1) 약자기업 및 창업기업 가점은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 중소기업자간 제한경쟁입찰, 지명경쟁입찰, 또는 「소프트웨어 진흥법」에 따라 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 제한되는 경우에 적용 주2) 약자기업 세부평가 항목은 중복하여 평가할 수 없으며, 그 중 높은 평점 한 가지만 적용 주3) 가산·감점을 포함해 산출된 정량평가 득점은 정량평가 배점한도 30점이하로 제한 주4) 정성평가 항목은 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표(참고1)‘에 따라 상대평가(단, PM 대면평가는 절대평가) 주5) 코로나19 대응방안 내용 포함하여 기술, 출장이 원활하지 않은 관계로 현지업체 활용분야, 방안 상세 기술 주6) 자격 및 경력 요건 : (필수) 통번역대학원 졸업자(수료는 미인정, 학위증 제출), (우대) ①3년 이상 번역업무 경험자, ②유관업무분야(개발협력학, 개발경제학, 국제학, 경영, 경제 등) 전공자, ③영어권 대학 학사 이상 학위소유자 및 원어민, ④개발협력 유관기관 근무 경력자, ⑤개발협력 사업 통번역 경력자 * 상기 필수 자격 요건 미충족시 결격 처리 주7) 사업참여기술자(PM) 및 분야별 책임기술자(분책)의 중복사업참여 및 본 용역 투입계획(투입 및 출장일수) 제안사별 상대평가 포함

2) 항목별 정량평가 기준

① 유사사업 수행실적(10점)

<유사사업 정의>

1) 평가대상 사업 : 입찰공고일자 기준 최근 5년간 국내외 감염병 관리 또는 대응 체계 구축 사업 컨설팅 또는 병원 건립 사업 컨설팅* 실적으로 하기 조건을 만족해야 함

(1) 감염병 관리 또는 대응 체계 구축사업 컨설팅(마스터플랜 및 연구용역 포함)

· 특정 지역(지자체) 또는 국가 단위의 감염병 관리, 대응 또는 방역 체계 구축 컨설팅

· 지자체 또는 정부 단위 질병관리 조직 설립 또는 발전 방안 컨설팅

(2) 병원건립 사업(최소 7개 이상의 진료과목을 갖춘 병원) 컨설팅

- 병원운영 및 의료계획 컨설팅

· 병원운영 : 의료계획을 토대로 한 병원 조직, 인력충원 및 재무(수익과 지출) 계획 포함 실적

· 의료계획 : 진료권 분석을 포함한 진료과 및 병상계획 등의 의료계획 컨설팅 실적

· 질병관련 연구소 건립 계획 : 감염병 등 질병관련 연구소 건립계획으로 연구소 조직, 인력충원 및 재무(수익과 지출) 계획 포함 실적

- 병원의료장비(또는 연구소장비) 컨설팅

· 의료장비 리스트 선정 및 추정 사업비 산정을 위한 장비별 기본 사양서 작성 업무 포함 실적

· 질병관련 연구소 장비 리스트 선정 및 추정 사업비 산정을 위한 장비별 기본 사양서 작성 업무 포함 실적

- 건축계획 컨설팅

· 병원 또는 질병관련 연구소 건립 타당성조사, 기본설계 또는 상세설계 컨설팅 실적

(3) 공통

- 관련 분야의 타당성조사, 기본설계 및 상세설계 등(감염병 관련 사업은 연구용역 및 마스터프랜 포함)으로 한정하며, 설계·감리가 포함된 컨설팅 과업의 경우 설계업무 완료시 실적으로 인정

- 수행중인 용역, 교육훈련, 발전방안, 연구용역, 마스터플랜, 예비타당성조사, 단순 계획·현지조사 등은 제외(단, 유사사업 정의를 만족하는 업무 포함 시 실적 인정)

* 병원 발전방안 또는 마스터플랜 사업에 병원운영계획 또는 의료계획 수립 업무범위가 포함된 경우는 관련 업무가 포함되어 있음을 증명할 수 있는 발주처의 증빙이 있는 경우 실적으로 인정

<평가방법>

1. 공동도급으로 수행한 실적건수는 본건과 동일한 업무분야를 단독으로 수행한 경우 참여지분율에 관계없이 1건으로 인정하며, 계약금액은 참여지분율을 고려하여 평가(단, 공동도급 수행실적에 해당 업무분야 수행을 증빙할 수 있어야 함)

2. 평가대상항목 건수/금액/해외용역건수 평가 결과(점수)를 아래 수식에 따라 합산

- 용역수행건수 및 금액 : 감염병 점수 x 30% + 운영계획 또는 의료계획 점수 × 30% + 건축 점수 × 20% + 의료장비 점수×20%

- 동일한 분야에 복수기업이 공동도급으로 참여하는 경우, 분야 내 지분율(동일분야 참여지분율 합을 100%로 환산)을 실적 건수에 곱하여 합산 후 평가(공동수급 약정서에 명시된 참여사 별 담당 업무범위에 따라 관련 실적 평가)

- 상기 각 분야별 평가 비율은 추정사업비 산정과 무관하며, 공동도급 참여지분율은 각 분야별 투입인력 등 수행계획에 따라 결정되어야 함

3. 병원건립사업 ‘운영계획’, ‘의료계획’ 및 ‘의료장비’ 업무범위가 함께 포함되어 있는 실적은 제안사가 지정한 한 가지 업무범위에 대해서만 인정

4. 실적증명서/기타 증빙서류상 실적 인정 여부를 확인할 수 있는 문구에 하이라이트처리 필수

5. 실적증명서 발급처가 국내 민간기업이거나 이와 유사한 형태의 사업실적일 경우, 실적증명서 발급처와 해당용역 발주기관간의 낙찰확인 증빙서류(용역승인공문, 세금계산서, 계약관련 서류 등)를 실적증명서와 묶어서 제출(미제출시 서류 보완요청 없이 불인정)

(i) 용역수행 건수(컨설팅 실적)

10건이상	10건미만 ~ 7건이상	7건미만 ~ 5건이상	5건미만 ~ 2건이상	2건미만
4.0	3.6	3.2	2.8	2.4

(ii) 용역수행 금액

30억원이상	30억원미만 ~ 25억원이상	25억원미만 ~ 20억원이상	20억원미만 ~ 15억원이상	15억원미만
4.0	3.6	3.2	2.8	2.4

(iii) 해외 용역수행 건수주1」

3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만 ~ 1건이상	1건미만 ~ 0.2건이상	0.2건미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

주1」 준공건수별 참여지분율을 고려한 당해 용역비에 따라 가중치 부여

- 2억원 이상                       : 100%

- 1억원 이상     ～  2억원 미만    :  80%

- 5천만원 이상   ～  1억원 미만    :  60%

- 3천만원 이상   ～  5천만원 미만  :  40%

- 3천만원 미만   ～                :  20%

(예시) 평가항목 산출예시

구 분 (참여분야, 지분율)	유사사업 수행실적(용역수행 건수)				비 고
	감염병 (컨설팅)	운영계획 및 의료계획 (컨설팅)	의료장비 (컨설팅)	건축 (컨설팅)
A사 (감염병, 30%)	9건	-	-	-
B사 (병원운영 및 의료계획, 20%)	-	6건	3건*	-	* 의료장비 분야 미참여 (불인정)
C사 (운영계획 및 의료계획, 10%)	-	8건	-	-
D사 (의료장비, 20%)	-	2건*	4건	-	* 운영계획 분야 미참여 (불인정)
E사 (건축, 20%)	-	-	-	11건
개별 인정건수	9건x[eqn: {30%} over {30%}]=9건	6건x[eqn: {20%} over {20%+10%}]+ 8건x[eqn: {10%} over {20%+10%}]= 6.6건*	4건×[eqn: {20%} over {20%}] = 4건	11건x[eqn: {20%} over {20%}]=11건	* 소수점 둘째자리 이하 절사
개별 점수	3.6	3.2점	2.8점	4점
합산 점수	3.6점x30% + 3.2점×30% + 2.8점×20% + 4점x20% = 3.4점

② 참여인력의 경력 및 유사사업 수행실적(15점)

- 사업수행책임자(5점) 및 참여기술자(10점)의 자격, 해당 분야 경력 및 실적(입찰 공고일 기준 최근 10년간 담당분야 타당성 조사, 기본설계, 실시설계 등 관련 컨설팅 용역수행 건수)에 대한 평가

※ ‘①유사사업 수행실적‘에서 규정한 과업으로 한정하며, 본 사업에 제안된 담당과업과 관련된 실적만 인정

※ 공동도급으로 참여하는 경우 사업수행책임자(PM)는 대표회사에 소속되어야 함

(i) 사업수행책임자(PM) 자격

기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

(ii) 사업수행책임자(PM) 경력

15년이상	15년미만 ~ 13년이상	13년미만 ~ 11년이상	11년미만 ~ 9년이상	9년미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

(iii) 사업수행책임자(PM) 실적

10건이상	10건미만 ~ 7건이상	7건미만 ~ 5건이상	5건미만 ~ 3건이상	3건미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

(iv) 참여기술자 경력(분야별 책임기술자 및 전담기술자)

8년이상	8년미만 ~ 7년이상	7년미만 ~ 5년이상	5년미만 ~ 3년이상	3년미만
5.0	4.5	4.0	3.5	3.0

(v) 참여기술자 실적(분야별 책임기술자 및 전담기술자)

8건이상	8건미만 ~ 7건이상	7건미만 ~ 5건이상	5건미만 ~ 3건이상	3건미만
5.0	4.5	4.0	3.5	3.0

※ 참고사항

1. PM 및 참여기술자는 관련 협회 또는 기관에서 발행한 “경력증명서”에 의해 평가하되, 등록되지 않은 자는 본 제안요청서에 첨부된 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’(“대외경제협력기금 외부전문가 고용기준” (별표 3) 용역대가 지급기준 및 방법)을 참조하여 제안사의 대표이사가 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서 등을 이용하여 평가

- 해당분야 참여실적은 ‘① 유사사업 수행실적’에 정의된 ‘유사사업’에 담당업무 전문분야에 참여한 컨설팅 실적을 의미함

2. 경제/재무분석 및 Safeguard(환경사회) 분야 참여기술자는 본 참여기술자 경력 및 실적 평가에서 제외하며 정성평가 조직·인력 현황 및 운영계획에서 평가

3. 분야별 책임기술자에 대한 평가는 아래 가중치를 적용하여 산출한 결과를 합산(분야별 책임기술자가 아닌 전담기술자는 자격등급별 가중치 미적용)

- 기술사/건축사(100%), 특급기술자(90%), 고급기술자(80%), 중급기술자(70%), 초급기술자(60%), 기타(50%)

* 예) 분책(고급)의 원 경력년수 12년 x 특급(90%) = 10.8년 → 8년 인정

- 참여기술자의 평가는 각 참여자별 건수/경력을 평균하여 계산하며, 1인 최대 8건/8년 초과시 8건/8년으로 인정

4. 일괄입찰 및 대안입찰(대안으로 입찰시)공사, 민간투자사업에 대한 참여 기술자의 실적은 낙찰자에 한하여 인정하되 사업책임기술자(PM)와 분야별 책임기술자(분책)에 한하여, 당해사업 해당 발주청의 확인을 득한 것에 한하여 인정

5. 설계‧시공 일괄입찰 또는 대안입찰방식으로 참여하여 낙찰자로 결정된 경우와 ‘사회기반시설에 대한 민간투자법’에 의한 사업시행자가 발주한 설계용역을 수행한 경우에는 수행실적으로 인정. 단, 일괄입찰 및 대안입찰 방식으로 참여하여 설계보상 대상자로 결정된 경우의 실적은 건수 및 금액에 대하여 80%만 인정

6. 발주처에서 컨설팅 용역을 직접 수행하지 않고 용역을 발주하여 컨설턴트가 업무를 수행하고 감독업무를 수행한 사업은 회사실적에서 제외함. 단, 발주처에서 감독업무를 수행한 경우 해당 건에 사업책임기술자(PM)로 참여하는 경우에 한하여 업무의 유사성을 고려하여 인정하고, 분야별책임기술자 및 전담참여자로 참여하는 경우 감독으로 수행한 업무는 실적으로 인정하지 않음

③ 재무구조 및 경영상태 (5점)

구 분		A등급	B	C	D	E
신용 평가 등급*	회 사 채	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
	기업어음	A2- 이상	A2- 미만 A3- 이상	A3- 미만 B0 이상	B-	C 이하
	기업신용평가	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
등급별 배점		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
*「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3에 의해 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음) 또는 기업신용평가 등급 - 공동수급의 경우 각 구성원별로 신용평가등급에 해당되는 점수에 참여비율을 곱하여 합산

3) PM 대면평가 기준

구 분	A등급 (최우수)	B등급 (우수)	C등급 (보통)	D등급 (미흡)	E등급 (부족)
사업이해도	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
수행역량	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
위험요소관리능력	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
창의적 수행계획	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
영어구사능력	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
계	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

◦ PM 대면평가는 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표’ 적용하지 않고 절대평가함

◦ PM 대면평가는 제출된 제안서에 대한 평가위원들의 질문으로 진행

- 영어구사능력 평가는 PM의 영어 Presentation 실시 후 평가위원들의 제출된 제안서에 대한 질의응답으로 진행 (별도 PPT자료 불필요)

◦ PM 대면평가 일정은 제안서 마감 후 개별 통보 예정

◦ PM 부재시, 당행이 인정하는 불가피한 사유*에 해당하지 않는 경우, PM 이외 대리인 참석시 해당 평가항목은 최저등급을 적용하며, 평가 불참시에는 0점으로 처리

* 사망, 천재지변 등(출장, 휴가 등의 사유는 불인정)

◦ PM대면평가시 코로나 사태 대응방안에 대한 평가 준비

4) 가산·감점 부여기준

◦ (가감점 일반) 가점감점을 포함한 정량평가 점수는 배점한도(30점)를 초과하지 아니함

◦ (중소기업 가점) 중소기업* 참여비율에 따라 최대 1.0점 가산점 부여(정량평가)

평가항목	가산점 계산방법	비고
중소기업 참여비율	가산점 = 1.0(점) × [eqn: {중소기업``참여비율(%)} over {100(%)}]

*「중소기업기본법」에서 정의하는 중소기업을 의미함.

◦ (신규 입찰자 가점)

i) EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점 부여

미수주자 가점 = 0.5(점) ×  [eqn: {미수주자``지분율(%)} over {100(%)}]

ii) 입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여

신규입찰자 가점 = 1.0(점) × [eqn: {신규``입찰자``지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (장애인기업 및 사회적기업 가점) 장애인기업*, 장애인고용 우수기업** 또는 사회적기업*** 인증을 받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.3점

* 장애인기업활동 촉진법에서 정한 기업으로서, 중소벤처기업부 장관(위임받은 자를 포함)에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

** 장애인고용촉진 및 직업재활법 제24조에 따른 장애인고용 우수사업주로 해당부처에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

*** 고용노동부장관(또는 위임 받은 자)으로부터 사회적기업 인증을 받은 기업

장애인·사회적기업 가점  = 0.3(점) ×[eqn: {장애인````또는````사회적기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (여성기업 가점) 존속기간*이 확인되는 여성기업**의 지분율에 따라 최대 0.3점(존속기간 3년 미만) 혹은 0.5점(존속기간 3년 이상)

*  법인인 경우 법인등기부등본, 개인사업자인 경우 사업자등록증상 여성대표자로서 그 유지기간(연속되어 있어야함)을 확인하여 평가

**「여성기업 지원에 관한 법률」및 같은 법 시행령에 따라 중소벤처기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘여성기업 확인서’를 발급받은 기업으로서(중소기업제품 공공구매종합 정보망에 등재된 자료로 확인), 그 존속기간을 확인할 수 있는 기업

(i) 존속기간 3년 미만 여성기업 가점 = 0.3(점) × [eqn: {여성기업`지분율(%)} over {100(%)}]

(ii) 존속기간 3년 이상 여성기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {여성기업`지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (창업기업 가점) 창업기업* 확인서**를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점

*「중소기업 창업 지원법령」제9조의 4(창업기업의 확인 등) 및 동 시행령 8조의 5에 따라 중소벤처기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘창업기업 확인서’를 발급받은 기업

** 확인서는 입찰공고일 기준 유효해야 하며, 유효기간이 정해지지 아니한 경우 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내 확인받은 것에 한함. (단, 사후관리 등을 통하여 유효기간이 연장되는 경우 그 기간까지를 유효기간에 포함)

창업기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {창업기업`지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (MDB 유사사업 경험 가점) 최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여 건수에 따라 최대 1.0점 가점 부여

MDB 유사사업 경험 가점 = PM의 MDB 유사사업 참여실적에 따른 구간별 가점

참여사업 건수	점수
5건 이상	1.0점
4.0건 이상 5.0건 미만	0.8점
3.0건 이상 4.0건 미만	0.6점
2.0건 이상 3.0건 미만	0.4점
1.0건 이상 2.0건 미만	0.2점

◦ (EDCF 부정당업자 제재 감점)

i) 입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자*로 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross debarment)를 받고 있는 입찰자는 그 지분율에 따라 최대 3.0점 감점

* EDCF 부정당업자 제재기준이 정하는 부패 또는 부정행위에 관여했다고 인정되는 기업, 기관, 단체를 의미

EDCF 부정당업자 제재 감점 = 3.0(점) × [eqn: {부정``당업자````지분율(%)} over {100(%)}]

ii) EDCF 부정당업자 제재기간이 경과했으나, 입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF 부정당업자 제재(제재기간 종료일 기준) 또는 경고 이력이 있는 입찰자, ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 및 ‘공기업·준정부기관 계약 사무규칙’에 의해 입찰 참가자격이 제한받은 이력이 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받은 이력이 있는 입찰자는 그 지분율에 따라 건별 최대 1.0점 감점 (최대 3.0점 감점)

EDCF 부정당업자 제재이력 등 감점 = Σ 건별 1.0(점) × [eqn: {부정당업자```등```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (제안서 작성지침 미준수 감점) 입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 최대 2점 감점(서식 21 ‘제안서 작성지침 위반사항(예시)’ 건별 0.25점, 기타의 경우 0.1점 감점)

◦ (F/S 용역 평가결과 가감점) 입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가*결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점

* 재평가를 포함하며 재평가시 기존평가 결과는 제외

F/S 용역 평가결과 가감점 = Σ 입찰자별 가감점 × [eqn: {입찰자별`지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (가감점 일반) 가점·감점을 포함한 정량평가 점수는 정량평가 배점한도(30점) 이내로 제한

5) 가격평가 기준

◦ 입찰가격평가는 계약예규(협상에 의한 계약체결 기준)상 입찰가격 평점산식을 이용하여 평가

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점 = 입찰가격평가 ~배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]
[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격}over {추정가격의 80%상당가격-추정가격의 60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의
100분의 60 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* Software 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점
다섯째자리에서 반올림함

협상대상자 선정 및 협상 절차

협상대상자 선정

제안요청서에 부합하는 제안서를 제출한 제안자의 기술능력 평가점수(90점) 기준으로 85% 이상 득점한 업체를 협상적격자로 선정하고, 협상적격자 중 기술과 가격의 합산점수가 가장 높은 순으로 협상에 의하여 선정

※ 기술능력 평가점수 76.5점(90점의 85%)미만의 업체는 가격평가 대상에서 제외

* 기획재정부 계약예규 제538호(‘협상에 의한 계약체결기준’, ’20. 12. 28. 일부 개정) 제9조에 따라 협상적격자 앞 서면 통보

합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 함

협상대상자 중 기술‧가격의 종합평점이 가장 높은 자를 우선협상대상자로 지정하여 협상하고 결렬 시 차순위와 협상

협상절차

협상은 당행이 정하는 절차와 일정에 따라 진행됨

협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상기간 내에 협상대상자와 협상이 성립된 경우 최종낙찰자로 선정하고 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함

협상은 기술조건 합의 및 당행이 요구하는 사항에 근거하여 진행

협상 중 당행이 어떠한 자료를 요구하더라도, 제안자는 당행의 자료 요구에 성실히 응해야 하며, 만약 제안자가 정당한 사유 없이 동 요구 자료를 제출하지 못하거나 제출을 거부하는 경우 당행은 동 제안자를 협상대상에서 제외할 수 있음

협상대상자가 협상에 불성실하게 임하거나 협상을 고의로 지연시키는 등 문제가 있다고 판단될 경우 당행은 협상이 결렬된 것으로 간주

협상이 성립되지 않을시 차 순위 협상적격자와 협상을 실시

모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음

협상내용과 범위

협상대상자가 제안한 사업추진 계획 및 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 본 입찰제안서에 명시되지 않은 사항이 주요 현안이 되는 경우 상호협의에 의하여 결정

가격협상 기준 가격은 당행 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 하되, 기술협상에서 제안내용의 가감조정이 있는 경우 제안가격을 가감 조정할 수 있음

최종낙찰자 유의사항

□ 당행은 다음의 과업수행 내용을 수시로 확인할 권한을 가지며, 과업수행업체는 이에 적극 협조하여야 함

◦ 인력투입현황, 과업수행현황 및 기타 확인이 필요한 사항

□ 중요 결정사항이 있을 경우에는 수시로 당행과 협의하여 보고회를 실시하여야 하며, 당행의 요구를 충분히 반영하여야 함

□ 계약 체결 후 7일 이내에 보안각서 및 기타 필요한 서류를 첨부한 “과업수행계획서(Inception Report)”를 작성하여 발주자의 승인을 받은 후 과업에 착수하여야 함

□ 용역업체는「엔지니어링 진흥법」에 의거, 과업수행에 필요한 손해배상보험(공제)에 가입하고 관련서류를 당행에 제출하여야 함.

□ 용역업체는「인지세법」에 의거, 계약서 작성에 따른 수입인지를 당행에 제출하여야 함.

□ 용역업체는 당행의 요청시 용역 추진내용을 보고하며 각 과업성과물에 대한 보고회를 실시하며, 최종보고는 용역완료 전에 실시하여야 함

□ 하자보증기간(완료 후 12개월) 중 본 용역과 관련된 사항에 대하여 재검토와 보완이 필요한 경우 비용청구 없이 즉시 시정 조치하여야 하며 보완 결과를 서면으로 제출하여야 함

□ 용역수행 중 용역업체의 귀책사유로 발생한 모든 문제에 대한 책임은 용역업체에 있으며, 당행이 입은 손해에 대하여 배상하여야 함

□ 본 용역수행 중 투입인력은 교체할 수 없는 것을 원칙으로 하되 퇴직, 질병 등 부득이한 사유발생 시에는 당행과 협의하여 승인을 득한후 동급 상당의 인력으로 교체하여야 함

□ 과업수행으로 인하여 취득 및 생산된 각종 조사자료와 일체의 산출물은 당행의 소유이며, 당행의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업이외의 목적에 사용할 수 없음

기타사항

□ 중소기업이 입찰에 참여한 경우 중소벤처기업부에서 발급한 ‘중소기업 확인서(공공기관 입찰확인용)’ 사본을 제출할 것

□ 장애인기업, 장애인고용 우수기업, 사회적기업 인증은 관계기관이 발급한 확인서, 인증서 등 공적 서류 사본을 제출할 것

□ 제안서 평가에 있어서 불명확한 부분이 있거나 보완설명이 필요한 경우 제안서 설명을 요청할 수 있으며 해당기관은 이에 응하여야 함

□ 제출된 제안서 및 관련서류 일체는 반환되지 않으며 제안요청서, 입찰유의사항 등을 숙지한 후 입찰에 참여할 것

□ 필요한 경우 당행은 제안서 제출 마감 전까지 입찰과 관련된 내용에 대하여 수정‧변경할 수 있음.

10. 용역결과 평가/활용

□ 용역완료 후 1개월 이내, 내부기준에 따라 용역 참여인력·보고서 품질·용역관리 등에 대한 평가가 이뤄지며, 동 평가결과가 후속 EDCF F/S 입찰평가시 가감점에 반영 됨.

□ 공동도급의 경우, 공동평가 예정

<평가점수별 가감점 매칭>

평가점수	가감점
-100점 이상 ~ -76점 이하	-2점
-76점 초과 ~ -52점 이하	-1.5점
-52점 초과 ~ -28점 이하	-1점
-28점 초과 ~ -4점 이하	-0.5점
-4점 초과 ~ +20점 이하	0점
+20점 초과 ~ +43점 이하	+0.5점
+43점 초과 ~ +66점 이하	+1점
+66점 초과 ~ +89점 이하	+1.5점
+89점 초과 ~ +112점 이하	+2점

대항목	중항목	소항목	가중치
인력평가 (20개 항목, 45점 배점)	PM (PM:OOO)	인력투입계획 준수	2
		각종 회의 참석 여부/진행능력	2
		해당분야 전문성/사업 이해도	2
		사업실시기관과의 협력	2
		당행 담당직원과의 협력	2
		F/S 방향(사업계획) 수립시 역할	2
		F/S 참여인력 관리/공동수행사 조율능력	2
		각종 보고서 검토 및 작성 능력	2
		커뮤니케이션/외국어능력	3
	Key Staff	인력투입계획 준수	2
		각종 회의 참석 여부	2
		해당분야 전문성/사업 이해도	3
		담당분야별 사업기본계획 적정성	3
		보고서 작성 및 검수 능력	3
		커뮤니케이션/외국어능력	2
	상주인력	상주인력 선임 및 활용정도	3
		현지활동 및 각종 자료조사 충실도	2
		사업실시기관과의 협력체계	2
		EDCF 현장사무소와의 협력 체계	2
		커뮤니케이션/외국어능력	2
보고서평가 (12개 항목, 35점 배점)	사업수행계획서	사업수행계획서(착수보고서) 적정성	2
	중간보고서	보고서 구성의 적정성	3
		가독성/수정보완 필요성	3
		영문보고서 품질	3
	최종보고서 (초안포함)	보고서 구성의 적정성	3
		가독성/수정보완 필요성	3
		영문보고서 품질	3
		당행의 요구사항 반영	3
		사업실시기관의 요구사항 반영	3
	사업비 산출내역	사업비 구성 내역의 적정성	4
		단가조사 방법의 적정성	3
	출장결과보고서	출장결과보고 적정성	2
관리현황평가 (10개 항목, 20점 배점)	일정관리	사업수행일정	2
		출장일정	2
		회의 개최 일정	2
		보고서 제출 일정	2
	신청행위 적정성	승인요청/신청행위 적정성	2
	리스크관리	리스크 대응체계	2
		리스크 해결 방안의 적정성	2
		사회적 물의	2
		안전관리	2
		정보보호	2
과업난이도평가 (3개 항목, 9점 배점)	(추가 가점)	수원국 FS 이견	3
		수원국 자료 비협조	3
		기타 어려움	3
심사수행 협조	(추가 가점)	EDCF 심사수행 협조도 (해당시)	3
합 계			112
평가 의견 :
주1. 비평가 항목 또는 정보가 없는 항목은 보통으로 평가 - 각 항목별로 5단계로 구분하여 평가 실시(우수[+100%], 양호[+50%], 보통[0%], 다소미흡[-50%], 미흡[-100%]) 주2. PM이 없는 참여사를 개별평가시 동 참여사의 leading staff을 PM으로 간주하여 평가

Ⅲ. 대상사업 개요 및 과업범위

1. 당행 발주 F/S 추진배경 및 목적

□ 대외경제협력기금(EDCF)으로 지원 대상사업에 대한 EDCF 주도의 사업 발굴을 통한 사업 진행과정에 투명성 및 공정성 제고

□ 지원 요청사업에 대한 사업타당성조사 및 개념설계(또는 기본설계) 도출을 통한 원활한 사업추진 도모

※ EDCF F/S 현장성 강화 등의 내실화를 위해 아국 컨설턴트의 현지 상주 의무화, 현지 컨설팅 업체(또는 컨설턴트) 고용을 통한 현지조사 강화, 보고서 내용에 대한 외부전문가 검토 실시 등을 시행

2. 본 사업 추진 배경

□ 캄보디아는 경제 성장과 더불어 유아‧임산부 사망률이 감소하고 기대수명이 늘어나는 등 보건 지표가 상당 부분 개선되었으나, 여전히 보건·의료 인프라 및 인력이 부족하여 감염병 대응 역량은 미흡한 상황임.

◦ WHO의 ‘16년 IHR 보건역량 외부평가(Joint External Evaluation) 결과 공중보건 긴급상황 및 신종 전염병에 대한 탐지‧예방‧대응 관련 기술적 역량이 기준에 미달하였으며, 관련 예산, 전문 인력, 부처간 협력, 모니터링‧평가체계 또한 부족한 것으로 평가됨.

□ ’20. 1월 코로나19 최초 확진자 발생 후, 캄보디아 정부는 ‘코로나19 대응 및 예방을 위한 국가행동계획’을 수립하고 역학조사 체계를 정비하는 등 다양한 대응조치를 시행 중이나, 바이러스 통제에 어려움을 겪고 있음.

□ 이에 전염병 초기 대응 핵심 역량과 글로벌 팬데믹에 대응할 수 있는 전국적 시스템을 갖춘 기관 설립 필요성이 부각되었으며, 캄보디아 정부는 질병통제예방센터 설립을 위해 본건 F/S 지원을 요청함.

3. 사업개요

□ 사업목적

◦ 전염병 발생시 효과적으로 통제‧대응할 수 있는 인프라 구축 및 역량 개발

◦ 감염병 전문 병원시설 및 관련 의료기자재 보완을 통한 의료서비스 품질 개선

□ 사업범위

◦ 질병통제예방센터 건립

- 감염병 대응을 위한 국가 공중보건관리 정책‧법규의 수립, 이행, 모니터링 및 역학조사 등을 수행하는 질병관리본부

- 감염병 연구 및 진단을 위한 장비 및 ICT시스템을 갖춘 현대식 연구시설

- 음압격리병실 포함 100병상 규모의 감염병 전문병원

- 역학조사관 등 관련 인력 양성을 위한 교육훈련센터(부대시설 포함)

◦ 관련 의료기자재 도입 및 ICT시스템 구축

◦ 감염병 조사·연구역량 강화 프로그램 운영 등

빌딩		기능	면적(㎡)	층
1	질병관리본부	행정실, 국제협력실, EOC센터, IT 서버실 및 각종 운영	50 x 20	4
2	연구실	EID연구실, 수인성 식품매개질환 연구실, CBRN 연구실, 회의실 등	50 x 20	4
3	병원	음압격리병동 50병상, IPD 50병상, ICU, 수술실 등	50 x 20	6
4	교육훈련센터	FETP 감염병대응 실무자 교육, 연구 훈련, 데이터관리 교육 등	40 x 20	2
	기숙사	생활관 50호실, 구내식당, 체력단련시설 등	30 x 20	3
	창고	비상용품 보관을 위한 대공간	50 x 30	1

※ 사업범위는 F/S 수행과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변경 가능

□ 사업실시기관 : 캄보디아 보건부 (Ministry of Health)

□ 사업실시지역

◦ 프놈펜 시내 북쪽에 10헥타르 규모의 정부 소유 부지 확보

□ 추정사업비(예상) : U$87백만불 (차관신청 예상금액 U$79백만불)

※ 추정사업비는 F/S 수행과정에서 현지조사 결과, 수원국 및 당행과의 협의 등에 따라 변경 가능

4. F/S 과업범위

[Part A] 추진배경 및 기대효과

□ 사업추진배경 및 필요성 검토

◦ 사업추진배경 및 필요성

- 사업관련 현황, 문제점, 수요 분석

- 사업 추진의 정책 또는 법률적 근거

- 사업 추진을 위한 준비 현황

□ 사업 목적

◦ 성과프레임워크 Goal과 연계되는 사업 목적 제시

□ 사업지원시 기대효과 분석

◦ 사업지원시 기대효과 등

- 국가적 측면

- 사업지역적 측면

[Part B] 현황 조사

□ 수원국 일반현황 조사

◦ 수원국 일반현황(국가 인구, 경제 등 사회경제 지표 조사)

◦ 수원국 사업지역별 현황(인구, 경제 등 사회경제 지표 조사)

◦ 국가·사업지역 산업화, 개발계획 현황

- 사업추진을 위한 정책 및 사업계획, 사업수행 조직 구성, 재원 배분, 수원국 작성 각종 계획서 등 검토

□ 보건분야 일반현황 조사

◦ 의료․보건복지 분야 정책, 개발계획 및 관련 예산

- 공공 및 민간병원 확충, 외국인 병원 도입 등 관련 정책/법률 포함

◦ 수원국 연도별(최근 3년) 보건분야 예산규모 및 사용현황 분석

- 예산 확대 가능성 검토

◦ 국가 및 지역별 보건지표(주요질환, 사망원인, SDGs 관련 통계 등)

- 질환들에 대한 주요통계, 질병별 통계, 성별/연령별 통계 포함

◦ 국가 의료체계 분석

- 의료 전달 체계 및 시스템

- 병원(특수질환 전문병원, 3차/2차/1차 병원 등) 현황

◦ 의료인력(의사, 간호사, 의료기사 등) 현황, 교육 및 수급 체계

- 의료인력 교육프로그램, 체계, 시설, 의료인력 배출 현황 등

- 의료인력 교육기관(대학 등) 학생 모집현황, 학년별 학생수, 최근 3년 졸업후 병원 취업 현황

- 의료인력 배치 또는 고용 관련 법/규정 등

- 의료인력(의사, 간호사, 의료기사 등) 공급 및 수급 체계

- 의료인력(의사, 간호사, 의료기사 등) 현황

- 주요 병원 의료인력 의술 및 관련 업무 숙련도 수준 및 재교육 실시 현황

- 의료인력 급여 체계

◦ 의료비 지급 체계

- 의료보험 현황, 의료비 지급 체계(공공, 민간병원, 의료보험 현황 등 포함)

◦ 국가 보건분야 주요 ODA Donor 및 NGO 현황

- 주요 ODA Donor 및 NGO 활동 현황

□ 질병예방통제 관련 현황 조사

◦ 질병 예방통제 관련 정책

◦ 질병 예방통제 관련 법·제도 및 규정 등

◦ 수원국 질병 예방통제 관련 계획, 추진 사업 및 관련 예산

- 추진 사업 관련 조직 및 인력, 재원, 진행 현황 등

◦ 질병 예방통제 관련 관리 조직 및 체계

- 중앙정부 및 지역별 질병 관리 조직 및 인력(행정, 역학, 의료 등 구분) 현황

- 질병 관리 체계(중앙정부-지방정부-행정구역-개인 간 지휘, 통제, 전파, 통계관리 등) 및 관련 시스템

- 역학조사 및 관리 체계(조직, 인력, 관련 시스템 등)

◦ 감염병 병원 현황(수도, 지방, 소규모 행정구역 구분)

- 기능 및 규모(총병상수 및 감염병 전용 병상수(음압병실 구분)) 등

◦ 질병 관련 연구소 현황

- 기능, 규모 및 주요 연구항목 등

◦ 질병 관리 및 대응 매뉴얼/업무절차 등 분석

◦ Covid-19 대응 현황 조사

- 관련 기관, 기관별 담당 조직 및 인력

- 관련 의료기관

- 진단/방역/치료를 위한 시설 및 장비, 투입인력 현황

- 진단 및 방역 등과 관련된 진단 시약, 약품, 방역 용품 등 조달 현황

- Covid-19 검사, 환자, 사망자 현황 등 현황

- Covid-19 대응 국제사회 응급 지원 현황

◦ 백신 공급 체계 및 현황(주요 질병 별 구분)

- 백신 수급 관련 정부 예산(최근 3년)

- 최근 3년 정부 백신 수급 현황(정부 구매 및 타 기관 지원 등 포함) 및 향후 계획

- 백신 공급(수입자-중앙정부-지방정부-행정구역 별), 보관, 접종 및 통계관리 체계

◦ 감염병 관련 검사 시설 현황(주요 감염병 별 구분)

- 전국 검사실 관리 체계, 운영 방식 및 매뉴얼, 질 관리 현황

- 검사 전문 인력 및 훈련 현황, 유지보수 인력 및 활동 현황

- 검사 장비 종류 (최근 Covid-19로 기증된 장비 포함), 인증 여부

- 검사 장비 Spare Part/Consumable 조달/운영/관리 현황

◦ 감염병 관련 전문인력 교육 및 배출 현황

- 감염병 관련 의료인력 (역학조사관 등) 양성 교육프로그램(재교육 포함), 체계, 시설, 배출 현황 등

- 관련 인력 양성 및 고용 관련 법/규정 등

- 관련 인력 공급 및 수급 체계

◦ 질병 통제예방을 위한 ICT System 구축, 운영 및 유지보수 현황

- 구축된 System 현황

· 구축사업 개요(사업실시조직, 재원 출처, 컨설턴트, 계약자, 계약금액, S/W 개발사 등)

· 공급 설치된 H/W 및 S/W 현황(모델명, 공급시기, 주요 사양 등)

- 운영 및 유지보수 현황

· 운영 및 유지보수 조직

· 운영 및 유지보수 인력의 운영 및 유지보수 능력

- Spare Part/Consumable 조달/운영/관리 현황

- 유지보수를 위한 H/W & S/W 공급사/개발사/Local 전문 기업 등과의 협업 체계 및 계약 현황(Post-Warranty 포함)

- 주요 전산자원 Manual 관리 및 이용 현황

◦ 주요 Donor 및 NGO 질병통제예방 관련 지원현황(최근 5년) 및 향후 지원계획(백신 공급 및 접종 사업 포함)

- 지원기관, 사업별 규모, 사업명, 사업비, 사업내용, 사업수행조직, 컨설턴트, 계약자, 사업진행 현황 등

- 지원사업 외 주요 공여국 및 NGO가 운영하는 질병통제예방 관련 연구소(e.g. 파스퇴르 연구소)에 대한 조사 포함

□ 주요 감염병 전문 의료기관 현황 조사 (수도 및 주요 지방 병원)

◦ 건축

- 건축현황(준공일, 공법, 주요 특징 등), 규모, 주요시설 현황, 전기·상하수도 Infra 구축 및 운영 현황, 폐수 및 폐기물 처리 시설(처리 방법) 현황

- 총병상수, 감염병 전용 병상(음압병실 구분) 현황

- 건축 및 주요 설비 유지보수 현황(의료설비, 부대시설 등 포함)

◦ 병원운영 및 의료계획

- 병원조직체계, 진료과 분석, 의료인력 현황(최근 3년 의료인력 수급 현황 포함)

- 병원운영(인사, 행정 등) 체계 및 현황

- 감염병 전문 의료인력 의술 및 관련 업무 숙력도 수준 및 교육현황

- 의료, 행정 및 의료기사 등 자체 또는 정부 주체 (재)교육훈련 현황

- 자체 교육훈련 프로그램(교육훈련 시설 및 장비 등) 및 운영 현황

- inpatient/outpatient, 주요 질환, 수술 건수, 주요사망원인 등

- 감염병 진단 및 치료 현황

- 감염병동 및 음압병실 운영 현황

- 의료수가 체계, 최근 3년 재무(지출 및 수입) 및 정부재원 지원 현황

- 의약품(백신 & 치료제 포함) 및 의료소모품 수급 현황

◦ 의료장비

- 의료장비 보유(제조사, 사양, 활용 현황, 유지보수, 의약품 수급 현황 등) 및 주요장비 운영 현황

- 음압병상 시설, 장비 및 유지보수 현황

- 의료장비 운영 및 유지보수 조직 및 인력(기술 수준 포함) 현황

- 의료장비 구입 및 유지보수 현황(최근 3년)

- Spare Part/Consumable 조달/운영/관리 현황

- 유지보수를 위한 의료장비 제조사/공급사/Local 전문 기업 등과의 협업 체계 및 계약 현황(Post-Warranty 포함)

- 주요 의료장비 Manual 관리 및 이용 현황

◦ 병원정보시스템(HIS)

- 병원별 컴퓨터 등 전산시스템 운영 현황 및 의료인력의 전산시스템 활용 능력

- 의료정보 처리 주요 절차 및 정보 저장 현황

- 데이터 네트워크(인터넷) 연결 및 이용 현황

- HIS 구축 병원 현황(전산실, H/W 및 S/W 등 포함)

- Spare Part/Consumable 조달/운영/관리 현황

- 유지보수를 위한 HIS장비 개발사/공급사/Local 전문 기업 등과의 협업 체계 및 계약 현황(Post-Warranty 포함)

- 주요 전산자원 Manual 관리 및 이용 현황

□ 질병 관련 연구소 및 센터 현황 조사 (국립센터 포함)

e.g. CNM(National Center for Parasitology Entomology and Malaria Control), NCHADS(National Center for HIV/AIDS Dermatology and STD)

◦ 건축

- 건축현황(준공일, 공법, 주요 특징 등), 규모, 주요시설 현황, 전기·상하수도 Infra 구축 및 운영 현황 등

- 건축 및 주요 설비 유지보수 현황(의료설비, 부대시설 등 포함)

◦ 연구소 기능 및 운영 현황

- 연구소 조직체계, 주요 연구 내용, 연구인력 현황(최근 3년 연구인력 수급 현황 포함)

- 연구소 운영(인사, 행정 등) 체계 및 현황

- 연구인력 관련 업무 숙력도 수준 및 교육현황

- 자체 교육훈련 프로그램(교육훈련 시설 및 장비 등) 및 운영 현황

- 주요 연구 현황

- 최근 3년 재무(지출 및 수입) 및 정부재원 지원 현황

- 연구용 각종 시약, 소모품 등 수급 현황

◦ 연구용 장비

- 연구용장비 보유(제조사, 사양, 활용 현황, 유지보수, 시약 등 수급 현황 등) 및 주요장비 운영 현황

- 연구용장비 운영 및 유지보수 조직 및 인력(기술 수준 포함) 현황

- 연구용장비 구입 및 유지보수 현황(최근 3년)

- Spare Part/Consumable 조달/운영/관리 현황

- 유지보수를 위한 장비 제조사/공급사/Local 전문 기업 등과의 협업 체계 및 계약 현황(Post-Warranty 포함)

- 주요 연구용장비 Manual 관리 및 이용 현황

◦ 연구소 정보시스템

- 연구소별 컴퓨터 등 전산시스템 운영 현황 및 연구인력의 전산시스템 활용 능력

- 연구 정보 처리 주요 절차 및 정보 저장 현황

- 데이터 네트워크(인터넷) 연결 및 이용 현황

- 연구소 ICT system 구축 현황(전산실, H/W 및 S/W 등 포함)

- Spare Part/Consumable 조달/운영/관리 현황

- 유지보수를 위한 관련 시스템 개발사/공급사/Local 전문 기업 등과의 협업 체계 및 계약 현황(Post-Warranty 포함)

- 주요 전산자원 Manual 관리 및 이용 현황

□ 관련분야 현황 및 주요가격 등 조사

◦ 건축

- 수원국 건축 설계 기준(Code)

- 건축 설계/시공/준공 관련 인허가 관련 법/제도, 절차, 인허가 기관, 각 단계별 소요 시간 등

- 수원국 건축설계사 및 건설사 현황(조직 및 인력, 병원건설 관련 주요 실적, 사업수행 능력

- 외국기업 진출 현황

- 주요 설비/기자재 생산/수입 현황

- 실적공사비 산정을 위한 자료 조사

- 건축 관련 인력현황, 인건비 및 주요 설비/기자재 가격, 운송비 등

◦ 질병통제예방센터/병원/연구소/교육훈련센터 장비 등

- 관련 장비 수입 및 등록 인허가 절차(관련 법/규정, 관련 조직, 절차, 소요시간, 비용, 필요조건 등)

- 주요장비 생산자, 공급자(대리점 등) 현황(최근 3년 공급 현황 포함)

- 의료 및 연구용 장비 설치 및 유지보수를 전문 기업, 인력, 기술력 현황

- 주요 장비 Spare Part/소모품/시약 공급 관련 기업 현황

- 의료장비 설치 인력 인건비,  주요 장비 가격, 운송비 등

◦ 의료/병원/질병 통제예방 관련 ICT 시스템

- 의료 및 병원정보화 관련 법제도

- 의료 및 병원정보화 관련 사업추진 정책, 추진계획 및 관련 예산 등

- 관련 H/W & S/W 수입 및 등록 인허가 절차(관련 법/규정, 관련 조직, 절차, 소요기간, 비용, 필요조건 등)

- 의료 및 병원정보 H/W & S/W 공급자(대리점 등) 현황(최근 3년 공급 현황)

- S/W 개발사 및 개발자 현황(HIS 및 타 S/W 구분)

- 의료 및 병원정보 H/W & S/W 가격, 개발비용, 관련 인건비, 운송비 등

- 주요 장비 Spare Part/소모품 공급 관련 기업 현황

- 주용 장비 설치, 운영 및 유지보수 전문기업, 인력, 기술력 현황

- 주요 Software 및 Hardware Local 생산, 공급 및 개발사

□ 사업실시기관 현황 및 사업수행체계

◦ 사업실시기관 개요

◦ 사업실시기관의 사업수행능력 검토

- 기수행 사업현황 및 소속 인력들의 사업 수행능력 검토

◦ 사업실시기관의 사업관리 역량

◦ 사업실시기관(PEA) 조직 및 인력현황(조직도 포함)

◦ 본건사업을 위한 사업실시조직(PMU or PIU) 구성 현황 분석 및 사업실시조직 구성 방안(지역별 조직, 인력 및 각 인력별 책임과 권한 정의)

◦ 사업추진 준비상태 : 법적․행정적 내부승인절차 완료 여부, 사업시행을 위한 필요한 조치 및 완료여부, 현재까지 진행상황

◦ 사업수행체계 및 관련 부처 등과의 협력체계 등

◦ ODA 사업 추진 및 승인 절차(Loan 도입, 입찰, 계약 절차 및 관련 부처)

□ 기수행 유사사업 분석(Lessons Learned from Previous similar projects)

◦ 수원국 또는 타 개발도상국 및 국내 기완공 또는 건립 중인 유사사업의 계획, 사업자선정, 공사 및 운영단계까지 진행현황 및 문제점 분석을 통한 교훈 도출

◦ 기수행 유사사업 교훈으로부터의 사전 관리계획 수립

◦ 수원국 자체 타당성조사 보고서 등 본건 기존 분석자료 검토를 통한 사업수행방안 도출

□ 사업대상지역 및 부지 현황 조사

◦ 사업대상지역 분석

- 사업대상지역 분석(경제, 인구 등)

◦ 질병통제예방센터(병원, 연구소, 교육훈련 센터 포함) 위치의 적정성(접근성, 방역체계, 감염병원들과의 연계 등 검토)

◦ 부지 변경 필요성 검토

- Khan Preaek Pnov 내 호수 매립후 부지로 활용 -> 매립이 필요 없는 부지

· 매립으로 인한 사업지연, 접근성, 필요 인프라 구축 비용 등

* 부지변경이 불가능한 경우 매립공사를 위한 계획설계, 사업비산정, 사업계획 수립 등은 별도 F/S로 발주 예정

◦ (부지변경이 안될 경우) 부지로 지정된 매립지 현황 조사

- 사업부지로 지정된 Khan Preaek Pnov 내 호수 개발계획

· 타 사업부지로 할당된 호수 매립 계획

· 매립공사위한 설계 또는 공사 진행시 관련 사업 정보(컨설턴트 : 계약금액, 컨설턴트명, 설계 기간, 매립공사 : 계약자, 계약금액, 매립기간 등)

· 매립공사위한 설계 또는 공사 가능 기업

- 캄보디아내 타 호수 매립 및 개발 현황

· 해당 호수 매립계획

· 매립공사 설계 및 공사 현황(컨설턴트 : 계약금액, 컨설턴트명, 설계 기간, 매립공사 : 계약자, 계약금액, 매립기간 등)

· 매립지 개발 현황

◦ (부지변경의 경우) 부지현황조사(자연재해 현황, 지질조사, 지장물 확인 등)

- 부지 지질조사(제안요청서에 지질조사 방법 및 절차 제시 필요)

- 질병통제예방센터 건립을 위한 인프라(전력, 도로, 상하수도, ICT 등) 현황 조사

- 주민이주, 환경영향평가 필요성 등

· 예상 환경영향(소음, 진동 등) 및 해당국 환경사회영향 관계법령 등

· 토지수용, 이주 체계 및 보상비용, 부지 내 시설물 등 이주계획

· 토지수용 넓이, 예상이주가옥 수(토지소유자 조사)

□ 본건 사업진행시 부과, 면제되는 세금, 제세공과금 등 규정

◦ 과세항목(비면세 항목) 조사 및 부과세금 산정

◦ 면세, 대납, 환급 항목 조사

◦ 수원국 세금체계(VAT, Tariff, Income Tax, Withholding Tax 등) 분석

- 외국기업 현지 공사시 적용되는 세금 관련 법․제도 분석 포함

[Part C] 타국가 질병통제예방센터 사례 분석

□ 선진국 사례 분석

◦ 설립계획

◦ 설립 및 운영 연역

◦ HQ 기능 및 조직

◦ 질병통제 관련 주요 법·제도 재·개정 현황

◦ 질병통제 체계 및 관련 조직

◦ 역학조사 및 관리 체계(조직, 인력, 관련 시스템 등)

◦ 백신 수급, 공급, 접종 등 체계

◦ 질병통제예방를 위한 ICT System 활용 현황

□ 인근 국가 사례 분석

◦ 설립계획

◦ 설립 및 운영 연역

◦ HQ 기능 및 조직

◦ 질병통제 관련 주요 법/제도 재/개정 현황

◦ 질병통제 체계 및 관련 조직

◦ 역학조사 및 관리 체계(조직, 인력, 관련 시스템 등)

◦ 백신 수급, 공급, 접종 등 체계

◦ 질병통제예방을 위한 ICT System 활용 현황

[Part D] 사업추진 기본방향

□ 질병통제예방 시스템 구축을 위한 Master Plan 수립

◦ 수원국 정부 요구사항, 현 질병통제예방 조직 및 체계, 선진 사례 및 인근국가 사례 등 검토기반 질병통제예방 시스템 구축을 위한 위한 Master Plan 수립

□ 사업추진 기본방향 제시

1) 질병통제예방센터(CDC) HQ

◦ 수원국 정부 요구사항 및 현 질병통제예방 관련 조직, 기능, 운영 체계(ICT System 포함), 타 국가 사례 등 검토기반 질병통제예방 시스템 개선 방안 제시

◦ 질병통제예방 시스템 개선 방안에 따른 CDC HQ 조직구성안 및 조직별 기능 정의

◦ 질병통제예방 시스템 개선 방안 및 CDC HQ 기능에 따른 법제도 재·개정필요사항 도출 및 재·개정 계획 수립

◦ 질병통제예방 시스템 개선 방안 실행 및 CDC 운영을 위해 필요한 Technical Assistance(TA) 도출(예, 법제도 개정, SoP 수립, EDCF 재원 지원이 어려운 각종 업무, 역량 강화 등)

◦ 질병통제예방 시스템 개선 방안 및 CDC HQ 기능에 대한 관련 기관 및 주요 Stakeholder 대상 의견 수렴

◦ CDC HQ 운영 계획 수립

- CDC HQ 조직계획에 따른 인력 배치 및 확보 방안 마련

- 최소 5년 운영비용 산정 및 재원조달 방안 마련

◦ CDC HQ 인력 배치 및 확보 방안에 따른 각 기능별 교육훈련 프로그램 제시

◦ 질병통제예방 시스템 개선 방안 및 CDC HQ 운영을 위한 정보화시스템 기본설계 및 물량 제시

- 질병통제예방 관련 조직(중앙정부, 지방정부, 행정구역 등) 간 업무 연계 및 비상상황 대처 방법 등

- 네트워크 연결 및 운영 시스템 H/W & S/W

- 개발 필요한 Solution의 경우 개발 범위 제시(기본설계에 따른 Function Point 제시 필요)

- 기 운영중이 H/W, S/W 및 Data 이전 필요시, 이전 계획 수립

- 정보화시스템 운영 및 유지보수를 위한 교육계획 수립

◦ CDC HQ 운영을 위한 설비, 장비, 가구 등 물량 산출(설비 및 장비 등은 주요 사양 제시 필요)

◦ CDC HQ 조직 및 운영계획에 따른 건축 구조 및 개념설계, Layout Plan 제시(조감도 포함), 대안 비교 포함

- CDC 운영을 위한 장비, 설비 등 배치 계획 고려 필요

◦ CDC HQ 건축물에 포함될 부대시설 종류, 규격, 수량 제시

◦ CDC HQ, 병원, 연구소 및 교육훈련센터 운영을 위한 인프라(도로, 전력, 상하수도, ICT 등) 시설규모 및 물량 산출(센터 내 시설과 부지까지의 인입 시설 분리하여 산출)

- 병원 인입 인프라 용량의 적정성 및 증설 필요용량 산출

- 관련 기관의 부지 인입 인프라 증설 및 공사계획 포함

2) 감염병 전문병원

◦ 감염병원 기능 및 의료계획 수립

- 타 감염병원과 연계를 고려한 병원 기능 및 의료계획 수립

◦ 병원운영 및 유지보수 계획 수립

- 병원 운영조직 및 의료인력 확보 계획 방안 마련

- 최소 5년 이상 환자 수 등 추정에 따른 수익 및 운영비용(건축물, 각종 설비, 의료장비 및 HIS 운영/유지보수 비용 포함) 비교 분석 및 부족한 재원 확보 방안 제시 필요)

◦ 수원국 정부 병원 운영계획의 이행 가능성 검토 및 검토 결과에 따른 사업규모(음압병실 포함), 병원기능, 의료계획 등 보완

◦ 감염병원건립 계획의 적정성 및 문제점 분석 및 해결 방안 제시

◦ CDC 내 연구소와 연계 운영 방안 마렴

◦ 의료인력 역량 강화를 위한 교육프로그램(교육과정, 과정별 교육생수, 기간, 교육 장소 등) 제시

◦ 병원 자체 교육훈련 프로그램 운영을 위한 계획 수립

- 교육훈련 커리큘럼 및 교육기자재 종류, 사양, 수량, 주요 Spare part 등 제시

◦ 의료계획 및 병원 운영계획에 따른 의료장비 선정(장비별 주요 사양 제시 필요)

- 운영 및 유지보수 방안을 고려한 의료장비 선정 필요

- 음암병실 시설 기준 제시

- 의료장비 운영 및 유지보수를 위한 교육훈련 계획 수립

◦ 의료 및 운영계획에 따른 건축 구조 및 개념설계, Layout Plan 제시(조감도 포함), 대안 비교 포함

- 의료장비 배치 계획 고려 필요

◦ 병원 건축물에 포함될 부대시설 종류, 규격, 수량 제시

◦ 병원 정보화시스템(병원운영시스템 포함) 기본설계 및 물량 제시

- Hardware 및 Software

- 개발 필요한 Solution의 경우 개발 범위 제시(기본설계에 따른 Function point 제시 필요)

- 정보화시스템 운영 및 유지보수를 위한 교육계획 수립

◦ 병원 폐기물 관리방안 제시

◦ 병원 운영을 위한 인프라(도로, 전력, 상하수도, ICT 등) 시설규모 및 물량 산출

- 병원 인입 인프라 용량의 적정성 및 증설 필요용량 산출

3) 질병 연구소

◦ 연구소 기능 및 세부 연구분야 제시

- 질병 관련 타 연구시설과 연계 또는 이전 계획 수립 포함

- CDC HQ 및 감염병원과 연계 방안 제시

- 국가중앙검사실 기능 포함

◦ 연구소 운영 계획 수립

- 연구소 조직계획 및 인력 확보 방안 마련

- 최소 5년 운영비용 산정 및 재원조달 방안 마련

◦ 연구소 각 기능별 연구자 양성 및 역량 강화를 위한 교육훈련 프로그램(교육과정, 과정별 교육생수, 기간, 교육 장소 등) 제시

◦ 연구소 자체 교육훈련 프로그램 운영을 위한 계획 수립

- 교육훈련 커리큘럼 및 교육기자재 종류, 사양, 수량, 주요 Spare part 등 제시

◦ 연구소 운영을 위한 정보화시스템 기본설계 및 물량 제시

- 네트워크 연결 및 운영 시스템 H/W & S/W

- 개발 필요한 Solution의 경우 개발 범위 제시(기본설계에 따른 Function Point 제시 필요)

- 기 운영중이 H/W, S/W 및 Data 이전 필요시, 이전 계획 수립

- 정보화시스템 운영 및 유지보수를 위한 교육계획 수립

◦ 연구소 운영을 위한 설비, 장비, 기구, 가구 등 물량 산출(주요 사양 제시 필요)

- 연구용 장비 등의 운영 및 유지보수를 위한 교육 계획 수립

◦ 연구소 기능 및 운영계획에 따른 건축 구조 및 개념설계, Layout Plan 제시(조감도 포함), 대안 비교 포함

- 연구소 운영을 위한 장비, 설비 등 배치 계획 고려 필요

◦ 연구소 건축물에 포함될 부대시설 종류, 규격, 수량 제시

◦ 연구소 폐기물 등 관리방안 제시

◦ 연구소 운영을 위한 인프라(도로, 전력, 상하수도, ICT 등) 시설규모 및 물량 산출

- 연구소 인입 인프라 용량의 적정성 및 증설 필요용량 산출

4) 교육훈련 센터

◦ 질병통제예방 시스템 개선방안에 따른 교육훈련센터 기능 및 역학 조사관 훈련 등 필요한 교육분야 제시

◦ 교육훈련센터 운영 계획 수립

- 조직계획 및 강사 확보 방안 마련

- 최소 5년 운영비용 산정 및 재원조달 방안 마련

◦ 교육훈련센터 운영자 역량 강화 및 강사 양성을 위한 교육훈련 계획 수립(교육과정, 과정별 교육생수, 기간, 교육 장소 등)

◦ 교육훈련센터 운영을 위한 정보화시스템 기본설계 및 물량 제시

- 네트워크 연결 및 운영 시스템 H/W & S/W

- 개발 필요한 Solution의 경우 개발 범위 제시(기본설계에 따른 Function Point 제시 필요)

- 원격 교육시스템 도입 검토 필요

- 정보화시스템 운영 및 유지보수를 위한 교육계획 수립

◦ 교육훈련센터 운영을 위한 설비, 장비, 기구, 가구 등 물량 산출(주요 사양 제시 필요)

- 교육훈련용 장비 등의 운영 및 유지보수를 위한 교육 계획 수립

◦ 교육훈련센터 기능 및 운영계획에 건축 구조 및 개념설계, Layout Plan 제시(조감도 포함), 대안 비교 포함

- 연구소 운영을 위한 장비, 설비 등 배치 계획 고려 필요

◦ 교육훈련센터 건축물에 포함될 부대시설 종류, 규격, 수량 제시

◦ 교육훈련센터 운영을 위한 인프라(도로, 전력, 상하수도, ICT 등) 시설규모 및 물량 산출

- 교육훈련센터 인입 인프라 용량의 적정성 및 증설 필요용량 산출

5) 공통

◦ 구매계획(EDCF Guideline에 따른 컨설턴트 선정 및 구매 절차, 분리구매 필요성)

◦ 사업추진시 예상되는 문제점 및 해결방안 제시

◦ 수원국 설계기준 및 해당국에서 시행 또는 시행 중인 유사사업에 적용된 설계기준 조사 및 적용 기준 검토

- 수원국의 건설 및 운영에 관한 법률 및 지침 검토

◦ 사업수행을 위해 요구되는 선결절차 검토(정부승인, 부지확보 등)

◦ 컨설턴트 고용의 필요성, 컨설팅(설계 및 감리) 과업범위(영문 TOR, SOW 포함), 인력투입계획(bar chart) 수립

◦ 예상 사업실시기간 및 추진일정

◦ ①F/S, ②기본/실시설계, ③구매조달(통관), ➃시공 각 과정별 인허가 절차, 기관 조사 및 검토

◦ 사업지역별 감독, 감리, 인허가 절차, 관련 부처 및 승인 기간 등

◦ 해당국의 안전관련 규정 준수 및 사고예방방안 조사 및 계획 수립

- 안전관리 기준 조사 및 세부계획 수립(설비, 교육, 점검방안 등)

◦ 예상 사업실시일정(Implementation schedule)

◦ 기타 사업추진 권고사항 등

□ 완공 후 운영 및 유지보수 방안

◦ 각종 장비(의료장비 포함)/정보화시스템/건축물/주요 설비/교육기자재 등 유지보수 방안 제시

◦ 각종 소모품(의료 소모품 포함), 의약품, 시약 등 조달 방안 검토

◦ 병원건축 및 공급된 교육기자재 및 의료장비의 효율적 사용방안 등에 기초한 본 사업의 효율적 추진방안 제시

□ 기자재 통관 및 운송방안 검토

◦ Foreign(Made in Korea/3rd Country) 기자재의 국경간 운송 방안

◦ 한국 및 제3국 → In-bound 운송방안, 내륙 운송방안 검토

□ 사업범위 확정

◦ 해당 사업범위(안)내 효율성과 효과적인 Risk관리 역량을 기준으로 EDCF 재원이 지원하는 Scope과 수원국이 자체적으로 수행하는 Scope간 구분

-  사업범위(안) 결정과 해당 사업범위내 EDCF/수원국간 scope 구분은 반드시 당행과 협의후 결정하여야 함에 유념

[Part E] 무상부문 연계에 대한 타당성 조사 수행

□ 유무상 공동 F/S 추진 배경 및 필요성 검토

◦ 공동 F/S 추진배경 및 필요성

- 그간 유무상 연계사업 현황, 문제점, 공동 F/S 필요성

□ 유무상 역할 및 책임 명시

◦ 사업 全 주기에 대한 유상 및 무상 업무 범위 제시

□ 수행체계

◦ 현지 보건부 내 고용될 컨설턴트(TA) 의견 반영

[Part F] 기술적 타당성

□ 분야별 기술적 타당성 분석

◇ (설계 타당성 논증) 적용 설계에 대한 분석 및 타당성 검증

· 분야별 개념·기본설계에 대한 근거 및 장단점 분석을 통하여 본건 사업에 가장 적합하고 타당한 최적안 도출

* 건축분야의 경우 건물배치, 조감도, 층별 구성 등 대안간(복수안) 장·단점 분석을 통해서 본건사업에 적용한 기술의 타당성을 도출

◦ CDC 기능의 적합성 분석

◦ 수원국 운영유지 기관, 조직 및 이해관계자 분석을 통한 CDC 운영 계획 적합성 분석

◦ 공급 장비 적합성 검토(각종 장비 및 정보화시스템 H/W & S/W)

- 수요 장비에 대한 수원국 및 주변국가의 제조현황, 공급가능성, 유지관리능력 분석 및 검토

◦ 건축물 배치도, 건축 구조 및 개념설계 최적안 도출

- 건축 구조 및 시설의 구조 및 배치 최적안 분석

- 각 시설별 기능 및 운영계획에 따른 층별 최적 배치계획 분석

[Part G] 사업비 및 사업추진계획(Excel형태의 Soft-file 별도 제출)

□ 직접사업비(직접공사비+컨설팅비) 및 간접사업비 산정

◦ 직접공사비 세부내역 산출

- 각 공종 또는 컴포넌트별 현지화/한국산/3국산 분리산출

◦ 직접공사비 주요 단가 비교(국내 및 현지시장)

- 소요설비/인력, 기자재의 종류, 규격, 수량, 단가 및 구매계획 등

◦ 컨설턴트 과업범위 및 비용(추정 근거 포함)

- 기본설계, 입찰지원, 공사감리 등 단계별 Man-Month 및 비용산정

- 투입인력별 추천 자격/역할 등 기술적 TOR 작성(국/영문본)

◦ 건축 비용 산정(건축 개념설계에 따른 공사비(현지 물가, 인건비, 시공비용 및 실적공사비를 기준))

- 유사 건축물 실적공사비, 자재 및 인건비에 따른 분석 및 현지 기업의 견적 비료 분석 등 필요

◦ 각종 장비, 교육기자재, 집기류 등 세부 단가 분석 및 구매비용 산정(Spare Part 등 포함)

◦ 정보화시스템 구축비용 산출(기본설계에 따른 물량표, 단가, 및 개발금액 산정 근거 제시)

◦ 정보화시스템 신규 개발 비용(Function point 및 실비정액가산방식에 따른 개발 비용 산정 필요)

◦ 각 사업범위별 운영 및 유지보수 지원 비용 산정

◦ CDC 건립 및 운영을 위한 필요한 TA 별 추정사업비 산정

◦ 노임단가 분석

- 한국 엔지니어, 현지 엔지니어/근로자 노임단가 조사후 단가적용

- 출장횟수 및 항공료, 체제비 산정

◦ 교육훈련비용 산정

- 완공후 수원국의 순조로운 운영을 위한 교육훈련 프로그램 및 훈련비용 산출

◦ 각종 안전시설 등 부대시설 계획 및 안전관리 소요예산

◦ EDCF 및 사업국 기준에 따른 물량예비비 및 가격예비비 산정

◦ 수원국 세금 관련체계 (관세, VAT, Withholding Tax 등)

◦ 용지보상 및 이주비용

◦ 총 추정사업비 산정

□ 사업추진계획 세부내역 및 인력투입계획 작성

◦ 컨설턴트 과업범위 및 각 단계별 인력 투입계획 작성(bar-chart 기준)

- 현장조사 단계

- 설계 단계

- 입찰지원 및 계약체결 지원 단계

- 시공감리 단계(운영유지관리 지원 포함)

- 용역완료 및 보고 단계

◦ 건축, 교육훈련, 정보화시스템 개발·설치·시험, 각종 장비 설치 및 시험, 유지보수 지원 등 과업수행을 위한 인력 투입계획 작성(Bar-chart 기준)

□ 사업비 항목별 구성 및 세부내역 작성

※ 모든 사업비는 한국산, 제3국산 및 Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

◦ 사업비 산정 기준

◦ 국내 및 현지 시장가격 조사 및 분석

◦ 적용환율

◦ 직접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

- 직접공사비

· 주요 공종별 단가

· 공사물량

- 컨설팅서비스 비용

· 설계 및 입찰지원 단계

· 시공감리 단계

◦ 간접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

- 예비비(Contingencies)

· 물량예비비(Physical Contingency)

· 가격예비비(Price Contingency)

- 용지보상 및 이주비용

- 사업관리비 및 차관취급수수료

- 제세공과금(수원국 부담분과 한국 사업자 부담분 구분)

· 부가가치세

· 관세

· 법인세

· 지방세

· 개인소득세 등

◦ 총사업비

[Part H] 타당성 분석(정책적·사업규모·대상지역·경제적·재무적·기술적 타당성 및 가격의 적정성)

□ 정책적 타당성 분석

◦ 사업추진의 근거가 되는 정책/법 제도 등에 근거

□ 사업의 적정성/사업지역의 적정성

□ 사업 규모, 범위 및 사업기간의 적정성

□ 경제적 타당성 분석

◦ 분석방법론 사전정의 및 가정사항 적정성 검토

◦ Without Project 분석

◦ 본건 사업으로 인한 사회적 비용, 편익 분석

- 국민, 국가적 비용, 편익 측면 감안

- 국가 발전, 마스터 플랜 등을 반영한 경제성 분석 실시

◦ E-B/C, EIRR, E-NPV 등 분석

◦ 경제성 민감도 분석(할인율 등 주요 변수에 대한 민감도)

- 편익감소 및 비용증가 동시 발생 시나리오 포함

※ 경제적 타당성 분석은 Guidelines for the Economic Analysis of Projects(ADB) 및 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project(European Commission) 참고

□ 재무적 타당성 분석(필요시)

□ 기술적 타당성 분석

◦ 각 사업범위별 적용 기술 등에 대한 기술적 타당성 분석(대안과의 비교 분석)

□ 추정사업비 적정성 분석

◦ 추정사업비(외화 및 현지화 구분)의 적정성(수원국, 인접국 등의 유사사업 규모 및 사업비와 비교 검토)

□ 지속가능성 검토

◦ 병원운영 계획 및 정부 지원 등을 고려한 지속가능성 분석

□ 사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

[Part I] 환경사회영향

□ 현지 환경사회 제도 조사 및 검토

◦ 관련 법․규정, 인허가 절차,

◦ 정식 환경영향평가 필요여부 분석

◦ 환경영향평가 허가 등 사업진행에 필요한 환경 부처 및 승인기간 등

- 환경영형평가 과정 감안

- 토지보상, 이주보상, 사적재산 침해 보상 감안

◦ 토지보상 및 주민이주 법령 조사

◦ 본건 사업에 대한 토지보상, 이주보상 규정

◦ 사업지역별 토지보상 및 주민이주 필요성

◦ 유적지/문화재 발견시 보고절차(Chance Find Procedure) 조사

◦ 현지 환경·사회 법령상 선결사항 및 본건 사업과의 부합여부 분석

◦ 현지 법령상 환경사회 등급분류 제시

□ 기초환경영향 분석

◦ EDCF Safeguard Policy에 근거한 환경영향 분석

- 직접공사에 의한 환경영향 분석

- 소음, 진동 등 간접적 영향에 의한 환경영향 분석

□ 사회영향 분석

◦ EDCF Safeguard Policy에 근거한 사회영향 분석

- 사회적 이주 여부 분석 및 대응계획 수립

- 예정부지內 가옥 이주, 보상 분석 및 기본계획 검토

- 사업지역별 토지보상 및 주민이주 비용 추산(토지소유자 조사)

□ 마커 분석(리우, 젠더, 정책 및 지속가능개발목표 마커)

◦ 기후변화(리우) 및 성평등(젠더) 영향분석 및 관리계획 수립

◦ 정책마커 및 지속가능개발목표(SDGs) 기여도 확인을 위한 자료 조사

□ 환경사회영향 분석 결과 사업비용에 영향을 주는 요소 분석

□ 환경사회영향 분석 결과 구축물 설계에 반영이 필요한 요소 도출

[Part J] 기타

□ 성과관리 프레임워크(Logical Framework) 수립(1차 출장완료 후 초안 제출)

◦ 중장기 효과, 산출결과, 산출물 간의 결과논리(Result Chain)가 반영된 성과지표* 선정

* 목표 달성여부, 진전사항을 측정할 수 있는 SMART(Specific, measurable, achievable, relevant, time bound) 지표 수립

◦ 기초선(baseline)설정을 위한 문헌조사 및 데이터 수집

◦ 기초선 수준, 유사사업 평가 결과 등을 토대로 목표치(target) 설정

◦ 주요 리스크 검토 및 대응방안 수립

* 사업 시행 단계에 따른 지표의 모니터링 방안과 향후 성과관리 상 발생할 수 있는 문제점 및 대처방안 포함

성과관리 프레임워크(Logical Framework)

구 분	지표			기초선			달성목표치			가정/리스크
중장기효과1)
산출결과2)
산출물3)
모니터링 지표
지표(예시)	달성률(예시)
	기초선		1년			2년		3년			종료선
컨설턴트 고용
본구매 구매계약
건축
기자재
연수
사업목표 : 주 수혜자 :
지표별 정의 및 관리
지표명		정의			자료원/ 자료수집방법				지표관리담당자

주 : 1) 사업완공 후 발생한 모든 효과(의도하지 않은 부정적 효과 포함)

주 : 2) 사업 완공 시 산출물을 통해 주 수혜자가 누리는 직접적 혜택

주 : 3) 물리적인 사업 완공 시 주 수혜자 앞 지원되는 생산물 및 서비스

□ 기타 EDCF 심사를 위한 F/S 항목

◦ 한국산 기자재 및 용역의 공급가능성, 외화가득효과

- Local 및 제3국산 구매 자재/장비/공사 등 필요성 및 금액

◦ 국내 병원 및 기업의 사업수행능력 및 참여가능성, 현지 참여가능 기업 및 기술 수준 등

◦ 사업수행을 위해 요구되는 선결절차 기재(예, 정부승인, 부지확보, 각종 인허가, 이주 및 보상 등)

◦ 기자재, 장비 등 가격조사(견적 입수 내역) 내역(별도 제출)

◦ 한국기업의 유사사업 국제경쟁력 분석

◦ ‘EDCF 분야별 모듈화 가이드’ 중에서 ‘보건’ 분야 작성(필요시)

◦ EDCF 심사수행에 필요한 내용

□ 유무상 융합 사업기획

◦ 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회에 유관 무상원조 시행기관 초청

◦ 동 사업을 위한 무상원조 시행기관과의 협업방안 협의 및 도출

◦ 아래 내용 보고서에 포함

- 착수/중간/최종보고회 초청 및 참석한 무상기관 리스트

- 참석 무상기관과의 연계방안 논의 내용

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음

5. 과업 수행방법

□ 과업수행 원칙

◦ 본 과업은 관련 규정 및 계약조건과 당행(이하 “발주자”)의 지시에 따라 수행하여야 함

◦ 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적·기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

◦ 국외출장을 위한 여행자 보험을 가입도록 하고, 보상한도 및 범위가 일정 수준 이상으로 설정될 수 있도록 함. 아울러, ‘국외 체류시 안전매뉴얼’에 따라 안전지침, 위기상황대처 및 여행경보제도 안내를 통한 안전관리 자체 교육함

◦ 해당 사업의 특성상, 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 사업 수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 사업범위에 포함시킬 수 있음

◦ 선정된 제안사(이하 “수급자”)의 사업수행책임자는 본 과업에 따른 모든 업무를 발주자와 협의하여 시행하여야 하며, 용역 성과품은 당행과 협의 후 제출하여야 함

◦ 과업내용(주요 결과물)은 수원국 사업실시기관과의 협의를 통해(현장조사 포함) 진행되어야 하며, 수원국 사업실시기관 협의 및 합의가 도출되어야 함

- 수원국 사업실시기관 동의 증빙서류를 포함한 최종보고서 제출을 과업 완료시점으로 함

- 현지출장 및 상주업무와 관련하여 최종보고서 제출전(잔금지급전) 개인별 ‘출입국에 관한 사실증명서’ 원본 및 ‘여권 해당부분 사본’ 동시 제출

- 현장조사, 자료수집, 유관기관 및 사업실시기관과의 실시간 협의를 위해 제안서에 지정된 1인 이상이 현장에 3M/M(90M/D) 이상 상주*하도록 해야 하며 주요인력(PM, 분책, 전담)은 최소 4회 이상 현지출장(착수보고, 중간보고, 최종보고 등) 필요** 및 각 단계별 주요 협의내용에 대한 회의록 작성

* 상주 인원의 상주기간 중 보고를 위한 회의는 제외하며, 연속하여 90일 상주 권고(2인 이상 분할로 수행 가능하나, 인당 상주일수는 최소 30일 이상)

** PM은 최소 4회 현지 출장 실시 필요하며, 분책 및 전담은 F/S 수행계획에 따라 현장조사, 계획수립(설계 포함) 및 주요 내용 협의 등에 필요한 출장을 실시해야 함(4회 이하 출장 실시 가능)

- 현지 상주는 전담인력이 실시함이 원칙이나, 제안서 ‘인력운영계획’에 별도 제안시에는 기타인력도 참여 가능

- 출장과 현지상주 일수는 구분하여 산정할 것

- 자료수집 등 현지조사를 위한 현지업체 활용 필요(현지업체 고용시, 당행의 하도급 계약체결 사전 승인 필요)

- 성과 도출을 위한 추가적인 현지출장 비용은 계약상대자가 부담함

◦ 사업수행책임자(PM)는 모든 현장 활동 및 당행과의 주요 회의에 참석해야 하며, 전 과업범위에 대해 검토 및 감독을 이행해야 함

□ 품질 및 하자보증

◦ 계약상대자는 성과물의 품질을 높이기 위하여 당행의 요구를 최대한 반영하여야 함

◦ 계약상대자가 공급한 컨설팅 자료의 품질 및 하자보증기간은 12개월로 함

◦ 사업 수행내용의 적정성 검증을 위해 당행은 과업수행기간 내 별도 자문위원의 선임을 요구할 수 있음

◦ 사업품질 제고를 위해 계약자 비용으로 관련분야 전문가 4인 이상으로 구성된 외부자문위원단(중간 및 최종보고회)을 구성해야 하며, 당행 참관하에 주요 보고서에 대한 자문회의를 개최해야 함(자문위원 선정 시, 당행 사전 동의 필요)

※ 과업 진행 중 외부자문위원단 선정(기술제안서에 외부자문위원 명단 불포함)

□ 책임 및 보안

◦ 계약상대자가 사업을 수행함에 있어 당행의 전반적인 보안사항에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 이에 따른 문제발생 시 계약상대자가 모든 민·형사상 책임을 짐

◦ 과업에 의해 개발된 산출물의 원본 파일을 제출하여야 하며, 계약상대자는 사업결과물을 다른 어떤 목적으로도 활용할 수 없음

□ 과업수행계획서(영문) 작성 및 변경

◦ 계획서 내용

- 과업목표 및 범위 : 제안요청서와 수급자가 제안한 제안서

- 과업수행기간 : 착수일로부터 8개월

- 추진 일정계획 및 보고계획

◦ 발주자의 승인

- 수급자는 과업수행계획서에 대한 발주자의 승인을 얻은 후 과업에 착수하고, 부득이한 사유로 변경하고자 할 경우에도 발주자의 승인을 얻어야 함

6. 성과품 납품

성과품 납품

◦ 성과품은 계약내용 및 발주자가 제시한 형식에 맞추어 제출하여야 함

◦ 발주자는 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 경우 추가 산출물을 요구할 수 있으며, 수급자는 이에 응하여야 함

◦ 산출물의 규격은 A4(좌철)로 함

보고서 제출 일정

◦ 착수보고서(국문,영문) : 계약체결 후 7일 이내 “착수보고서(Inception Report)” 제출

◦ 보고서 목차 및 목차별 작성 담당자 제출 : 착수 후 2개월 이내

◦ 중간보고서(국문) : 착수 후 4개월 이내 “중간보고서(Interim Report)” 초안 제출

◦ 최종보고서(국문,영문) : 착수 후 8개월 이내 “최종보고서(Final Report)” 초안 제출

(단, 최종보고서 초안은 용역 완료일 1개월 이전에 제출)

- 영문 보고서 20부, 국문 보고서 10부 및 동일내용 수록 USB 메모리 6개

· 한글보고서 : USB 메모리 2개 / 영문보고서 : USB 메모리 4개

- 보고서는 국영문 요약본(30 ~ 40쪽 이내)을 포함

◦ 보고서 제출 부수 및 형태 관련 사항은 당행, 사업실시기관과 별도로 협의하여 조정 가능

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

□ 일반사항

◦ 제안참가 업체는 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 하며, 본 제안요청서상 요구하는 과업내용과 이에 대한 용역결과가 제시되어야 함

◦ 입찰공고 및 제안요청서에 명시되지 않은 기타의 사항에 대하여는 당행에서 정하는 바에 따름

◦ 제안서에 서명날인이 필요한 곳은 제안사나 그의 권한을 적법하게 위임받은 대리인이 자필로 서명하거나 입찰참가등록 시 제출한 인감(또는 사용인감)으로 날인되어야 하며, 행간에 쓴 것이나 지운 것, 덮어쓴 것 등은 정정 날인되었을 경우에만 유효함

◦ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 당행의 입증요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외함은 물론 계약 후에도 계약해지와 함께 인적․물적․기간적 손실에 따른 손해배상이 청구될 수 있음

◦ 제안서는 본 지침서의 양식 및 기재순서에 따라 작성하여야 하며, 각 페이지에 일련번호를 부여하고 목차항목에 해당 일련번호 기재

◦ 제안서의 내용 중 평가항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주

◦ 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 제출한 후 수정이나, 추가 또는 대체할 수 없음

◦ 모든 평가항목의 평가 적용 기준시점은 따로 정하지 않는 한 공고일자를 기준으로 함

◦ 제안서의 내용 중 기술자의 경력사항, 기관실적에 대하여 원본1부는 발행기관이 확인 날인한 것으로 제출(‘원본대조필’한 사본도 인정)

◦ 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, ‘할 수도 있다‘, ’고려할 수 있다‘ 등의 추상적인 표현은 제안하지 않은 것으로 간주

◦ 제안서 제출자는 대표이사 또는 그 위임을 받은 자로 함

◦ ‘재무구조 및 경영상태’ 평가를 위한 신용평가등급 확인서 제출(‘원본대조필’)

◦ 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 하며 제출된 평가 자료는 일체 반환하지 않음

◦ 코로나19에 따른 수원국 상황을 고려한 수행계획(실행계획, 조사방법, 사업실시기관 협업 및 Local 기업 활용 방안 포함) 및 조직·인력 운용 계획 등이 제안되어야 함*

* 현지 하도급 활용은 필수이며, 현지 하도급에 대한 아래의 내용 제안서에 포함 필요

- 현지 하도급 활용 및 협업 방안 제안 필요(단순 자료 및 현장 조사가 아닌 전문분야에 대한 조사, 협의, 계획 수립에 참여)

- 조직 및 인력 현황(서식4, 5 참조)

- 사업수행능력(유사 사업 및 사업실시기관 발주 사업 등 수행 주요 경험 기술)(서식6 참조)

- 투입 인력 이력서 첨부(서식9 참조)

□ 제안서의 서명 및 효력

◦ 제출된 제안서의 내용은 당행이 요청하지 않은 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시의 계약조건의 일부로 간주 함

◦ 제안내용에 대한 확인 필요 시, 입찰참가자에게 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

◦ 본 제안에 의한 성과물은 별도의 명시가 없는 한 당행이 소유권을 가짐

□ 보안 요구사항

◦ 제안자는 당행으로부터 배부받은 제안요청서, 각종자료 및 제안 과정에서 얻은 정보를 당해 제안 외의 목적으로 사용할 수 없음

◦ 용역진행 중 또는 용역완료 후 용역에 관한 일체의 사항이 외부에 누설되는 일이 없도록 당행의 보안규정을 철저히 준수하여야 하며 용역의 성과물을 사전승인 없이 용역 목적 이외에 사용할 수 없음

◦ 기타 보안과 관련되는 사항이 발생되었을 경우 또는 발주처가  요구하는 경우에는 이에 따라야 함

◦ 낙찰자는 계약 시 용역 참여인원 전원에 대한 보안교육 및 보안 관리에 철저를 기하도록 하고 용역 착수와 동시에 보안각서를 자필로 작성 하여 서명한 후 제출하여야 함

2. 제안서 목차

I. 사업내용, 대상국의 이해 1. 사업의 목적 2. 사업의 범위 3. 대상국 일반현황 및 관련 계획 4. 사업대상지역 특성 5. 사업의 기대효과 II. F/S 수행계획 1. F/S 실행계획 가. 추진전략 및 운영계획 나. 추진일정 2. 항목별 조사방법 가. 분야별 세부 조사계획 및 방법 나. 기술적․경제적 타당성분석 방안 다. 현지 및 국내협력업체 활용계획 3. 위험요소 분석 및 대책 4. F/S 관리방안 5. 영문보고서 작성계획 III. 조직ㆍ인력 현황 및 운용계획 1. 인력운용계획 가. 과업수행조직(실제참여자 기준) 나. 업무분담계획 다. 현지 및 국내 인력투입계획(현지 출장계획 및 상주인원 지정)	2. 투입인력의 경험 및 능력 가. 유사사업 수행경험 나. 대상국 경험 다. 주요경력 및 학위 라. 어학능력 IV. 원조효과성 제고를 위한 독창적인 아이디어 및 방안 등

3. 제안서 항목별 작성 방법

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
Ⅰ. 사업내용 및 대상국의 이해 1. 사업의 목적 2. 사업의 범위 3. 대상국 일반현황 및 관련 계획 4. 사업대상지역 특성 5. 사업의 기대효과	- 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 사업의 목적, 범위를 요약하여 기술 - 대상국 현황/개발계획/정책 및 해당 산업 분야 동향, 사업대상지역의 기능 및 특성 등을 요약하여 기술 - 사업의 기대효과를 요약하여 기술
Ⅱ. F/S 수행계획
1. F/S 실행계획
가. 추진전략 및 운영계획	- 본 사업 및 과업 특성, 제한된 시간, 예산 및 인적자원을 고려한 체계적인 F/S 추진전략 및 운영 방안 등
나. 추진일정	- 과업별 수행계획, 세부 추진일정
2. 항목별 조사 방법	- 본 과업수행을 위해 필요하다고 판단되는 자료 확보 계획
가. 분야별 세부조사 계획 및 방법	- 과업별 세부조사 방법 및 계획
나. 기술적․경제적 타당성 분석방안	- 기술적, 재무적/경제적, 정책적 타당성 분석방안 제시
다. 현지 및 국내협력업체 활용계획	- 효율적인 과업수행 및 성과물의 품질 제고를 위해 활용 가능한 현지 및 국내 협력 기관을 제시하고, 구체적인 협력사랑 등 기술
3. 위험 요소 분석 및 대책	- 과업수행 중 발생 가능한 위험 요소 분석 및 해결방안 제시 - 코로나19에 따른 수원국 상황을 고려한 수행계획
4. F/S 관리방안	- 수행 일정, 인력, 위험, 보안, 각종 보고서 및 성과물 등 관리방안 제시 - 각종 보고 계획(당행, 수원국 사업실시기관 등) - 수원기관 기술자 또는 현지 업체 기술자에 대한 우리나라 기술홍보 - F/S 관련 자료에 대한 품질 및 하자 보증 방안 - 보안 준수 방안 등
5. 영문 보고서 작성계획	- 각 단계별 영문 보고서 작성방안 등을 영문으로 작성

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
Ⅲ. 조직‧인력 현황 및 운용계획
1. 인력운용계획
가. 과업수행조직	- 참여 조직도 및 전문가 투입계획 (역학전문가, 경제/재무분석, ICT 전문가(HIS 포함), Safeguard(환경사회) 분야 참여기술자는 외부전문가 활용 가능함)	서식 7
나. 업무분담계획
다. 현지 및 국내 인력투입 계획	- 분야별, 단계별 과업수행을 위한 국내 및 현지 인력투입 세부 계획(Man-Month 포함) - 현지출장 및 상주인력 제시(계획 포함) - 현지 하도급 인력 투입 계획 포함
2. 투입인력의 경험 및 능력
가. 유사사업 수행경험	- 본 과업 내용을 명확히 이해하고, 분야별 실제 투입인력(현지 하도급 투입인력 포함)의 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요경력, 학위 및 어학 능력 등 과업수행에 필요한 사항 * 별첨서식에 목차 내용 포함되게, 상세하게 기술 - 증빙서류는 별첨(유사사업 수행실적 증빙서류에는 각 유사사업 기재 순서대로 표시 후 번호 부여) - 참여인력의 이력 사항<서식 9>은 분야별 책임자급과 전담참여자를 제외한 인력에 대하여는 요약 기재 가능하며, 최근 10년간 유사사업 수행경험 기술	서식 8 서식 9
나. 대상국 경험
다. 주요경력 및 학위
라. 어학 능력
Ⅳ. 원조 효과성 제고를 위한 독창적인 아이디어 및 방안 등
	- 코로나19 대응 효과적 과업수행방안, 원조의 효과성 제고 방안, TOR에 대한 의견/제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적․독창적 제안/과업수행방안, 사업별 특수사항 등

4. 가격제안서 작성방법

○ 가격제안서는 조달청 나라장터에 전자입찰서로 제출하며, 제출 시 제안금액에 대한 상세내역 (산출내역서 및 산출근거)을 첨부하여야 한다.

○ 제안금액은 부가가치세 등 제세를 포함하여 제시한다.
(면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함하여 제시)

○ 제안금액 상세내역 산출내역서 작성방법

- 직접인건비, 제경비, 기술료, 직접경비를 구분하여 작성하고 세부 산출근거 제시 (중도 정산사유 발생시 근거자료)

․ 제경비 : 직접인건비의 110% 이내

․ 기술료 : 직접인건비+제경비의 30% 이내

․ 직접경비 : 출장경비, 자료수집비, 보고서 작성비 등 실경비

5. 기술제안서 작성지침

□ 제안서 본문과 첨부물은 합쳐서 양면 제본하여 한 권으로 제출

◦ 제안서 본문(15장 이내, 제목, 목차, 간지 제외) + 제안서 첨부물(50장 이내) = 제안서 1권

◦ 첨부물은 (별첨)의 제출서류목록 중 「서식 4, 5, 6, 7, 8, 9」를 의미

◦ □글 글자크기 본문기준 13포인트, 글꼴 휴먼명조(영문글꼴 Times New Roman), 줄간격 160%, 좌우여백 25mm, 상하여백 각각 20mm, 15mm로 작성

◦ 단, 표 안의 글자크기는 12포인트 사용 가능(단, 서식6, 7, 8, 9는 글자크기의 제한 없음)

◦ A4 용지 세로로 작성

- A4로 작성하지 못하는 경우 A3를 A4 사이즈로 접어서 붙이며, 이 경우 A3 단면인쇄는 2페이지로 간주(A3 최대 3매*까지 허용)

*단면 인쇄 기준

◦ 입찰 참가 자격 증명서류 및 기타 서류는 서류 형태로 제출

□ 각종 증빙서류는 별권으로 제본하여 제출

◦ 사업수행실적 관련 실적증명서는 발주처가 발급한 실적증명서 또는 해외건설협회 등 관련 기관이 발급한 증명서를 의미함.

- 단, 민간거래 실적은 실적증명서를 비롯해 세금계산서 및 계약서 사본(인감으로 원본대조필)을 첨부하여야 함.

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 실적증명서는 서식 6의 유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 용역 종류, 용역기간, 지분금액에 형광펜으로 표시

◦ 해당분야 조직․인력․기술․지식 보유현황 관련 증명서는 관련 협회 또는 기관에서 발급한 경력증명서를 의미함.

- 단, 등록되지 않은 자는 본 제안요청서에 첨부된 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’을 참조하여 제안사의 대표이사가 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서, 발주처 등이 발행한 유사사업 수행증명서 등을 이용하여 평가

- 경력증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 경력증명서는 서식 9의 국내외 유사업무 수행경험 실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 사업명, 분야, 발주자, 담당업무에 형광펜으로 표시

□ 각종 증빙서류는 서류 각 장에 원본대조필(인감 날인)해야 하는 것이 원칙이나, 증빙서류 원본대조필 확인 문서(서류 List 포함)를 제출함으로써 대체 가능

□ 제안서는 과다한 비용이 지출되는 오프셋 인쇄 등 금지(컬러프린터 출력은 가능하나 컬러 인쇄물은 3페이지 이내로 제한하며, A3의 경우에도 1페이지로 간주하고 인쇄용지는 일반 사무용지(백색, 80g/m2 이내)로 한정)

(별 첨)

제출서류목록

구 분	제 목		부수	비 고	담당
① 입찰참가 자격증명 서 류	입찰참가신청서		1부	「서식 1」 참조	대표사
	입찰 대리인 재직증명서 사본		1부		대표사
	조달청 경쟁입찰참가자격 등록증		1부	나라장터 홈페이지	각사
	서약서		1부	「서식 2」 참조	각사
	입찰보증금 지급각서		1부	「서식 3」 참조	공동
	사업자등록증 사본		1부	원본대조필	각사
	법인인감증명서		1부		각사
	사용인감계		1부		각사
	법인등기부등본		1부		각사
	국세 및 지방세 완납 증명서		1부		각사
	신용평가등급 확인서		1부	원본대조필	각사
② 기술 제안서	기술제안서 본문		8부	USB 메모리 1 Set 별도 제출 (PDF 및 한글(.hwp) 형식)	-
	첨부물	일반현황 및 연혁		「서식 4」 참조	각사
		조직 및 인력 현황		「서식 5」 참조	각사
		유사사업 수행실적		「서식 6」 참조	각사
		과업수행 조직 및 업무분장		「서식 7」 참조	공동
		참여인력의 자격사항(요약)		「서식 8」 참조	공동
		참여인력의 이력사항		「서식 9」 참조	공동
③ 증빙 서류	경력증명서(관련협회 등 발행)		1부	원본대조필 ※기술제안서와 별권으로 제본	-
	기술용역이행 실적증명서		1부
④ 기타 서류	청렴계약이행 서약서		1부	「서식 12」 참조	각사
	독립성 확약서		1부	「서식 13」 참조	각사
	정보 비공개 동의서		1부	「서식 14」 참조	각사
	퇴직자 영입현황 확인서		1부	「서식 15」 참조	각사
	신규 입찰자 확인서(최근 2년 실적)		1부	「서식 16」 참조	각사
	신규 입찰자 확인서(계약실적)		1부	「서식 17」 참조	각사
	EDCF 부정당업자 제재(제재중)		1부	「서식 18」 참조	각사
	EDCF 부정당업자 제재(제재 종료되었으나 최근 2년 이력보유)		1부	「서식 19」 참조	각사
	F/S 용역 평가·활용 동의 확약서		1부	「서식 20」 참조	각사
	제안서 작성지침 미준수 자가진단표		1부	「서식 21」 참조	공동
	정량평가 자가진단표		1부	「서식 22」 참조 ※USB에도 수록하여 제출	공동
	공동수급표준협정서 (공동이행방식)		1부	기획재정부 ‘계약예규’, 8. 공동계약운용요령 참조	공동
	중소기업 확인서 (중소벤처기업부 발급)		1부	중소기업인 경우에 제출	각사
	장애인기업 확인서		1부	장애인기업인 경우에 제출	각사
	사회적기업 확인서		1부	사회적기업인 경우에 제출	각사

※ 신청서류 중 사본 제출시에는 “원본대조필”이라고 명기하고, 인감(또는 사용인감)을 날인하여 제출,

제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

※ ④기타서류 중 해당 없는 경우는 ‘해당 없음’을 표시하고 제출

※ 법인인감증명서 및 법인등기부등본은 최근 3개월 이내 발급된 서류 제출

※ ①입찰참가자격 및 ④기타는 서류형태, ②기술제안서 및 ③증빙서류는 책자로 제출

(서식 1)

입 찰 참 가 신 청 서
신청인	상호 및 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
입찰 개요	입찰공고(지명)번호	-	입 찰 일 자
	입 찰 건 명	「사 업 명」F/S 용역
입찰보증금	납 부	․보증금율 : 2.5/100이상 ․보 증 액 : 원정(￦ ) ․보증금납부방법 : (작성예시) 입찰보증금 지급각서 제출
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	(작성 예시, 불필요시 삭제 요망) ․본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 은행에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 확약합니다.
입찰참여	대리인․사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생년월일 :	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
귀 행의 「사 업 명」F/S 용역 입찰에 참가하고자 귀 행의 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 2. 기타 공고로서 정한 서류 2021년 월 일 상호 및 법인명칭 : 신청인 : (인) 한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 2)

서  약  서

회사명:

주  소:

본인은 「사 업 명」F/S 용역에 참가함에 있어 귀 은행이 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2021.   .    .

상호 및 법인명칭	:

대표자	성         명	:              (인)

생   년   월  일	:

한국수출입은행장 귀하

(서식 3)

입찰보증금 지급각서

입 찰 건 명	: 「사 업 명」 F/S 용역

입 찰 일 자	: 2021.   .   .

입찰예정금액	: 금                     원정 (￦            .-)

입찰 보증금	: 금                     원정 (￦            .-)

(입찰보증금은 입찰예정금액의 100분의 2.5이상)

당사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조에 의한 귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 즉시 현금으로 납부할 것을 확약하며, 이에 각서를 제출합니다.

2021년   월    일

주          소 :

상호 및 법인명칭 :

대    표    자 :             (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조(입찰보증금)

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제3의 규정에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 법 제9조 제3항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

(서식 4)

일반현황 및 연혁

회 사 명				대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도
해당부문 종사기간
재무제표 (최근 3년 평균치)	총자산		자기자본
	매출액		당기순이익
주요연혁

(서식 5)

조직 및 인력 현황

□ 조직도

□ 인력 현황

직무 분야	계	임원/ 관리자	PM					영업/ 기타
계

(서식 6)

유사사업 수행실적(각 참여사별 작성)

상호 및 법인명칭 : (ex, A사)

유 사 사 업 수 행 실 적
No.	구 분 (타당성 조사, 기본설계 등)	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주처	책임 기술자	비 고 (해외)
1	타당성조사	[A1]ㅁㅁㅁ			전체금액 (지분율, 지분금액)
2	타당성조사	[A2]ㅂㅂㅂ			1,000,000 (60%, 600,000)			해외
계	00건							총
	00건							해외
	기본설계	[A3]ㄴㄴㄴ
	기본설계	[A4]ㄷㄷㄷ						해외
계	00건							총
	00건							해외
합계	00건							총
	00건							해외

※ 1. ‘입찰제안서 세부평가기준’에 명시된 수행실적 중 발주자의 평가기준(p8. 정량평가 기준) 에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외(명백히 해당되지 않는 실적을 기재하는 경우 제안서 작성지침 미준수로 간주하여 감점대상)

- 입찰제안서 세부평가기준의 요구사항(진료과목수, 과업범위 등)에 따라 용역개요 기술 필요

2. 각 사업분야별로 작성하며 사업건수 및 금액을 상단에 기재, 각 분야별로 국내 및 해외사업(정부 및 민간 구분) 구분하여 수행지역별 소계를 상단에 기재

- 컨설팅 용역에 의료계획, 의료장비 또는 운영계획 수립 과업이 중복하여 포함되어 있는 실적은 ‘의료계획’, ‘의료장비’ 또는 ‘병원운영‘ 중 1개를 선택하여 명기

3. 발주처 또는 실적증빙기관이 발행한 실적증명서 미첨부시 실적 불인정

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필할 것)도 가능하며, 민간거래 실적은 세금계산서 및 낙찰을 증명할 수 있는 계약서 사본(인감으로 원본대조필) 첨부할 것

- 각 실적증명서는 유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 사업명, 수행기간, 사업내용, 실적금액 등 주요내용은 형광펜으로 표기 할 것

4. 공동도급에 의한 실적의 경우 계약금액 항목에 총 계약금액 및 지분율 따른 자사 계약 금액만 기재(비고에 지분율도 표시)

5. 다른 통화(원화 이외)로 계약 체결된 해외실적의 경우, 입찰공고 일자 고시 기준환율 적용

(서식 7)

과업수행 조직 및 업무분장

			사업수행책임자
			홍 길 동
보건정책/공중보건	감염병/ 역학	운영계획	의료계획	건축계획	교육계획	의료장비	ICT	경제성	환경	통번역
감염병 및 공중보건 관리법규‧위기대응 매뉴얼 수립 등	사건기반 감시체계 구축, 긴급상황실 연계‧운영계획 수립 등	CDC/병원/실험실 운영계획 수립 등	병원의료 서비스 계획 수립 등	건축/토목/전기/통신/기계/소방/조경 등 기본계획 수립	교육훈련센터/CDC/병원/연구소	CDC/병원/실험실 및 감염병 관련 의료장비 계획 수립	감염병 관리‧의료 IT 시스템 구성 및 HIS 관련 법제도/ 요구사항 분석, 설계 및 사업비 도출 등	경제적 및 재무적 타당성, 편익, B/C, 민감도 분석 등	ESIA 승인절차, 법규검토, 기초자료분석 등	영문 보고서 번역
[분책]
성명	성명	성명	성명	성명	성명	성명	성명	성명	성명	-
[전담]
제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능			-
[비전담]
제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	제안 가능	-	-	성명

참고) 1. 위의 그림과 동일하게 단위업무별로 세분화하여 작성

2. 분야별 과업책임자, 전담참여자 및 비전담참여자 명시

- 과업수행 조직 및 업무분장을 참조하여 11개 분야는 최소 1인의 참여인력을 필수 제안해야 하며, 8개 분야*의 추가 제안 허용(단, PM, 분야책임자(분책) 및 참여기술자(전담) 합산 17인 제한)

* 보건정책/공중보건, 감염병/역학전문, 운영계획, 의료계획, 건축계획, 교육계획, 의료장비, ICT

- 비전담 참여자는 관련분야 업무를 지원하는 역할로서 총 10인 이내

- 1인이 복수의 단위업무 참여인력으로 제안시, 각 단위업무별로 유사사업 참여실적을 기재한 이력서 각각 제출

3. 역학조사, ICT, Safeguard, 경제/재무분석, 통번역(비전담) 전문가는 외부인력 제안 가능

4. 참여자별 역할, 성명, 참여기간(M/M) 명시

5. 사업수행책임자는 영어 구사능력이 우수한 자를 지정

6. 사업수행책임자, 분야별 책임자 및 전담참여자는 타사업 중복 참여여부 등을 종합적으로 감안하여 지정

(서식 8)

참여인력의 자격사항(예시)

구분	분야별	소속	성명	연령 (세)	기술 등급	최종 학력	자격증	담당 업무	비고 (중복건수)
전담 참여	PM
	보건정책
	공중보건
	감염병전문
	역학전문
	운영계획
	의료계획
	건축계획
	교육계획
	의료장비
	ICT
	경제성
	Safeguard
	...
비전담 참여	(기타 1)
	(기타 2)
	...
Local 하도급 참여	(기타 1)
	(기타 2)
	...

참고) 1. 작성기준일 : 입찰공고일 현재

2. 기술등급 : 본 제안요청서 첨부 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’에 따라 기술자별 기술등급 및 해당 사유 간략 기재

예) 특급(석사 10년), 고급(석사 6년)

3. 각종 증빙서류(경력증명서 등)는 별도 제출

4. 사업수행책임자(PM) 및 분야책임자는 제안서 제출일 현재 참여 또는 참여자로 제안된 사업수를 비고에 명기해야 하며, 하기 정보를 이력서에 첨부해야 함

- PM 및 분야책임자는 중복참여한 사업정보(사업명, 발주처, 발주처 담당자명, 계약기간, 참여직책, 담당업무, 참여일수(출장일수 구분))

5. 사업수행책임자 및 분야책임자는 본 용역기간의 최소 40% 및 20% 이상 각각 투입되어야 함(정성평가 대상)

(서식 9)

참여인력의 이력사항

성 명		(국문)					생 년 월 일					(사진첨부 필수)
		(영문)
		(한문)
직장주소
자택주소
연락처		전화 : / 휴대전화 :
		e-mail :
학 력		학 교 명						학 과(전 공)			졸업일		논 문 명
		고등학교
		학사과정
		석사과정
		박사과정
직장경력		회 사 명 (기 관 명)				근 무 기 간				직 위		담 당 업 무
						00.0.~00.0. (0년0개월)
		총 근무기간				년 개월
자 격 증		자 격 증 명				취 득 년 월 일						발 행 기 관
외국어	구 분		읽 기		쓰 기	말 하 기			A : Native speaker와 같이 자유로운 구사 (통역자격 수준) B : 일상생활은 물론 전문적 내용에 대해서도 구사가능 C : 일상생활에 지장 없음 D : 사전이 있으면 의사소통가능

유사업무 수행경험	No.	사 업 명 (조사명)		대상국	분야	기 간	발주자명	담당 업무
						00.0.~00.0. (0년0개월)
해외근무 경력 또는 출장경력	No.	업 무 명	국 명	기 간	담 당 업 무
참고사항

※ ‘입찰제안서 세부평가기준’에 명시된 수행실적 중 발주자의 평가기준에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외(명백히 해당되지 않는 실적의 경우 제안서 작성지침 미준수로 간주하여 감점대상)

- 경제/재무 전문가는 경제-․재무분석 실적만 기재

※ 유사업무 수행경험은 제안한 담당분야 업무에 해당하는 실적만 기재(담당 업무와 관련 없는 실적은 평가대상에서 제외)하며, 이력서 ‘분야’란에 담당했던 업무 분야 기재(본 F/S에 제안된 분야와 유사사업 수행실적 업무 분야가 일치해야 실적으로 인정됨)

※ 1인이 복수의 단위업무 참여인력으로 제안시, 각 단위업무별로 유사사업 참여실적을 기재한 이력서 각각 제출

※ 발주처 또는 실적증빙기관이 발행한 유사사업 실적증명서 별도 제출(제안서의 유사사업 수행경험 기재 순번과 동일한 번호의 견출지 부착 및 주요사항 마킹)

※ 각 실적증명서는 사업명, 수행기간, 사업내용, 실적금액 등 주요내용에 대해서 식별 가능하도록 형광펜으로 표기할 것

※ 이력사항에 미기재된 유사사업 수행경험은 실적증빙을 제출하여도 실적으로 불인정

※ 유사업무 수행경험 작성시 발주기관명과 함께 발주처 담당자 및 연락처를 같이 기재할 것(단, 발주처 발급 실적증명서를 제출한 사업은 기재 생략 가능)

※ PM 및 분야책임자는 중복참여한 사업정보(사업명, 발주처, 발주처 담당자명, 계약기간, 참여직책, 담당업무, 참여일수(출장일수 구분))

- 중복참여 사업정보에 허위사실 기재시, 해당 인력은 기술평가대상에서 제외

(서식 10)

용역비 산출내역서

1. 사 업 명 :「사 업 명」F/S 용역

2. 입찰일자 : 2021년   월   일

○ 용역비 산출내역서

(단위 : 원)

연 번	항 목		금 액
1	직접 인건비
2	제 경 비
3	기 술 료
4	직접 경비	국 외 여 비
		현 지 상 주
		현지조사비
		<항목별 기입>
		...
		...
		보고서 작성
		자문위원회
		소 계
5	손해배상공제
6	부가가치세( %)
합 계

※ 각 항목별 세부 산출근거 첨부(현장조사 항목별 금액 분리 기재)

※ 제경비 : 직접인건비의 110% 이내, 기술료 : 직접인건비+제경비의 30% 이내

주  소 :

상  호 :

대표자 :           (인)

(서식 11)

용역비 세부 산출근거

○ 사업 용역비 세부 산출근거

(단위 : 원)

구 분			합 계	산 출 근 거
합 계
1. 직접인건비		계
		기술사		00MM×일단가×22일/월
		특급
		고급
2. 제경비		계		직접인건비의 110% 이내
3. 기술료		계		직접인건비+제경비의 30% 이내
4 직 접 경 비		계
	국외여비	소계
		항공료		00회×항공료
		체재비		출장 : 00일×00회×일체재비 상주 : 00일×일체재비
	현지상주	소계
		차량		00개월×단가
		사무실		00개월×단가
		통신비		00개월×단가
	현지조사비	소계
	보고서작성	소계
		인쇄비		00부×000장×단가
		번역비		000장×단가
	자문위원회	소계
				2회×00인×단가
	<항목별 기입>	소계
		소계
5. 엔지니어링 손해배상공제료				1단계 = 순계약금액*×기본요율 2단계 = 순계약금액×0.16%
6. 부가가치세

(서식 12)

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하고자 한국수출입은행(이하 “귀행”이라 한다)에서 시행하는 모든 공사, 용역, 물품구매 등과 관련하여 당사 임직원과 대리인(이하 “임직원 등”이라 한다)은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에서 특정인의 낙찰을 위하여 담합하거나 입찰가격협정을 한 것이 사실로 드러날 경우 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참가하지 않겠으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 귀행이 공정거래위원회에 신고하여 과징금 등이 부과되더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 뇌물이나 부당한 이익(이하 “뇌물 등”이라 한다)을 제공하지 않겠으며 이를 위반하였을 때는 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참여하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 귀행이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하고 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사 임직원 등이 관계 임직원에게 뇌물 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에게 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 하도급자가 뇌물 등을 제공한 때에는 그러한 행위에 당사의 책임이 없는 경우라 하더라도 귀행의 지시에 따라 하도급계약을 해제 또는 해지하도록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며 당사가 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 귀행의 조치와 관련하여 당사는 귀행을 상대로 손해배상 청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2021.    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자):               (인)

한국수출입은행장 귀하

(서식 13)

독립성 확약서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역을 수행함에 있어 관계 법규의 위반이 없이 용역수행을 위한 독립성을 확보하였음을 확약합니다.

2021년    월    일

상 호 (법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부 귀하

(서식 14)

정보 비공개 동의서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제 3자에게 일체 누설하지 않겠으며, 제안서에 명시한 보안방침 및 귀행의 보안정책을 철저히 이행할 것을 확약합니다.

20  년   월    일

상 호 (법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 15)

퇴직자 영입현황 확인서

- 공고번호 :

- 입찰(계약)건명 :

1. 상기 입찰(계약)건과 관련하여 당사는 한국수출입은행의 퇴직자* 영입 근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

성 명	고용일자	담당업무

* 한국수출입은행 퇴직 후 2년이 경과하지 않고 고용한 경우만 해당

2. 한국수출입은행의 퇴직자를 영입한 경우에는 귀행의 내규에 따라 계약의 상대방 자격을 제한하는 은행의 규정을 따르겠습니다.

본 건 입찰 또는 계약을 수행함에 있어 상기의 사항을 준수할 것을 확약하며, 만일 상기 신고사항과 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2021.    .    .

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 16)

신규 입찰자 확인서

(최근 2년 EDCF F/S 계약실적이 없는 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당	당사는 과거 EDCF F/S 수주실적이 있으나 아래표와 같이 입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.
□ 미해당	입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

ㅇ 가장 최근 EDCF F/S 계약건명 및 해당건 계약 연월일

(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분	가장 최근 EDCF F/S 계약건명	계약 연월일	비 고
1
2
3

20  .    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 17)

신규 입찰자 확인서

(신규입찰자용-EDCF F/S 계약실적 전무)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당	당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약 실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다. 한편, EDCF 사업타당성조사(F/S) 입찰에는 참여하였으나, 계약자로 선정되지 않은 건은 아래표와 같습니다.
□ 미해당	입찰공고일자 기준 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

ㅇ 가장 최근 EDCF F/S 입찰 참여 건 기재

(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 해당없음 기재)

구 분	가장 최근 EDCF F/S 계약건명	계약 년월일	비 고
1
2
3

20  .    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 18)

EDCF 부정당업자 제재 확인서

(입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재 중인 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당	당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, 아래 표와 같이 EDCF 부정당업자 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받고 있는 입찰자임을 알려드리며, 그에 따라 평가기준에 의거 본건 입찰에 불이익이 존재함을 인지하고 있습니다.
□ 미해당	입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재가 아닌 경우

ㅇ 입찰공고일자 기준, EDCF 제재 또는 MDB 상호제재 진행 사항

(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 해당없음 기재)

구 분	제재 발생 사업명	제재 기간	제재 처분일	제재 사유
1
2
3

20  .    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 19)

EDCF 부정당업자 제재 확인서

(입찰 공고일자 기준 최근 2년 이내 EDCF 부정당업자 제재 또는 경고 이력 등이 있는 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당	당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, 아래표와 같이 최근 2년 이내 아래 ‘제재대상 ①~③’에 해당되는 이력이 있었음을 알려드리며, 그에 따라 평가기준에 의거 본건 입찰에 불이익이 존재함을 인지하고 있습니다.
□ 미해당	입찰 공고일자 기준 최근 2년 이내 아래 ‘제재대상 ①~③’에 해당하는 이력이 없는 경우

※ 제재대상

① EDCF 부정당업자 제재 또는 경고 이력

② ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 및 ‘공기업·준정부기관 계약사무규칙’에 의해 입찰참가자격 제한을 받은 이력

③ MDB로부터 부정당행위로 인한 상호제재를 받은 이력

ㅇ 입찰공고일자 기준, 최근 2년 이내 위 ‘제재대상 ①~③’에 해당되는 이력사항(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 해당없음 기재)

구 분	제재(경고) 발생 사업명	제재(경고) 기간	제재(경고) 처분일	제재(경고) 사유
1
2
3

20  .    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(대  표  자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 20)

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

당사는 금번 EDCF F/S 용역업무를 수주할 경우

1. EDCF F/S 용역 수행 완료 후 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 평가되는 것을 충분히 숙지하고 있습니다.

2. 또한, 사후적으로 (고의 또는 중과실 등의 사유로) F/S가 부실로 확인되는 경우 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 재평가될 수 있음을 충분히 숙지하고 있습니다.

3. 상기 평가 및 재평가 결과는 평가 후 2년간 당사가 다른 F/S 용역 입찰 참여시 귀행의 F/S 제안서 기술평가에서 가감점(건별 ±2점 이내, 누계 ±4점 이내)으로 반영·활용됨을 충분히 이해하고 이에 동의합니다.

귀행의 F/S 용역 평가 및 타 F/S 용역 입찰자 심사시 평가결과 활용  (가감점 적용) 등의 조치와 관련하여 당사가 귀행을 상대로 손해배상을   청구하거나 민‧형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2021.   .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 21)

제안서 작성지침 미준수 여부 자가진단표

□ 입찰제안서상 명시된 본문 및 첨부물 작성 페이지 수 위반 (0.25점)

□ 제안서상 A3용지 매수제한 위반 (0.25점)

제안서는 A4용지 세로로 작성, A4로 작성하지 못하는 경우 A3를 A4 사이즈로 접어서 붙이며 이 경우 A3는 단면인쇄 기준 2페이지로 산정하며 최대 6페이지(단면기준 3장)까지 허용

(ex, 단면인쇄 기준, A4용지 54페이지+A3용지 3장(=A4 6페이지) 까지 가능)

□ 컬러인쇄물 페이지수 제한 위반 (0.25점)

□ 제안서상 자문위원 명단 기재 (0.25점)

□ 과다한 비용이 지출되는 인쇄물 제출(오프셋 인쇄 등) (0.25점)

□ 제안서 목차상 요구내용 누락 (0.25점)

□ 제안서상 서식 또는 기재순서 위반 (0.25점)

□ 제안서 내 페이지번호 누락 (0.25점)

□ 기타 입찰제안서에 명시된 제안서 작성지침 위반 (건별 0.1점)

- 각종 증명서의 유효기간 경과 또는 요구한 기한 이전 발행

- 실적평가 관련 평가대상과 무관한 실적 제출 또는 요구서류 미제출

- 제안요청서에서 허용하지 않은 분야의 외부전문가 제안

- 출장횟수 및 상주기간 등 요구된 인력투입계획 위반

- 전담 및 비전담 참여자수 미준수

- 제안인력 소속사 미기재(서식 7 및 8)

- A4용지 1페이지에 1/4로 축소된 4페이지 내용 기재 등

감점 합계 : 감점대상 ___건, 감점 ____점(최대 2.0점 감점 한도)

2021년   월   일

작성기관 :        , 작성자 직함 :    , 작성자 성명:           (인)

(서식 22)

정량평가 자가진단표

평가부문	평가항목	배점	실적	A사 (60%)		B사 (40%)			합계 (가중평균)	평가점수
업체 사업수행 실적	용역수행 건수	4	건수	00건		00건			00건	00점
	용역수행 금액	4	금액 (백만원)	00원		00원			00원	00점
	해외 용역수행 건수	2	건수	00건		00건			00건	00점
참여인력 경험	PM 자격	1	등급	특급기술자						00점
	PM 경력	2	연수	00년						00점
	PM 실적	2	건수	00건						00점
	참여기술자 경력	5	연수 (최대 15년)	실제	인정		비고(등급 가중치)
	책임 1(분야, 성명, 등급)			17.0	8.0		17.0×100%(기술사)			N/A
	책임 2(분야, 성명, 등급)			8.0	7.2		8.0×90%(특급)			N/A
	책임 3(분야, 성명, 등급)			6.0	5.4		6.0×90%(특급)			N/A
	책임 4(분야, 성명, 등급)			13.5	8		13.5×80%(고급)			N/A
	전담 1(분야, 성명)			7.5	7.5		...			N/A
	전담 2(분야, 성명)			9.4	8		...			N/A
	전담 3(분야, 성명)			5.7	5.7		...			N/A
	소 계 (산술평균)				00		00년			00점
	참여기술자 실적	5	건수 (최대 15건)	실제	인정		비고(등급 가중치)
	책임 1(분야, 성명, 등급)			13	8		13×100%(기술사)			N/A
	책임 2(분야, 성명, 등급)			7	6.3		7×90%(특급)			N/A
	책임 3(분야, 성명, 등급)			19	8		19×90%(특급)			N/A
	책임 4(분야, 성명, 등급)			6	4.8		6×80%(고급)			N/A
	전담 1(분야, 성명)			16	8		...			N/A
	전담 2(분야, 성명)			5	5		...			N/A
	전담 3(분야, 성명)			6	6		...			N/A
	소 계 (산술평균)				00		00건			00점
				A사 (60%)				B사 (40%)		평가점수
재무구조 및 경영상태	신용평가등급	5	신용 등급	개별점수				개별점수		00점
가산점, 감점 (정량평가 배점한도 내)	중소기업 가점	(+1)	중소기업 여부	해당여부				해당여부		00점
	신규 입찰자 가점(1)	(+0.5)	2년간 수주 없음	해당여부				해당여부		00점
	신규 입찰자 가점(2)	(+1.0)	신규 입찰자 여부	해당여부				해당여부		00점
	장애인기업 및 사회적 기업	(+0.3)	공적 증빙	해당여부				해당여부		00점
	EDCF 부정당업자 제재(1)	(-3.0)	제재 기간	해당여부				해당여부		00점
	EDCF 부정당업자 제재(2)	(-3.0)	종료 2년 이내	해당여부				해당여부		00점
	제안서 작성지침 미준수	(-2.0)	건별 -0.25	개별점수				개별점수		00점
	F/S 용역결과 평가	(+2.0~-2.0)	최근 2년 평가	개별점수				개별점수		00점
총 계		32.3		가산점 포함하여 30점 이내						00점

※ 업체의 사업수행실적, 재무 및 경영상태는 공동도급으로 참여할 경우, 참여지분율을 고려한 건수(과거 참여지분율 감안한 실적), 금액(과거 참여 지분율 감안한 금액), 등급(재무등급)을 적시하고, 공동도급 구성원별로 유사사업 수행실적에 참여비율을 곱하여 산정한 후, 가산점 여부 등을 감안하고 합산(표 안 붉은색은 작성예시)

※ 분야별 참여인력 경력 및 실적은 각 참여자별(책임은 등급별 가중치를 곱한 값) 1인 최대 8년, 8건 초과시 8년/8건으로 인정

※ 공동도급 구성원 수에 따라, 칸을 추가 또는 삭제하여 기입

년     월     일

작성기관 :        , 작성자 직함 :        , 작성자 성명:           (인)

(참고1)

참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표

참여업체수	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	계
1	-	-	-	-	-	절대평가
2	1	1	0	0	0	2
3	1	1	1	0	0	3
4	1	2	1	0	0	4
5	1	3	1	0	0	5
6	2	2	1	1	0	6
7	2	3	1	1	0	7
8	2	3	2	1	0	8
9	2	4	2	1	0	9
10	2	4	3	1	0	10
11	2	5	3	1	0	11
12	2	5	3	2	0	12
13	2	6	3	2	0	13
14	3	6	3	2	0	14
15	3	6	3	2	1	15
16	3	6	4	2	1	16
17	3	6	4	3	1	17
18	4	6	4	3	1	18
19	4	6	5	3	1	19
20	4	6	5	4	1	20

(참고 2)

참여인력의 등급 및 자격기준

기준 구분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
기 술 사	․기술사, 건축사	-
특급기술자	․기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․산업기사자격을 가진 자로서 13년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자	․박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자, ․학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자
고급기술자	․기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․산업기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자	․박사학위를 가진 자 ․석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자, ․학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자
중급기술자	․기사자격을 가진 자로서 4년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․산업기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자	․석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자, ․학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자
초급기술자	․기사자격을 가진 자 ․산업기사자격을 가진 자	․석사학위를 가진 자 ․학사학위를 가진 자 ․전문대학을 졸업한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자