「방글라데시 다카 메트로 4호선 건설사업」

F/S(타당성조사) 및 기본설계 용역을 위한

제 안 요 청 서 (RFP)

2024. 2.

－ 목   차 －

Ⅰ. 제안 안내

1. 용역 개요

2. 사업 추진 일정

Ⅱ. 제안 일반사항

1. 입찰 및 계약 방법

2. 입찰공고

3. 입찰 참가자격

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

5. 입찰시 유의사항

6. 제안서 평가방법

7. 협상대상자 선정 및 협상 절차

8. 최종낙찰자 유의사항

9. 기타사항

Ⅲ. F/S 대상사업 및 과업범위

1. 당행 발주 F/S 추진배경 및 목적

2. 본 사업 추진배경

3. F/S 대상 사업개요

4. F/S 과업범위

5. 과업 수행방법

6. 성과품 납품 및 보고서 관련 사항

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

2. 제안서 목차

3. 항목별 작성방법

4. 가격제안서 작성방법

5. 제안서 작성지침

[별첨] : 제출서류 목록

Ⅰ. 제안 안내

용역개요

과 업 명 :「방글라데시 다카 메트로 4호선 건설사업」F/S(타당성조사) 및 기본설계 용역

과업기간 : 착수일로부터 18개월

과업예산 : 4,970,000,000원(부가세, 손해배상보험공제료 포함)

추진 일정

제안요청 설명회 또는 입찰참여 의향 표시(택1, 대표사 자격 부여)

[(대면) 제안요청 설명회 참석]

◦ 일시 및 장소 : 2024. 2. 27(화) 13:30시, 한국수출입은행 1층 서울 회의실

◦ 구비서류 : 당행 담당자 앞 사업자등록증 사본 제출

[(비대면) 입찰참여 의향 표시]

◦ 입찰참여 의향자는 아래와 같이 사업자등록증 사본을 제출

- 제출기한 : 2024. 2. 27(화), 17:00시

- 제출서류 : 사업자등록증 사본

- 제출방식 : E-mail (제목: [용역사명] ‘입찰건명’ 참여의향 확인‘)

- 담당자 :
(수신) 최성일 책임심사역 (☎ 02-6255-5092, sichoi@koreaexim.go.kr)
(참조) 박건록 심사역     (☎ 02-6255-5093, pglog@koreaexim.go.kr)

[참여의향 확인, 질의 및 공지]

◦ 입찰참여 의향자 앞 JV구성현황을 포함한 참여의향 재확인 후, 최종 참여예정자에 한하여 사업 기초자료 및 유의사항 e-mail송부 예정

* 제출기한 이후에도 사업자등록증 사본 제출을 통한 입찰 참여 의향 표명 및 참여사로서 입찰 참가 가능

◦ 질의응답은 E-mail 혹은 유선을 통하여 실시

기술제안서 제출

제출기한 : 2024. 4. 5(금) 16:00시 (입찰 마감 전일)

제출장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비 (고객접견실)

제출서류 : 입찰참가신청서 및 관련 서류 (붙임 참조)

※ 직접 방문하여 제출할 것 (우편접수 불가)

가격제안서 제출

입찰기간 : 2024. 4. 1(월) 10:00시 ~ 2024. 4. 8(월) 16:00시

입찰장소 : 조달청 나라장터

가격입찰 시 가격산출근거서 파일(서식 10 및 11)을 첨부

개찰일시 : 제안서 기술평가 후 개찰

면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함한 금액으로 제출

※ 본 입찰의 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 기술제안서와 가격제안서 중 어느 하나라도 미제출시에는 입찰 무효처리됨. 기술제안서를 제출한 입찰자만 가격입찰서를 제출할 수 있음

Ⅱ. 제안 일반사항

입찰 및 계약 방법

□ 입찰 방법 : 제한경쟁입찰

□ 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약방식

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제43조 및 "협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규 제656호, 2023. 6. 16,. 일부개정)”에 의거, “협상에 의한 계약방식”을 적용

입찰공고

□ 공고방법 : 조달청 나라장터와 당행 홈페이지 공고

□ 공고기간 : “입찰공고”에 의함

입찰 참가자격

< 공통사항 >

□ 입찰마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 유자격자로서 아래의 자격중 하나를 갖춘 자

◦ 해외건설촉집법 제6조에 의한 해외건설업(건설엔지니어링업)

◦ 건설기술진흥법 제26조에 의한 건설엔지니어링업(종합) 또는 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반), 또는 건설엔지니어링업(설계,사업관리-설계 등 용역-일반)

□ 입찰마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」,「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 부정당업자에 해당하지 않는 업체 또는 기관

□ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청고시 제2024-1호, 2024.1.19.)에 의하여 입찰일 전일까지 조달청 경쟁입찰참가자격 등록을 마친 업체 또는 기관

□ 공동도급이 가능하며, 이 경우 “공동계약운용요령(기획재정부 계약예규 제651호, 2023. 6. 16.)”에 명시된 공동이행방식 적용

◦ 단, 공동도급의 경우 입찰 의사를 전달한 업체 또는 기관에 한하여 대표사 자격이 부여되며, 입찰 의사를 전달하지 않은 업체 또는 기관은 공동도급의 참여사로만 입찰 참여 가능

□ 입찰등록(제안서 제출) 마감일 기준 당행 컨설턴트 Pool의 ‘철도’ 분야에 등록된 업체 또는 기관

◦ 공동도급의 경우, 모든 구성원이 등록되어 있어야 함

◦ 당행 EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) - 「사업정보」-「해외원조시장 입찰정보」-「컨설턴트 신청/관리」메뉴 이용

< 실적 및 역량 >

□ 입찰공고일 기준(2024. 2. 20) 최근 10년간 준공된 실적 중 아래 유사사업*에 해당하는 예비타당성조사, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계 등 컨설팅업무 수행실적 보유 업체 및 기관

* 유사사업 : 국내외 지하철, 일반철도, 광역철도, 고속철도, 도시철도 및 경전철 신설이 포함된 사업(개·보수 사업 제외)

※ 공동도급으로 상호 실적 보완 가능

< 기타사항 >

□ 당행 계약관련 내규에 의거하여 계약의 투명성 및 공정성을 위하여 아래 각 호에 해당하는 업체는 계약상대자가 될 수 없음. (단, 사업목적 달성을 위한 불가피한 경우는 예외로 함)

당행을 퇴직한 후 2년이 지나지 않은 퇴직자를 고용한 업체로서, 퇴직자가 당행의 입찰 또는 계약과 직접 관련된 업무를 담당하고 있는 업체

당행의 현직 임직원이 설립한 업체

◦ 위에 따라 계약 상대자의 자격이 제한되는 기간은 아래와 같음.

퇴직자가 당행을 퇴직한 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체와의 고용관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

현직 임직원이 당행을 퇴직하는 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체에 대한 지배관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

※ 서식 16 「퇴직자 영입현황 확인서」제출

□ 본 입찰은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청고시 제2023-18호, 2023.6.26.) 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함

□ 당행이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자는 입찰참가자격이 결격 처리됨

□ 기타 입찰등록 마감일 현재 당행 규정 및 국가계약법상 하자가 있거나, 전국은행연합회의 “신용정보관리규약”에서 정하는 연체, 대위변제･대지급, 부도, 관련인에 의한 신용거래정보 및 금융질서문란정보의 등록대상자, 국세 및 지방세 체납기관 등은 입찰에 참가할 수 없음

□ 국가계약법 제27조, 동법 시행령 제76조에 따른 부정당업자(입찰참가자격 제한) 상태인 자는 동 입찰에 참여 불가

□ 국가계약법 제27조의5 및 동법 시행령 제12조 제3항에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 동 입찰에 참여 불가

◦ 입찰자는 동법 시행령 제12조 제3항 각 호에 해당하지 아니한다는 서약서를 입찰시 제출하며, 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약의 해제‧해지를 당할 수 있고 부정당업자 입찰참가자격제한처분을 받을 수 있음

입찰참가 등록 및 제안서 제출

□ 제출기한 : “입찰공고”에 의함

□ 접수장소 : 한국수출입은행 1층 로비 (고객접견실)

□ 구비서류 : “입찰참가서류” 및 “제안서류” 참조

□ 제출방법 : 참가서류를 구비하여 직접 방문접수 (우편접수 불가)

□ 문    의

◦ (수신) 최성일 책임심사역 (☎ 02-6255-5092, sichoi@koreaexim.go.kr)

◦ (참조) 박건록 심사역     (☎ 02-6255-5093, pglog@koreaexim.go.kr)

입찰시 유의사항

□ 공동수급체의 대표자가 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 상태인 경우에는 해당 공동수급체의 결격사유로 평가하며(제안서 평가를 종료 후 평가 당시 그 결격사유가 있었던 사실이 확인된 경우이거나 제안서 평가 종료 후부터 계약체결 전까지 결격사유가 발생하고 해소되지 않은 경우에도 같다), 공동수급체 구성원 중 부도, 부정당업자제재, 영업정지, 입찰무효 등의 상태인 자가 있는 경우에는 제안서 평가를 할 수 있다. 이 경우 출자비율 또는 분담비율은 입찰서 제출 마감일 전날까지 확정ㆍ제출된 비율로 하며, 결격사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율을 남은 구성원에게 배분하지 않는다.

◦ 위에 따라 공동수급체를 평가할 경우 결격사유 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율을 전체 사업에 대한 비율로 환산하여 기술능력평가점수에서 환산 비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다. 다만, 제안서 평가를 종료 후 평가당시 그 결격사유가 있었던 사실이 확인된 경우에는 감점처리한 후 재산정한 점수로 평가 절차를 다시 진행한다.

□ 입찰보증금의 납부 및 귀속

◦ 입찰보증서의 보증기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제55조(보증보험증권등에 의한 보증금 납부)에 따라 보증기간의 초일은 입찰서 제출마감일 이전이어야 하며, 보증기간의 만료일은 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후 일자이어야 함

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조(입찰보증금) 제2항에 따라 입찰보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부해야 하며, 동시행령 제3항에 해당하는 기관은 지급각서(서식 3) 제출로 입찰보증금 면제 가능

◦ 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정기일 내에 계약을 체결하지 않을시 입찰보증금은 당행으로 귀속됨

□ 입찰무효

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제11조에서 정한 유효한 입찰이 성립되지 않거나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 동법 시행규칙 제44조의 규정에 해당하는 입찰은 무효로 함

□ 기타사항

◦ 제안기관은 본 사업에 대한 제반사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

◦ 제안요청서의 내용과 상이하거나 제안요청서에 누락되어 있어도 본 사업의 수행에 필수적인 요건 또는 중요한 내용이라고 판단될 경우 제안자는 제안서에 그 내용을 기술하고 보완 대책 또는 해결방안을 제시하여야 함. 이 경우 구체적인 시행방안을 제시하여야 하며 이에 대한 제반비용은 제안자가 부담함

◦ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

◦ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

◦ 제안서는 허위나 단순 예상으로 작성하여서는 아니 되며, 모든 기재 사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 경우 심사대상에서 제외될 수 있음

◦ 사업자 선정과 관련한 제안요청 설명회(서면 또는 유선 질의응답 포함)에서 논의·답변 및 제안한 내용은 제안서와 동일한 법적 효력을 가짐

◦ 당행의 사전 승인을 득한 기준 소요 인력으로 사업을 시행하여야 하며, 변동이 있을시 필히 사전에 승인을 얻은 후 참여시켜야 함

◦ 계약서상 계약완료일까지 용역을 완료할 수 없는 경우, 지급할 용역 대가에 대한 제반 절차 및 방법을 특약으로 별도로 마련 예정

□ 본 용역에 고용된 업체(관계회사 포함)는 당해 사업의 공급자 참여에 제한될 수 있음. 다만, 일괄수주방식의 사업에 컨설턴트로서의 역할만을 수행할 목적으로 참여하는 경우에는 그러하지 아니함

제안서 평가방법

□ 평가위원회 구성

◦ 당행 내규에 따라 평가위원회를 구성(정량평가는 제안서 및 증빙서류를 기반으로 입찰 담당부서에서 평가)

□ 평가분야별 배점

◦ 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하며, 기술ㆍ가격평가 비중은 기술평가(90%)* + 입찰가격 평가(10%)임

* 용역수행을 위해 상당한 수준의 전문지식과 기술이 필요하고, 유사한 용역수행 경험이 중요한 점 등을 고려하여, 협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규 제656호, 2023.6.16.) 제7조 제2항에 따라 기술능력평가 배점한도를 10점 가산 조정하였음

□ 기술평가

◦ 기술능력평가는 세부항목별로 5등급(A, B, C, D, E)으로 평가하고, 이를 합산하여 제안서별로 점수 산정

◦ 평가등급별 점수

구 분	A	B	C	D	E
점 수	배점의 100%	90%	80%	70%	60%
(예시) 배점 10점	10	9	8	7	6

◦ 정량평가는 유사사업 수행실적, 참여인력의 경력 등에 대해 항목별 정량평가 세부평가기준을 적용

◦ 정성평가는 참여기관수에 따른 등급배분표(참고1)를 이용하여 상대평가

※ PM 대면평가는 제출한 입찰제안서 각 항목에 대해 사업이해도, 수행계획 등에 관한 질의응답을 실시하여 평가위원들이 절대평가함

※ PM 대면평가 항목 중 ‘영어구사능력’ 항목(대면평가 총 10점 중 2점 배정),  PM의 영어 Presentation(별도 PPT 불필요) 실시 후 질의응답으로 진행

* 제안서 실행계획 및 전략 중점발표

입찰제안서 세부평가기준

구분	평가항목	세부평가항목	배점	비 고
정량 평가	사업수행 실적	용역수행 건수	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		용역수행 금액	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 금액
		해외용역수행 건수	2.0	최근 10년간 해외용역 수행 건수
		소 계	10.0
	참여인력의 경험	사업수행책임자 자격	1.0	기술자등급 평가
		사업수행책임자 경력	2.0	해당분야 업무수행 년수
		사업수행책임자 실적	2.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		참여기술자 경력	5.0	해당분야 업무수행 년수
		참여기술자 실적	5.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		소 계	15.0
	재무구조 및 경영상태	신용평가등급	5.0	신용조회사* 또는 신용평가사**가 제안서 접수 마감일 기준 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음), 또는 기업신용평가등급 *「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8항의 3의 업무를 영위하는자 **「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3의 업무를 영위하는 자
	감점 가감점	-	-1)	(하단의 ‘정량평가 가감점표’ 참고)
	정량평가2) 소계		30.0
정성 평가 4)	사업내용 및 대상국의 이해	사업내용 이해	2.5	사업의 목적, 범위, 기대효과 등
		사업대상국 이해	2.5	대상국 현황, 관련계획, 대상지역 기능/특성 등
		소 계	5.0
	F/S 수행 계획	F/S 실행계획	7.0	F/S 추진전략 및 운영계획, 추진 일정, 용역 기본골격
		항목별 조사방법	6.0	분야별 조사계획 및 방법, 타당성분석 방안, 현장조사 방안
		현지 협력사 활용계획	4.0	유사사업 실적 보유 현지 하도급자 활용 계획
		위험요소 분석/대책	3.0	예상 위험요소 분석 및 대응방안
		F/S 관리방안	3.0	보고계획, 사후관리, 보안준수 방안 등
		영문보고서 작성계획	1.0	영문보고서 전문인력 활용계획 및 영문보고서 감수계획
		영문보고서 전문인력	1.0	영문 통번역전문가 자격 및 경력3)
		소 계	25.0
	조직·인력 현황 및 운용 계획	인력운용계획	5.0	참여조직도 및 전문가 투입계획
		투입인력의 경험 및 능력	5.0	유사사업 수행경험, 대상국 경험 등
		소 계	10.0
	원조효과성 제고를 위한 독창적 아이디어 및 방안 등		10.0	완공후 사업의 지속가능성 향상방안, 원조의 효과성 제고방안, TOR에 대한 의견/제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적․독창적 제안/과업수행방안, 사업별 특수사항 등
	PM 평가	사업이해도	2.0	사업의 목적, 범위, 대상국에 대한 이해 등
		수행역량	2.0	사업 수행역량 등
		위험요소관리능력	2.0	위험요소 대응 역량 등
		창의적 수행계획	2.0	사업 성공을 위해 필요한 독창적 수행계획 등
		영어구사능력	2.0	영어 Presentation 및 질의응답
		소 계	10.0
	정성평가 소계		60.0
기술능력평가 합계			90.0
주1) 가산·감점을 포함해 산출된 정량평가 득점은 정량평가 배점한도 30점이하로 제한 주2) 정성평가 항목은 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표(참고1)‘에 따라 상대평가(단, PM 대면평가는 절대평가) 주3) 통번역 전문가 자격 및 경력 요건 (필수) 통번역대학원 졸업자(수료는 미인정, 학위증 제출) (우대) ① 3년 이상 번역업무 경험자, ②유관업무분야(개발협력학, 개발경제학, 국제학, 경영, 경제 등) 전공자, ③영어권 대학 학사 이상 학위소유자 및 원어민, ④개발협력 유관기관 근무 경력자, ⑤개발협력 사업 통번역 경력자 * 통번역전문가의 증빙서류는 제출서류목록-③증빙서류에 포함하여 제출하고, 상기 필수 자격 미충족시 해당 입찰참여기관(대표사 및 참여사)는 결격 처리

1) 기술능력평가 세부평가항목 및 배점

※ 정량평가 가감점표

구분	평가항목	세부평가항목		배점	비 고
정량 평가	가점	중소기업		(1.0)	중소기업 지분율에 따라 최대 1.0점 가점
		신규 입찰자		(0.5)	EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
				(1.0)	입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점
		약자 기업1)	장애인기업 및 사회적기업2)	(0.3)	장애인기업, 장애인고용 우수기업 또는 사회적기업 인증을 받은 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.3점 가점
			여성기업2)	(0.3) (0.5)	존속기간 3년 미만의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.3점 가점 존속기간 3년 이상의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		창업기업1)		(0.5)	창업기업 확인서를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		MDB 유사사업 경험		(1.0)	최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여실적에 따라 최대 1.0점 가점
	감점	EDCF 부정당업자 제재(MDB제재 포함)		(△3.0)	입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자로 제재를 받고 있는 입찰자는 지분율에 따라 최대 3.0점 감점
		제안서 작성지침 미준수		(△2.0)	입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 건별 0.25점(최대 2.0점) 감점
	가감점	F/S용역평가결과		(4.0~ △4.0)	입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가 결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점
주1) 약자기업 및 창업기업 가점은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 중소기업자간 제한경쟁입찰, 지명경쟁입찰, 또는 「소프트웨어 진흥법」에 따라 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 제한되는 경우에 적용 주2) 약자기업 세부평가 항목은 중복하여 평가할 수 없으며, 그 중 높은 평점 한 가지만 적용 주3) 가산·감점을 포함해 산출된 정량평가 득점은 정량평가 배점한도 30점이하로 제한

2) 항목별 정량평가 기준

① 회사 유사사업 수행실적(10점)

- 입찰공고일 기준 최근 10년 이내에 완료된 아래의 국내외 유사사업*의 컨설팅용역** 중 계약금액 3억원 이상(총 용역금액) 실적에 대한 수행건수(4점), 금액(4점) 및 해외 용역건수(2점) 평가

* 유사사업 : 국내외 지하철, 일반철도, 광역철도, 고속철도, 도시철도 및 경전철 신설이 포함된 사업(개·보수 사업 제외)

** 컨설팅용역 : 예비타당성조사, 타당성조사, 기본설계 또는 상세설계 등
(ex, 조사·설계·물량산출 관련 과업이 모두 포함된 용역)

(i) 용역수행 건수

5건이상	5건미만 ~ 4건이상	4건미만 ~ 3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만
4.0	3.6	3.2	2.8	2.4

(ii) 용역수행 금액

70억원이상	70억원미만 ~ 60억원이상	60억원미만 ~ 50억원이상	50억원미만 ~ 40억원이상	40억원미만
4.0	3.6	3.2	2.8	2.4

(iii) 해외 용역수행 건수

3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만 ~ 1건이상	1건미만 ~ 0.2건이상	0.2건미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

※ 작성 및 증빙방법(회사 유사사업)

1. 실적증명서/기타 증빙서류상 본 입찰에서 요구하는 기술특성(형식, 연장 등)이 수행실적건 설계용역에 적용되었음을 확인할 수 있는 문구에 하이라이트처리 필수(비교안 설계건 인정 불가, 도면 등으로 대체 불가)

2. 과거 공동도급으로 참여한 실적은 참여지분율을 고려한 건수 및 금액으로 평가하고, 본건 사업에 공동도급으로 참여하는 경우 공동도급 구성원별로 유사사업 수행실적에 참여비율을 곱하여 산정한 후 합산

- 과거실적 규모(연장, 구조물 규모 등)는 참여지분율과 관계없음.

3. 해외 용역수행 실적은 준공건수별 참여지분율을 고려한 당해 용역비에 따라 가중치 부여

- 예, ‘C’실적, 총사업비 3억원, 참여지분율 60%, 당해 용역비 1.8억원 ☞ 0.4건 인정

구 분	10억원 이상	10억원 미만 ~ 5억원 이상	5억원 미만 ~ 2억원 이상	2억원 미만 ~ 5천만원 이상	5천만원 미만
비 율	100%	80%	60%	40%	20%

- (국외 공공기관 발주사업) 해외건설협회 또는 발주처에서 발급한 ‘시설공사 시공실적증명서’를 제출한 사업에 한하여 실적을 인정함 (EDCF 수행사업도 실적제출 필요)

- (국외 민간부문 발주사업) ‘※ 실적인정 기준’에 따른 증빙서류 제출 사업에 한하여 인정

[평가 예시 ❶] : 용역수행 건수/금액 평가항목 산출예시

ABC 컨소시엄 (지분율 : A사 50% + B사 30% + C사 20%)

- 제출실적

구분	사업명	지분율	금액 (억원)
A사	A-① △△ 외곽순환고속도로 건설 상세설계	80%	20
	A-② ○○ 연결 고속도로 건설 타당성조사	60%	10
B사	B-① □□ 교량 타당성조사	50%	15
	B-② ◇◇ 고속도로 기본 및 실시설계	70%	24
C사	C-① ☆☆ 지방도로 건설 예비타당성조사	90%	9

- 제출실적 평가

구분		제출실적		평가
		지분율	금액	건수	금액
A사	A-①	80%	20	80% × 1건 = 0.8건	80% × 20억 = 16억원
	A-②	60%	10	60% × 1건 = 0.6건	60% × 10억 = 6억원
	소계			1.4건	22억원
B사	B-①	50%	15	50% × 1건 = 0.5건	50% × 15억 = 7.5억원
	B-②	70%	24	70% × 1건 = 0.7건	70% × 24억 = 16.8억원
	소계			1.2건	24.3억원
C사	C-①	90%	9	90% × 1건 = 0.9건	90% × 9억 = 8.1억원
	소계			0.9건	8.1억원

- ABC컨소시엄 실적산정(지분율 : A사 50% + B사 30% + C사 20%)

ⓐ 실적건수 : [eqn: (1.4건` TIMES `50%)+(1.2건` TIMES `30%)`+`(0.9건` TIMES `20%)] = 1.29건

ⓑ 평가금액 : [eqn: (22억원` TIMES `50%)+(24.3억` TIMES `30%)`+`(8.1억원` TIMES `20%)] = 19.91억원

[평가 예시 ❷] : 해외 용역수행 건수 평가항목 산출예시

ㄱㄴ 컨소시엄 (지분율 : ㄱ사 70% + ㄴ사 30%)

- 제출실적

구분	사업명	지분율	금액 (억원)
ㄱ사	ㄱ-① 해외 △△ 외곽순환고속도로 건설 상세설계	30%	10
	ㄱ-② 해외 □□ 교량 건설 상세설계	70%	5
ㄴ사	ㄱ-① 해외 △△ 연결도로 건설 타당성조사	100%	12
	ㄱ-② 해외 □□ 고속도로 건설 기본설계	60%	7

- 제출실적 평가

구분		제출실적		평가
		지분율	금액	지분금액	건수	합산
ㄱ사	ㄱ-①	30%	10	10억 × 30% = 3억	0.6건	1.2건
	ㄱ-②	70%	5	5억 × 70% = 3.5억	0.6건
ㄴ사	ㄴ-①	100%	12	12억 × 100% = 12억	1.0건	1.6건
	ㄴ-②	60%	7	7억 × 60% = 4.2억	0.6건

- ㄱㄴ컨소시엄 실적산정(지분율 : ㄱ사 70% + ㄴ사 30%)

⦁ 합산건수 : [eqn: (1.2건` TIMES `70%)+(1.6건` TIMES `30%)] = 1.32건

⦁ 해외용역건수 1건이상 ~  2건미만 해당 ⟹ 1.6점

② 참여인력의 경력 및 유사사업 수행실적(15점)

- (PM) 공동도급의 경우 PM은 대표사에 소속되어야 하며, PM의 자격, 해당분야 경력년수 및 입찰공고일 기준 최근 10년간 국내외 유사사업* 중 계약금액 3억원 이상(총 용역금액) 준공된 컨설팅용역 실적건수에 대한 평가 (5점)

- (참여인력) 참여인력(서식7 참조)의 자격, 해당분야 경력년수 및 입찰공고일자 기준 최근 10년간 국내외 유사사업* 중 계약금액 3억원 이상(총 용역금액, 단, 철도운영 인력의 경우 5천만원 초과) 준공된 컨설팅용역 실적건수에 대한 담당분야별 평가 (10점)

* 평가대상 인력의 분야별 유사사업 인정범위

분 야	유사사업 인정범위
1. PM	국내외 지하철, 일반철도, 광역철도, 고속철도, 도시철도 및 경전철 신설이 포함된 사업(개·보수 사업 제외)
2. 철도
3. 교통
4. 구조
5. 토질·지반
6. 터널
7. 수리·수문 8. 신호·통신
98. 차량기지·건축환경·사회
109. 환경·사회건축
	국내외 철도분야 운영관련 연구 등 경력(1)국내외 지하철, 일반철도, 광역철도, 고속철도, 도시철도 및 경전철 신설이 포함된 사업(개·보수 사업 제외) 또는 (2)국내외 [건축법시행령 별표1]에 따른 8. 운수시설 또는 기타분야 신설이 포함된 사업
110. 철도운영	국내외 철도분야 운영관련 연구 등 경력

※ 단, 위의 분야책임자를 제외한 참여인력은 본 정량평가(참여인력의 경력 및 유사사업 수행실적) 대상에서 제외되며, 비전담인력과 함께 정성평가 ‘조직·인력현황 및 운용 계획’ 항목에서 평가됨(서식 7의 ‘-참여자‘ 항목 참고)

(i) PM 자격(1점)

기술사*	특급기술자	고급기술자
1.0	0.8	0.6

* 기술사의 경우 ‘철도기술사‘만 인정. PM의 경우 타 사업의 PM을 겸하지 않는 자.

(ii) PM 경력(2점)

15년이상	15년미만 ~ 13년이상	13년미만 ~ 11년이상	11년미만 ~ 9년이상	9년미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

(iii) PM 실적(2점)

10건이상	10건미만 ~ 7건이상	7건미만 ~ 5건이상	5건미만 ~ 3건이상	3건미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

(iv) 전담기술자 경력(5점)

10년이상	10년미만 ~ 9년이상	9년미만 ~ 7년이상	7년미만 ~ 5년이상	5년미만
5.0	4.5	4.0	3.5	3.0

(v) 전담기술자 실적(5점)

8건이상	8건미만 ~ 7건이상	7건미만 ~ 5건이상	5건미만 ~ 3건이상	3건미만
5.0	4.5	4.0	3.5	3.0

※ 작성 및 증빙방법 (참여인력)

1. 참여인력 실적은 아래에 한하여 평가함

①한국건설기술인협회에서 발급한 “참여기술인 경력사항(P.Q) 확인서” 또는
②발주처가 발급한 “참여기술자 실적증명서” 혹은 이에 준하는 사업참여 확인서류(계약서 등) 또는
③“건설기술인 경력증명서”상 동일사업 참여기간 합계 인정일이 30일 이상인 사업

2. PM 및 전담기술자의 경력은 “건설기술인 경력증명서”의 “전문분야별 참여일수 현황”에 명시된 일수에 의해 금번 용역 포지션에 해당하는 전문분야는 100%인정하고, 기타 분야는 60% 인정함.

3. 2인 이상 참여하는 분야의 경우, 경력 및/또는 기술자등급이 높은 인력이 분책 담당

4. 분야별 전담기술자에 대한 평가는 아래 기술등급별 가중치를 적용하여 산출한 결과를 합산

- 기술등급별 가중치

기술사 급	특급	고급	중급	초급	기타
100%	90%	80%	70%	60%	50%

- 분야별 전담기술자의 평가는 각 참여자별 경력/건수를 평균하여 계산하며, 1인 최대 10년/8건 초과 시 10년/8건으로 인정

* 예) 분책(특급)의 원 경력년수 12년 x 특급(90%) = 10.8년 → 10년 인정

공통사항

0. 외부로부터 과업을 수주하여 직접 수행한 실적만 인정

- 내부자체 수행실적 및 발주처로서 사업관리 성격의 수행실적은 인정하지 않음

- 모든 제출 실적에 대해서 용역내용 확인이 가능한 발주처가 발급한 실적증명서를 반드시 첨부해야 함

1. 실적증명서/기타 증빙서류상 본 입찰에서 요구하는 기술특성(형식, 연장 등)이 수행실적건 설계용역에 적용되었음을 확인할 수 있는 문구에 하이라이트처리 필수(비교안 설계건 인정 불가, 도면 등으로 대체 불가)

2. 아래의 경우 유사용역 수행실적으로 인정하며, 해당 서류를 증빙으로 제출(미제출시 서류 보완요청 없이 불인정)

구분		제출 증빙서류
설계․시공 일괄입찰 또는 대안입찰방식	낙찰자	낙찰자로 결정된 증빙서류, 낙찰자와 계약한 서류
	설계보상 대상자*	설계보상 대상자 확인 서류(보상금액 포함)
｢사회기반 시설에 대한 민간투자법｣에 의한 사업시행자 발주 설계용역		사업시행자 지정공문, 사업시행자와 설계용역사간 체결한 계약서류, 사업시행자가 확인한 설계 완료 증빙자료

* 설계보상 대상자로 선정된 경우, 유사사업 수행실적의 건수에 대해 실시설계적격자의 80%만 인정하며, 유사사업 수행실적 금액에 대해 설계보상 금액으로 인정하며, 참여인력 실적에 대해서는 불인정

3. ‘2’에 해당하지 않는 민간부문 발주실적의 경우 아래의 방법으로 증빙(미제출시 서류 보완요청 없이 불인정)

구분	제출 증빙서류
국내	⒜ 발주처의 용역이행 실적증명서 또는
	⒝ 용역 계약서 및 세금계산서
해외	⒜ 해외건설협회의 실적 증명서 또는
	⒝ 발주처의 용역이행 실적증명서 및 용역 계약서

4. 유사실적 제외사업

- 조사, 설계 및 물량산출이 포함되지 않은 각종 용역(기본계획, 마스터플랜, 정밀점검, 성능개선, 내진보강, 설계감리, 교육훈련 등),

- 각 협회의 시장개척 지원사업,

- 단순 현지조사(측량/지질조사), 수량․도면작성 용역,

- 연구용역(연구용역 중 기술부분도 실적에서 제외),

- 교통/환경 등 영향평가용역, 시공감리 및 용역이 완료되지 않은 기성실적
(단, 설계와 시공감리가 같이 포함된 사업 등의 경우에는 전체 용역이 완료되지 않았지만 설계완료 사실을 확인할 수 있으면 인정)

- 소속사 또는 소속기관에서 외부용역을 발주하여 외부 컨설턴트가 업무를 수행하고 감독업무를 수행한 사업(컨설팅 용역을 직접 수행하지 않은 경우)의 경우, 감독업무를 수행한자가 본 건에 사업책임기술자(PM)로 참여하는 경우에 한하여 업무의 유사성을 고려하여 인정함. 그러나, 해당 인력이 분야별 책임기술자 및 참여기술자로 참여하는 경우에는 실적으로 인정하지 않음

5. 다년간 수행한 사업(연차계약)의 경우, 단일 실적(1건)으로 실적 인정함

6. 기본 및 실시설계가 함께 포함된 실적의 경우 2건이 아닌 단일 실적(1건)으로 인정

7. 설계와 감리가 함께 포함된 실적의 경우, 전체 용역이 완료되지 않더라도 설계가 완료되어 이를 확인할 수 있으면 실적으로 인정함.

- 실적증명서상 설계용역 금액을 분리하여 제시 필요(미분리시 실적건수만 인정)

8. 실적증명서 상 과거실적 금액이 원화가 아닌 다른 통화로 명시되어 있는 경우, 해당 실적 계약일 환율(KEB 하나은행 고시 최종 매매기준율) 적용

9. 개별 실적에 대한 인정 여부는 제안서 평가 과정에서 결정하므로, 그 이전 답변 불가하며, 본 제안서 요구 실적과 무관한 실적제출은 감점 대상

※ 실적인정 기준

③ 재무구조 및 경영상태 (5점)

구 분		A등급	B	C	D	E
신용 평가 등급*	회 사 채	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
	기업어음	A2- 이상	A2- 미만 A3- 이상	A3- 미만 B0 이상	B-	C 이하
	기업신용평가	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
등급별 배점		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
*「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8항의 3 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 제안서 접수 마감일자 기준 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음) 또는 기업신용평가등급 - 공동수급의 경우 각 구성원별로 신용평가등급 해당점수에 참여비율을 곱하여 합산 - 신용평가등급 서류 미제출 또는 유효기간이 만료된 등급 서류 제출시 최저 등급으로 평가

3) PM 대면평가 기준

구 분	A등급 (최우수)	B등급 (우수)	C등급 (보통)	D등급 (미흡)	E등급 (부족)
사업이해도	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
수행역량	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
위험요소관리능력	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
창의적 수행계획	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
영어구사능력	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
계	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

◦ PM 대면평가는 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표’ 적용하지 않고 절대평가함

◦ PM 대면평가는 제출된 제안서에 대한 평가위원들의 질문으로 진행

- 영어구사능력 평가는 PM의 영어 Presentation 실시 후 평가위원들의 제출된 제안서에 대한 질의응답으로 진행 (별도 PPT자료 불필요)

◦ PM 대면평가 일정은 제안서 마감 후 개별 통보 예정

◦ 당행이 인정하는 불가피한 PM 부재 사유*에 해당하는 경우에 한하여 대리인이 PM을 대신하여 대면평가에 참석 가능하며, 해당 평가항목은 최저등급(E등급, 6점)을 적용

* 사망, 천재지변 등(출장, 휴가 등의 사유는 불인정)

◦ 당행이 인정하는 불가피한 PM 부재 사유에 해당하지 않는 이유로 PM이 대면평가(총 10점)에 불참할 경우에는 0점으로 처리

4) 가산·감점 부여기준

◦ (가감점 일반) 가점감점을 포함한 정량평가 점수는 배점한도(30점)를 초과하지 아니함

◦ (중소기업 가점) 중소기업* 참여비율에 따라 최대 1.0점 가산점 부여(정량평가)

*「중소기업기본법」에서 정의하는 중소기업을 의미함.

중소기업 가점 = 1.0(점) × [eqn: {중소기업``지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (신규 입찰자 가점)

i) EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점 부여

i) 미수주자 가점 = 0.5(점) ×  [eqn: {미수주자``지분율(%)} over {100(%)}]

ii) 입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여

ii) 신규입찰자 가점 = 1.0(점) × [eqn: {신규``입찰자``지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (장애인기업 및 사회적기업 가점) 장애인기업*, 장애인고용 우수기업** 또는 사회적기업*** 인증을 받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.3점

* 장애인기업활동 촉진법에서 정한 기업으로서, 중소벤처기업부 장관(위임받은 자를 포함)에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

** 장애인고용촉진 및 직업재활법 제24조에 따른 장애인고용 우수사업주로 해당부처에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

*** 고용노동부장관(또는 위임 받은 자)으로부터 사회적기업 인증을 받은 기업

장애인·사회적기업 가점  = 0.3(점) ×[eqn: {장애인````또는````사회적기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (여성기업 가점) 존속기간*이 확인되는 여성기업**의 지분율에 따라 최대 0.3점(존속기간 3년 미만) 혹은 0.5점(존속기간 3년 이상)

* 법인인 경우 법인등기부등본, 개인사업자인 경우 사업자등록증상 여성대표자로서 그 유지기간(연속되어 있어야함)을 확인하여 평가

**「여성기업 지원에 관한 법률」및 같은 법 시행령에 따라 중소벤처기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘여성기업 확인서’를 발급받은 기업으로서(중소기업제품 공공구매종합 정보망에 등재된 자료로 확인), 그 존속기간을 확인할 수 있는 기업

i) 존속기간 3년 미만 여성기업 가점 = 0.3(점) × [eqn: {여성기업`지분율(%)} over {100(%)}]

ii) 존속기간 3년 이상 여성기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {여성기업`지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (창업기업 가점) 창업기업* 확인서**를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점

*「중소기업창업 지원법」제39조(창업기업의 확인 등) 및 동 시행령 제15조에 따라 중소벤처기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘창업기업 확인서’를 발급받은 기업

** 확인서는 입찰공고일 기준 유효해야 하며, 유효기간이 정해지지 아니한 경우 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내 확인받은 것에 한함. (단, 사후관리 등을 통하여 유효기간이 연장되는 경우 그 기간까지를 유효기간에 포함)

창업기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {창업기업`지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (MDB 유사사업 경험 가점) 최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여 건수에 따라 최대 1.0점 가점 부여

MDB 유사사업 경험 가점 = PM의 MDB 유사사업 참여실적에 따른 구간별 가점

참여사업 건수	점수
5건 이상	1.0점
4.0건 이상 5.0건 미만	0.8점
3.0건 이상 4.0건 미만	0.6점
2.0건 이상 3.0건 미만	0.4점
1.0건 이상 2.0건 미만	0.2점

◦ (EDCF 부정당업자 제재 감점) 입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자*로 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross debarment)를 받고 있는 입찰자는 그 지분율에 따라 최대 3.0점 감점

* EDCF 부정당업자 제재기준이 정하는 부패 또는 부정행위에 관여했다고 인정되는 기업, 기관, 단체를 의미

EDCF 부정당업자 제재 감점 = 3.0(점) × [eqn: {부정``당업자````지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (제안서 작성지침 미준수 감점) 입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 최대 2점 감점(서식 21 ‘제안서 작성지침 위반사항(예시)’ 건별 0.25점, 기타의 경우 0.1점 감점)

◦ (F/S 용역 평가결과 가감점) 입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가*결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점

* 재평가를 포함하며 재평가시 기존평가 결과는 제외

F/S 용역 평가결과 가감점 = Σ 입찰자별 가감점 × [eqn: {입찰자별`지분율(%)} over {100(%)}]

5) 가격평가 기준

입찰가격평가는 계약예규(제656호, ‘23.6.16자, 협상에 의한 계약체결 기준)상 입찰가격 평점산식을 이용하여 평가

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점 = 입찰가격평가 ~배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]
[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-당해입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의70%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의
100분의 70 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* SW 사업 및 「소방장비관리법」에 따른 소방장비, 「경찰관 직무집행법」에 따른 경찰장구, 「해양경찰장비 도입 및 관리에 관한 법률」에 따른 해양경찰장비, 「군수품관리법」에 따른 군수품으로서 소방·경찰·해양경찰·군의 안전 관련 물품 구매·제조의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점
다섯째자리에서 반올림함

협상대상자 선정 및 협상 절차

협상대상자 선정

제안요청서에 부합하는 제안서를 제출한 제안자의 기술능력 평가점수(90점) 기준으로 85% 이상 득점한 업체를 협상적격자로 선정하고, 협상적격자 중 기술과 가격의 합산점수가 가장 높은 순으로 협상에 의하여 선정

※ 기술능력 평가점수 76.5점(90점의 85%)미만의 업체는 가격평가 대상에서 제외

※ ‘협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규 제656호, 2023. 6. 16. 일부 개정)’ 제9조에 따라 협상적격자 앞 서면 통보

합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

협상대상자 중 기술‧가격의 종합평점이 가장 높은 자를 우선협상대상자로 지정하여 협상하고 결렬 시 차순위와 협상

협상절차

협상은 당행이 정하는 절차와 일정에 따라 진행됨

협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상기간 내에 협상대상자와 협상이 성립된 경우 최종낙찰자로 선정하고 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함

협상은 기술조건 합의 및 당행이 요구하는 사항에 근거하여 진행

협상 중 당행이 어떠한 자료를 요구하더라도, 제안자는 당행의 자료 요구에 성실히 응해야 하며, 만약 제안자가 정당한 사유 없이 동 요구 자료를 제출하지 못하거나 제출을 거부하는 경우 당행은 동 제안자를 협상대상에서 제외할 수 있음

협상대상자가 협상에 불성실하게 임하거나 협상을 고의로 지연시키는 등 문제가 있다고 판단될 경우 당행은 협상이 결렬된 것으로 간주

협상이 성립되지 않을시 차 순위 협상적격자와 협상을 실시

모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음

협상내용과 범위

협상대상자가 제안한 사업추진 계획 및 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 본 입찰제안서에 명시되지 않은 사항이 주요 현안이 되는 경우 상호협의에 의하여 결정

가격협상 기준 가격은 당행 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 하되, 기술협상에서 제안내용의 가감조정이 있는 경우 제안가격을 가감 조정할 수 있음

최종낙찰자 유의사항

□ 당행은 다음의 과업수행 내용을 수시로 확인할 권한을 가지며, 과업수행업체는 이에 적극 협조하여야 함

◦ 인력투입현황, 과업수행현황 및 기타 확인이 필요한 사항

□ 최종낙찰자는 중요 결정사항이 있을 경우에는 수시로 당행과 협의하여 보고회를 실시하여야 하며, 당행의 요구를 충분히 반영하여야 함

□ 계약 체결 후 14일 이내에 보안각서 및 기타 필요한 서류를 첨부한 “과업수행계획서(Inception Report)”를 작성하여 발주자의 승인을 받은 후 과업에 착수하여야 함

□ 최종낙찰자는「엔지니어링산업진흥법」에 의거, 과업수행에 필요한 손해배상보험(공제)에 가입하고 용역 완료 전 관련서류를 당행에 제출하여야 함.

□「인지세법」에 의거, 최종낙찰자는 계약체결시 계약서 작성 및 소유에 따른 수입인지를 당행에 제출하여야 함

◦ 해당 법령에 의거, 계약서 원본(Original) 부수에 따라 개별 납부

- 예) 3개사 JV = 2개사 원본 요청(인지세 개별 납부) + 1개사 사본(인지세 미해당)

□ 최종낙찰자는 당행의 요청시 용역 추진내용을 보고하며 각 과업성과물에 대한 보고회를 실시하며, 최종보고는 용역완료 전에 실시하여야 함

□ 하자보증기간(완료 후 12개월) 중 본 용역과 관련된 사항에 대하여 재검토와 보완이 필요한 경우 비용청구 없이 즉시 시정 조치하여야 하며 보완 결과를 서면으로 제출하여야 함

□ 용역수행 중 최종낙찰자의 귀책사유로 발생한 모든 문제에 대한 책임은 최종낙찰자에 있으며, 당행이 입은 손해에 대하여 배상하여야 함

□ 본 용역수행 중 투입인력은 교체할 수 없는 것을 원칙으로 하되 퇴직, 질병 등 부득이한 사유발생 시에는 당행과 협의하여 승인을 득한후 동급 상당의 인력으로 교체하여야 함

□ 과업수행으로 인하여 취득 및 생산된 각종 조사자료와 일체의 산출물은 당행의 소유이며, 당행의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업이외의 목적에 사용할 수 없음

기타사항

□ 중소기업이 입찰에 참여한 경우 중소벤처기업부에서 발급한 ‘중소기업 확인서(공공기관 입찰확인용)’ 사본을 제출할 것

□ 장애인기업, 장애인고용 우수기업, 사회적기업, 여성기업 인증은 관계기관이 발급한 확인서, 인증서 등 공적 서류 사본을 제츨할 것

□ 제안서 평가에 있어서 불명확한 부분이 있거나 보완설명이 필요한 경우 제안서 설명을 요청할 수 있으며 해당기관은 이에 응하여야 함

□ 제출된 제안서 및 관련서류 일체는 반환되지 않으며 제안요청서, 입찰유의사항 등을 숙지한 후 입찰에 참여할 것

□ 필요한 경우 당행은 제안서 제출 마감 전까지 입찰과 관련된 내용에 대하여 수정‧변경할 수 있음.

용역결과 평가/활용

□ 용역완료 후 1개월 이내, 내부기준에 따라 용역 참여인력·보고서 품질·용역관리 등에 대한 평가가 이뤄지며, 동 평가결과가 후속 EDCF F/S 입찰평가시 가감점에 반영 됨.

□ 공동도급의 경우, 공동평가 예정

<평가점수별 가감점 매칭>

평가점수	가감점
-100점 이상 ~ -76점 이하	-2점
-76점 초과 ~ -52점 이하	-1.5점
-52점 초과 ~ -28점 이하	-1점
-28점 초과 ~ -4점 이하	-0.5점
-4점 초과 ~ +20점 이하	0점
+20점 초과 ~ +43점 이하	+0.5점
+43점 초과 ~ +66점 이하	+1점
+66점 초과 ~ +89점 이하	+1.5점
+89점 초과 ~ +112점 이하	+2점

대항목	중항목	소항목	가중치
인력평가 (20개 항목, 45점 배점)	PM (PM:OOO)	인력투입계획 준수	2
		각종 회의 참석 여부/진행능력	2
		해당분야 전문성/사업 이해도	2
		사업실시기관과의 협력	2
		당행 담당직원과의 협력	2
		F/S 방향(사업계획) 수립시 역할	2
		F/S 참여인력 관리/공동수행사 조율능력	2
		각종 보고서 검토 및 작성 능력	2
		커뮤니케이션/외국어능력	3
	Key Staff	인력투입계획 준수	2
		각종 회의 참석 여부	2
		해당분야 전문성/사업 이해도	3
		담당분야별 사업기본계획 적정성	3
		보고서 작성 및 검수 능력	3
		커뮤니케이션/외국어능력	2
	상주인력	상주인력 선임 및 활용정도	3
		현지활동 및 각종 자료조사 충실도	2
		사업실시기관과의 협력체계	2
		EDCF 현장사무소와의 협력 체계	2
		커뮤니케이션/외국어능력	2
보고서평가 (12개 항목, 35점 배점)	사업수행계획서	사업수행계획서(착수보고서) 적정성	2
	중간보고서	보고서 구성의 적정성	3
		가독성/수정보완 필요성	3
		영문보고서 품질	3
	최종보고서 (초안포함)	보고서 구성의 적정성	3
		가독성/수정보완 필요성	3
		영문보고서 품질	3
		당행의 요구사항 반영	3
		사업실시기관의 요구사항 반영	3
	사업비 산출내역	사업비 구성 내역의 적정성	4
		단가조사 방법의 적정성	3
	출장결과보고서	출장결과보고 적정성	2
관리현황평가 (10개 항목, 20점 배점)	일정관리	사업수행일정	2
		출장일정	2
		회의 개최 일정	2
		보고서 제출 일정	2
	신청행위 적정성	승인요청/신청행위 적정성	2
	리스크관리	리스크 대응체계	2
		리스크 해결 방안의 적정성	2
		사회적 물의	2
		안전관리	2
		정보보호	2
과업난이도평가 (3개 항목, 9점 배점)	(추가 가점)	수원국 FS 이견	3
		수원국 자료 비협조	3
		기타 어려움	3
심사수행 협조	(추가 가점)	EDCF 심사수행 협조도 (해당시)	3
합 계			112
평가 의견 :
주1. 비평가 항목 또는 정보가 없는 항목은 보통으로 평가 - 각 항목별로 5단계로 구분하여 평가 실시(우수[+100%], 양호[+50%], 보통[0%], 다소미흡[-50%], 미흡[-100%]) 주2. PM이 없는 참여사를 개별평가시 동 참여사의 leading staff을 PM으로 간주하여 평가

Ⅲ. F/S 대상사업 및 과업범위

당행 발주 F/S 추진배경 및 목적

대외경제협력기금(EDCF) 지원 대상사업에 대한 EDCF 주도의 사업발굴을 통한 사업 진행과정에 대한 투명성 및 공정성 제고

지원 요청사업에 대한 사업타당성조사 및 기본 설계개념 도출을 통한 원활한 사업추진 도모

본 사업 추진배경

□ 방글라데시는 높은 인구 밀도와 대중교통 시스템 부족으로 교통 혼잡 문제가 발생하고 있음. 이에, 방글라데시 정부는 다카시와 인접지역의 대중교통 시스템 개선을 위해 MRT(Mass Rapid Transit) 도입 등을 내용으로 하는 전략적 교통계획*을 수립하였음.

* Revised Strategic Transport Plan 2015-2025

□ ‘방’ 정부는 전략적 교통계획에 따라 6개의 MRT 노선*을 건설할 계획이며, 이 중 MRT 4호선을 복합금융 (EDCF+EDPF) 방식으로 지원할 것을 요청해 왔음.

* 6호선, 1호선, 5호선 북부, 5호선 남부, 2호선, 4호선

F/S 대상 사업개요

사업목적

◦ 방글라데시 다카 및 인근지역의 교통 정체 해소 및 빠르고 안전하고, 친환경적인 대중교통 시스템 구축

사업범위

◦ 메트로 4호선 구간 건설 (연장 16km, 6개 역사, 터널 10km, 교량 0.4km, 토공 5.6km)

◦ 차량기지, 전동차, 신호·통신 시스템 공급, 컨설팅서비스 등

추정사업비 : USD 33억불(잠정)

◦ 사업비는 EDCF, EDPF, 방글라데시 정부 부담 등으로 조달 예정

* 사업범위 및 추정사업비 등은 F/S 수행 과정에서 현지조사 결과, 수원국 및 당행과의 협의 등에 따라 변동 가능

□ 사업실시기관 : 방글라데시 다카메트로공사
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)

◦ ‘13년 6월 다카시 및 인근 지역의 도시교통 수요 충족 목적으로 MRT 시스템의 계획, 조사, 설계, 개발, 건설, 자금조달 등을 위하여 설립된 정부 소유 기업

□ 사업실시지역 : 다카시 내 Kamlapur∼Madanpur를 통과하는 노선

◦ 주요 노선: Kamlapur– Jatrabari – Signboard – Chattogram Road – Kantchpur Bridge - Madanpur

< 사업실시지역 >

F/S 및 기본설계 과업범위: (별첨의 영문 TOR 범위 포함)

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음.

※ F/S 과업수행 시 아래의 자료 참고 필요

- EDCF F/S 작성지침(’23. 12)

◦ EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) -「정보공개」-「서류/서식」-18번 게시물(EDCF Feasibility Study Guideline) 참고

주요 과업내용

기초자료 수집 및 분석

교통수요 조사 및 장래 교통수요 예측

현황조사

현장 세부조사

관련법 및 제기준 정립, 설계기준 설명서

과업노선 주변 측량

노선선정 및 계획

지상 및 지하 지장물(유틸리티 포함) 확인 및 이전계획 수립

토공 및 궤도계획

구조물계획(터널, 교량 등)

차량기지계획

건축계획(정거장 및 차량기지)

시스템계획(현용 설비와 비교검토 포함)

차량시스템계획(차량제원 및 수량 포함)

운영 및 관리 (Operation & Maintenance, O&M) 마스터 플랜

역량강화 계획

대중교통지향형 개발(Transit Oriented Development, TOD) 계획(역사 Plaza 포함)

환경사회영향 분석

기후변화영향 분석

기본설계(Basic Design)

사업실행계획

사업비산출

경제적(B/C, NPV, IRR 등) 및 재무적(재무편익, 비용 분석, FIRR 산출, 민감도 분석 등) 타당성 검토

초청연수 계획 및 시행

EDCF/EDPF 사업을 위한 검토 항목

성과품 작성 등

[Part 1] 사업개요 및 추진배경 검토

본 용역(FS 및 기본설계 용역) 과업개요 요약

과업수행 배경, 과업의 목적

과업 수행범위, 과업기간, 과업 이해관계자 등

본사업(메트로 4호서 건설공사) 개요 요약

사업배경, 사업의 목적 및 필요성

사업실시지역, 사업범위, 사업기간, 사업비

사업의 기대효과 및 사업지원 효과 등

[Part 2] 일반현황 및 관련계획 조사

사업 추진배경 및 필요성

사업추진배경 및 추진목적

정책적 필요성 : 국가적 측면(거시적), 사업지역적 측면(미시적)

기술적 필요성 : 국가적 측면(거시적), 사업지역적 측면(미시적)

사업지원시 기대효과 등 : 국가적 측면(거시적), 사업지역적 측면(미시적)

기초자료 수집 및 분석

사회․경제적 현황분석 및 관련계획 조사․분석

- 사회․경제지표 등 교통관련 자료분석, 직접 및 간접 대상지역의  인구․고용․산업․교육 등 수송수요에 영향을 미칠 수 있는 주요 사회․경제적 자료를 수집 분석하여 장기간에 걸친 과거의 추세 변화를  파악하고 장기 경제계획 지표 및 정책목표를 토대로 본 과업과 관련된 모든 사항의 분석 및 전망

- 대상지역의 토지이용계획, 도시기본계획, 지역개발계획, 교통수요를 유발시키는 공단 개발계획, 대규모 위락시설계획 등 관련계획의 개발방향을 분석하고, 장기 철도망 정비계획과 주변 도로망의 신설 및 확장, 택지개발 등 개발계획 분석

- 신설역에 대한 역세권, 향후 발전계획, 수요유발 등을 분석하여 역신설 타당성 검토

- 관련계획 : 국가차원의 상위계획, 대상지역의 개발계획, 도시철도 관련 계획, 기타 교통 관련 계획 등(JICA 및 MDB에서 진행중인 MRT 1,2,3,5,6호선 등)

교통 현황조사 및 분석

- 장래의 시설기준, 애로구간 판단 및 시설용량 등의 설정을 위해 철도․도로․항공 등 수송수단별로 현재의 시설상태, 운영체계, 수송능력, 한계용량 도달시기 및 연계 교통체계 등 조사분석

- 교통수단별 특성과 역할을 정립하기 위하여 교통량은 당해 지역내의 수단별 통계자료 및 기존 관련조사  보고서를 활용하고 차종별, 방향별 통과량에 대한 교통량 조사 분석

- 기존의 여객 이용실태를 감안한 장래 수송체계를 수립하기 위하여 수단별, 여객별 지역간 시․종점을 조사

- 새로운 교통체계의 도입 및 개선에 따른 여객 성향조사, 이용실태 조사를 통하여 차종별 평균 승차인원, 수단별 통행량 및 새로운 수단에 대한 전환율 분석

- 철도, 공로, 항공 등 수단별 운행비용 및 물류 시간가치 분석

- 메트로 관련 정책 및 관련예산 현황 조사

최근 측량조사 및 지형지질조사 자료 등 수집

- 사업실시지역 인근 건설중인 교량 및 터널 공사 자료 확보 및 조사․분석

- JICA 및 MDB 발주 사업(마스터플랜 등) 중 과업 참고가능한 보고서 수집

건설/계획 중인 철도(도시철도 포함), 고속도로, 국도 등 도로노선 자료 조사․분석 (현황, 도로계획, 교통수요, 지반현황, 요금체계, 재원) 등

기수행 유사사업 분석(Lessons Learned from Previous similar projects)

- 국내외 기완공 또는 건립 중인 유사사업의 계획, 사업자선정, 공사 및 운영단계까지 진행현황 및 문제점 분석을 통한 교훈 도출

- 기수행 유사사업 교훈으로부터의 사전 관리계획 수립

유관 사업실시기관(사업, 환경/사회영향, ODA 승인 등) 및 담당자 조사

- 규제기관, 정책기관, 운영기관, 운영현황 등 관리체계 구조 조사 포함

관련법 및 제기준 정립, 설계기준 설명서

방글라데시 메트로 건설 관련 법, 기준 조사․분석

해외 설계기준 및 설계지침, 시방서 등 조사

터널, 교량 건설공사기준 조사·분석 및 Design Standard 제공

[Part 3] 각종 현황조사 및 수요예측

교통수요 조사 및 장래 교통수요 예측

자료수집 및 조사 : 사회・경제지표 조사, 교통시설 현황 등

교통량 조사 : OD표와 수단분담모형 구축, 교차로 등 통행특성 조사, 통행구간 속도 조사 등

장래 수송수요 예측

- 장래의 수송수요, 유발효과, 수단별 분담율, 전환수송율 및 통행배정을 위한 수송수요예측 모형개발

- 사업의 직․간접 영향권으로 판단되는 대상지역을 중심으로 적절한 교통죤 체계 설정

- 각 구역별 교통현황, 사회․경제적 특성, 산업활동 및 지역간 교통의 용이성을 구역별 수송실적과 상호 연관 시켜 구역별 교통량 추정

- 교통 용이성의 함수로서 지역간 물동량의 배분모형을 정립하고 수단 선택에 영향을 미치는 변수를 선정 모형 화하여 지역간 배분 물동량을 수송수단별 특성에 따라 분담, 지역간․수송수단별 이용 교통량 추정

- 추정된 지역간․수단별 교통량과 시설분석 자료를 활용하여 애로구간을 결정, 시설용량 초과시기와 장래 시설 투자규모 등을 제시하고 필요한 경우 대안의 필요성 제시

- 통행패턴 및 이용자 성향조사를 바탕으로 이용자의 가치만족을 추구할 수 있는 노선으로 설계

수요예측에 대한 방글라데시 타 MRT 사업 및 관련계획과 비교 분석

선로용량 산정 및 검토

방글라데시 정부 의견을 반영한 수요 검증 등

현황조사

지형조사, 연도변조사, 각종 시설물 및 식생, 토지이용 현황 등 조사

지하 지장물조사

도로, 철도(메트로 포함), 하천 등 현황조사

메트로와 관련된 인프라 현황 조사(수전변전소 조사 등)

수리 및 기상자료 수집

관계기관 협의

[Part 4] 과업대상구간 현장조사

사업대상지 현장 세부조사
(현지 하도급 가능, 단, 중간보고서 제출 전까지 시행, 결과물 별도제출)

측량

- 측량과업 시행전 DMTCL(방글라데시 정부) 협의된 지형도에 계획 노선(안)을 작성하고 도시계획 등 개발예정 현황과 지상 및 지하 주요시설물 계획을 표시한 후 선형(종단․평면)계획과 주요구조물 계획 등을 비교하여 종합적으로 검토한 선형 검토보고서(주요 노선경유지 및 주요 지장물 전경 사진첩 포함)를 제출하여 관계기관과 최종 협의 후 측량과업을 시행

- 대안노선에 대해 미리 관계기관과 협의하여 노선을 확정한 후 확정된 노선에 대하여 시행

- 모든 측량은 방글라데시 정부에서 시행한 삼각 및 수준측량 성과를 확인하여 시행

- 이외의 사항은 방글라데시 정부의 측량법, 공공측량표준작업규정, 철도설계기준 및 선로측량규칙 등 제 기준에 따름

- 측량항목

구 분	주 요 사 항
현황측량	⦁축척 1:1,000으로 실시 (관계기관과 협의하여 축척 변경 가능) ⦁전체노선에 대한 무인비행측량(드론 등)을 시행
중심선 측량	⦁중심선의 측점간격은 20m로 하고 지형상 종·횡단의 변화가 있는 지점, 구조물 설치 및 곡선의 시·종점 등 필요한 지점에 소정의 중심말뚝 설치
종·횡단 측량	⦁종단측량은 중심선을 따라 매 측점과 지형이 변화되는 지점의 지반고를 측정하며, 반드시 왕복 실시 ⦁횡단측량은 중심선에서 직각방향으로 좌·우측 충분한 폭으로 횡단면 지반고를 측정

RoW 내 지장물(민가, 건물 등 보상대상) 상세 조사(1:5,000 상세 지형도 작성)

* 축척은 방글라데시 정부 요구에 따라 변경될 수 있음

수리/수문(hydraulics and hydrology) 조사

- 계획홍수량 등에 따른 배수로 용량 검토

- 교량 등 시설물 설치에 따른 홍수위 상승, 기존 제방의 영향, 하천의 침식 및 퇴적 영향, 기초지반의 세굴 등에 대한 분석 실시

- 조사구간 : 노선구간 전체연장에 영향을 미치는 하천조사 시행

지질(geological) 및 지반(geo-technical) 조사

- 지표지질조사 : 터널구간은 주변지역에 대한 정밀 지표지질조사를 시행하여, 그 결과를 방글라데시 정부에서 요구하는 지형도(축척)에 표시하고 터널계획에 검토 반영하며, 조사의 범위는 노선중심으로부터 좌․우 각 200m이내를 원칙으로 하되, 지형여건에 따라 조정 가능

- 탄성파탐사 : 터널구간의 지층 분포상태 및 공학적 특성 등을 파악하여 터널계획의 기초자료로 활용하여야 하며, 발파에 의한 방법을 원칙으로 하나, 지반조건이 불량할 경우 공법(안)을 설정하여 제시

- 시추조사 및 시료의 토질, 암석시험 등 실내시험 실시(안)

구 분	시추공 배치	시추공 심도	비 고
토공 (땅깎기)	⦁20m 이상 대절토부는 개소당 1공 이상	⦁계획고 하 2.0m	⦁현장시험 1회/개소
토공 (흙쌓기)	⦁500m 간격	⦁지층의 종류를 판단할 수 있는 깊이까지(N값 50/30 이상 3회 확인)	⦁역사위치, 하수박스, 흄관 등 구조물 설치 개소는 우선 시행
교량구간	⦁100m이상 교량 : 3공 이상 ⦁100m 이하 교량 : 최소 교대 위치	⦁연암 2m 또는 경암 1m ⦁암이 출현하지 않을 때는 풍화암 10m 까지
터널구간 (도심지)	⦁본선 200~500m 간격, 주요 구조물(수직구, 정거장, 집수정, 환기구 등)은 개소당 1공	⦁계획고하 3 m 이상 (기반암이 확인 안 된 경우 계획고 하 0.5 B), B : 굴착 계획폭)	⦁토질, 지형조건, 산악 터널 등과 단층, 파쇄대 등 지층이 불규칙한 경우는 증감
개착BOX 구간	⦁1공/개소	⦁풍화대에서 N값 50/30 이상 3회 확인	⦁횡단연장이 길 경우는 현장여건에 따라 책임 기술자가 증가 판단
연약지반 구간	⦁100m 간격	⦁연약지반 심도를 결정할 수 있을 정도	⦁공단 자연시료 채취는 최소 1회/50cm

터널부 구간(약 10km 예상) 시추 (한국 감독자 입회 必)

지상부 구간(약 6km 예상) 시추 (한국 감독자 입회 必)

기타 구조물 시추 (한국 감독자 입회 必)

* 기타 구조물은 시점부 역사, 각 승강장(5~6개소 예상), Kanchpur Bridge 또는 타 교량 확장/신설시 주교각 및 교대, 종점부 차량기지 등 포함

※ 필요한 실험(시료채취, 표준관입시험(시추공 내 1~1.5m 간격), 공내재하시험(PMT), 공내전단시험(BST), 시험굴조사(Test pit), 교란 및 불교란 시료 채취 등) 실시(일일보고서 제출). 시험의 종류는 사업실시기관 승인 하에 일부 수정 가능

※ 책임기술자는 시추 및 현장시험광경을 원근에 따라 1개소당 2매 이상, 실내시험은 종류별로 2매 이상 사진을 촬영하여 기록 사진첩을 작성후 현장조사보고서에 수록. 상기 기준은 (안)으로, 현장상황에 따라 당행의 검토를 득한 후 일부 변경 가능.

** 상기의 측량, 수리/수문, 지질 및 지반조사는 중간보고서 작성 전 완료必

지형 및 토질조사, 수리․수문, 용지 및 지장물, 기상자료, 측량, 재료원 조사 및 조사보고서 작성 등

현지 건설단가 및 주요자재 수급여부, 현지 건설장비 수급현황 조사

현지조달 주요자재(골재, 시멘트 등)에 대한 재료원 및 조달거리 조사(석산, 주요자재 생산공장 유무 등)

현지 연간 시공가능기간 조사(우기 등 감안)

기타 설계 시에 필요한 현지 기초 조사자료 획득 및 검토

[Part 5] 기술적 타당성검토

설계기준 및 절차 검토

사업대상 및 기술검토 항목/주안점 정의

해당국 설계기준 및 해당국에서 시행 또는 시행 중인 유사사업에 적용된 설계기준 조사 및 적용 기준 검토

- 수원국의 건설 및 운영에 관한 법률 및 지침 검토

사업수행을 위해 요구되는 선결절차 검토(정부승인, 부지확보 등)

노선선정 및 계획

선로설계기준 정립 및 설명서 작성

노선 후보지 선정

- 사업실시예정지역 선정 : 방글라데시 정부와 협의하여 대안노선을 검토하고 기초조사 결과를 바탕으로 1개 루트(안) 우선 확정

- 공사비, 주민이주, 민원, 환경사회영향, 현장여건 등을 고려 적정 후보지 선정

* 후보지별 장·단점 등 비교검토를 통해, 사업실시기관과 협의하여 선정하여야 함

노선계획

- 기술적 난점이 적은 루트, 공사비 최적화, 민원, 환경사회영향 최소화를 위한 루트 도출 (대안 노선에 대한 노선도/표준도 작성)

- 노선대안 분석은 1/25,000 지형도를 이용하여 개략 노선대를 검토하고, 최적노 선대는 1/5,000 지형도로 선정

* 축척은 방글라데시 정부 요구에 따라 변경될 수 있음

- 다카 Kamlapur~Madanpur까지 전철 운행을 위한 적절한 노선계획를 구상하여야 하며, 대안별로 경제성 및 유지관리성을 고려하여 검토

- 시․종점쪽 연결부분은 교통량, 지형적인 여건, 수송거리, 기존 운행선의 지장유무 및 시공성, 장래확장 등을 감안하여 최적안을 도출

- 노선계획을 사업실시기관 및 DMTCL과 사전협의 하고, 지자체 등 관계기관과 협의하여 최적 노선 결정

- 최적노선 확정 후, 이에 대한 측량 및 지반조사를 시행하고 구조물 계획 수립

- 본 과업과 관련되는 철도건설계획과 주요 간선도로계획 등을 상세히 조사하여 노선계획에 반영 (메트로 간 연결 및 환승계획 검토-해당시)

- 주변 도시계획 등 장래계획을 반영하여야 하며, 장래 연장운행 등을 고려하여 계획

정거장계획

- 정거장 입지 검토 및 정거장 위치 선정(지상지하 여부, 정거장 출입구 계획 포함)

정거장(승강장 등) 시설계획

- 정거장은 열차운영계획, 장래 개발계획, 새로운 역세권 형성, 타 교통수단과의 연계성 등을 고려하여 위치를 선정하여야 하며, 정거장 위치 선정의 적정성을 검토 (정거장 환승 및 직결방안 등 검토-해당시)

- 정거장의 규모는 열차운영, 장래 지역발전, 지역주민의 문화공간 제공, 시민편의시설 등을 감안한 적정 규모로 계획하고 개략적인 배선을 제시

- 정거장의 시설은 주변 교통 연계수단(Ride 등) 등을 검토

- 시․종점의 거점역은 장래 철도건설계획상 구내확장을 감안

- 시․종착역은 반복시설을 감안한 선형을 검토

토공계획

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

토공설계

대성토 및 대절토 최소화와 토공량의 균형적인 배분

절토법면 경사는 지반조사결과에 따라 비탈면 안전검토 결과에 의해 결정

배수체계 검토

표준횡단, 본선 부속, 개천내기, 길내기, 구교 등 시설검토

연약지반을 고려한 차량기지 토공노반 계획

- 비탈면 보강공법 검토

궤도계획

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

궤도설계

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준  제시

배선계획(정거장, 본선, 차량기지)

- 궤도구조형식 검토

- 궤도재료 선정

- 궤도부설공사 공종 및 최적의 궤도부설공사 방안 검토

구조물 계획(교량, 터널 등)

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

교량계획

- 기존 Kamchpur Bridge 확장 vs 철도교량신설 등 대안 검토

- 상부구조, 하부구조, 기초 형식검토 및 선정

- 고속주행 및 장대레일화 조건이 충족되고, 장대레일 설치가 가능한 교량형식 선정 및 경간분할 계획 수립

- 하천통과를 고려한 특수공법 검토

개착구조물 계획

- 개착식 BOX형 구조물 계획 검토

- 토류가시설 종류와 특징 비교 및 공법 선정

- 기존 매트로 규격을 비교 검토

터널계획

- 본선터널 단면계획 및 형식 결정

- 지질, 선형, 주변현황, 건축한계에 적합한 최적단면 선정 및 공법 표준화

- 터널 굴착공법 검토 및 터널장비 운용계획

- 횡갱 및 집수정계획

- 터널 내부 기계/전기 시설, 안전시설, 대피로, 유지보수, 환기설비 등 계획

- 터널내 제반설비의 시설공간 및 유지관리에 필요한 유효폭 검토

- 소요 건축한계와 선형조건에 따른 확폭량 검토

- 터널은 선로용량을 감소시키지 않고 환기, 배수 등을 감안하여야 하며, 비상시 여객의 안전을 확보할 수 있도록 방재 시스템,  대피통로, 공동관로 등을 계획

최적 구조물 형식선정

- 공사비, 공사기간, 장·단점, 민원, 제한사항, 현장여건, 유지보수 용이성, 환경영향 등을 고려하여 교량 및 터널 공법 비교 검토

- 각종 구조물의 기본형식은 열차 안전운행, 유지관리, 소음․진동, 미관 및 경제성 등을 고려하고 주요 구조물은 비교안을 작성하여 사업실시기관 및 관계기관과 사전에 협의하여 결정

구조물 계획 유의사항

- 구조물 계획 시에는 지반조사 결과를 토대로 구조물계획을 하여야 하며, 연약지반이 예상되는 지역은 처리방안을 검토하고 이를 설계에 반영

- 터널 및 교량 등은 최적규모로 계획하여 적정사업비가 계상되도록 특히 유의

- 구조물 설치로 인하여 도로교통에 지장이 되거나 상하수도 등 지하매설물, 철탑, 전주, 가옥 등이 저촉 될 경우 처리방안을 검토 계획

- 철도와 도로가 평면 교차되는 곳은 도로종류, 확장계획, 교통량 및 교통처리 등을 고려하여 위치, 폭, 형식, 설계하중 등을 관계기관과 협의 후 입체화 계획 수립

- 지진 등 각종 재해대책 수립 및 주변의 공사로 인한 환경이나 주민들의 피해를 최소화하는 방안 제시

- 지체․시각 장애인, 노약자를 위한 편의시설 계획을 반영한 구조물로 계획 수립

차량기지 계획

기존 차량기지(다카 메트로 6호선 등) 활용 가능성 검토

차량기지 입지검토

차량기지 운영방안 검토(설비계획 및 운영계획 수립)

차량기지 시설계획 (연약지반 처리대책 고려)

- 규모 설정

- 차량검수 계획

- 차량배선 계획

- 부지정지계획, 기지내 도로계획, 기지내 우·배수 및 오·폐수 계획, 상수도(급수) 계획

입·출고선 계획

- 선로설계 제기준 정립

- 입출고선 선형계획

차량기지 개략사업비, 공사기간, 장·단점, 제한사항, 유지보수 용이성, 환경영향 검토

연약지반 처리계획

- 실시한 지반조사를 토대로 연약지반의 물리적·역학적 특성 등을 파악 및 분석

연약지반 판정기준 및 설계기준 정립, 안정성 검토

- 연약지반 설계기준에 의하여 쌓기 구조물의 안정성 확보를 위한 최적의 연약지반처리 대책공법을 선정

- 연약지반 개량공법(프리로딩, 치환, 고화처리) 비교 검토 및 대안 제시

건축계획(정거장 및 차량기지)

국·내외 사례조사 분석

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 부지에 적용되는 법적규제(용적률, 건폐율, 고도제한 등) 분석

정거장 및 차량기지 건축컨셉 도출

- 적용 가능한 친환경‧양성평등‧무장애 건축요소 제시(해당시)

정거장 및 차량기지 규모 및 부속건물 등 계획

정거장 및 차량기지 기능실 소요면적 산출, 배치 계획

- 정거장 및 차량기지 외 ToD 및 역사 Plaza 계획 포함

관제센터 건설 관련계획 수립(수원국 정부와 논의 후 해당시)

건축 구조 및 설비 검토

- 사업부지 지반상태 및 지형 분석검토

- 건물 구내설비(전기, 기계, 소방 등) 계획수립(주요사양 제시, 소요용량 검토 등)

- 부지 내 기반시설(전력, 상하수도, 통신 등) 계획수립(인입계획, 설치구간, 설치 주체 등)

- 기본계획을 토대로 모델링 및 층별 평면도·조감도 작성

- 기초공법, 구조형식, 내외부 마감수준 계획안(현지 기후 고려)

시스템계획

기계설비 계획

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 환기·제연 방식 및 시설 계획

- 정거장 및 차량기지 기계설비 계획

본선환기구(HVAC) 시설계획

승강설비(E/V 및 E/S) 규모 산정 및 배치 계획

본선(터널, 교량) 기계설비 계획

배수설비 계획

지하수 활용계획

자동제어설비 검토

T.A.B 및 유지관리계획

자동요금징수(AFC) 시스템

승강장 스크린도어 시스템

전기설비 계획

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 수전변전소를 고려한 전력공급 계획 검토

- 전철, 전력 설비(수전/발전/전철용 변전/전차선로) 검토

- 건축물(정거장, 차량기지) 전력설비(송·변전/전기실/전력간선 및 동력/전등, 전열 및 조명/접지 및 피뢰) 검토

- 본선 전기설비(교량 점검등/교량 환기(콘센트) 전원/터널전기) 검토

- Substation system and Overhead contact system plan 작성

- 기타 설비(보호계전 시스템/원방감시(SCADA) 제어) 검토

신호설비 계획

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 수송수요와 열차운영계획에 근거한 최소운전시격 산출 및 최적의 신호체계 검토

운행최고속도를 고려한 신호시스템 검토

주요 신호장치(ATP, 연동장치, CTC 등)들의 설비방식 검토 및 최적의 신호장치 선정

* 신호방식 및 폐색방식 검토 및 선정

* 열차제어시스템 검토

* 연동방식 검토

* 정류장, 본선 및 차량기지 신호설비 계획

* 정보통신설비, 전송망설비, 열차무선설비, 역무자동화설비 계획

* 통신유도 대책

안전성, 신뢰성 및 경제성 등을 고려한 최적의 신호시스템 도출 및 제시

철도교통관제센터 및 예비관제센터 수용여부, 구축방안 검토

통신설비 계획

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

정보통신설비, 전송망설비 검토

역무용 통신설비 및 열차무선설비 검토

역무자동화설비 검토

통신유도 대책

타 설비와의 인터페이스 검토

철도안전 시설 및 철도부대시설 계획

해당국의 안전관련 규정 준수 및 사고예방방안 조사 및 계획 수립, 안전관리 기준 조사 및 세부계획 수립(설비, 교육, 점검방안 등), 안전관리 소요예산 산정

차량시스템 계획(차량제원 및 수량 포함)

외국 도시철도 차량 및 운행사례 조사·분석

해외 도시철도 제원조사

해외 도시철도 운행사례 조사

방글라데시 도시철도 제원 및 운행사례 조사

차량 기본 성능 및 제원 제시

설계기준 수립(방 정부 Metrorail 기준과 비교 검토)

차량 요구사항(안) 제시(승객수송용량, 열차편성계획 등 포함)

단계별 차량수급 계획

열차운영계획

수요 예측 결과를 토대로 열차운행계획 수립

연도별 열차 운행횟수 및 시격 검토

열차 당 수송량에 의한 운행횟수, 운행시격 산정

열차운전시뮬레이션(TPS)을 통한 구간별 운행시간 및 표정속도 산정

구간별 운행시간 사정 검토

열차 운전선도 작성 등

열차 운행시격과 운행시간 및 반복시간 등을 적용하여 적정편성 및 차량 수 등 산정

선로용량 검토

기타 열차운행에 필요한 사항 검토

관제시스템 기본사양 도출 및 제시

관제시스템 사례조사

관제시스템 기본사양 도출 및 제시

관제센터 운영계획 수립(해당시)

역량강화 계획(컨설팅 기간중)

기관사 양성을 위한 교육프로그램 제시 및 이에 따른 교육기자재 종류, 사양, 수량, 주요 Spare part 등 제시

Capacity Building Program 제시(Curriculum, 기간, 교육생 수 등)

차량 운영(교육과정 포함) 및 유지보수 지원을 위한 교육 범위 및 비용(국내․외 교육의 필요성, 추정 근거 포함)

메트로 운영 및 유지보수 인력 양성을 위한 교육 범위 프로그램 검토(국내․외 교육의 필요성, 교육과정 제시 포함)

사업실시기관 자체적으로 운영할 교육훈련 프로그램 작성

차량 운영 및 유지보수를 위한 연도별 필요재원 추정 및 재원조달 방안 검토(최소 5년 이상 이용객 수 등 추정에 따른 수익 및 운영비용 비교 분석 및 부족한 재원 확보 방안 제시 필요)

선로 및 노반/시스템/차량/건축물/주요설비/교육기자재 등 유지보수 프로그램

warranty 종료 후 차량 운영 방안(무상 원조기관 협업 등) 포함

차량 및 공급된 교육기자재의 효율적 사용방안 등에 기초한 본 사업의 효율적 추진방안 제시

대중교통지향형 개발(Transit Oriented Development, TOD) 및 역사 Plaza 계획

개발여건 분석

대상지역 토지이용계획 및 교통체계 검토, 국내외 TOD 개발사례 검토, TOD 시행에 따른 법적/제도적 검토 등

개발방향 설정

TOD 개념과 도시개발 트렌드, 개발여건을 고려한 TOD 도입 방향 제시
(역사 Plaza 개발계획/규모 포함)

TOD 개발사업 후보지 평가, 대상지 선정, 미선정 구역에 대한 개발방향성 제시

TOD 개발 세부전략 수립

개발의 기본방향 설정, 개발의 기본구상, 우선사업구역 선정, 역사주변 TOD 개발사업 컨셉 계획 검토, 역사 중심의 지선버스 체계 개편 계획, 사업비 산정

기본계획/설계(Basic Design) - 별첨의 영문 TOR 포함 必

기본계획/설계(Basic Design)는 방글라데시 관련 법 및 규정에 의거하여 실시

기본설계 수준(안)

노선계획 : 타당성조사 및 기본계획에서 구체화된 선형개요도, 선로 평면(1:5,000) 및 종단면도 (H=1,000, V=400) 작성

수리수문 상세조사, Sub-Soil 상세조사

구조물설계 : 타당성조사 및 기본계획을 감안하여 시설물의 규모, 배치, 형태, 개략 공사방법 및 기간, 개략 공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 선정된 최적안(교량, 터널, BOX, Viaduct, Depot, Stabling Yard 등)에 대하여 설계도서 작성

건축설계 : 타당성조사 및 기본계획에서 구체화된 건물 배치, 평면·입면·단면, 대지단면 작성

궤도설계 : 타당성조사 및 기본계획에서 구체화된 배선계획도, 구조물별 표준단면도, 주요 선로용품도, 주요 안전시설 용품도

시스템설계 : 타당성조사 및 기본계획에서 구체화된 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서 작성(OCS, Signal, Communication, AFC, PSD, SCADA 등 포함)

사업실행계획

사업추진 체계조직 및 운영조직 제안

해당 사업범위(안)내 효율성과 효과적인 Risk관리 역량을 기준으로 EDCF/EDPF 재원이 지원하는 scope와 수원국이 자체적으로 수행하는 scope간 구분(Role & Responsibility)

사업범위(안) 결정과 해당 사업범위내 EDCF/수원국간 scope 구분은 반드시 당행과 협의후 결정하여야 함에 유념

시공시 공정지연, 비용초과를 최소화 할 수 있는 범위내에서 사업 구성요소 선정

컨설턴트 고용의 필요성, 컨설팅 과업범위(영문 TOR, SOW 포함), 인력투입계획(bar chart) 수립

설계, 본구매 입찰업무 지원, 시공감리별 투입인력 및 인력별 업무범위, 투입인력별 추천 자격/역할 등 기술적 TOR 작성(국/영문본) 작성

* 실시설계를 시공사가 수행하는 경우로서 컨설턴트가 수행하면 상기 및 이하 내용 일부 변경要

단계별 인력투입계획 작성

기타 컨설팅 업무(교육훈련 등) 필요성 검토

예상 사업실시기간 및 추진일정

사업지역별 감독, 감리, 인허가 절차, 관련 부처 및 승인 기간 등

예상 사업실시일정(Implementation schedule)

세부 공정계획

사업 기간의 적정성 분석

지역 여건, 주변환경, 경제성, 시설편의 등을 고려한 개발방안

시공 중 교통처리 방안 조사 및 계획 수립

경제성, 효율성, 안정성 및 이용자 편의를 고려한 건설방안 검토

주요기자재 조달방안 검토

Local 기업 주요기자재 생산 여부

수원국 기술기준 만족 기자재 범위 조사(현지, 제3국, 한국산 등)

수원국 기술기준 만족 국내/외 주요기자재 조달가능 현황 조사

한국기업의 유사사업 국제경쟁력 분석

주변국가 주요기자재 생산능력

건설장비 조달방안 검토

상기 분석을 통한 최적 조달방안 도출

기자재 통관 및 운송방안 검토

Foreign(Made in Korea/3rd Country) 기자재의 국경간 운송 방안

한국 및 제3국 → In-bound 운송방안, 내륙 운송방안 검토

재원별(EDCF/EDPF) 사업범위에 따른 사업추진일정 및 시공계획 수립

기타 사업추진 권고사항 등

[Part 6] 환경사회영향 및 기후변화영향 분석

환경사회영향 분석

환경사회영향 관련 현지 법령 검토 및 환경사회위험 현지등급 분류

대상국 환경법 등 규정에 따른 인허가 승인 절차, 이행 필요사항(주민공청회 실시, 영향평가 실시 및 보고서 제출 등) 등 분석

토지보상 및 주민이주 관련 현지 법령 및 절차 분석

사업실시기관의 환경사회영향평가 등 준비, 제출, 승인, 허가, 이행사항 등 단계별 필요조치 및 향후 일정 확인

현지 환경당국, 토지보상 및 주민이주 당국, 사업실시기관, 컨설턴트, 시공사 등 사업참여 주체별 역할 분석

EDCF Safeguard Policy 검토 및 환경사회위험 등급 분류(Categorization)

현지 환경사회 관련 법규와 EDCF Policy간 갭 분석(Gap Analysis) 실시

환경사회 기초조사(Baseline Study) - 문헌조사로 수행

환경 기초조사(자연환경(기온, 강수량, 지질, 지형, 자연재해 등), 대기, 소음, 진동, 수질(지표수, 지하수), 토양, 생태계(동물(포유류, 조류, 파충류, 양서류, 어류 등), 식물, 멸종위기종), 자연보호지역 등)

사회 기초조사(인구현황(인구수, 성비 등), 주거·교육·보건·노동·수입·소비형태, 문화재 및 유적지 현황, 토지수용 및 이주대상 주민 또는 가구수 추정, 해당 소요금액 추정 등)

사업시행 전·후 예상되는 환경사회 영향(Impact) 및 위험(Risk) 분석

건설 전(Pre-Construction), 건설(Construction), 운영(Operation) 단계별 분석

환경사회영향 및 위험분석에 따른 저감대책(Mitigation Measure) 수립

건설 전(Pre-Construction), 건설(Construction), 운영(Operation) 단계별 수립 또는 단계별 필요한 저감방안 목록 제시

모니터링 계획 수립

모니터링 요소별 담당 주체, 점검 주기 수립

환경사회영향 관련 소요비용 추정

환경사회 보고서 (환경영향평가보고서(EIA), 이주대책계획(RAP), 토지수용계획(LAP) 완성본) 작성을 위한 구체적인 TOR 작성

기후변화영향 분석

대상국의 기후변화 관련 기초현황 조사

대상국 기후변화 관련 법, 정책, 계획, 국가온실가스감축목표(NDC) 등 현황 분석, 동 사업과의 관련성 및 해당분야 기술 동향 분석 등

기후변화영향 관련 대상국 담당기관, 조직, 협력체계, 역량 수준 분석

기후변화 영향분석 및 대응방안 마련

‘EDCF 기후변화영향 대응체계 적용 가이드라인’ 및 유사사례 참고

대상사업의 기후변화 영향 조사 및 기후위험 사전 분석

기후위험 사전 스크리닝

기후위험 평가(사업의 노출·위해·취약성, 기후위험 수준, 기후위험관리표 제시 등)

기후위험 경감계획 도출·제시

기후위험 경감계획 후보군 도출, 최종기후위험 경감계획 수립

기후사업 예상 성과분석

기후사업 예상 성과 측정결과(완화, 적응) 제시

성과관리 프레임워크(기후사업 성과지표 포함) 설정

[Part 7] 사업비 산정(EDCF/EDPF 재원별로 별도양식 산정)

□ 직접사업비(직접공사비+컨설팅비) 및 간접사업비 산정
(Excel형태의 Soft-file 제출)

(직접공사비) 주요 공종별 국내 및 현지시장 단가 조사

소요설비/인력, 기자재의 종류, 규격, 수량, 표준단가 등

직접공사비(선로,역사,토공,전동차,시스템 등) 산출

각 공종 또는 컴포넌트별 현지화/한국산/3국산 분리산출

재료비/노무비/경비 분리산출(필요시)

(컨설턴트) 과업범위 및 각 단계별 인력 투입계획 작성(bar-chart 기준)

실시설계 검토 및 조달 검토 단계

입찰지원 및 계약체결 지원 단계

시공감리 단계(하자보수기간중 컨설턴트 필요여부 반영)

용역완료 및 보고 단계 등

컨설턴트 과업범위(SoW) 및 비용(추정 근거 포함)

상세설계, 입찰지원, 공사감리 등 단계별 Man-Month 및 비용산정

O&M, 기술이전 및 Training 관련 실시기관 요구사항 재확인 및 비용반영

인력투입계획(Bar chart) 수립

투입인력별 추천 자격/역할 등 기술적 TOR 작성(국/영문본)

노임단가 분석

한국 엔지니어, 현지 엔지니어/근로자 노임단가 조사후 단가적용

출장횟수 및 항공료, 체제비 산정

교육훈련비용 산정(사업범위에 따라 필요시)

완공후 수원국의 순조로운 운영을 위한 교육훈련 프로그램 및 훈련비용 산출

각종 안전시설 등 부대시설 계획 및 안전관리 소요예산

EDCF/EDPF 및 사업국 기준에 따른 물량예비비 및 가격예비비 산정

(간접사업비) 예비비, 사업관리비, 토지보상비, 세금 등 산정

물량예비비 및 가격예비비 산정

수원국 세금 관련체계 (관세, VAT, Withholding Tax 등)

용지보상 및 이주비용

총 추정사업비 산정

◦ 총사업비의 적정성 비교 검토

- 타 유사사업과 비 컴포넌트별로 공사비 비교

운영 및 유지보수 지원 비용 산정

사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

□ 수원국 세금 관련 체계 상세조사(현지 세무법인 고용 必)

수원국 현지 세법에 따른 세금범위(세금항목, 세율 등) 및 세액에 대한 기초조사 보고서 별도제출

건설공사 및 컨설팅시 법인 결합형태(법적결합 JV(현지법인화 or 파트너쉽) or 법적비결합 JV(컨소시엄 등))에 따른 세금/세율 확인

□ 사업비 항목별 구성 및 세부내역 작성

◦ EDCF 지원예정부문(전동차, 시스템, 컨설팅 및 토공구간 일부) 및
EDPF 지원예정부문(이외 토공구간)별 사업비 별도산정

비용항목 구성(안)

구 분	EDCF			EDPF		수원국	합 계
	외화 (Korea)	제3국산	현지화 (Local)	외화	현지화
a. 직접공사비	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo
b. 컨설팅비	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo
직접사업비(a+b)	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo
c.예비비	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo
d.사업관리비	-	-	-	ooo	ooo	ooo	ooo
e.토지보상비	-	-	-	ooo	ooo	ooo	ooo
f.제세공과금	-	-	-	ooo	ooo	ooo	ooo
g.차관취급수수료	ooo	-	-	ooo	ooo	ooo	ooo
계	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo

* 제세공과금, 사업관리비, 토지보상비는 수원국 부담분

* 차관취급수수료는 EDCF(외화) 및 EDPF(외화) 반영분

※ (EDCF) 모든 사업비는 한국산, 제3국산 및 Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

(EDPF) 사업비는 외화, Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

※ 모든 사업비는 한국산, 제3국산 및 Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

사업비 산정 기준

국내 및 현지 시장가격 조사 및 분석

적용환율

직접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

직접공사비

· 주요 공종별 단가

· 공사물량

컨설팅서비스 비용

· 설계 및 입찰지원 단계

· 시공감리 단계

간접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

예비비(Contingencies)

· 물량예비비(Physical Contingency)

· 가격예비비(Price Contingency)

토지보상 및 이주 비용

사업관리비 및 차관취급수수료

제세공과금(수원국 부담분과 한국 사업자 부담분 구분)

· 부가가치세, 관세, 법인세, 지방세, 개인소득세 등

· 과세, 면세, 대납, 환급 항목 조사 및 부과세금 산정

총사업비

유사사업 직접공사비 조사 및 건설단가 비교

한국 및 수원국 유사사업 건설단가 비교 조사

연도별 자금집행 계획 작성(EDCF/EDPF, 수원국 자체재원 등 구분)

동 사업 단계별 금융지원 내용을 고려하여 재원별 연도별 자금집행 계획 작성

[Part 8] 타당성 분석(기술적/경제적/재무적 등)

기술적 타당성 분석

사업 컴포넌트 구성, 추정사업비, 사업실시기간, 우리기업의 사업수행능력의 타당성 검토

컴포넌트별 기술적 타당성 분석

◇ (적용 세부기술 타당성 논증) 또한 적용 세부기술에 대해서는 해당 세부기술을 적용하는 것이 타당한지에 대해 검증하는 과정을 통해 분석

· 세부사업에 적용되는 기술은 여러 기술대안을 상정후에 대안간 장단점 분석을 통해서 본건사업에 적용한 기술의 타당성을 논증

본건사업을 추진하는 것이 기술적 관점에서 필요한지 논증

설계속도 및 기하구조 기준 적용 사유 논증

철로선형, 터널 및 철도 시공공법, 비탈면 처리공법, 연약지반 처리공법, 도입설비 등 적용 사유 논증(대안분석 실시)

적용기술에 대한 대안분석(복수안) 실시후 사업에 적용되는 기술 선정

※ 기술·공법 제시할 때에는 ①반드시 후보 기술·공법을 대상으로 대안분석을 실시한 후, ②가장 적절한 기술·공법을 제안하는 형태로 과업을 진행하여야 함에 유의(상기과정이 보고서에 기재되어 확인 가능해야함)

구 분	후보기술 1	후보기술 2	후보기술 3
기술요소1
기술요소2...
경제성
제 안	◎
제안사유	제안사유를 총괄적으로 기재(비교우위 등)

경제적/재무적 타당성 분석

분석방법론 사전정의, 분석방법 설정 및 가정사항 적정성 검토

경제성 분석

- 편익산정 : 직접편익(통행시간 절감, 차량운행비 절감, 교통사고감소 등), 간접편익(환경비용절감 등) 등

- 경제성(B/C, NPV, IRR) 분석

민감도 분석 : 비용증감, 편익증감, 할인율 증감에 대한 분석, 편익감소 및 비용증가 동시 발생 복합시나리오 포함

재무성 분석

- 사업구조 및 재원조달방안 수립

- 이용요금에 따른 재무적 타당성 분석 등

- FNPV, FIRR, R/C Ratio 분석

- 재무상태표 (Balance Sheet), 손익계산서(Income Statement), 현금흐름표(Cash Flow) 작성 및 재무적 Sustainability 지표 분석

- 민감도 분석  : 비용증감, 수익증감, 할인율 증감에 대한 분석, 수익감소 및 비용증가 동시 발생 복합시나리오 포함

EDCF 지원예정구간 및 EDPF 지원예정구간 각각 별도 산정(추후 필요시)

※ 경제적 타당성 분석은 Guidelines for the Economic Analysis of Projects(ADB) 및 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project(European Commission) 참고

재무적 타당성 분석

수원국 자체자금/EDCF loan 에 따른 시나리오별 F-NPV, F-IRR, PI(Profit Index) 산정

민감도 분석(수입/비용 등 주요 변수에 대한 민감도)

비용증감, 수입증감, 할인율 증감에 대한 분석

수입감소 및 비용증가 동시 발생 복합시나리오 포함

[Part 9] 기타 EDCF/EDPF 심사를 위한 항목

사업실시기관 현황

사업실시기관 개요, 조직 및 인력 현황(조직도 포함)

본건 사업을 위한 사업실시조직(PMU or PIU) 구성 현황 분석 및 사업실시조직 구성 방안(지역별 조직, 인력 및 각 인력별 책임과 권한 정의)

사업수행체계 및 관련 부처 등과의 협력체계 등

사업실시기관의 행정지원 태도, 사업수행능력 검토, 사업관리 역량, 사업수행 경험

완공 후 유지관리기관 개요, 조직 및 인력, 예산 등

사업추진 준비상태

ODA 사업 추진 및 승인 절차(Loan 도입, 입찰, 계약 절차 및 관련 부처)

법적․행정적 내부승인절차, 사업시행을 위한 필요한 조치 및 완료여부, 현재까지 진행상황(인허가, 정부승인, 부지확보 등)

재원조달계획

컨설턴트 고용의 필요성, 컨설팅(설계 및 감리) 과업범위(영문 TOR, SOW 포함), 인력투입계획(bar chart) 수립

- 설계, 본구매 입찰업무 지원, 시공감리별 투입인력 및 인력별 업무범위 작성

- 기타 컨설팅 업무(교육훈련, 초청연수, 기술이전 등) 필요성 검토

①F/S, ②기본/실시설계, ③구매조달(통관), ➃시공감리 각 과정별 인허가 절차, 기관 조사 및 검토

사업지역별 감독, 감리, 인허가 절차, 관련 부처 및 승인 기간 등

EDCF/EDPF 사업비용 산정을 위한 외화 및 현지화 항목구성

직접사업비(직접공사비 및 컨설팅)에 대한 외화 및 현지화 항목 및 비율

상세항목에 대한 재료비/노무비/장비비 등의 외화 및 현지화 분류

제3국산 항목 및 국가 분류 등

구매계획

자재 및 물품의 구매적격국(외화, 현지화, 제3국산) 조사

국내 컨설팅 및 건설사 리스트 및 경쟁력

컨설턴트 및 본구매의 입찰방식 검토 및 구매 패키지 제시

빈곤퇴치효과 분석

위험요소 분석 및 대응 방안

주주(Stakeholder), 시행기관(EA), 사업(Project) 리스크 분석 및 overall risk rating 분석

마커 분석(리우, 젠더, 및 정책마커)

기후변화(리우, 그린인덱스) 및 성평등(젠더) 영향분석 및 관리계획 수립

(예시)

- (기후변화 완화) 자전거 도로, 버스전용도로 신설여부 검토

- (기후변화 적응) 해수면 상승 등 기후변화 관련 사업지역 내 이동제약여부(연중 접근제한 일수 등) 조사 및 동 사업을 통한 개선 효과 분석, 해수면 상승 예측치(분석기간 내) 조사 후 동 사업(해안도로)의 높이와 비교분석을 통해 기후변화로 인한 해수면 상승 고려한 설계임을 입증

- (젠더) 인부/엔지니어 등 건설현장 여성인력 고용율, 여성인력 앞 교육기회 제공 횟수 등에 대한 현지조사를 통한 성과평가지표 상 반영가능 여부 조사

정책마커 및 지속가능개발목표(SDGs) 기여도 확인을 위한 자료 조사

(참고) SDGs 17개 목표

① 빈곤 종식 ② 기아 종식 ③ 보건 ④ 교육 ⑤ 양성평등 ⑥ 물과 위생 ⑦ 에너지 ⑧ 경제성장 ⑨ 지속가능한 인프라 및 산업화 ⑩ 불평등 해소 ⑪ 지속가능도시 ⑫ 지속가능소비･생산 ⑬ 기후변화 대응 ⑭ 대양･바다･해양자원 ⑮ 생태계･생물다양성 ⑯ 평화･제도(거버넌스) ⑰ 이행수단 및 글로벌 파트너십

< 주요 사업 분야별 목표 (예시) >

사업 분야	SDGs 목표	세 부 목 표

기후변화 위험분석 및 경감계획 도출(필요시)

‘EDCF 기후변화 영향 대응체계 적용 가이드라인’에 따른 기후변화 대응방안 마련

① 대상사업의 기후변화 영향 조사 및 기후위험 사전 분석

기후위험 사전 스크리닝 및 기후위험 평가 실시

② 기후변화 경감계획 도출·제시

기후위험 관리표 작성, 기후위험 경감계획 후보군 도출 경감계획 대안 마련

③ 기후사업 예상 성과분석

기후사업 예상 성과 측정 결과 제시 및 성과관리 프레임워크 설정

그린인덱스 분석

기후변화 완화 (예시 : 신재생에너지 활용, 가로수 조성 여부)

화석연료 대체, 에너지 효율화

탄소회수, 이용 및 저장

기후변화 적응

개인의 기후변화 대응력 강화, 인프라 회복적 증진

자연자원 생산성 제고, 자연 생태계 보존

순환경제

자원투입 절감, 자원순환율 제고

사회적 포용성

소득격차 해소, 지역균형 발전, 양성인지 제고

성과관리 프레임워크(Logical Framework) 수립(중간보고서 수록 필요)

중장기 효과, 산출결과, 산출물 간의 결과논리(Result Chain)가 반영된 성과지표 선정

목표 달성 여부, 진전사항을 측정할 수 있는 SMART(Specific, measurable, achievable, relevant, time bound) 지표 수립

기초선(Baseline) 조사(동 사업은 기존도로 교통량 조사를 통한 지역 내 정체감소 효과 반영 必)

기초선 설정을 위한 문헌조사 및 데이터 수집 등

기초선 수준, 유사사업 평가결과 등을 토대로 목표치(Target) 설정

주요 리스크 검토 및 대응방안 수립

사업 시행 단계에 따른 지표의 모니터링 방안과 향후 성과관리 상 발생할 수 있는 문제점 및 대처방안 포함

중간보고회 이전 성과관리 프레임워크 초안 제출 및 중간보고회(또는 그 이전) 당행(경협평가부)과 의견 교환 세션 실시

성과관리 프레임워크(Logical Framework)

중장기효과1)
사업의 중장기 효과와 연관된 지속가능개발목표(SDGs) 또는 국가개발목표2)
구 분	지표			기초선			달성목표치			가정/리스크
산출결과3)
산출물4)
모니터링 지표
지표(예시)	달성률(예시)
	기초선		1년			2년		3년			종료선
컨설턴트 고용
본구매 구매계약
건축
기자재
연수
사업목표 주 수혜자
지표별 정의 및 관리
지표명		정의			자료원/ 자료수집방법				지표관리담당자

주 : 1) 사업의 파급효과로 발생한 상위의 장기적이고 유의미한 변화

주 : 2) 사업특수성, 수원국 요청 등 고려하여 별도의 성과지표(기초선, 달성목표치, 가정/리스크 포함) 수립으로 갈음 가능

주 : 3) 사업 완공 시 산출물을 통해 주 수혜자가 누리는 직접적 혜택

주 : 4) 물리적인 사업 완공 시 주 수혜자 앞 지원되는 생산물 및 서비스

유사사업의 ODA 지원사례 조사

철도분야 ODA 지원사업 조사(지원기관, 규모, 사업내용, 사업비 등)

주요 공여기관 최근 10년간 지원현황 및 향후 지원계획

수원국에서 활동하는 주요 ODA 기관 도로분야 관련 주요활동

사업실행계획

사업실시기관의 계획 및 관련 사업(적용가능시) 과의 연계성을 고려한 사업추진일정 제시

본 사업이 우리나라에 미치는 효과

양국관계에 미치는 효과

우리기업에 미치는 효과

외화가득 효과

이전 단계 사업의 성과분석(해당시)

기타 항목

‘EDCF 분야별 모듈화 가이드’ 중에서 ‘도로’ 분야 작성(필요시)

OECD 상업성 여부 검토(필요시)

안전관리 기준, 관리계획 및 소요예산 산정

FSI(취약국 지수) 분석(필요시)

유무상 융합 사업기획

착수보고회, 중간보고회, 최종보고회에 유관 무상원조 시행기관 초청(유관기관 리스트 제공 예정)

동 사업을 위한 무상원조 시행기관과의 협업방안 협의 및 도출

무상원조 시행기관과 협의된 연계방안이 없는 경우에도 아래 내용 보고서에 포함

착수/중간/최종보고회 초청 및 참석한 무상기관 리스트

참석 무상기관과의 연계방안 논의 내용

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음

국내 초청연수 실시

국내 초청 연수는 동 사업에 참여하는 방 정부 관계자와 기술자를 대상으로 우리나라의 철도정책, 건설, 운영, 관리 및 기술사항에 대한 교육/견학 등을 통해 우리나라 철도기술 전수 및 우수성 홍보

- (예상)대상자 : 약 10인,  연수기간 : 1주일

우수한 장비와 교육시설이 갖추어진 국내에서 현지관계자에게 관련 기술 전수 실시

세부 커리큘럼 및 연수 세부 일정은 수원국과 협의하여 결정

연수에 대한 참여자의 반응 및 만족도에 대한 조사 실시하여 확대방안 도출

F/S 과업 최종보고시 과업성과물에 대한 시현영상 제작
(5분 가량의 애니메이션) - 필요시 외주업체 고용 가능

◦ 대안노선 및 구조물 형식을 반영/비교한 시현영상

◦ 노선/객차의 이동 시뮬레이션 및 적용 건설공법 등 시현

◦ 시점부터 종점까지의 ROW 식별을 목적으로 함을 만족하는 수준

◦ 이 외 사업실시시관의 요청사항 포함 및 영상 품질수준 반영

과업 수행방법

□ 과업수행 원칙

◦ 본 과업은 관련 규정 및 계약조건과 당행(“발주자”)의 지시에 따라 수행하여야 함

◦ 사업수행책임자(PM)는 모든 현장활동 및 출장결과를 포함한 당행 및 사업실시기관과의 모든 회의에 참석하여 보고해야 하며, 전 과업범위에 대해 검토 및 감독을 이행해야 함(원칙적으로 기타 인력이 주도하여 보고 불가)

- 당행 및 사업실시기관과의 주요한 업무관련 모든 연락(메일, 전화 등)의 Contact Point는 PM이 주도(부득이한 경우 주요분야 분책이 대행)

- 본 건 PM은 타 사업의 PM을 겸하지 않아야 함.

◦ 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적·기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

◦ 과업은 현장중심으로 수행되어야 하며 주요 결과물은 수원국 정부 및 사업실시기관과의 협의 및 합의가 도출되어야 함

- 수원국 사업실시기관 동의 증빙자료를 포함한 최종보고서 제출을 과업 완료시점으로 함

- 현지출장 및 상주업무와 관련 하여 잔금지급 전까지 개인별 ‘출입국에 관한 사실증명서’ 원본 및 ‘여권 해당부분 사본’ 제출

- 현장조사, 자료수집, 유관기관 및 사업실시기관과의 실시간 협의를 위해 제안서에 지정된 4인이 현장에 21M/M 이상(630 calendar-day) 상주(주요 현장조사기간 중 감독 필수) 및 주요 인력(전담)은 최소 3~8회 이상 현지출장(착수보고, 현장조사, 중간보고,기본계획보고, 최종보고 협의, 최종보고, 주요안건협의 등) 실시 및 각 단계별 주요 협의내용에 대한 회의록 작성 후 당행 앞 출장결과 보고

최소 출장 횟수	PM	구조,철도,교통, 터널,건축,지반	궤도,차량기지, 기계,전기,신호,통신	환경,기후,TOD 운영, 비용, 경제·재무
	8회	6회	4회	3회
상주 분야	철도(2회), 구조(및 또는 터널), 지반, 비용 (5회, 총 630일 이상)

주) 출장 : 602일 이상 (86회 * 7일/회),  FS 및 기본계획 기간 중 분배하여 시행

· 각 분야별 최소횟수 현지출장 실시(현지상주는 출장횟수와 별도). 단, 코로나19로 인해 현지출장이 원활하지 않을 경우, 당행 승인하에 현지 상주인력 기간연장 등으로 출장자 역할 대체 가능(출장시 현지격리기간만 출장기간으로 인정, 국내격리기간 불인정)

· 철도, 구조(및 또는 터널), 지반분야 인력은 담당분야 관련 현장 조사 시기에, 비용산정 인력은 관련시기에 현지상주 필수.
교통 인력은 현지 교통량 조사기간중 출장 권고

· 출장인력은 보고회 참석 및 현장조사 보완업무를 수행해야 함

· 현지상주인력은 전담인력이 실시함이 원칙이나, 제안서 ‘인력운영계획’에 별도 제안시에는 비전담인력도 참여가능. 단, 과업일시중지사유 발생시를 제외하고는 현지상주 최소단위는 3개월이며 분할상주가 가능하나 동시에 1인만 상주(이 경우 추가 항공료는 용역사 부담)

- 위의 4인 현장 상주와는 별개로 사업실시기관과의 원활한 의사소통 및 전체 사업지원을 위하여 반드시 2인 이상 전담자를 지정하여 현장에서 전체 용역기간 동안 근무할 것

· 동일한 전담자가 전체 용역 기간 동안 사업실시기관에 상주하는 것이 원칙

· 전담자는 현지 하도급 가능

- 각종 법규확인 또는 각종 현장조사[건설단가, 교통량, 측량, 지형/지반, 환경/사회(현황조사, 토지수용, 주민이주, 공청회 포함) 등] 지원을 위한 현지업체 활용 가능(현지업체 고용시, 당행 앞 하도급 계약체결 사전 승인 필요)

- 착수보고서 제출 시 상세 현장조사(교통량, 측량, 지반 등) 계획서 및 현지업체 설계하도급 계획서(과업범위, 업무분장 등 포함) 제출

◦ 주요 현장조사(측량, 지반 등)는 사업실시기관과 협의가 완료된 후 실시해야 하며, 반드시 중간보고서 제출 전 완료되어야 함.

- 따라서, 과업 초기(2~3개월차) 주요사항(노선, 구조물형식 등)을 협의하고 현장조사업체와 계약체결 필수

◦ 국외출장을 위한 여행자 보험을 가입토록 하고, 보상한도 및 범위가 일정수준이상으로 설정될 수 있도록 함. 아울러, ‘국외 체류시 안전매뉴얼’에 따라 안전지침, 위기상황대처 및 여행경보제도 안내를 통한 안전관리 자체 교육함

◦ 해당 과업의 특성상, 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 과업 수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 과업범위에 포함 시킬 수 있음

◦ 선정된 입찰자(이하 “수급자”)의 과업수행책임자는 본 과업에 따른 모든 업무를 발주자와 (필요시 사업실시기관과) 협의하여 시행하여야 하며, 용역 성과품에 관한 사항은 발주자와 협의 후 발간하여야 함

◦ EDCF 사업 특성상 수원국 중요사항 결정지연 등으로 인해 과업지연이 빈번함을 인지하고, 과업지연 예상시 당행 앞 과업중단 요청 필요. 이로 인한 과업기간 연장시 용역비 추가지급은 없으며, 과업기간연장에 따른 적절한 인력투입계획 수정이 필요함

□ 품질 및 하자보증

◦ 수급자는 성과물의 품질을 높이기 위하여 당행의 요구를 최대한 반영하여야 하며

◦ 특히, 수요분석 및 적용공법 등의 적정성 검증을 위해 당행은 과업수행기간내 별도 자문위원의 선임을 요구할 수 있음

◦ 보고서 품질 제고를 위해 수급자 비용으로 관련분야 전문가 4인 이상으로 구성된 외부자문위원단을 구성해야 하며, 당행 참관 하에 주요 보고서에 대한 자문회의를 개최해야 함(자문위원 선정 시, 당행 사전 동의 필요)

- FS(중간보고서 및 최종보고서) 및 기본계획 등에 대한 자문회의 4회 개최

◦ 각종 보고서의 영문본 작성은 전문 번역업체/번역가 앞 의뢰를 원칙으로함.

- 각종 보고서의 국문·영문본은 반드시 전문 교열 업체/교열가 앞 의뢰하여 교열 완료 후 제출해야 함.

◦ 수급자가 공급한 컨설팅 자료의 하자보증기간은 12개월로 함

- 최종보고서 제출 후 수원국 승인 중 요청에 의해 수급자 앞 일부 내용의 수정을 요구할 수 있으며, 수급자는 이에 응해야 함.

◦ 사업수행책임자는 과업이행에 대한 공정보고를 매주 이행하여야함

□ 책임 및 보안

◦ 수급자가 본 건 용역을 수행함에 있어 취득한 사업내용 및 과업내용에 대해 보안을 유지하여야하며, 이에 따른 문제발생시 계약상대자가 모든 민․형사상 책임을 짐

◦ 과업에 의해 개발된 산출물의 원본 파일을 제출하여야 하며, 수급자는 결과물을 다른 어떤 목적으로도 활용할 수 없음

□ 과업수행계획서 작성 및 변경

◦ 계획서 내용

- 과업목표 및 범위 : 제안요청서와 수급자가 제안한 기술제안서

- 추진 일정계획 및 보고계획

◦ 발주자의 승인

- 수급자는 과업수행계획서에 대한 당행의 승인을 얻은 후 과업에 착수하고, 과업기간 연장 또는 출장/상주기간의 주요한 변동 등의 부득이한 사유로 변경하고자 할 경우 당행의 승인을 얻어야 함

성과품 납품 및 보고서 관련 사항

제출 성과품 전체목록

<주보고서(Hard-copy 및 Soft-file(pdf & hwp/docx 등) 제출)>

타당성조사(요약본 포함) 및 기본계획 보고서(필요시 별권작성)

부록(별권)

총사업비 산출 상세내역(컨설턴트 인력투입계획 포함) 및 Raw data

컨설턴트 역할 및 상세 과업범위(각종 Facility 제공 가정사항 포함)

경제·재무성 분석 데이터

용지 및 지장물조서 (용지도 포함)

현황조사 보고서(요약)

각 회의 회의록, 주요 질의서, 보고회 발표자료, 주요 수발신 공문

자문위원 검토의견 및 조치결과

수원국 Screening Form(환경사회등급분류)

워크숍/연수 결과보고서

홍보영상기록물 등(USB)

<기타 별도보고서(Soft-file(pdf & hwp/docx 등) 제출)>

현장조사 보고서(상세)

- 측량조사 보고서(시설확인 및 이전계획 포함)

- 지반 및 토질 조사 보고서(각 시추공별 현장조사 사진 포함 必) 등

- 교통조사 보고서

수리수문 검토보고서

구조 및 수리 계산서

터널해석보고서

수량산출서

단가산출서 및 설계예산서

설계기준 설명서

기본설계 도면(Basic Design) 일체

TOD 및 역사 Plaza 개발전략 보고서

성과품 납품

성과품은 계약내용 및 발주자가 제시한 형식에 맞추어 제출하여야 함

발주자는 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 경우 추가 산출물을 요구할 수 있으며, 수급자는 이에 응하여야 함

산출물의 규격은 A4(좌철)로 함(단, 도면 등 필요시 예외)

보고서는 본문 1권과 부록 1권(필요시 도면 별도)을 별도로 구성함.

주요 보고서 제출 일정(안) 및 부수

영문 보고서의 경우 사업실시기관과의 사전 협의된 내용이 반영되어야 하며, 사전 협의된 내용을 확인할 수 있는 회의록, 서한 등을 반드시 첨부할 것

산출물	제출시기	언어	부수
과업수행계획서 (Inception Report)	계약체결 후 14일 이내	국문, 영문	10, 10
노선선정 결과	과업 착수 후 4개월 이내	국문, 영문	10, 10
보고서 목차	과업 착수 후 5개월 이내	국문, 영문	-
현장조사 보고서 초안	과업 착수 후 6개월 이내	국문, 영문	-
중간보고서 초안 (Draft Interim Report)	과업 착수 후 6개월 이내	국문, 영문	10, 10
현장조사 보고서 최종1)	과업 착수 후 8개월 이내	국문, 영문	5, 15
중간보고서 (Interim Report)	과업 착수 후 10개월 이내	국문, 영문	10, 10
기본계획 보고서 초안	과업 착수 후 11개월 이내	국문, 영문	10, 10
TOD 개발전략 보고서 초안	과업 착수 후 12개월 이내	국문, 영문	-
최종보고서 초안 (Draf Final Report)	과업 착수 후 14개월 이내	국문, 영문	10, 20
기본설계도면(초안)2)	과업 착수 후 14개월 이내	국문, 영문	-
기본계획 보고서	과업 착수 후 15개월 이내	국문, 영문	10, 20
최종보고서 (Final Report)	과업 착수 후 18개월 이내	국문, 영문	10, 20
기본설계도면(일체)3)	과업 착수 후 18개월 이내	국문, 영문	10, 20
TOD 개발전략 보고서	과업종료 전 1개월 이내	국문, 영문	10, 10
연수 실시계획서	연수 실시 2개월 전	국문, 영문	-
연수 결과보고서	매 연수 종료 후 3주 이내	국문, 영문	-
홍보물(동영상)	최종보고서 제출시	영문	-

1) 현장조사보고서 : 현황조사, 측량, 지반, 교통, 수리수문, 용지 및 지장물조서

2) 기본설계도면(초안) : 평면 및 종단면도, 표준도(횡단면도, 토공구조물, 교량구조물, 터널구조물 등)

3) 기본설계도면(일체) : 평면 및 종단면도, 표준도(횡단면도, 토공구조물, 교량구조물, 터널구조물, 부대시설도 등), 용지도, 구조계산서, 토질조사 보고서, 수량산출서, 단가산출서, 용지 및 지장물조서 등

* 상기 표에 제시되지 않은 성과품은 착수보고시 용역사가 제출시기 제시 必

* 연수 실시계획서의 언어는 국문을 기본으로 하되, 각 활동의 개요 및 일정은 영문을 함께 제출

* 최종보고서 서면 제출시 별도 저장장치(USB) 형태로 EDCF용 10부, 수원국용 20부를 함께 제출 (국문, 영문 보고서 및 현장조사보고서, 도면 및 수량계산서 등 설계자료 일체, 동영상 등 모든 산출물 포함)

* 최종보고서는 국영문 요약본(30~40쪽 이내)을 포함하여야 함

* 동영상은 영문 나레이션을 제작하고 총 20부를 USB로 제작하여 EDCF에 일괄제출

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

□ 일반사항

◦ 제안참가 업체는 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수 하여야 하며, 본 제안요청서상 요구하는 과업내용과 이에 대한 용역결과가 제시되어야 함

◦ 입찰공고 및 제안요청서에 명시되지 않은 기타의 사항에 대하여는 당행에서 정하는 바에 따름

◦ 제안서에 서명날인이 필요한 곳은 제안사나 그의 권한을 적법하게 위임받은 대리인이 자필로 서명하거나 입찰참가등록 시 제출한 인감(또는 사용인감)으로 날인되어야 하며, 행간에 쓴 것이나 지운 것, 덮어쓴 것 등은 정정 날인되었을 경우에만 유효함

◦ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 당행의 입증요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외함은 물론 계약 후에도 계약해지와 함께 인적․물적․기간적 손실에 따른 손해배상이 청구될 수 있음

◦ 제안서는 본 지침서의 양식 및 기재순서에 따라 작성하여야 하며, 각 페이지에 일련번호를 부여하고 목차항목에 해당 일련번호 기재

◦ 제안서의 내용 중 평가항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주

◦ 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 제출한 후 수정이나, 추가 또는 대체할 수 없음

◦ 모든 평가항목의 평가 적용 기준시점은 따로 정하지 않는 한 공고일자를 기준으로 함

◦ 제안서의 내용 중 기술자의 경력사항, 기관실적에 대하여 원본1부는 발행기관이 확인 날인한 것으로 제출(‘원본대조필’한 사본도 인정)

◦ 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, ‘할 수도 있다‘, ’고려할 수 있다‘ 등의 추상적인 표현은 제안하지 않은 것으로 간주

◦ 제안서는 과다한 비용이 지출되는 오프셋 인쇄 등 금지
(컬러프린터 출력은 가능하나 컬러인쇄물은 용지 크기에 관계없이 단면 3페이지 이내로 제한하며, 인쇄용지는 일반 사무용지(예 : A4의 경우 80g/㎡, A3의 경우 75g/㎡)로 한정함)

◦ 제안서 제출자는 대표이사 또는 그 위임을 받은 자로 함

◦ ‘재무구조 및 경영상태’ 평가를 위한 신용평가등급 확인서 제출(‘원본대조필’)

◦ 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 하며 제출된 평가 자료는 일체 반환하지 않음

□ 제안서의 서명 및 효력

◦ 제출된 제안서의 내용은 당행이 요청하지 않은 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시의 계약조건의 일부로 간주함

◦ 제안내용에 대한 확인 필요 시, 입찰 참가자에게 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

◦ 본 제안서는 별도의 명시가 없는 한 당행이 소유권을 가짐

□ 보안 요구사항

◦ 제안자는 당행으로부터 배부 받은 제안요청서, 각종자료 및 제안 과정에서 얻은 정보를 당해 제안 외의 목적으로 사용할 수 없음

◦ 용역진행 중 또는 완료 후 용역에 관한 일체의 사항이 외부에 누설되는 일이 없도록 당행의 보안규정을 철저히 준수하여야 하며 용역의 성과물을 사전승인 없이 용역 목적 이외에 사용할 수 없음

◦ 기타 보안과 관련되는 사항이 발생되었을 경우 또는 발주처가  요구하는 경우에는 이에 따라야 함

◦ 낙찰자는 계약 시 용역 참여인원 전원에 대한 보안교육 및 보안 관리에 철저를 기하도록 하고 용역 착수와 동시에 보안각서를  자필로 작성하여 서명한 후 제출하여야 함

2. 제안서 목차

I. 사업내용 및 대상국의 이해 1. 사업의 목적 2. 사업의 범위 3. 대상국 현황 및 관련 계획 (관련 정책/개발계획, 지역 현황 등) 4. 대상지역 기능 및 특성 5. 사업의 기대효과 II. F/S 수행계획 1. F/S 실행계획 가. F/S 추진전략 및 운영계획 나. 추진일정 2. 항목별 조사방법 가. 분야별 세부 조사계획 및 방법 나. 기술적ㆍ경제적 타당성분석 방안 다. 현장조사 방안(각종 측량, 교통량조사 및 지반조사 등) 3. 현지 협력사 활용계획 4. 위험요소 분석 및 대책 5. F/S 관리방안 가. 보고계획 나. F/S 품질 및 하자보증 방안 다. 용역완료 후 사후지원 방안 라. 보안준수 방안 6. 영문보고서 작성계획 가. 영문보고서 전문인력 활용계획 나. 영문보고서 감수계획	III. 조직ㆍ인력 현황 및 운용계획 1. 인력운용계획 가. 과업수행조직(실제 참여자) 나. 업무분담계획 다. 현지 및 국내 인력투입계획(현지 출장일정 및 상주인원 지정) 2. 투입인력의 경험 및 능력 가. 유사사업 수행경험 나. 대상국 경험 다. 주요경력 및 학위 라. 어학능력 IV. 원조효과성 제고를 위한 독창적인 아이디어 및 방안(완공 후 사업의 지속가능성 향상 방안) 등

3. 제안서 항목별 작성방법

1) 제안서 본문

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
Ⅰ. 사업내용 및 대상국의 이해 1. 사업의 목적 2. 사업의 범위 3. 대상국 현황 및 관련 계획 4. 대상지역 기능 및 특성 5. 사업의 기대효과	- 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 사업의 목적, 범위를 요약하여 기술 - 본 사업과 관련된 대상국 현황/개발 계획/정책 및 해당산업분야 동향/사업대상지역의 기능 및 특성 등을 요약하여 기술 - 사업의 기대효과를 요약하여 기술
Ⅱ. F/S 수행계획
1. F/S 실행계획
가. F/S 추진전략 및 운영계획	본 사업 및 F/S 과업 특성, 제한된 시간, 예산 및 인적 자원을 고려한 체계적인 F/S 추진전략 및 운영 방안 등
나. 추진일정	과업별 수행계획, 세부추진일정
2. 항목별 조사방법	본 과업 수행을 위해 필요하다고 판단되는 자료 확보 계획
가. 분야별 세부조사 계획 및 방법	과업별 세부조사 방법 및 계획
나. 기술적․경제적 타당성 분석 방안	기술적, 재무적/경제적, 정책적 타당성 분석 방안 제시
다. 현장조사 방안	효율적인 과업수행 및 성과물의 품질제고를 현장조사방안 및 계획을 제시하고, 구체적인 현장조사 내용, 조사방안 및 계획 등 기술 (측량, 교통량조사 및 지반조사 등)
3. 현지 협력사 활용방안	현지사 활용 필요성, 담당 업무, 고용계획, 관리방안(품질, 보안 등), 참여규모 (장비, 인력) 등 작성 - (현지 협력사 미확정시) 후보업체, TOR배포 및 견적접수 일정, 업체선정 및 계약체결 일정 기재 - (현지 협력사 기확정시) 해당업체 개요(업력, 전문분야, 직원수 등), 유사과업 수행사례, 장비 보유현황 등 기술
4. 위험요소 분석 및 대책	과업 수행 중 발생 가능한 위험요소 분석 및 해결방안 제시
5. F/S 관리방안 가. 보고계획 나. F/S성과물 품질확보 방안 다. F/S 하자보증 및 사후지원 방안 라. 보안준수 방안	- 수행일정, 인력, 위험, 보안, 각종 보고서 및 성과물 등 관리방안 제시 - 각종 보고 계획(발주처, 수원국 사업실시기관 등) - 수원기관 기술자 또는 현지 업체 기술자에 대한 우리나라 기술 홍보 및 F/S 자료에 대한 품질 및 하자보증 방안 - 과업 수행 중 F/S 품질확보 방안 - 과업 종료 후 F/S 하자보증 방안 - 과업 종료 후 F/S 사후지원 방안 - 보안준수 방안 등
6. 영문보고서 작성계획
가. 영문보고서 전문인력 활용계획	- 영문보고서 전문인력을 활용한 각 단계별 영문보고서 작성방안 등을 영문으로 작성
나. 영문보고서 감수계획	- 영문보고서 품질(기술 및 개발협력 용어 적정성 포함) 제고를 위한 감수계획 등을 영문으로 작성

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
Ⅲ. 조직‧인력 현황 및 운용계획
1. 인력운용계획
가. 과업수행조직	참여 조직도 및 전문가 투입계획 (경제성 분야 등 필요시 타 기관의 외부전문가 활용 가능함)
나. 업무분담계획
다. 현지 및 국내 인력투입 계획	- 분야별, 단계별 과업수행을 위한 국내 및 현지 인력투입 세부 계획(Man-month 포함) - 현지출장 및 현장상주계획 제시(담당자 지정)
2. 투입인력의 경험 및 능력
가. 유사사업 수행경험	본 과업 내용을 명확히 이해하고, 분야별 실제 투입인력의 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요경력, 학위 및 어학 능력 등 과업수행에 필요한 사항 - 정량평가에서 평가되지 않은 분야별 책임기술자 및 비전담 인력에 대한 평가
나. 대상국 경험
다. 주요경력 및 학위
라. 어학능력
Ⅳ. 원조효과성 제고를 위한 독창적인 아이디어 및 방안 등
	원조의 효과성 제고방안, TOR에 대한 의견/제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적․독창적 제안/과업수행방안, 사업별 특수사항 등

2) 제안서 첨부물

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
1. 일반현황 및 연혁	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 자본금 및 매출액(최근 3년 평균치) 등을 명료하게 작성	서식 4
2. 조직 및 인력현황	제안사의 조직 및 인원 현황 작성	서식 5
3. 회사 유사사업 수행실적	제안사의 회사 유사사업 수행실적(용역구분, 용역명, 개요, 기간, 계약금액, 발주처 등) 작성	서식 6
4. 과업수행 조직 및 업무분장	제안사의 실제 투입인력을 기준으로 과업수행 조직(참여인력, 각사별 업무분장, 투입인력별 투입 Man-Month 등) 작성	서식 7
5. 참여인력의 자격사항 요약	참여인력의 자격사항 (분야, 성명, 연령, 기술등급, 중복건수 등) 작성	서식 8
6. 참여인력의 이력사항	전체 참여인력에 대해 최근 10년간 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요 경력 및 학위, 어학능력 등 이력사항 제출 ※ 비 전담 참여인력의 경우 요약기재 가능 ※ 각종 증빙서류는 별첨 (유사사업 수행실적 증빙서류에는 각 유사사업 기재 순서대로 표시 후 번호 부여)	서식 9

4. 기술제안서 작성지침

□ 제안서 본문과 첨부물은 합쳐서 양면 제본하여 한권(45장이내)으로 제출

◦ 제안서 본문(20장 이내, 제목, 목차, 간지 제외)
+ 제안서 첨부물(25장 이내) = 제안서 1권(총 45장(90페이지) 이내)

◦ 첨부물은 (별첨)의 제출서류목록 중 「서식 4, 5, 6, 7, 8, 9」를 의미

◦ □글 글자크기 본문기준 13포인트, 글꼴 휴먼명조(영문글꼴 Times New Roman), 줄간격 160%, 좌우여백 25mm, 상하여백 각각 20mm, 15mm로 작성

◦ 단, 표 안의 글자크기는 12포인트 사용 가능(단, ‘서식6, 9, 21, 22’는 글자크기의 제한 없음)

◦ A4 용지 세로로 작성,

- A4로 작성하지 못하는 경우 A3를 A4 사이즈로 접어서 붙이며 이 경우 2페이지로 간주(최대 3장, 6페이지까지 허용)

◦ 과다한 비용이 지출되는 오프셋 인쇄 등 금지(컬러인쇄물은 용지 크기에 관계 없이 단면 3페이지 이내로 제한)

◦ 작성항목 중 해당사항이 없는 경우, 작성항목 목차는 그대로 유지하고, 내용 작성 부문에 “해당사항 없음”으로 기술하여야 함.

□ 각종 증빙서류는 별권으로 제본하여 제출

◦ 사업수행실적 관련 실적증명서는 발주처가 발급한 실적증명서 또는 해외건설협회 등 관련기관이 발급한 증명서를 의미함.

- 단, 민간거래 실적은 실적증명서와 함께 원발주자(실적증명서를 발급한 민간기업 앞 공사발주자)의 낙찰증명 서류(낙찰확인 공문 등) 첨부

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 실적증명서는 서식 6의 유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 용역종류, 용역기간, 지분금액, 적용기술 등에 형광펜으로 표시

◦ 해당분야 조직․인력․기술․지식 보유현황 등 관련협회 또는 기관에서 발급한 경력증명서를 의미함.

- 경력증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 경력증명서는 서식 9의 국내외 유사업무 수행경험 실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 사업명, 분야, 담당업무에 형광펜으로 표시

5. 가격제안서 작성방법

□ 가격제안서는 조달청 나라장터에 전자입찰서로 제출하며, 제출 시 제안금액에 대한 상세내역 (산출내역서 및 산출근거)을 첨부하여야 한다.

□ 제안금액은 부가가치세 등 제세를 포함하여 제시한다.
(면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함하여 제시)

□ 제안금액 상세내역 산출내역서 작성방법

◦ 직접인건비, 제경비, 기술료, 직접경비를 구분하여 작성하고 세부 산출근거 제시 (중도 정산사유 발생시 근거자료)

․ 제경비 : 직접인건비의 110% 이내

․ 기술료 : 직접인건비+제경비의 30% 이내

․ 직접경비 : 출장경비, 자료수집비, 보고서 작성비 등 실경비

별첨 : 제출서류목록 및 관련 서식.  끝.

(별첨)

제출서류목록

구   분

제   목

부수

비   고

대표사/각사/공동

①

입찰참가

자격증명 서    류

입찰참가신청서

1부

「서식 1」 참조

대표사

입찰 대리인 재직증명서 사본

1부

대표사

사업자등록증 사본

1부

원본대조필

각사

법인등기부등본

1부

각사

법인인감증명서

1부

각사

사용인감계

1부

각사

조달청 경쟁입찰참가자격 등록증

1부

나라장터 홈페이지

각사

서약서

1부

「서식 2」 참조

각사

입찰보증금 지급각서

1부

「서식 3」 참조

공동

국세 및 지방세 완납 증명서

1부

각사

신용평가등급 확인서

1부

원본대조필

각사

②

기술제안서

기술제안서

8부

USB 1 Set 별도 제출

(한글(.hwp) 및 PDF형식)

-

일반현황 및 연혁

「서식 4」 참조

각사

조직 및 인력 현황

「서식 5」 참조

각사

유사사업 수행실적

「서식 6」 참조

각사

과업수행 조직 및 업무분장

「서식 7」 참조

공동

참여인력의 자격사항(요약)

「서식 8」 참조

공동

참여인력의 이력사항

「서식 9」 참조

각사

③

증빙 서류

경력증명서(관련협회 등 발행) 및 기술용역이행 실적증명서

1부

원본대조필

※기술제안서와 별권으로 제본

-

④

기타 서류

청렴계약이행 서약서

1부

「서식 12」 참조

각사

독립성 확약서

1부

「서식 13」 참조

각사

정보 비공개 동의서

1부

「서식 14」 참조

각사

개인정보 수집·이용 동의서

1부

「서식 15」 참조

각사

퇴직자 영입현황 확인서

1부

「서식 16」 참조

각사

신규 입찰자 확인서(최근2년 실적 전무)

1부

「서식 17」 참조

각사

신규 입찰자 확인서(계약실적 전무)

1부

「서식 18」 참조

각사

EDCF 부정당업자 제재(제재중)

1부

「서식 19」 참조

각사

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

1부

「서식 20」 참조

각사

제안서 작성지침 미준수 자가진단표

1부

「서식 21」 참조

공동

정량평가 자가진단표

1부

「서식 22」 참조

*엑셀파일 별도송부

대표사

조세포탈 여부 확인 확약서

1부

「서식 23」 참조

각사

공동수급표준협정서

(공동이행방식)

1부

기획재정부 ‘계약예규’,

8. 공동계약운용요령 참조

공동

중소기업 확인서(중소벤처기업부 발급)

1부

중소기업인 경우에 제출

각사

장애인기업, 사회적기업 증명·확인서

(중소벤처기업부, 고용노동부, 해당부처 발급·확인문서)

1부

해당기업인 경우에 제출

각사

당행 컨설턴트 Pool 등록 확인자료

1부

EDCF 홈페이지 컨설턴트 정보관리 캡처화면 제출

각사

※ 신청서류 중 사본 제출시에는 “원본대조필”이라고 명기하고, 인감(또는 사용인감)을 날인하여 제출하고, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

※ “②” 기술제안서 및 “③” 증빙서류는 책자로 제출, “①” 입찰참가자격 및 “④” 기타는 서류형태로 제출

※ ④기타서류 중 해당사항이 없는 경우라도, ‘해당사항 없음’으로 기재하여 제출

※ 법인인감증명서 및 법인등기부등본은 최근 3개월 이내 발급된 서류 제출

(서식 1)

입 찰 참 가 신 청 서

신

청

인

상호 및 법인명칭

법인등록번호

주            소

전 화  번 호

대     표     자

생 년 월 일

입찰

개요

입찰공고(지명)번호

-

입 찰  일 자

입  찰  건  명

「사 업 명」F/S 용역

입

찰

보

증

금

납          부

․보증금율 : 입찰금액의 25/1000 이상

․보증금납부방법 : (작성예시) 입찰보증금 지급각서 제출

납 부 면 제 및

지  급  확  약

(작성 예시, 불필요시 삭제 요망)

․본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 은행에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 확약합니다.

입찰참여

대리인․사용인감

본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성 명 :

생년월일 :

본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감          (인)

귀 행의 「사 업 명」F/S 용역 입찰에 참가하고자 귀 행의 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류

2. 기타 공고로서 정한 서류

2024년  월   일

상호 및 법인명칭 :                                                                  신청인 :            (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 2)

서  약  서

회사명:

주  소:

본인은 「사 업 명」F/S 용역에 참가함에 있어 귀 은행이 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024.   .    .

상호 및 법인명칭	:

대표자	성         명	:              (인)

생   년   월  일	:

한국수출입은행장 귀하

(서식 3)

입찰보증금 지급각서

입 찰 건 명	: 「사 업 명」 F/S 용역

입 찰 일 자	: 2024.   .   .

입찰보증금율 : 입찰금액의 1000분의 25

당사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조에 의한 귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 즉시 현금으로 납부할 것을 확약하며, 이에 각서를 제출합니다.

2024년   월    일

주          소 :

상호 및 법인명칭 :

대    표    자 :             (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조(입찰보증금)

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제3항의 규정에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 법 제9조 제3항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

(서식 4)

일반현황 및 연혁

회  사  명

대 표 자

사 업 분 야

주       소

전 화 번 호

회사설립년도

해당부문 종사기간

재무제표

(최근 3년 평균치)

총자산

자기자본

매출액

당기순이익

주요연혁

(현지업체) 일반현황

회  사  명

대 표 자

사 업 분 야

주       소

전 화 번 호

회사설립년도

주요연혁

주요실적

전문역량(전문인력 보유현황 등)

(서식 5)

조직 및 인력 현황

□ 조직도

□ 인력 현황

직무

분야

계

임원/

관리자

PM

영업/

기타

계

(서식 6)

유사사업 수행실적(각 참여사별 작성)

상호 및 법인명칭 : (ex, A사)

유 사 사 업 수 행 실 적

No.

구 분

(FS,기본,실시설계)

용역명

용역개요

용역기간

계약금액

(천원)

발주처

책임 기술자

비 고

(해외)

A1

예비타당성조사

ㅁㅁㅁ

전체금액

(지분율, 지분금액)

A2

타당성조사

ㅂㅂㅂ

1,000,000

(60%, 600,000)

해외

계

00건

총

00건

해외

기본설계

기본설계

해외

계

00건

총

00건

해외

합계

00건

총

00건

해외

※ 1. ‘입찰제안서 세부평가기준’에 명시된 수행실적 중 발주자의 평가기준에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외(명백히 해당되지 않는 실적의 경우 제안서 작성지침 미준수로 간주하여 감점대상)

2. 해외·국내 실적을 분리하고, 각각 (예비)타당성조사, 기본설계, 실시(상세)설계
총 3가지로만 구분하여 분야별 합계를 하단에 기재

3. 발주처 또는 실적증빙기관이 발급한 실적증명서 미첨부시 실적 불인정

- 실적증명서는 ①유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호(용역사별로 A1, A2 또는 B1, B2 등) 견출지를 부착하고 ②용역종류(예:타당성조사, 기본설계 등), 용역기간, 지분금액, 적용기술 등 중요사항에 형광펜으로 표시 할 것 (실적평가시 형광펜 표시된 부분만 검토될 예정)

- 기본설계, 상세설계 용역과 감리용역을 동시에 수행한 건에 대해서는 지분을 고려한 설계용역의 금액만을 분리하여 제시

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필할 것)도 가능하며, 민간거래 실적은 낙찰을 증명할 수 있는 서류 첨부 필요
[‘작성 및 증빙방법(회사 유사사업)’의 4. 실적인정 기준, ⑵, ⑶번] 참고

- 해외실적의 경우 해외건설협회 또는 발주처에서 발급한 실적증명서를 제출한 사업에 한하여 실적을 인정함.
[‘작성 및 증빙방법(회사 유사사업)’의 4. 실적인정 기준, ⑵, ⑶번] 참고

4. 공동도급의 경우 계약금액 항목에 전체금액과 지분율에 따른 금액을 같이 기재 (계약금액에 지분율 표시)

5. 다른 통화(원화 이외)로 계약 체결된 해외실적의 경우, 해당 실적 계약일 기준환율(KEB 하나은행 고시 매매기준율) 적용

(서식 7)

과업수행 조직 및 업무분장

사업실시기관지원

사업수행책임자(PM, 철도)

Local Team Leader

현지상주 2인

성명 (0 MM)

철도

교통

구조

토질·지반

터널

수리·수문

건축신호·통신

차량기지

·건축

철도운영

환경·사회

(A ENG)

(B ENG)

(B ENG)

(A ENG)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

- 전담(분야책임자) (정량평가 대상)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

- 전담(분야참여자) (정성평가 대상)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

-

성명

(0 MM)

-

성명

(0 MM)

-

-

-

-

-

-

-

궤도

철도기계

철도전기

비용산정

TOD

차량기지

신호

통신

기후변화

재무·경제

(A ENG)

(B ENG)

(B ENG)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회계사)

- 참여자 (정성평가 대상)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

자율분야 3인(선택사항)

통번역

(회사명)

(영어)

- 비전담 참여자(통번역 포함 최대 4인)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

현지 설계업체 참여인력(안)

국내인력 조직도 중 기후변화, 재무·경제, 통번역 제외 전 부문에 대한 현지업체 설계하도급 조직도(안)

참고) 1. 위의 그림과 동일하게 단위업무별로 세분화하여 작성

- PM, 철도, 궤도 분야 인력은 반드시 대표사소속

- 각 분야별 참여인력은 모두 동일 용역사 소속

2. JV 구성시 대표사 포함 최대 4개사까지로 제한됨(3개사 이내 권고)

- 단, 건축, 신호, 통신, 기후변화, 재무·경제 및 통번역(영어전공), 인력은 외부기관 인력 제시 가능(옅은음영 부분)

- 재무·경제 인력은 교통관련 사업 재무성분석 경험자 및 회계사 자격을 보유한자, 법인 또는 법인소속 으로 제시 必

3. 참여자별 참여기간(M/M) 명시

4. 현지상주 관련하여, 지반조사/측량 기간중 토질지반 또는 구조/터널 등 관련분야 인력이 필수로 상주해야 하며, 필요시 주요분야 인력과 분할 상주
- 주요분야 외 타인력 상주사유 있을시 당행 승인 하에 예외적용

5. PM은 영어 구사능력이 우수한 자를 지정

(서식 8)

구분

분야별

성명

연령

(세)

기술

등급

최종

학력

자격증

담당업무

소속사

(중복건수)

전담

PM

기술사

석사

A기술사

ex)사업총괄

한은(2건)

철도

분책

기술사

박사

B기술사

수은(3건)

참여

특급

석사

C기사

참여

교통

분책

중급

학사

D기사

참여

구조

분책

참여

참여

토질·지반

분책

참여

터널

분책

참여

수리·수문

분책

참여

신호통신

분책

참여

차량기지

·건축

분책

참여

철도운영

분책

참여

환경·사회

분책

궤도

참여

철도기계

참여

철도전기

참여

비용산정

참여

TOD

참여

차량기지

참여

신호

참여

통신

참여

기후변화

참여

재무·경제

참여

Local Team Leader

참여

비전담

[자율]

소속사(3건)

[자율]

[자율]

통번역

참고) 1. 전담인력 : 사업수행책임자(PM) 1인, 분야책임 10인, 참여 18인(총 29인)

2. 비전담참여 : 자율3인, 통번역(최대 4인)

3. 작성기준일 : 입찰공고일현재

4. 기술등급 : 본 제안요청서 첨부 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’에 따라 기술자별 기술등급 및 해당 사유 간략 기재

예) 특급(석사 10년), 고급(석사 6년)

5. 각종 증빙서류(PQ서류, 경력증명서, CEMS자료 등)는 별도제출
(통번역전문가(통번역대학원 학위증 사본) 및 재무·경제전문가(회계사 자격증) 필수 제출서류 포함)

6. 분야별 전담인력은 계획된 참여기간 중 타 사업 중복참여건수 명기(예: 2건)

- 정성평가 ‘인력운용계획’에서 중점 평가 예정 및 PM 대면평가 시 질의 가능하므로 이를 고려하여 인력 구성

- 중복참여건수 확인을 위해 건설기술용역통합관리시스템(CEMS)자료 제출

- 입찰공고일 기준 ①잔여과업기간이 2개월 이상용역 대상, ②건설기술용역통합관리시스템(CEMS) 실적데이터 기준, ③3개월이상 과업중지건 제외

7. 입찰공고일 기준 용역에 참여하고 있지만 CEMS상 미등재된 경우, 등록 후 증빙서류 제출

(서식 9)

참여인력의 이력사항

성    명

(국문)

주 민 등 록 번 호

(뒷자리 *로 표시)

(사진첨부 필수)

(영문)

*******

(한문)

직장주소

자택주소

연락처

전화 :                  / 휴대전화 :

e-mail :

학    력

학  교  명

학과 (전공)

졸업일

논 문 명

고등학교

학사과정

석사과정

박사과정

직장경력

회 사 명 (기관명)

근무기간

직 위

담 당 업 무

00.0.~00.0.

(0년0개월)

총 근무기간

년  개월

자 격 증

자  격  증  명

취 득 년 월 일

발 행 기 관

외

국

어

구분

읽기

쓰기

말하기

A : Native speaker와 같이 자유로운

구사 (통역자격 수준)

B : 일상생활은 물론 전문적 내용에 대해서도 구사가능

C : 일상생활에 지장 없음

D : 사전이 있으면 의사소통가능

유사업무

수행경험

No.

사 업 명 (조사명)

대상국

분야

기   간

발주자명

담당

업무

1

[A1]~~~~

00.0.~00.0.

(0년0개월)

2

[A3]~~~~

3

[A6]~~~~

4

[A7]~~~~

5

6

7

8

9

10

해외근무

경력 또는

출장경력

No.

업 무 명

국 명

기 간

담  당   업  무

1

2

3

4

5

참고사항

[Notes]

1. ‘입찰제안서 세부평가기준’에 명시된 수행실적 중 발주자의 평가기준에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외(명백히 해당되지 않는 실적의 경우 제안서 작성지침 미준수로 간주하여 감점대상)

2. 발주처 또는 실적증빙기관이 발급한 경력증명서 미첨부시 실적 불인정

- 실적증명서는 ①유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지를 부착하고 ②용역종류(예:타당성조사, 기본설계 등), 용역기간, 지분금액, 적용기술 등 중요사항에 형광펜으로 표시 할 것 (실적평가시 하이라이트 표시된 부분만 검토될 예정)

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필할 것)도 가능하며, 민간거래 실적은 낙찰을 증명할 수 있는 계약서 사본(인감으로 원본대조필)/낙찰통보공문 등 본 제안요청서에서 요구하는 증빙서류를 첨부할 것
[‘작성 및 증빙방법(회사 유사사업)’의 4. 실적인정 기준, ⑵, ⑶번] 내용을 참고하여, 동일한 방법으로 증빙서류 제출

3. 비전담 참여인력의 경우도 제출해야 하며, 필요시 요약기재 가능

* 정성평가대상인 전담참여 인력은 반드시 전부 기재 필요

4. PM의 경우 참고사항에 중복사업 개요(사업명, 과업종류, 발주자, 사업기간), 역할(PM/분책/실무자 등) 등 기재

(서식 10)

용역비 산출내역서

1. 사 업 명 :「사 업 명」F/S 용역

2. 입찰일자 : 2024년   월   일

○ 용역비 산출내역서

(단위 : 원)

연 번

항      목

금                액

1

직접 인건비

2

제  경  비

3

기  술  료

4

직접 경비

국 외 여 비

현 지 상 주

현지조사비

<항목별 기입>

...

...

보고서 작성

자문위원회

소   계

5

손해배상공제

6

부가가치세(  %)

합   계

※ 각 항목별 세부 산출근거 첨부(현장조사 항목별 금액 분리 기재)

※ 제경비 : 직접인건비의 110% 이내, 기술료 : 직접인건비+제경비의 30% 이내

주  소 :

상  호 :

대표자 :           (인)

(서식 11)

용역비 세부 산출근거

○ 사업 용역비 세부 산출근거

(단위 : 원)

구       분

합   계

산     출    근    거

합       계

1. 직접인건비

계

기술사

00MM×일단가×20.6일/월

특급

고급

중급

2. 제경비

계

직접인건비의 110% 이내

3. 기술료

계

직접인건비+제경비의 30% 이내

4

직

접

경

비

계

국외여비

소계

항공료

00회×항공료

체재비

출장 : 00일×00회×일체재비

상주 : 00일×일체재비

현지상주

소계

차량

00개월×단가

사무실

00개월×단가

통신비

00개월×단가

현지조사비

소계

측량

지반

환경

단가

...

보고서작성

소계

인쇄비

00부×000장×단가

번역비

000장×단가

자문위원회

소계

4회×4인×단가

<항목별 기입>

소계

소계

5. 엔지니어링 손해배상공제료

1단계 = 순계약금액*×기본요율

2단계 = 순계약금액×0.16%

6. 부가가치세

(서식 12)

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하고자 한국수출입은행(이하 “귀행”이라 한다)에서 시행하는 모든 공사, 용역, 물품구매 등과 관련하여 당사 임직원과 대리인(이하 “임직원 등”이라 한다)은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에서 특정인의 낙찰을 위하여 담합하거나 입찰가격협정을 한 것이 사실로 드러날 경우 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참가하지 않겠으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 귀행이 공정거래위원회에 신고하여 과징금 등이 부과되더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익(이하 “뇌물 등”이라 한다)을 제공하지 않겠으며 이를 위반하였을 때는 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참여하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 귀행이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하고 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사 임직원 등이 관계 임직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에게 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 하도급자가 뇌물 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 때에는 그러한 행위에 당사의 책임이 없는 경우라 하더라도 귀행의 지시에 따라 하도급계약을 해제 또는 해지하도록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며 당사가 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 귀행의 조치와 관련하여 당사는 귀행을 상대로 손해배상 청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024.    .    .

서약자(회사대표자):               (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 13)

독립성 확약서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역을 수행함에 있어 관계 법규의 위반이 없이 용역수행을 위한 독립성을 확보하였음을 확약합니다.

2024년    월    일

상 호 (법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부 귀하

(서식 14)

정보 비공개 동의서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제 3자에게 일체 누설하지 않겠으며, 제안서에 명시한 보안방침 및 귀행의 보안정책을 철저히 이행할 것을 확약합니다.

2024년   월    일

상 호 (법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 15)

입찰평가를 위한 개인정보 수집·이용 동의서

한국수출입은행은 「○○○○○○ 사업 F/S(타당성조사) 용역」입찰평가를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 하는 바,「개인정보보호법」등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집·이용 동의

[개인정보 수집‧이용 목적]

○ 입찰절차의 진행 및 업체선정 과정에서 필요한 정보 확인 등

[수집‧이용하는 개인정보의 항목]

○ 제안업체 대표자 성명, 생년월일, 성별, 주소

○ 입찰참가 신청 제출 대리인의 성명, 생년월일, 전화번호, 이메일, 소속/직책, 재직기간

(대표자 및 대리인의 개인정보 외 참여인력의 개인정보는 제안업체에서 자체적으로 ‘개인정보 제3자 제공 동의’를 받아 한국수출입은행 앞 제공하는 정보임.)

[개인정보 보유 및 이용 기간]

○ 본 동의서가 작성된 때로부터 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간(5년)까지

[동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익]

○ 위 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나 동의하지 않은 경우, 본 입찰의 계약체결 대상에서 제외함.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?              (동의하지 않음 ☐  동의함 ☐)

2024년

월

일

성명:

(서명)

한국수출입은행 귀중

(서식 16)

퇴직자 영입현황 확인서

- 공고번호 :

- 입찰(계약)건명 :

1. 상기 입찰(계약)건과 관련하여 당사는 한국수출입은행의 퇴직자* 영입 근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

성   명

고용일자

담당업무

* 한국수출입은행 퇴직 후 2년이 경과하지 않고 고용한 경우만 해당

2. 한국수출입은행의 퇴직자를 영입한 경우에는 귀행의 내규에 따라 계약의 상대방 자격을 제한하는 은행의 규정을 따르겠습니다.

본 건 입찰 또는 계약을 수행함에 있어 상기의 사항을 준수할 것을 확약하며, 만일 상기 신고사항과 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2024.    .    .

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 17)

신규 입찰자 확인서

(최근 2년 EDCF F/S 계약실적이 없는 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 과거 EDCF F/S 수주실적이 있으나 아래표와 같이 입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

□ 미해당

입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

ㅇ 가장 최근 EDCF F/S 계약건명 및 해당건 계약 연월일

(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

가장 최근 EDCF F/S 계약건명

계약 연월일

비 고

1

2

3

2024.    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 18)

신규 입찰자 확인서

(신규입찰자용-EDCF F/S 계약실적 전무)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약 실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

한편, EDCF 사업타당성조사(F/S) 입찰에는 참여하였으나, 계약자로 선정되지 않은 건은 아래표와 같습니다.

□ 미해당

입찰공고일자 기준 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

ㅇ 가장 최근 EDCF F/S 입찰 참여 건 기재

(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 해당없음 기재)

구 분

가장 최근 EDCF F/S 계약건명

계약 년월일

비 고

1

2

3

2024.    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 19)

EDCF 부정당업자 제재 확인서

(입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재 중인 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, 아래 표와 같이 EDCF 부정당업자 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받고 있는 입찰자임을 알려드리며, 그에 따라 평가기준에 의거 본건 입찰에 불이익이 존재함을 인지하고 있습니다.

□ 미해당

입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재가 아닌 경우

ㅇ 입찰공고일자 기준, EDCF 제재 또는 MDB 상호제재 진행 사항

(가장 최근 건 부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 해당없음 기재)

구 분

제재 발생 사업명

제재 기간

제재 처분일

제재 사유

1

2

3

2024.    .    .

상호 및 법인명칭 :

서약자(회사대표자) :         (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 20)

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

당사는 금번 EDCF F/S 용역업무를 수주할 경우

1. EDCF F/S 용역 수행 완료 후 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 평가되는 것을 충분히 숙지하고 있습니다.

2. 또한, 사후적으로 (고의 또는 중과실 등의 사유로) F/S가 부실로 확인되는 경우 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 재평가될 수 있음을 충분히 숙지하고 있습니다.

3. 상기 평가 및 재평가 결과는 평가 후 2년간 당사가 다른 F/S 용역 입찰 참여시 귀행의 F/S 제안서 기술평가에서 가감점(건별 ±2점 이내, 누계 ±4점 이내)으로 반영·활용됨을 충분히 이해하고 이에 동의합니다.

귀행의 F/S 용역 평가 및 타 F/S 용역 입찰자 심사시 평가결과 활용  (가감점 적용) 등의 조치와 관련하여 당사가 귀행을 상대로 손해배상을   청구하거나 민‧형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024.   .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 21)

제안서 작성지침 미준수 여부 자가진단표

□ 입찰제안서상 명시된 본문 및 첨부물 작성 페이지 수 위반 (0.25점)

□ 제안서상 A3용지 매수제한 위반 (0.25점)

제안서는 A4용지 세로로 작성, A4로 작성하지 못하는 경우 A3를 A4 사이즈로 접어서 붙이며 이 경우 A3는 단면인쇄 기준 2페이지로 산정하며 최대 6페이지(단면기준 3장)까지 허용

(ex, 단면인쇄 기준, A4용지 54페이지+A3용지 3장(=A4 6페이지) 까지 가능)

□ 컬러인쇄물 페이지수 제한 위반 (0.25점)

□ 제안서상 자문위원 명단 기재 (0.25점)

□ 과다한 비용이 지출되는 인쇄물 제출(오프셋 인쇄 등) (0.25점)

□ 제안서 목차상 요구내용 누락 (0.25점)

□ 제안서상 서식 또는 기재순서 위반 (0.25점)

□ 제안서 내 페이지번호 누락 (0.25점)

□ 기타 입찰제안서에 명시된 제안서 작성지침 위반 (건별 0.1점)

- 각종 증명서의 유효기간 경과 또는 요구한 기한 이전 발행

- 실적평가 관련 평가대상과 무관한 실적 제출 또는 요구서류 미제출

- 제안요청서에서 허용하지 않은 분야의 외부전문가 제안

- 출장횟수 및 상주기간 등 요구된 인력투입계획 위반

- 전담 및 비전담 참여자수 미준수

- 제안인력 소속사 미기재(서식 7 및 8)

- A4용지 1페이지에 1/4로 축소된 4페이지 내용 기재 등

감점 합계 : 감점대상 ___건, 감점 ____점(최대 2.0점 감점 한도)

2024년   월   일

작성기관 :        , 작성자 직함 :    , 작성자 성명:           (인)

(서식 22)

정량평가 자가진단표

별도 엑셀파일 송부
(작성 후 Soft-file로 제출)

(서식 23)

조세포탈 여부 확인 확약서

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 및
같은 법 시행령 제12조 제5항에 따른 서약서

당사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 제1항에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다.  만일 다음 각 호의 사유로 유죄 판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 경우에는 계약을 해제ㆍ해지하는 등 불이익을 감수하겠으며, 같은 법 시행령 제76조 제2항 제1호 가목에 따라서 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.

1. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억 원 이상인 자

2. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 감면받거나 면탈하거나 환급받은 세액이 5억 원 이상인 자

3. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억 원 이상인 자

4. 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조 제1항에 따른 금액을 초과하는 자

5. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조 제1항 제3호에 해당하는 자

2023.   .   .

서약자(회사대표자) :               (인)

한국수출입은행장 귀하

(참고1)

참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표

참여업체수

A등급

B등급

C등급

D등급

E등급

계

1

-

-

-

-

0

절대평가

2

1

1

0

0

0

2

3

1

1

1

0

0

3

4

1

2

1

0

0

4

5

1

3

1

0

0

5

(참고 2)

참여인력의 등급 및 자격기준

기준

구분

기술자격 및 경험기준

학력 및 경험기준

기  술  사

․ 기술사

-

특급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 13년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

고급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 박사학위를 가진 자

․ 석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

중급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 4년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

초급기술자

․ 기사자격을 가진 자

․ 산업기사자격을 가진 자

․ 석사학위를 가진 자

․ 학사학위를 가진 자

․ 전문대학을 졸업한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

대면 제안설명회 참여 또는 비대면 입찰참여 의향을 표시한 회사만이 JV대표사 자격이 주어짐

(입찰마감일 전까지 참여의향을 밝히지 않은 회사는 참여사로만 용역참가 가능)

(필요시)본 RFP 출력후 지참 요청

대면으로 제출한 경우, 별도 송부 필요 없음

공동도급의 경우, 대표사만 사업자등록증 제출 필요

(중요) 서류 및 USB에 가격제안서를 포함하지 않음

가격제안서는 당행 앞 미제출

>반드시 나라장터에 업로드

> ‘직접경비’는 항목별 상세내역 Break down하여 기재 必

>가격제안서에 엔지니어링 손해배상공제 보험금액 반영 必

(안내사항)

1. 공동이행방식

: 공동수급체 구성원이 일정 출자비율에 따라 연대하여 공동으로 계약을 이행하는 공동계약

-구성원수 : 4개 이하

(3개사이하 권고)

2. 최소지분율

- 기관별 최소지분율 10% 이상

공동도급으로 참여시에도, 참여사 보유 실적을 합산해서 판단

(예시)

‘A사 + B사 + C사’ 공동도급 참여하는 경우, A사 ①번 해당실적, C사 ②번 해당실적 보유시  해당 공동도급사는 입찰참가 자격을 보유하고 있는 것으로 판단함

(본 건 한정 유의사항)

(본 건 한정 유의사항)

(안내사항)

현지업체를 활용한 현장조사방안 상세 기재(현지업체 선정부터 보고서 작성, 조사품질 관리방안 등)

협력 가능한 현지업체가 이미 확보되어 있는 경우, 해당업체의 개요(업력, 직원수 등), 유사과업 수행사례, 장비 보유현황 등 기술

현지업체 앞 설계 하도급을 위한 R&R 및 고용/관리 계획 포함

(안내사항)

기술제안서 증빙서류에 관련증빙 필수 포함

(안내사항)

‘MDB유사사업’경험 증명의무는 입찰사에 있음에 따라, 증빙서류상에 반드시 여부 별도 명시!

(명시하지 않을시 불인정)

3억원 기준은 과거지분율을 미고려한 총 용역금액으로 평가

단, 분리발주된 용역(측량 등) 건은 총 용역금액에서 제외함

* 실업무 수행인력 제시필수

참여도가 낮다고 판단될 경우 교체/제외 예정

제시된 참여인력만 주도적 용역참여 가능(메일/유선 연락, 당행/실시기관과 협의 등)

비공식 참여인력은 내부업무만 수행

- PM의 참여도가 낮다고 판단될 경우 즉시 제외/교체 예정

(ex, 실시기관 및 당행과의 관계에서 타 인력에게 유선/메일 보고업무 전가, 온/오프라인 주요회의 참석률 저조, 타용역 수행으로 인한 잦은 업무중복 등을 종합적으로 고려해 판단)

8. 운수시설

가. 여객자동차터미널

나. 철도시설

다. 공항시설

라. 항만시설

마. 그 밖에 가목부터 라목까지의 규정에 따른 시설과 비슷한 시설

여객자동차터미널, 공항여객청사, 항만운송터널의 건축분야 등

여객취급과 관련된 유사시설

단, 건설기술인협회 외 다른 협회에서 실적/경력을 관리하는 분야*의 경우 해당협회 실적 제출시 실적/경력 인정.

* ex)철도운영, 건축 등

(중요) 착수보고서는 기 제출했던 ‘제안서’를 재구성하는 수준이 아니라,

-제안서 내용을 바탕으로

-각 세부항목별 목표시기, 과업종류별로 해당 과업을 어떻게 수행할 예정인지에 대해,

-상세한 FS공정표 및 항목별 실행계획을 작성해야 합니다.

-또한, III-6.의 보고서제출계획 일정을 수립해야 합니다.

Part 1~9로 구성.

은행에서 ‘주보고서’ 내용에 일반적으로 요구하는 과업범위(안)으로서 향후 보고서 목차는 이를 근간으로 하되, F/S 수행기관과 은행, 수원국간 협의를 통해 목차 수정 또는 보완 가능

현장조사보고서 별도본 제출시 현장조사사진 삽입

이를 위한 현장조사 계획을 제안서에 명시

현지 하도급 예정시

대상후보업체, TOR배포 및 견적접수일정, 수행 및 보고서 작성일정을 포함하고(일정 수립시 현지 기후 제약사항 반영)

현장 관리감독 등을 통한 현지 하도급 업체 품질관리방안 기재 >>입찰사 상주인력/출장일정과 연계

하도급업체가 이미 확정되어 있는 경우, 해당업체의 개요(업력, 직원수 등), 유사과업 수행사례, 장비 보유현황 등 기술

본공사 하자보수기간 중 사업실시기관의 컨설턴트 필요성 확인 및 MM 파악 및 반영

실시기관에서 요구하는

-O&M 요구사항(매뉴얼/절차서 작성 여부, 기술전수 수준 등) 파악

-Training 대상범위, 횟수, 연수수준, 수행주체 등 수립 必

* 관리자가 아닌 실업무 수행인력 제시필수!!

- PM의 참여도가 낮다고 판단될 경우 즉시 제외/교체 예정

(ex, 실시기관 및 당행과의 관계에서 타 인력에게 유선/메일 보고업무 전가, 온/오프라인 주요회의 참석률 저조, 타용역 수행으로 인한 잦은 업무중복 등을 종합적으로 고려해 판단)

- 설계업무에 비해 타당성조사 용역은 과업량/참여인력이 적음에 따라, PM은 용역관리 업무보다는 해당분야 실무업무를 병행할 실무자급 인력으로 제시

>>> 전무/상무급 권고

교량은 노선대안/형식/향후 항만 개발계획 반영 방안,

도로 등은 노선협의, 매립고 등 주요한 사항에 대해 과업 초기 관련정부부처 확인 및 이해관계자와 회의 必

(필요시) 당행/현지사무소 통한 협조 적극 요청

FS기간중 12개월

기본계획기간중 9개월

FS기간 중 현장조사 기간에 중복상주 허용

단, 당행과의 협의를 통해 일부 변동 가능.

현지업체를 통한 현장조사시 상주인력은 필히 현지인력 감독을 수행해야 하며,

가능한 출장도 현장조사 시기에 맞추어 실시하여, 출장기간 중 해당분야 전문가는 현장조사 감독 수행 병행

현지출장 기간은 7일/1회 기준.

출장/상주 잔여분 경비 환입 必

단, 필요시 당행 승인하에 현장조사기간중 중복상주 가능

(과업기간 후반 중복상주 불가)

4.FS 과업범위 - Part4에서 제안서에 반영 요청한 사항을 바탕으로 보다 상세하게 작성

상기 사업실시기관 상주 2인 내용 포함

철도, 구조(또는 터널), 지반, 운영, 비용(경제성/재무성) 등 각 단계별

유의사항

유의사항

(안내사항)

별첨에 들어가는 양식을 활용하는 것이 아니라 실질적인 과업능력을 파악할 수 있도록 서술 필요

4. F/S과업범위 참고

------------

-현지 하도급 예정시 상세작성

-대상업체, TOR배포 및 견적접수일정, 수행 및 보고서 작성일정을 포함하고(일정 수립시 현지 기후 제약사항 반영)

-현지 팀리더와 설계업체 그리고 현장조사 하도급업체의 Role& Responsibility 명시

-현장 관리감독 등을 통한 현지 하도급 업체 품질관리방안 기재 >>입찰사 상주인력/출장일정과 연계

-하도급업체가 이미 확정되어 있는 경우, 해당업체의 개요(업력, 직원수 등), 유사과업 수행사례, 장비 보유현황 등 기술

------------

-현지 세무법인 하도급을 통한 세금체계 조사 계획 포함

서식8 또는 서식9의 어학능력 표를 발췌해서 작성하지 말고 해당내용 평가가 가능하도록, 서술 또는 별도의 양식을 사용 할것

별도 송부드릴 예정인 제안서 증빙서류 작성요령 참고

별도 송부드릴 예정인 제안서 증빙서류 작성요령 참고

(안내사항)

① 및 ④는 제본하지 않고,

간지를 제외한, 각각 낱장 형태로 순서대로 제출

가격제안서는 포함하지 않음

Part1. 회사 및 개인의 기술용역이행 실적증명서는 각 사별로 앞부분에 모두 첨부한 후,

A회사실적 : A1~A10

A소속 개인실적 : A11~A20

B회사실적 : B1~B10

B소속 개인실적 : B11~B20

Part2. 개인별 ‘PQ서류/분야별참여기술인명단/건설기술인 경력증명서’는 해당항목 우측에 Part1의 실적번호(ex,A5~A14)를 기재하고, 주요사항 하이라이트 기재

간지 없이 순서대로 제출

(안내사항)

대표사의 대표자를 의미함

(안내사항)

공동도급의 경우

1) 대표사가 전체에 대하여 지급각서를 제출하거나,

2) 각 참여사가 참여지분율만큼 보증금을 설정 후 날인하여 제출 가능

(안내사항)

참여사별로 작성

(안내사항)

F/S사가 제안하는 현지업체별로 작성하고, 제시된 항목은 예시로서 내용은 자유롭게 기술

(안내사항)

참여사별로 작성

본 서식6 No.에 각 회사별 실적번호 [A1], [A2], [B1], [B2] 등을 기재하고,

해당 실적증빙서류(발주처 발행, 해건협 등)에 동일번호[A1], [A2] 견출지 부착

실적증명서상 기재되어 있는 용역사별 계약금액(지분율 고려)과 일치 필요

총계 및 해외만 입력

-(예비)타당성조사, 기본설계, 실시(상세)설계 총 3가지로만 분류

2가지 이상의 과업이 하나의 실적에 포함된 경우, 상위단계 용역으로 분류

타당성+기본설계 -> 기본설계

기본+실시설계 -> 실시설계

정성평가 대상(참여자 간주)

-이력서 첨부 必

(실적증명서 첨부는 선택사항)

-제안서 내 ‘현지 협력사 활용방안’ 부분에 FS 및 기본설계 단계별 현지 설계팀 및 팀리더의 Role&Responsibility 명시

-중복입찰 가능

경력 및 실적 정량평가 대상

경력 및 실적 정성평가 대상

-유사사업 수행실적 및 증빙서류 제출

인력 명시하지 않은 조직도

* 분야 및 인원(안) 작성

- 상기 ‘사업실시기관지원 현지상주 2인’ 인력 포함

참여인력의 현재 소속사명 기재

자율 비전담 관련

- (서식7) ‘자율분야’ 중 선택하여 제안 가능 (제안하지 않아도 무방)

비전담은 통번역 1인(영어,필수), 자율분야 3인(선택), 최대 4인까지 제안 가능

단, 철도, 구조, 기후변화, 재무경제 분야 제시 불가

(안내사항)

건설기술인협회에 등록된 전담인력 전원은 CEMS 화면을 캡처하여 제출

(안내사항)

계획된 기간 중, 참여 예정인 모든 용역(당행 발주 포함 모든 용역) 건수에 대해 명기

(중복 건수를 누락하여 기재했을 경우 감점 처리)

자택주소는 ‘동’ 단위 까지만 기재

반드시 소속회사 메일주소 기재

(일반 상용메일(네이버, daum등)은 타인의 대용 가능성 문제로 제외)

향후 용역진행시 동 메일주소 사용 예정

(분책) 인력요구조건에 부합하는 실적에 대해 최대 10건 수록

(참여/비전담) 유사실적에 대해 최대 최대 10건 수록

국내에서 수행한 해외사업 수행실적이 아닌,

‘해외상주’ ‘장기출장’ 또는 ‘해외연수’ 등 경력만 기재

(필요시 출입국증명원 등 증빙자료 추가 요청)

(안내사항)

유사 경험은

”2)-② 참여인력의 경력 및 유사사업 수행실적 기준*“의 유사사업 실적에 맞춰 작성

인쇄비 및 번역비 포함*

*용역사 자체 통번역전문가를 통한 번역을 기본으로 하나, 번역 퀄리티 검토 후 필요시 외부 용역 고용 요청 예정

하단에 표기된 항목은 필수 작성

(해당 없을시 빈칸 기재)

반드시 하단 양식 준용하여 상세작성

제안요청서(III. - 5.과업 수행방법)상 제시된 최소 횟수이상 (출장+상주)

91회(86+5) 이상

제안요청서(III. - 5.과업 수행방법)상 제시된 최소 횟수이상

-출장 : 출장당 평균 7일/회*최소86회= 최소 602일 기준

-상주 : 최소 21MM(총 630일)

(당행 승인하에 출장자간 및 출장-상주인력간 변경만 가능)

측량/지반조사비는 별도로 분리

- 회사 내 통번역 인력를 통한 번역시 예상 비용 또는

- 외부 통번역사 고용시 예상 비용

최소 4인 * 4회

본 용역은 손해배상보험(공제) 가입대상임.

엔지니어링 손해배상보험(공제)관련 법령에 의한 보험 가입금액

단, 순계약금액= 표 1~4의 합

각사별 제출하나

아래 개인정보 항목 관련, 제출 대리인 정보는 대표사만 해당되므로 이외 참여사의 경우 해당 내용 삭제후 날인

대표사만 해당되는 내용

(참여사의 경우 해당 문구 삭제)

해당사항 없을시,

“해당사항 없음” 으로 기재 후 제출

해당사항 있을시,

퇴직자의 업무가 계약/입찰과 무관함을 증빙할 수 있는 서류 제출 필요

Ex) 조직도 및 개인업무분장 등