「우즈베키스탄 타슈켄트-사마르칸트 고속철 노선 건설사업」

타당성조사(F/S) 용역을 위한

제 안 요 청 서 (RFP)

2024. 9.

－ 목   차 －

Ⅰ. 제안 안내

1. 용역 개요

2. 사업 추진 일정

Ⅱ. 제안 일반사항

1. 입찰 및 계약 방법

2. 입찰공고

3. 입찰 참가자격

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

5. 입찰시 유의사항

6. 제안서 평가방법

7. 협상대상자 선정 및 협상 절차

8. 최종낙찰자 유의사항

9. 기타사항

10. 용역결과 평가/활용

Ⅲ. 대상사업 개요 및 F/S 과업범위

1. 당행 발주 F/S 추진배경 및 목적

2. 본 사업 추진배경

3. F/S 대상 사업개요

4. F/S 과업범위

5. 과업 수행방법

6. 성과품 납품 및 보고서 관련 사항

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

2. 제안서 목차

3. 항목별 작성방법

4. 제안서 작성지침

5. 가격제안서 작성방법

[별첨] : 제출서류 목록 및 관련 서식

Ⅰ. 제안 안내

용역개요

□ 과 업 명 :「우즈베키스탄 타슈켄트-사마르칸트 고속철 노선 건설사업」 타당성조사(F/S) 용역

□ 과업기간 : 착수일로부터 15개월

□ 사업예산 : 3,975,000,000원(부가세, 손해배상보험공제료 포함)

사업 추진 일정

□ 제안요청 설명회 또는 입찰참여 의향 표시(택1, 대표사 자격 부여)

[(대면) 제안요청 설명회 참석]

◦ 일시 및 장소 : 2024. 9. 11(수) 10:00시, 한국수출입은행 1층 서울 회의실

◦ 구비서류 : 당행 담당자 앞 사업자등록증 사본 제출

[(비대면) 입찰참여 의향 표시]

◦ 입찰참여 의향자는 아래와 같이 입찰참여 의향 표명(사업자등록증 사본 제출)

- 제출기한 : 2024. 9. 11.(수), 17:00시

- 제출서류 : 사업자등록증 사본

- 제출방식 : E-mail 송부 (메일제목: [용역사명] ‘사업명’ F/S 참여의향서 제출)

- 담 당 자 :

(수신) 신중민 심사역 (☎ 02-3779-6789, jm.shin@koreaexim.go.kr)
(참조) 최홍석 선임심사역 (☎ 02-6255-5094, hongsuk@koreaexim.go.kr)

[참여의향 확인, 질의 및 공지]

◦ 입찰참여 의향자 앞 JV구성현황을 포함한 참여의향 재확인 후, 최종 참여예정자에 한하여 사업 기초자료 및 유의사항 e-mail송부 예정

* 제출기한 이후에도 사업자등록증 사본 제출을 통한 입찰 참여 의향 표명 및 참여사로서 입찰 참가 가능

◦ 질의응답은 E-mail 혹은 유선을 통하여 실시

□ 기술제안서 제출

◦ 제출기한 : 2024. 10. 15.(화) 17:00 (★★가격입찰 마감일 하루 전 제출★★)

◦ 제출장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비 (고객접견실)

※ 제출전 담당자 앞 유선 연락하여 당행 내방일시 사전 확인 권고

◦ 제출서류 : 입찰참가신청서 및 관련 서류 (붙임 참조)

※ 직접 방문하여 제출할 것 (우편접수 불가)

□ 가격입찰

◦ 입찰기간 : 2024. 10. 8.(화) 10:00 ~ 2024. 10. 16.(수) 17:00

◦ 입찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

◦ 가격입찰 시 가격산출근거서 파일(서식 10 및 11)을 첨부

◦ 개찰일시 : 제안서 기술평가 후 개찰

◦ 면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함한 금액으로 제출

※ 본 입찰의 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 가격입찰서와 기술제안서 중 어느 하나라도 미제출 시에는 입찰 무효처리됨(가격입찰서와 제안서는 순서에 상관없이 제출 가능)

Ⅱ. 제안 일반사항

입찰 및 계약 방법

□ 입찰 방법 : 제한경쟁입찰

□ 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약방식

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제43조 및 "협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규 제656호, 2023. 6. 16. 일부개정)”에 의거, “협상에 의한 계약방식”을 적용

입찰공고

□ 공고방법 : 조달청 나라장터와 당행 홈페이지 공고

□ 공고기간 : “입찰공고”에 의함

입찰 참가자격

□ 공통사항

◦ 입찰마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 유자격자로서 아래의 자격 중 하나를 갖춘 자

- 해외건설촉진법 제6조에 의한 해외건설업(건설엔지니어링업)

- 건설기술진흥법 제26조에 의한 건설엔지니어링업(종합) 또는 건설엔지니어링업(설계, 사업관리 - 일반), 또는 건설엔지니어링업(설계, 사업관리 - 설계 등 용역 - 일반)

◦ 입찰마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 부정당업자에 해당되지 않고,「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의해 입찰참가자격이 제한되지 않는 업체 또는 기관

◦ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청고시 제2024-1호, 2024. 1. 19.)에 의하여 입찰일 전일까지 조달청 경쟁입찰참가자격 등록을 마친 업체 또는 기관

◦ 공동도급이 가능하며, 이 경우 “공동계약운용요령(기획재정부 계약예규 제651호, 2023. 6. 16.)”에 명시된 공동이행방식 적용

◦ 입찰등록(제안서 제출) 마감일 기준 당행 컨설턴트 Pool의 ‘토목-철도’ 분야에 등록된 업체 또는 기관

- Pool 등록방법 : 당행 EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) -「고객참여·사업정보」-「해외원조시장 입찰정보」-「컨설턴트 신청/관리」메뉴 이용

- 공동도급의 경우, 모든 구성원이 당행 Pool에 등록되어 있어야 함

□ 실적 및 역량

□ 입찰공고일(2024. 9. 5.) 기준 최근 10년간 준공된 실적 중 아래 유사사업*에 해당하는 예비타당성조사, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계 등 컨설팅** 업무 수행실적 1건 이상 보유 업체 및 기관

* 유사사업: 국내외 일반철도, 광역철도, 고속철도, 도시철도 및 경전철 신설이 포함된 사업(단순 개·보수 사업 제외)

** (개념)설계, 사양검토, 물량 및 사업비 산정 등의 과업내용을 포함하여함

◦ 참여사는 상기 자격요건을 충족(공동도급으로 용역실적 상호보완 가능)하여야 하며, 세부내용은 ‘사업수행실적’ 평가기준(p.12)에 따름

입찰참가 등록 및 제안서 제출

□ 제출기한 : “입찰공고”에 의함

□ 접수장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비(고객접견실)

□ 구비서류 : “입찰 참가서류” 및 “제안서류” 참조

□ 제출방법 : 참가서류를 구비하여 직접 방문접수(우편접수 불가)

□ 문    의 : 신중민 심사역 (02-3779-6789, jm.shin@koreaexim.go.kr)
최홍석 선임심사역 (02-6255-5094, hongsuk@koreaexim.go.kr)

입찰시 유의사항

□ 공동수급체의 대표자가 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 상태인 경우에는 해당 공동수급체의 결격사유로 평가하며(제안서 평가를 종료 후 평가 당시 그 결격사유가 있었던 사실이 확인된 경우이거나 제안서 평가 종료 후부터 계약체결 전까지 결격사유가 발생하고 해소되지 않은 경우에도 같다), 공동수급체 구성원 중 부도, 부정당업자제재, 영업정지, 입찰무효 등의 상태인 자가 있는 경우에는 제안서 평가를 할 수 있다. 이 경우 출자비율 또는 분담비율은 입찰서 제출 마감일 전날까지 확정ㆍ제출된 비율로 하며, 결격사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율을 남은 구성원에게 배분하지 않는다.

◦ 위에 따라 공동수급체를 평가할 경우 결격사유 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율을 전체 사업에 대한 비율로 환산하여 기술능력평가점수에서 환산 비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다. 다만, 제안서 평가를 종료 후 평가당시 그 결격사유가 있었던 사실이 확인된 경우에는 감점처리한 후 재산정한 점수로 평가 절차를 다시 진행한다.

□ 당행 계약관련 내규에 의거하여 계약의 투명성 및 공정성을 위하여 아래 각 호에 해당하는 업체는 계약상대자가 될 수 없음(단, 사업목적 달성을 위한 불가피한 경우는 예외로 함)

당행을 퇴직한 후 2년이 지나지 않은 퇴직자를 고용한 업체로서, 퇴직자가 당행의 입찰 또는 계약과 직접 관련된 업무를 담당하고 있는 업체

당행의 현직 임직원이 설립한 업체

◦ 위에 따라 계약 상대자의 자격이 제한되는 기간은 아래와 같음.

퇴직자가 당행을 퇴직한 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체와의 고용관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

현직 임직원이 당행을 퇴직하는 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체에 대한 지배관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

※ 서식 16 「퇴직자 영입현황 확인서」제출

□ 본 입찰은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청고시 제2023-18호, 2023.6.26.) 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함

단, “지문인식 신원확인 폐지에 따른 조달업무처리 특례 안내(조달청 고시 제2023-51호(2023.12.21.제정)”에 따라 지문정보를 등록하지 않아도 전자입찰에 참가할 수 있으므로 관련 절차는 해당 고시를 참고하기 바람

□ 당행이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자는 입찰참가자격이 결격 처리됨

□ 기타 입찰등록 마감일 현재 당행 규정 및 국가계약법상 하자가 있거나, 전국은행연합회의 “신용정보관리규약”에서 정하는 연체, 대위변제･대지급, 부도, 관련인에 의한 신용거래정보 및 금융질서문란정보의 등록대상자, 국세 및 지방세 체납기관 등은 입찰에 참가할 수 없음

□ 국가계약법 제27조, 동법 시행령 제76조에 따른 부정당업자(입찰참가자격 제한) 상태인 자는 동 입찰에 참여 불가

□ 국가계약법 제27조의5 및 동법 시행령 제12조 제3항에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 동 입찰에 참여 불가

◦ 입찰자는 동법 시행령 제12조 제3항 각 호에 해당하지 아니한다는 서약서를 입찰시 제출하며, 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약의 해제‧해지를 당할 수 있고 부정당업자 입찰참가자격제한처분을 받을 수 있음

□ 입찰보증금의 납부 및 귀속

◦ 입찰보증서의 보증기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제55조(보증보험증권등에 의한 보증금 납부)에 따라 보증기간의 초일은 입찰서 제출마감일 이전이어야하며, 보증기간의 만료일은 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후 일자이어야 함

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조(입찰보증금) 제2항에 따라 입찰보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부해야 하며, 동시행령 제3항에 해당하는 기관은 지급각서(서식 3) 제출로 입찰보증금 면제 가능

◦ 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정기일 내에 계약을 체결하지 않을시 입찰보증금은 당행으로 귀속됨

□ 입찰무효

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제11조에서 정한 유효한 입찰이 성립되지 않거나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 동법 시행규칙 제44조의 규정에 해당하는 입찰은 무효로 함

□ 기타사항

◦ 제안기관은 본 사업에 대한 제반사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

◦ 제안요청서의 내용과 상이하거나 제안요청서에 누락되어 있어도 본 사업의 수행에 필수적인 요건 또는 중요한 내용이라고 판단될 경우 제안자는 제안서에 그 내용을 기술하고 보완 대책 또는 해결방안을 제시하여야 함. 이 경우 구체적인 시행방안을 제시하여야 하며 이에 대한 제반비용은 제안자가 부담함

◦ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

◦ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

◦ 제안서는 허위나 단순 예상으로 작성하여서는 아니 되며, 모든 기재 사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 경우 심사대상에서 제외될 수 있음

◦ 사업자 선정과 관련한 제안요청 설명회(서면 또는 유선 질의응답 포함)에서 논의·답변 및 제안한 내용은 제안서와 동일한 법적 효력을 가짐

◦ 당행의 사전 승인을 득한 기준 소요 인력으로 사업을 시행하여야 하며, 변동이 있을시 필히 사전에 승인을 얻은 후 참여시켜야 함

□ 본 용역에 고용된 업체(관계회사 포함)는 당해 사업의 공급자 참여에 제한될 수 있음. 다만, 일괄수주방식의 사업에 컨설턴트로서의 역할만을 수행할 목적으로 참여하는 경우에는 그러하지 아니함

제안서 평가방법

□ 평가위원회 구성

◦ 당행 내규에 따라 평가위원회를 구성

◦ 정량평가는 제안서 및 증빙서류를 기반으로 입찰 담당부서에서 평가

□ 평가분야별 배점

◦ 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하며, 기술ㆍ가격평가 비중은 기술평가(90%) + 입찰가격 평가(10%)*임

※ EDCF 사업 특성상 수원국에 대한 경험 및 이해, 해외 현장여건을 고려한 적정 사업계획 수립 및 사업실시기관과의 협의 등 기술능력이 사업수행에 중요한바, 기획재정부 계약예규 ‘협상에 의한 계약체결기준’ 제7조 제2항에 의거, 기술능력평가 및 입찰 가격평가 배점한도를 10점 범위내에서 조정하였음

□ 기술평가

◦ 기술능력평가는 세부항목별로 5등급(A, B, C, D, E)으로 평가하고, 이를 합산하여 제안서별로 점수 산정

◦ 평가등급별 점수

구 분	A	B	C	D	E
점 수	배점의 100%	90%	80%	70%	60%
(예시) 배점 10점	10	9	8	7	6

◦ 정량평가는 유사사업 수행실적, 참여인력의 경력 등에 대해 항목별  정량평가 세부평가기준을 적용

◦ 정성평가는 참여기관수에 따른 등급배분표(참고 1)를 이용하여 상대평가

- PM 대면평가는 제출한 입찰제안서 각 항목에 대해 사업이해도, 수행계획 등에 관한 질의응답을 실시하여 평가위원들이 절대평가함

- PM 대면평가 항목 중 ‘영어구사능력’ 항목(대면평가 총 10점 중 4점 배정), PM의 영어 Presentation*(별도 PPT 자료 불필요) 실시 후 질의응답으로 진행

* 제안서 실행계획 및 전략 중점발표

□ 입찰제안서 세부평가기준

1) 기술능력평가 세부평가항목 및 배점(기후변화영향 대응체계 적용사업)

구분	평가항목	세부평가항목	배점	비 고
정량 평가	사업수행 실적	용역수행 건수	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		용역수행 금액	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 금액
		해외용역수행 건수	2.0	최근 10년간 해외용역 수행 건수
		소 계	10.0
	참여인력의 경험	사업수행책임자 자격	1.0	기술자등급 평가
		사업수행책임자 경력	2.0	해당분야 업무수행 연수
		사업수행책임자 실적	2.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		부사업수행책임자 경력	2.0	해당분야 업무수행 경험
		참여기술자 경력	4.0	해당분야 업무수행 연수
		참여기술자 실적	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
		소 계	15.0
	재무구조 및 경영상태	신용평가등급	5.0	신용조회사* 또는 신용평가사**가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음), 또는 기업신용평가등급 *「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8항의 3의 업무를 영위하는자 **「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3의 업무를 영위하는 자
	가점 및 감점	-	-	(하단의 ‘정량평가 가·감점표’ 참고)
	정량평가1) 소계		30.0

정성 평가 2)	사업내용 및 대상국의 이해	사업내용 이해	2.5	사업의 목적, 범위, 기대효과 등
		사업대상국 이해	2.5	대상국 현황, 관련계획, 대상지역 기능/특성 등
		소 계	5.0
	F/S 수행 계획	F/S 실행계획	6.0	F/S 추진전략 및 운영계획, 추진일정
		항목별 조사방법	5.0	분야별 조사계획 및 방법, 타당성분석 방안, 현장조사 방안
		수원국 소통계획	5.0	현지상주계획 및 수원국과의 협의채널 구축
		현지 협력사 활용계획3)	6.0	유사사업 실적 보유 현지 협력사 선정 및 활용 계획
		기후변화영향 대응체계 적용계획	3.0	기후위험평가, 기후위험경감계획 및 성과측정방안 수립 등
		위험요소 분석/대책	1.0	예상 위험요소 분석 및 대응방안
		F/S 관리방안	1.0	보고계획, 사후관리, 보안준수 방안 등
		영·러문보고서 작성계획	1.5	영·러문보고서 전문인력 활용계획 및 영문보고서 감수계획
		영·러문보고서 전문인력	1.5	영·러문 통번역전문가 자격 및 경력4)
		소 계	30.0
	조직·인력 현황 및 운용 계획	인력운용계획	5.0	참여조직도 및 전문가 투입계획
		투입인력의 경험 및 능력	5.0	유사사업 수행경험, 대상국 경험 등
		소 계	10.0
	원조효과성 제고를 위한 독창적 아이디어 및 방안 등		5.0	완공 후 사업의 지속가능성 향상방안, 원조 효과성 제고방안, TOR에 대한 의견·제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적․독창적 제안·과업수행방안, 사업별 특수사항 등
	PM 대면평가	사업이해도	2.0	사업의 목적, 범위, 대상국에 대한 이해 등
		수행역량	2.0	사업 수행역량 등
		위험요소 관리능력	2.0	위험요소 대응 역량 등
		영어 구사능력	4.0	영어 Presentation 진행
		소 계	10.0
	정성평가 소계		60.0
기술능력평가 합계			90.0
주1) 가산·감점을 포함해 산출된 정량평가 득점은 정량평가 배점한도 이내로 제한 (p.17 가산·감점 부여기준 참조) 주2) 정성평가 항목은 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표(참고 1)’에 따라 상대평가 (단, PM 대면평가는 절대평가) 주3) 현지 협력사(하도급) 활용방안 및 현지 인력(Local Team Leader) 운용계획 등을 평가 ※ 협업 예정 현지 기업(또는 전문가) 정보를 아래와 같이 제안서에 포함할 것 - 현지 협력사(하도급) 활용 및 협업방안(자료수집 및 현장 조사외 주요 사안에 대한 사업 실시기관과의 협의, 계획수립 등에 현지 협력사 전담인력 포함) - 조직 및 인력 현황(서식 4, 5 참조) - 사업수행능력(유사사업 및 사업실시기관 발주사업 등 주요 수행경험 기술)(서식 6 참조) - 투입인력 이력서 첨부(서식 9 참조) 주4) 영·러현지 통번역 전문가 1인 제안 (우대) ①영·러 현지통번역대학원 졸업자(수료는 미인정, 학위증 제출), ②3년 이상 번역업무 경험자

※ 정량평가 가·감점표

구분	평가항목		세부평가항목	배 점	비 고
정량평가 1)	가점	중소기업		(1.0)	중소기업 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여
		신규 입찰자		(0.5)	EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점 부여
				(1.0)	입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여
		약자 기업2)	장애인기업 및 사회적기업3)	(0.3)	장애인기업, 장애인고용 우수기업 또는 사회적기업 인증을 받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.3점 가점
			여성기업3)	(0.3) (0.5)	존속기간 3년 미만의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.3점 가점 존속기간 3년 이상의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		창업기업2)		(0.5)	창업기업 확인서를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		MDB 유사사업 경험		(1.0)	최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여실적에 따라 최대 1.0점 가점
	감점	EDCF 부정당업자 제재 (MDB 제재 포함)		(△3.0)	입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자로 제재를 받고 있는 입찰자는 지분율에 따라 최대 3.0점 감점
		제안서 작성지침 미준수		(△2.0)	입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 건별 0.25점(최대 2.0점) 감점
	가감점	F/S 용역 평가결과		(4.0~ △4.0)	입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점

주1) 가점·감점을 포함한 정량평가 점수는 정량평가 배점한도(30점) 이내로 제한

주2) 약자기업 및 창업기업 가점은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 중소기업자간 제한경쟁입찰, 지명경쟁입찰, 또는 「소프트웨어 진흥법」에 따라 대기업인 소프트웨어 사업자의 참여가 제한되는 경우에 적용

주3) 약자기업 세부평가 항목은 중복하여 평가할 수 없으며, 그중 높은 평점 한 가지만 적용

2) 항목별 정량평가 기준

① 사업수행실적(10점)

- 입찰공고일자(2024. 9. 5.) 기준 최근 10년간 준공된 실적 중 아래 유사사업*에 해당하는 예비타당성조사, 타당성조사, 기본설계 및 상세설계 등 컨설팅**업무 실적에 대한 수행건수(4점), 금액(4점) 및 해외 용역건수(2점) 평가

* 유사사업: 국내외 일반철도, 광역철도, 고속철도, 도시철도 및 경전철 신설이 포함된 사업(단순 개·보수 사업 제외)

** (개념)설계, 사양검토, 물량 및 사업비 산정 등의 과업내용을 포함하여함

(i) 용역수행 건수

5건이상	5건미만 ~ 4건이상	4건미만 ~ 3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만
4.0	3.6	3.2	2.8	2.4

(ii) 용역수행 금액

70억원이상	70억원미만 ~ 60억원이상	60억원미만 ~ 50억원이상	50억원미만 ~ 40억원이상	40억원미만
4.0	3.6	3.2	2.8	2.4

(iii) 해외 용역수행 건수주)

3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만 ~ 1건이상	1건미만 ~ 0.2건이상	0.2건미만
2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

주) 준공건수별 참여지분율을 고려한 당해 용역비에 따라 가중치 부여

구 분	10억원 이상	5억원 이상 ~ 10억원 미만	2억원 이상 ~ 5억원 미만	5천만원 이상 ~ 2억원 미만	5천만원 미만
비 율	100%	80%	60%	40%	20%

1) 유사사업은 타당성조사, 기본계획, 기본설계 또는 상세설계 등으로 한정(단순 기술검토, 심사, 현장 기초조사(측량/지질조사 등), 수량․도면작성 용역, 시공감리, 교육 및 연수, 발전방안 또는 정책 컨설팅, 연구용역, 교통/환경 등 영향평가용역, 마스터플랜 등은 원칙적으로 제외하되, (개념)설계, 사양검토, 물량 및 사업비 산정 등의 세부 과업내용을 포함하는 경우 인정 가능)

* 기본 및 실시설계, 타당성조사 및 기본계획 등 다른 유형의 과업이 함께 수행된 경우는 단일 컨설팅 실적으로 간주

* 실적인정은 용역완료를 원칙으로 함. 단, 설계와 감리를 함께 수행한 실적의 경우, 전체 용역이 완료되지 않더라도 설계가 완료되어 이를 확인할 수 있으면 실적으로 인정함. 이 경우, 실적증명서상 설계 해당 금액을 분리하여 제출 필요(미제출 시 건수만 인정)

2) 도시계획/단지개발 컨설팅 실적 등의 일부 과업(sub-scope)으로 포함된 경우는 용역보고서 본문을 기준으로 관련 내용(조사, 분석 및 계획) 100페이지 이상인 경우만 인정함

3) 관련 협회의 시장개척 지원사업은 실적으로 인정하지 않음

4) 공동도급으로 수행한 실적은 참여지분율을 고려한 건수/금액으로 평가하고, 본건 입찰에 공동도급으로 참여하는 경우 구성원별로 유사사업 수행실적에 참여비율을 곱하여 산정한 후 합산

5) 외부로부터 과업을 수주하여 직접 수행한 실적만 인정

* 자체 과제 및 발주자로서 사업관리를 수행한 실적은 인정하지 않음

* 타 기관과의 협약/위탁사업이나 참여기관을 위해 수행된 실적은 인정하지 않음

6) 다년간 수행한 사업(연차 계약)의 경우, 1건으로 인정

7) 해외 용역수행 건수 관련, 해외건설협회 또는 발주처에서 발급한 실적증명서를 제출한 사업에 한하여 실적을 인정함

* 실적증명서상 금액이 원화(KRW)가 이외의 통화(USD 등)로 명시되어 있는 경우 해당 실적 계약일 환율(KEB 하나은행 고시 매매기준율) 적용할 것

8) i) 설계․시공 일괄입찰이나 ii) 대안입찰방식으로 참여하여 낙찰자로 결정된 경우, 또는 iii) 사회기반 시설에 대한 민간투자법에 의한 사업시행자가 발주한 설계용역을 수행한 경우에는 유사용역 수행실적으로 인정하되, i) 또는 ii)에 참여하여 설계보상 대상자로 결정된 경우에는 금액 및 건수에 대하여 실시설계적격자의 80%만 인정하며, 아래 증빙자료를 모두 제출하여야 함

- i) 설계․시공 일괄입찰 또는 ii) 대안입찰방식의 설계용역을 수행한 실적은 낙찰자로 결정된 증빙서류와 낙찰자와 계약한 서류 제출

- iii) 사회기반 시설에 대한 민간투자법에 의한 민간투자사업의 설계를 수행한 실적은 사업시행자 지정공문 사본, 사업시행자와 설계용역사간에 체결한 계약서류 사본, 사업시행자가 확인한 설계완료 증빙자료

- 설계보상 대상자로 결정된 경우, 설계보상 대상자 확인 서류, 낙찰자(실시설계적격자) 계약금액(낙찰자 계약금액×80%) 확인서류

9) 상기 8)에 해당하지 않는 민간부문 발주실적의 경우 아래의 방법으로 증빙

구 분	제 출 서 류	비 고
국 내	⒜ 발주처의 용역이행 실적증명서 ⒝ 용역 계약서 및 세금계산서
해 외	⒜ 해외건설협회의 실적 증명서(또는 발주처의 용역이행 실적증명서) ⒝ 용역 계약서

10) 개별 실적에 대한 인정 여부는 제안서 평가 과정에서 결정하므로, 그 이전 답변 불가하며, 본 제안서 요구 실적과 무관한 실적 제출은 감점 대상이 될 수 있는바 유의 필요(서식 21, 제안서 작성지침 위반사항(예시) 자가진단표 참조)

[평가 예시 ❶] : 용역수행 건수/금액 평가항목 산출예시

ABC 컨소시엄 (지분율 : A사 50% + B사 30% + C사 20%)

- 제출실적

구분	사업명	지분율	금액 (억원)
A사	A-① △△ 외곽순환고속도로 건설 상세설계	80%	20
	A-② ○○ 연결 고속도로 건설 타당성조사	60%	10
B사	B-① □□ 교량 타당성조사	50%	15
	B-② ◇◇ 고속도로 기본 및 실시설계	70%	24
C사	C-① ☆☆ 지방도로 건설 예비타당성조사	90%	9

- 제출실적 평가

구분		제출실적		평가
		지분율	금액	건수	금액
A사	A-①	80%	20	80% × 1건 = 0.8건	80% × 20억 = 16억원
	A-②	60%	10	60% × 1건 = 0.6건	60% × 10억 = 6억원
	소계			1.4건	22억원
B사	B-①	50%	15	50% × 1건 = 0.5건	50% × 15억 = 7.5억원
	B-②	70%	24	70% × 1건 = 0.7건	70% × 24억 = 16.8억원
	소계			1.2건	24.3억원
C사	C-①	90%	9	90% × 1건 = 0.9건	90% × 9억 = 8.1억원
	소계			0.9건	8.1억원

- ABC컨소시엄 실적산정(지분율 : A사 50% + B사 30% + C사 20%)

ⓐ 실적건수 : [eqn: (1.4건` TIMES `50%)+(1.2건` TIMES `30%)`+`(0.9건` TIMES `20%)] = 1.29건

ⓑ 평가금액 : [eqn: (22억원` TIMES `50%)+(24.3억` TIMES `30%)`+`(8.1억원` TIMES `20%)] = 19.91억원

[평가 예시 ❷] : 해외 용역수행 건수 평가항목 산출예시

ㄱㄴ 컨소시엄 (지분율 : ㄱ사 70% + ㄴ사 30%)

- 제출실적

구분	사업명	지분율	금액 (억원)
ㄱ사	ㄱ-① 해외 △△ 외곽순환고속도로 건설 상세설계	30%	10
	ㄱ-② 해외 □□ 교량 건설 상세설계	70%	5
ㄴ사	ㄱ-① 해외 △△ 연결도로 건설 타당성조사	100%	12
	ㄱ-② 해외 □□ 고속도로 건설 기본설계	60%	7

- 제출실적 평가

구분		제출실적		평가
		지분율	금액	지분금액	건수	합산
ㄱ사	ㄱ-①	30%	10	10억 × 30% = 3억	0.6건	1.2건
	ㄱ-②	70%	5	5억 × 70% = 3.5억	0.6건
ㄴ사	ㄴ-①	100%	12	12억 × 100% = 12억	1.0건	1.6건
	ㄴ-②	60%	7	7억 × 60% = 4.2억	0.6건

- ㄱㄴ컨소시엄 실적산정(지분율 : ㄱ사 70% + ㄴ사 30%)

⦁ 합산건수 : [eqn: (1.2건` TIMES `70%)+(1.6건` TIMES `30%)] = 1.32건

⦁ 해외용역건수 1건이상 ~  2건미만 해당 ⟹ 1.6점

② 참여인력의 경험(15점)

- 사업수행책임자(5점), 부사업수행책임자(2점) 및 참여기술자(8점)의 자격, 해당 분야 경력 및 실적(입찰공고일 기준 최근 10년간 담당분야 타당성 조사, 기본설계, 실시설계 등 관련 컨설팅 용역수행 완료 건수)에 대한 평가

※ 평가대상 인력의 분야별 유사사업 인정범위

분 야	유사사업 인정범위
1. 사업관리자 PM	‘①사업수행실적’에서 규정한 과업으로 한정하며, 본건 사업에 제안된 담당분야(역할)와 관련된 실적
2. 교통계획
3. 철도
4. 구조
5. 토질 및 기초
6. 차량기지
7. 비용
8. Safeguard
8. 부책임자	ODA 관련 컨설팅 업무 참여건수, 또는 ODA 유관기관 근무 경력으로 평가함
9. 경제	토목 인프라(상하수도, 환경, 도로, 항만, 공항, 수자원 등) 분야 경제성분석 실적
10. 재원조달 방안	토목 인프라(상하수도, 환경, 도로, 항만, 공항, 수자원 등) 분야 재무성분석 실적(국내 민투법 사업 실적, 국외 PPP사업 실적 등)
11. 기후변화	국내외 기후변화대응* 관련 용역** 수행실적 * 기후위험 분석(잠재 온실가스 감축량 산정(산정 툴킷 모델 수립도 인정) 또는 기후 위해, 취약성, 노출 분석) 또는 기후위험 경감계획 수립 또는 기후 성과관리(평가) 중의 하나 이상의 요소를 포함한 용역에 한정 ** ① 국내외 그린사업 및 국제감축사업(CDM 등) 관련 연구용역(컨설팅), 마스터플랜, 타당성 조사, 발굴, 실행, 성과평가, ② 기후변화 대응(TCFD(Take Force on Climate-related Financial Disclosure), 탄소중립전략, GCF(Green Climate Fund) Funding Proposal 작성, 배출권거래제, 온실가스목표관리제, 기후변화적응 등) 컨설팅 등

※ 공동도급으로 참여하는 경우 사업수행책임자(PM)는 공동수급표준협정서에 명시된 대표사/주관사에 소속되어야 함

(i) 사업수행책임자(PM) 자격 (1점)

기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
100%	90%	80%	70%	60%

(ii) 사업수행책임자(PM) 경력 (2점)

15년이상	15년미만 ~ 13년이상	13년미만 ~ 11년이상	11년미만 ~ 9년이상	9년미만
100%	90%	80%	70%	60%

(iii) 사업수행책임자(PM) 실적 (2점)

12건이상	12건미만 ~ 10건이상	10건미만 ~ 8건이상	8건미만 ~ 5건이상	5건미만
100%	90%	80%	70%	60%

(iv) 부책임자 업무경험* (2점)

5건이상	5건미만 ~ 4건이상	4건미만 ~ 3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만
100%	90%	80%	70%	60%

* ODA 관련 업무 : ODA(공적개발원조) 유관 기관 [EDCF, KOICA, MDB(다자개발은행), KSP]이 직접 발주한 용역 참여 실적, 단, EDCF 외부전문가 참여(당행과 직접 계약체결건만 해당)건의 경우에도 용역 참여 실적으로 인정됨

* ODA(공적개발원조) 유관 기관 [EDCF, KOICA, MDB(다자개발은행)] 소속으로 ODA 업무 유관부서 근무 경력

※ ODA 관련 업무 참여건수 및 ODA 유관기관 근무 경력은 합산가능 함

(v) 참여기술자 경력(분야별 책임기술자 및 전담기술자) (4점)

10년이상	10년미만 ~ 9년이상	9년미만 ~ 7년이상	7년미만 ~ 5년이상	5년미만
100%	90%	80%	70%	60%

(vi) 참여기술자 실적(분야별 책임기술자 및 전담기술자) (4점)

(vi-1) 기후변화 외 기타 분야

10건이상	10건미만 ~ 8건이상	8건미만 ~ 6건이상	6건미만 ~ 5건이상	5건미만
100%	90%	80%	70%	60%

(vi-2) 기후변화 분야

6건이상	6건미만 ~ 5건이상	5건미만 ~ 3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만
100%	90%	80%	70%	60%

※ 참고사항

1. 전담 참여인력(PM, 부PM, 분야별 책임, 분야별 참여)이 정량평가 대상

2. 전담 참여인력은 한국건설기술인협회 등에서 발행한 “참여기술인 경력사항(PQ) 확인서” 및 “경력증명서”에 의해 평가하되, 등록되지 않은 자는 본 제안요청서에 첨부된 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’을 참조하여 제안사의 대표이사가 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서, 대학/기관에서 발급한 학력증명서, 발주처 등이 발행한 용역수행 증명서 등을 이용하여 평가

- 해당분야 참여실적은 ①사업수행실적에 정의된 ‘유사사업’에 담당업무 전문분야에 참여한 컨설팅 실적을 의미함

3. PM 및 참여기술자의 경력은 “건설기술자 경력증명서”의 “전문분야별 참여일수 현황”에 명시된 일수에 의해 전문분야는 100% 인정하고, 기타 분야는 60% 인정함. 단, Safeguard 분야는 대기, 수질, 소음진동, 폐기물처리, 자연환경, 토양 등에 한하여 모두 100% 인정

4. 분야별 책임기술자에 대한 평가는 아래 가중치를 적용하여 산출한 결과를 합산

기술사/건축사	특급	고급	중급	초급	기타
100%	90%	80%	70%	60%	50%

- 분야별 책임기술자가 아닌 전담기술자는 자격등급별 가중치 미적용

- 참여기술자의 평가는 각 참여자별 건수/경력을 평균하여 계산하며, 1인 최대 10년/10건(기후변화 분야는 6건) 초과 시 10년/10건(6건)으로 인정

5. 발주자로서 감독업무를 수행한 사업은 경력기간은 인정하되, 실적건수는 인정하지 않음

6. 부 PM 경력 증빙 및 평가방법

▶ ODA 관련 업무 수행경험

- 해외건설협회에서 발급한 ‘실적증명서’를 제출한 사업에 한하여 인정됨
: 실적증명서 참여기술인 명단을 통해 참여여부 확인 가능해야함

단, 당행 직접 발주 사업(EDCF F/S, KSP 용역 등)의 경우 당행이 발급한 실적증명서도 동일하게 인정됨

- EDCF 외부전문가(PCP 지원, 심사지원, 기술검토, 완공평가 등) 참여 증빙은 계약서 사본, 성과물, 성과물 제출 내역 등 업무수행 여부를 확인할 수 있는 자료

▶ ODA 유관기관 근무경력

- 해당기관 대표가 날인한 경력증명서 등 근무이력 확인 가능한 서류로 평가함

- ODA 유관기관* 소속으로 ODA 유관업무를 수행한 근무경력을 제출하는 경우 근무일수를 건수로 환산**하여 평가
단, 입찰공고일자 기준 최근 10년내 근무한 경력만 인정됨
* ODA 유관기관 : EDCF, KOICA, MDB(다자개발은행), KSP 등
** 환산방법 : 근무일수/365 = 건수

③ 재무구조 및 경영상태 (5점)

구 분		A등급	B	C	D	E
신용 평가 등급*	회 사 채	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
	기업어음	A2- 이상	A2- 미만 A3- 이상	A3- 미만 B 이상	B-	C 이하
	기업신용평가	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
등급별 배점		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
*「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8항의 3 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3에 의해 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음) 또는 기업신용평가 등급 - 공동수급의 경우 각 구성원별 신용평가등급에 해당되는 점수에 참여비율을 곱하여 합산 - 신용평가등급 서류 미제출 또는 유효기간이 만료된 등급 서류 제출시 최저 등급으로 평가

3) PM 대면평가 기준

구 분	A등급 (최우수)	B등급 (우수)	C등급 (보통)	D등급 (미흡)	E등급 (부족)
사업이해도	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
수행역량	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
위험요소 관리능력	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
영어 구사능력	4.0	3.6	3.2	2.8	2.4
계	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

◦ PM 대면평가는 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표’ 적용하지 않고 절대평가 실시

◦ PM 대면평가는 제출된 제안서에 대한 평가위원들의 질문으로 진행

- 영어구사능력 평가는 PM의 영어 Presentation 실시 후 평가위원들의 제출된 제안서에 대한 질의응답으로 진행 (별도 PPT 자료 불필요)

* 제안서 실행계획 및 전략 중점 발표

- 부PM도 대면평가에 참석하여, 수원국 소통계획, 경제·재무 관련한 평가위원 질의에 답변

◦ PM 대면평가 일정은 제안서 마감 후 개별 통보 예정

◦ 당행이 인정하는 불가피한 PM 부재 사유*에 해당하는 경우에 한하여, 대리인이 PM을 대신하여 대면평가에 참석 가능하며, 해당 평가항목은 최저등급(E등급, 6점)을 적용

* 질병, 천재지변 등(출장, 휴가 등의 사유는 불인정)

◦ PM의 대면평가 불참 및 당행이 인정하는 불가피한 PM 부재 사유에 해당하지 않는 경우, PM 대면평가(총 10점)는 0점으로 처리

4) 가산·감점 부여기준

◦ (가감점 일반) 가점감점을 포함한 정량평가 점수는 배점한도(30점)를 초과하지 아니함

◦ (중소기업 가점) 중소기업* 지분율에 따라 최대 1.0점 가산점 부여

중소기업 가점 = 1.0(점) × [eqn: {중소기업``지분율(%)} over {100(%)}]

*「중소기업기본법」에서 정의하는 중소기업을 의미함

◦ (신규 입찰자 가점)

i) EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점 부여

미수주자 가점 = 0.5(점) ×  [eqn: {미수주자``지분율(%)} over {100(%)}]

ii) 입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여

신규입찰자 가점 = 1.0(점) × [eqn: {신규``입찰자``지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (장애인기업 및 사회적기업 가점) 장애인기업*, 장애인고용 우수기업** 또는 사회적기업*** 인증을 받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.3점

* 장애인기업활동 촉진법에서 정한 기업으로서, 중소벤처기업부 장관(위임받은 자를 포함)에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

** 장애인고용촉진 및 직업재활법 제24조에 따른 장애인고용 우수사업주로 해당부처에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

*** 고용노동부장관(또는 위임 받은 자)으로부터 사회적기업 인증을 받은 기업

장애인·사회적기업 가점 = 0.3(점) ×[eqn: {장애인````또는````사회적기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (여성기업 가점) 존속기간*이 확인되는 여성기업**의 지분율에 따라 최대 0.3점(존속기간 3년 미만) 혹은 0.5점(존속기간 3년 이상)

* 법인인 경우 법인등기부등본, 개인사업자인 경우 사업자등록증상 여성대표자로서 그 유지기간(연속되어 있어야함)을 확인하여 평가

**「여성기업 지원에 관한 법률」및 같은 법 시행령에 따라 중소벤처기업부 장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘여성기업 확인서’를 발급받은 기업으로서 (중소기업제품 공공구매종합 정보망에 등재된 자료로 확인), 그 존속기간을 확인할 수 있는 기업

(i) 존속기간 3년 미만 여성기업 가점 = 0.3(점) × [eqn: {여성기업```지분율(%)} over {100(%)}]

(ii) 존속기간 3년 이상 여성기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {여성기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (창업기업 가점) 창업기업* 확인서**를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점

*「중소기업 창업 지원법령」제9조의 4(창업기업의 확인 등) 및 동 시행령 8조의 5에 따라 중소벤처기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘창업기업 확인서’를 발급받은 기업

** 확인서는 입찰공고일 기준 유효해야 하며, 유효기간이 정해지지 아니한 경우 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내 확인받은 것에 한함. (단, 사후관리 등을 통하여 유효기간이 연장되는 경우 그 기간까지를 유효기간에 포함)

창업기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {창업기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (MDB 유사사업 경험 가점) 최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여 건수에 따라 최대 1.0점 가점 부여

* PM의 경력증명서 상 MDB 유사사업 참여 여부가 명시/확인되지 않는 경우, 이를 증명할 수 있는 별도 증빙자료 제출 필요

MDB 유사사업 경험 가점 = PM의 MDB 유사사업 참여실적에 따른 구간별 가점

참여사업 건수	점수
5건 이상	1.0점
4.0건 이상 5.0건 미만	0.8점
3.0건 이상 4.0건 미만	0.6점
2.0건 이상 3.0건 미만	0.4점
1.0건 이상 2.0건 미만	0.2점

◦ (EDCF 부정당업자 제재 감점) 입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자*로 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받고 있는 입찰자는 그 지분율에 따라 최대 3.0점 감점

* EDCF 부정당업자 제재기준이 정하는 부패 또는 부정행위에 관여했다고 인정되는 기업, 기관, 단체

EDCF 부정당업자 제재 감점 = 3.0(점) × [eqn: {부정당업자```등```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (제안서 작성지침 미준수 감점) 입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 최대 2점 감점(서식 23 ‘제안서 작성지침 미준수 여부 자가진단표’ 건별 0.25점, 기타의 경우 0.1점 감점)

◦ (F/S 용역 평가결과 가감점) 입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가*결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점

* 재평가를 포함하며 재평가시 기존 평가 결과는 제외

F/S 용역 평가결과 가감점 = Σ 입찰자별 가감점 × [eqn: {입찰자별```지분율(%)} over {100(%)}]

5) 가격평가 기준

◦ 입찰가격평가는 계약예규(협상에 의한 계약체결 기준)상 입찰가격 평점산식을 이용하여 평가

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점`=`입찰가격평가~배점한도` TIMES ` LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

* 당해입찰가격: 당해 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]
[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-당해입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의70%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

* 당해입찰가격: 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의
100분의 70 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* Software 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점
다섯째자리에서 반올림함

협상대상자 선정 및 협상 절차

□ 협상대상자 선정

◦ 제안요청서에 부합하는 제안서를 제출한 제안자의 기술능력 평가점수(90점) 기준으로 85% 이상 득점한 업체를 협상적격자로 선정하고, 협상적격자 중 기술과 가격의 합산점수가 가장 높은 순으로 협상에 의하여 선정

※ 기술능력 평가점수 76.5점(90점의 85%) 미만의 업체는 가격평가 대상에서 제외

* 기획재정부 계약예규 제656호(‘협상에 의한 계약체결기준’, ’23. 6. 16. 일부개정) 제9조에 따라 협상적격자 앞 서면 통보

◦ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

◦ 협상대상자 중 기술‧가격의 종합평점이 가장 높은 자를 우선협상대상자로 지정하여 협상하고 결렬시 차순위와 협상

□ 협상절차

◦ 협상은 당행이 정하는 절차와 일정에 따라 진행됨

◦ 협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상기간 내에 협상대상자와 협상이 성립된 경우 최종낙찰자로 선정하고 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함

◦ 협상은 기술 조건 합의 및 당행이 요구하는 사항에 근거하여 진행

◦ 협상 중 제안자는 당행의 자료 요구에 성실히 응해야 하며, 만약 제안자가 정당한 사유없이 동 요구 자료를 제출하지 못하거나 제출을 거부하는 경우 당행은 동 제안자를 협상대상에서 제외할 수 있음

◦ 협상대상자가 협상에 불성실하게 임하거나 협상을 고의로 지연시키는 등 문제가 있다고 판단될 경우 당행은 협상이 결렬된 것으로 간주

◦ 협상이 성립되지 않을시 차 순위 협상적격자와 협상을 실시

◦ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음

□ 협상내용과 범위

◦ 협상대상자가 제안한 사업추진 계획 및 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 본 입찰제안서에 명시되지 않은 사항이 주요 현안이 되는 경우 상호협의에 의하여 결정

◦ 가격협상 기준 가격은 당행 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 하되, 기술협상에서 제안내용의 가감조정이 있는 경우 제안가격을 가감 조정할 수 있음

최종낙찰자 유의사항

□ 당행은 과업수행 내용*을 수시로 확인할 권한을 가지며, 용역사는 이에 적극 협조해야 함

* 인력투입현황, 과업수행현황 및 기타 확인이 필요한 사항

□ 용역사는 중요 결정사항이 있을 경우, 수시로 당행과 협의하고 당행의 요청시 관련 보고회를 실시하여야 하며, 당행의 요구를 충분히 반영하여야 함

□ 계약체결 후 기한(기한일은 계약협상시 결정) 이내에 보안각서 및 기타 필요한 서류를 첨부한 “과업수행계획서(Inception Report)”를 작성하여 당행의 승인을 받은 후 과업에 착수하여야 함

□「엔지니어링산업진흥법」에 의거, 모든 용역 참여사는 과업수행에 필요한 손해배상보험(공제)에 가입하고 용역 완료 전 관련 서류를 당행에 제출하여야 함.

□「인지세법」에 의거, 용역사는 계약체결시 계약서 작성 및 소유에 따른 수입인지를 당행에 제출하여야 함.

- 해당 법령에 의거, 계약서 원본(Original) 부수에 따라 개별 납부

□ 용역사는 당행의 요청시 용역 추진내용을 보고하며 각 과업성과물에 대한 보고회를 실시하며, 최종보고는 용역 완료 전에 실시함을 원칙으로 함

□ 하자보증기간(완료 후 12개월) 중 본 용역과 관련된 사항에 대하여 재검토와 보완이 필요한 경우 비용청구 없이 즉시 시정 조치하여야 하며 보완 결과를 서면으로 제출하여야 함

□ 용역수행 중 용역사의 귀책사유로 발생한 모든 문제에 대한 책임은 용역사에 있으며, 당행이 입은 손해에 대하여 배상하여야 함

□ 본 용역수행 중 투입인력은 교체할 수 없는 것을 원칙으로 하되 퇴직, 질병 등 부득이한 사유 발생 시에는 당행과 협의하여 승인을 득한 후 동급 상당의 인력으로 교체하여야 함

□ 본 용역수행 과정에서 취득하거나 생산한 각종 조사자료 및 일체의 산출물은 당행의 소유이며, 당행의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없음

기타사항

□ 중소기업이 입찰에 참여한 경우 중소벤처기업부에서 발급한 ‘중소기업 확인서(공공기관 입찰확인용)’ 사본을 제출할 것

□ 장애인기업, 장애인고용 우수기업, 사회적기업 인증은 관계기관이 발급한 확인서, 인증서 등 공적 서류 사본을 제출할 것

□ 제안서 평가에 있어서 불명확한 부분이 있거나 보완설명이 필요한 경우 제안서 설명을 요청할 수 있으며 해당기관은 이에 응하여야 함

□ 제출된 제안서 및 관련서류 일체는 반환되지 않으며 제안요청서, 입찰유의사항 등을 숙지한 후 입찰에 참여할 것

□ 필요한 경우 당행은 제안서 제출 마감 전까지 입찰과 관련된 내용에 대하여 수정‧변경할 수 있음

용역결과 평가/활용

□ 용역 완료 후 1개월 이내, 내부기준에 따라 용역 참여인력·보고서 품질·용역관리 등에 대한 평가가 이뤄지며, 동 평가결과가 후속 EDCF F/S 입찰평가시 가감점에 반영됨

□ 공동도급의 경우, 공동평가 예정

<평가점수별 가감점 매칭>

평가점수	가감점
-100점 이상 ~ -76점 이하	-2점
-76점 초과 ~ -52점 이하	-1.5점
-52점 초과 ~ -28점 이하	-1점
-28점 초과 ~ -4점 이하	-0.5점
-4점 초과 ~ +20점 이하	0점
+20점 초과 ~ +43점 이하	+0.5점
+43점 초과 ~ +66점 이하	+1점
+66점 초과 ~ +89점 이하	+1.5점
+89점 초과 ~ +112점 이하	+2점

대항목	중항목	소항목	가중치
인력평가 (20개 항목, 45점 배점)	PM (PM:OOO)	인력투입계획 준수	2
		각종 회의 참석 여부/진행능력	2
		해당분야 전문성/사업 이해도	2
		사업실시기관과의 협력	2
		당행 담당직원과의 협력	2
		F/S 방향(사업계획) 수립시 역할	2
		F/S 참여인력 관리/공동수행사 조율능력	2
		각종 보고서 검토 및 작성 능력	2
		커뮤니케이션/외국어능력	3
	Key Staff	인력투입계획 준수	2
		각종 회의 참석 여부	2
		해당분야 전문성/사업 이해도	3
		담당분야별 사업기본계획 적정성	3
		보고서 작성 및 검수 능력	3
		커뮤니케이션/외국어능력	2
	상주인력	상주인력 선임 및 활용정도	3
		현지활동 및 각종 자료조사 충실도	2
		사업실시기관과의 협력체계	2
		EDCF 현장사무소와의 협력 체계	2
		커뮤니케이션/외국어능력	2
보고서평가 (12개 항목, 35점 배점)	사업수행계획서	사업수행계획서(착수보고서) 적정성	2
	중간보고서	보고서 구성의 적정성	3
		가독성/수정보완 필요성	3
		영문보고서 품질	3
	최종보고서 (초안포함)	보고서 구성의 적정성	3
		가독성/수정보완 필요성	3
		영문보고서 품질	3
		당행의 요구사항 반영	3
		사업실시기관의 요구사항 반영	3
	사업비 산출내역	사업비 구성 내역의 적정성	4
		단가조사 방법의 적정성	3
	출장결과보고서	출장결과보고 적정성	2
관리현황평가 (10개 항목, 20점 배점)	일정관리	사업수행일정	2
		출장일정	2
		회의 개최 일정	2
		보고서 제출 일정	2
	신청행위 적정성	승인요청/신청행위 적정성	2
	리스크관리	리스크 대응체계	2
		리스크 해결 방안의 적정성	2
		사회적 물의	2
		안전관리	2
		정보보호	2
과업난이도평가 (3개 항목, 9점 배점)	(추가 가점)	수원국 FS 이견	3
		수원국 자료 비협조	3
		기타 어려움	3
심사수행 협조	(추가 가점)	EDCF 심사수행 협조도 (해당시)	3
기후변화영향 대응체계	(추가 가점)	기후변화영향 대응체계 적용계획의 적정성	3
합 계			115
평가 의견 :
주1. 비평가 항목 또는 정보가 없는 항목은 보통으로 평가 - 각 항목별로 5단계로 구분하여 평가 실시 (우수[+100%], 양호[+50%], 보통[0%], 다소미흡[-50%], 미흡[-100%]) 주2. PM이 없는 참여사를 개별평가시 동 참여사의 Leading Staff을 PM으로 간주하여 평가

Ⅲ. 대상사업 개요 및 F/S 과업범위

1. 당행 발주 F/S 추진배경 및 목적

□ 대외경제협력기금(EDCF) 지원 대상사업에 대한 EDCF 주도의 사업발굴을 통한 사업 진행과정에 대한 투명성 및 공정성 제고

□ 지원 요청사업에 대한 사업타당성조사 및 기본 설계개념 도출을 통한 원활한 사업추진 도모

※ EDCF F/S 현장성 강화 등을 통한 내실화를 위해 아국 컨설턴트의 현지 상주 의무화, 현지 컨설팅 업체 고용을 통한 현지 조사 강화, 보고서 내용에 대한 외부전문가 검토 실시 등을 시행

2. 본 사업 추진배경

□ 우즈베키스탄은 중앙아시아 지역의 중심에 위치한 이중내륙국*의 지리적 특성으로 철도가 교통인프라의 중요한 축을 담당하고 있으나, 철도인프라 노후화, 선로 용량 부족 등으로 물류효율성** 및 여객운송률***이 낮은 편임.

* 전세계에 우즈베키스탄과 리히텐슈타인 2개국이 있음

** 물류성과지표 순위 : 우즈베키스탄 (88위), 중국(19위) (세계은행, ‘23년)

***철도는 전체 여객의 3∼4% 수송 담당 (ADB, ‘21.11월)

◦ 수도인 타슈켄트와 제2의 도시인 사마르칸트를 잇는 노선*은 여객 수요가 가장 높은 구간이나, 일부 구간**을 제외하고는 대부분 단선으로, 일일 운행가능차량 및 최대 속력이 제한적으로 운행중임.

* 기존 노선은 341km 이며, 신규 노선은 직선화 노선으로 268km 예상

** Dashtad-Jizzak, Galliaaral - Bulungur

*** 차량의 최대 운행가능속도는 250km/h인 고속철도 6편성을 가지고 있으나, 노선의 운행가능속도 (160Km/h)로 제한되어 운행중

□ 우즈벡 정부의 본건 사업목적은 아래와 같음.

◦ 속도, 안전 및 교통품질을 고려한 고속철도 네트워크의 구축을 통해 우즈베키스탄의 경제성장과 삶의 질 향상 가속화

◦ 관광 잠재력 확대 및 역사적 도시와 수도를 포함한 관광 경로 창출

◦ 고속 교통을 별도 철로로 분리하여 기존 타슈켄트-사마르칸트 철도 노선의 처리 및 운송 용량 증가

□ 본건에 대한 타당성조사가 EDCF 지원으로 연결될 경우, 고속철도 차량 지원(‘24년)에 이어, 고속철 노선 건설사업에서 최초 해외수주를 EDCF로 지원하게 됨에 따라 고속철 부문에서 우리기업의 중앙아시아 후속사업 발굴 가능성이 높아짐.

◦ 우리기업의 교통부문 진출 촉진을 통하여 중앙아시아와의 경제협력 다각화에 기여

3. F/S 대상 사업개요

□ 사업목적

◦ 타슈켄트에서 사마르칸트까지 연결되는 신규 노선*건설

* 기존 노선은 341km 이며, 신규 노선은 직선화 노선으로 268km 예상

□ 사업범위

구 분	사업 내용
타슈켄트-사마르칸트 고속철도 신설	◦ 신규 고속철 노선 건설, 노선 운행에 필요한 인프라 공급 및 역량 강화 지원 - 신규 고속철 노선 신설(약 268Km 구간) - 통신, 전력 등 인프라 공급 - 본사업 실시를 위한 역량 강화
컨설팅 서비스	- 설계, 입찰지원, 시공감리 등

※ 사업범위는 F/S 수행과정에서 수원국 및 당행과의 협의 등에 따라 변경 가능

□  (추정사업비) 우즈베키스탄 철도공사는 본건 사업의 추진 방안별로 다음과 같이 사업비를 추정하였음.

< 추진 방안별 추정 사업비 >

구 분	노면철도	고가철도	노면+고가 철도
총 길이(km)	268	좌동	좌동
고가구간(km)	13	268	138
터널형 건널목 (개수)	141	0	12
터널(개수/km)	2/7.7	2/7.7	2/7.7
총 건설비용 (백만 달러)	2,196	5,988	3,835

□ 사업실시기관 : 우즈베키스탄 철도공사(Uzbekistan Temir Yollari)는 ’94. 11월 대통령령(UP-982)에 의해 설립된 100% 정부 소유 국영회사로, 철도인프라 구축·관리, 철도화물 및 여객운송, 철도차량 구매·관리 등을 담당하고 있음.

◦ ‘24. 2월말 기준 총 5,242km의 공영 철로 구간을 관리하고 있으며, 이중 약 61%에 해당하는 3,184km에 대한 전철화 사업을 완료하였음

□ 사업실시지역 : 타슈켄트에서 사마르칸트까지 연결되는 신규 노선*

* 기존 노선은 341km 이며, 신규 노선은 직선화 노선으로 268km 예상

< 사업 실시지역 >

=

※ 단, 사업실시지역 관련 구체적 범위는 F/S 수행과정에서 변동 가능

4. F/S 과업범위

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음.

※ F/S 과업수행 시 아래의 자료 참고 필요

- EDCF F/S 작성지침(’23. 12.)

◦ EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) -「정보공개」-「서류/서식」- 18번 게시물(EDCF Feasibility Study Guideline) 참고

※ 성과물 F/S 보고서는 영어, 러시아어(수원국 요청시 우즈벡어로 변경 가능)로 작성하되, 수원국 내부 F/S 승인을 위한 자료 제공 및 지원 업무 포함

※ 본 과업은 우즈베키스탄 내부 승인 절차 지원 등을 포함하여 과업의 효율적 진행을 위하여 현지(우즈베키스탄)하도급 업체 고용 수준을 상향하여 진행코자함

- 이하, 현지 하도급 포함 필수 과업 범위는 아래 명기

- F/S 수행사는 표(56pg) ‘참여기술자 투입기간 세부사항’ 참고하여, 제안서 내 ‘현지 협력사 활용계획’에, ①하도 예정 분야 및 ②각 분야 별 투입예정 M/M 작성하여 제안 필요

주요 과업내용

기초자료 수집 및 분석

교통수요 조사 및 장래 교통수요 예측

현황조사

현장 세부조사

관련법 및 제기준 정립, 설계기준 설명서

노선선정 및 계획

토공 및 궤도계획

구조물계획(터널, 교량 등)

차량기지계획

건축계획(정거장 및 차량기지)

기계설비 및 시스템(E&M) 계획

역량강화 계획

환경사회(이주대책 포함) 영향평가 실시

* 환경영향평가보고서(EIA), 이주대책계획(RAP), 토지수용계획(LAP) 작성

기후변화 대응체계 분석

사업실행계획

사업비산출 (중간 보고 이후 우즈베키스탄 재무부 등 기타 부처 제출)

재원조달방안

경제적(B/C, NPV, IRR 등) 타당성 검토

EDCF 사업을 위한 검토 항목

우즈베키스탄 재무부 등 기타 부처 F/S 승인을 위한 지원

성과품 작성 (영어 및 러시아어(단, 수원국 협의에 따라 러시아어는 우즈벡어로 변경 가능))

[Part 1]  사업개요 및 추진배경 검토

본 타당성조사 과업개요 요약

과업수행 배경, 과업의 목적

과업 수행범위, 과업기간, 과업 이해관계자 등

본사업(고속철도 건설사업) 개요 요약

사업배경, 사업의 목적 및 필요성

사업실시지역, 사업범위, 사업기간, 사업비

사업의 기대효과 및 사업지원 효과 등

[Part 2]  일반현황 및 관련계획 조사

사업 추진배경 및 필요성

사업추진배경 및 추진목적

정책적 필요성 : 국가적 측면(거시적), 사업지역적 측면(미시적)

기술적 필요성 : 국가적 측면(거시적), 사업지역적 측면(미시적)

사업지원시 기대효과 등 : 국가적 측면(거시적), 사업지역적 측면(미시적)

기초자료 수집 및 분석

사회․경제적 현황분석 및 관련계획 조사․분석

- 사회․경제지표 등 교통관련 자료분석, 직접 및 간접 대상지역의 인구․고용․산업․교육 등 수송수요에 영향을 미칠 수 있는 주요 사회․경제적 자료를 수집 분석하여 장기간에 걸친 과거의 추세 변화를  파악하고 장기 경제계획 지표 및 정책목표를 토대로 본 과업과 관련된 모든 사항의 분석 및 전망

- 대상지역의 토지이용계획, 도시기본계획, 지역개발계획, 교통수요를 유발시키는 공단 개발계획, 대규모 위락시설계획 등 관련계획의 개발방향을 분석하고, 장기 철도망 정비계획과 주변 도로망의 신설 및 확장, 택지개발 등 개발계획 분석

- 관련계획 : 국가차원의 상위계획, 대상지역의 개발계획, 도시철도 관련 계획, 기타 교통 관련 계획 등

교통 현황조사 및 분석

- 장래의 시설기준, 애로구간 판단 및 시설용량 등의 설정을 위해 철도․도로․항공 등 수송 수단별로 현재의 시설상태, 운영체계, 수송능력, 한계용량 도달시기 및 연계 교통체계 등 조사분석

- 교통수단별 특성과 역할을 정립하기 위하여 교통량은 당해 지역내의 수단별 통계자료 및 기존 관련조사  보고서를 활용하고 차종별, 방향별 통과량에 대한 교통량 조사 분석

- 기존의 여객 이용실태를 감안한 장래 수송체계를 수립하기 위하여 수단별, 여객별 지역간 시․종점을 조사

- 새로운 교통체계의 도입 및 개선에 따른 여객 성향조사, 이용실태 조사를 통하여 차종별 평균 승차인원, 수단별 통행량 및 새로운 수단에 대한 전환율 분석

- 철도, 공로, 항공 등 수단별 운행비용 및 물류 시간가치 분석

- 고속철도 관련 정책 및 관련 예산 현황 조사

최근 측량조사 및 지형지질조사 자료 등 수집

- 사업실시지역 인근 건설중인 교량 및 터널 공사 자료 확보 및 조사․분석

- MDB 발주 사업(마스터플랜 등) 등 참고 가능한 보고서 수집

건설/계획 중인 철도(도시철도 포함), 고속도로, 국도 등 도로노선 자료 조사․분석 (현황, 도로계획, 교통수요, 지반현황, 요금체계, 재원) 등

기 수행 유사사업 분석(Lessons Learned from Previous similar projects)

- 국내외 기 완공 또는 건립 중인 유사사업의 계획, 사업자 선정, 공사 및 운영단계까지 진행현황 및 문제점 분석을 통한 교훈 도출

- 기 수행 유사사업 교훈으로부터의 사전 관리계획 수립

유관 사업실시기관(사업, 환경/사회영향, ODA 승인 등) 및 담당자 조사

- 규제기관, 정책기관, 운영기관, 운영현황 등 관리체계 구조 조사 포함

관련법 및 제기준 정립, 설계기준 설명서

우즈베키스탄 철도건설 관련 법, 기준 조사․분석

해외 설계기준 및 설계지침, 시방서 등 조사

터널, 교량 건설공사기준 조사·분석 및 Design Standard 제공

[Part 3]  각종 현황조사 및 수요예측

교통수요 조사 및 장래 교통수요 예측

자료수집 및 조사 : 사회・경제지표 조사, 교통시설 현황 등

교통량 조사 : OD표와 수단분담모형 구축, 교차로 등 통행특성 조사, 통행구간 속도 조사 등

장래 수송수요 예측

- 장래의 수송수요, 유발효과, 수단별 분담율, 전환수송율 및 통행배정을 위한 수송수요예측 모형개발

- 사업의 직․간접 영향권으로 판단되는 대상지역을 중심으로 적절한 교통존 체계 설정

- 각 구역별 교통현황, 사회․경제적 특성, 산업활동 및 지역간 교통의 용이성을 구역별 수송실적과 상호 연관 시켜 구역별 교통량 추정

- 교통 용이성의 함수로서 지역간 물동량의 배분모형을 정립하고 수단 선택에 영향을 미치는 변수를 선정 모형화하여 지역간 배분 물동량을 수송수단별 특성에 따라 분담, 지역간․수송수단별 이용 교통량 추정

- 추정된 지역간․수단별 교통량과 시설분석 자료를 활용하여 애로구간을 결정, 시설용량 초과시기와 장래 시설 투자규모 등을 제시하고 필요한 경우 대안의 필요성 제시

- 통행패턴 및 이용자 성향조사를 바탕으로 이용자의 가치만족을 추구할 수 있는 노선으로 설계

수요예측에 대한 우즈베키스탄 타 고속철도 사업 및 관련계획과 비교 분석

선로용량 산정 및 검토

우즈베키스탄 정부 의견을 반영한 수요 검증 등

□ 현황조사 (현지 하도급 포함 必)

지형조사, 연도변조사, 각종 시설물 및 식생, 토지이용 현황 등 조사

지하 지장물조사

도로, 철도(고속철도 포함), 하천 등 현황조사

고속철도와 관련된 인프라 현황 조사(수전 및 변전소 조사 등)

수리 및 기상자료 수집

관계기관 협의

[Part 4]  과업대상구간 현장조사

현장 세부조사 (현지 하도급 포함 必)

측량

- 측량과업 시행 전 우즈베키스탄 정부와 협의된 지형도에 계획 노선(안)을 작성하고 도시계획 등 개발예정 현황과 주요시설물 계획을 표시한 후 선형(종단․평면)계획과 주요구조물 계획 등을 비교하여 종합적으로 검토한 선형 검토보고서(주요 노선경유지 및 주요 지장물 전경 사진첩 포함)를 제출하여 관계기관과 최종 협의 후 측량과업을 시행

- 대안노선에 대해 미리 관계기관과 협의하여 노선을 확정한 후 확정된 노선에 대하여 시행

- 모든 측량은 우즈베키스탄 정부에서 시행한 삼각 및 수준측량 성과를 확인하여 시행

- 이외의 사항은 우즈베키스탄 정부의 측량법, 공공측량표준작업규정, 철도설계기준 및 선로측량규칙 등 제 기준에 따름

- 측량항목

구 분	주 요 사 항
기준점 측량	⦁우즈베키스탄 정부에서 정한 기준점 측량 및 GPS에 의한 기준점 측량 작업규정에 의함
노선 측량	⦁선점측량, 중심측량, 수준측량, 횡단측량 및 기타 측량은 우즈베키스탄 관련 절차 및 규정에 따라 시행
용지 측량	⦁계획 노선내의 토지가격 산정, 평가 및 용지배수 등을 목적으로 시행 ⦁평면도의 축척은 1/1,000을 기준으로 하며, 우즈베키스탄 관련 절차 및 규정에 따라 시행

RoW 내 지장물(민가, 건물 등 보상대상) 상세 조사(1:5,000 상세 지형도 작성)

* 축척은 우즈베키스탄 정부 요구에 따라 변경될 수 있음

수리/수문(hydraulics and hydrology) 조사

- 계획홍수량 등에 따른 배수로 용량 검토

- 교량 등 시설물 설치에 따른 홍수위 상승, 기존 제방의 영향, 하천의 침식 및 퇴적 영향, 기초지반의 세굴 등에 대한 분석 실시

- 조사구간 : 노선구간 전체연장에 영향을 미치는 하천조사 시행

지질(geological) 및 지반(geo-technical) 조사

- 지표지질조사 : 터널구간은 주변지역에 대한 지표지질조사를 시행하여, 그 결과를 우즈베키스탄 정부에서 요구하는 지형도(축척)에 표시하고 터널계획에 검토 반영하며, 조사의 범위는 노선중심으로부터 좌․우 각 200m이내를 원칙으로 하되, 지형여건에 따라 조정 가능

- 탄성파탐사 : 터널구간의 지층 분포상태 및 공학적 특성 등을 파악하여 터널계획의 기초자료로 활용하여야 하며, 발파에 의한 방법을 원칙으로 하나, 지반조건이 불량할 경우 공법(안)을 설정하여 제시

- 시추조사 및 시료의 토질, 암석시험 등 실내시험 실시(기본계획 기준)

구 분	시추공 배치	시추공 심도	비 고
토공 (땅깎기)	⦁20m 이상 대절토부는 개소당 1공 이상	⦁계획고 하 2.0m	⦁현장시험 1회/개소
토공 (흙쌓기)	⦁불필요	⦁지층의 종류를 판단할 수 있는 깊이까지(N값 50/30 이상 3회 확인)	⦁역사위치, 하수박스, 흄관 등 구조물 설치 개소는 우선 시행
교량구간	⦁교량당 1공 이상	⦁연암 2m 또는 경암 1m ⦁암이 출현하지 않을 때는 풍화암 10m 까지
터널구간 (산악지)	⦁터널 입출구부에 각1공	⦁FL하 D/2 (D : 터널 최대직경)	⦁토질, 지형조건, 산악 터널 등과 단층, 파쇄대 등 지층이 불규칙한 경우는 증감
개착BOX 구간	⦁필요시 박스 개소당 1공	⦁풍화대에서 N값 50/30 이상 3회 확인	⦁횡단연장이 길 경우는 현장여건에 따라 책임 기술자가 증가 판단
연약지반 구간	⦁연약지반 개소당 1공 이상	⦁연약지반 심도를 결정할 수 있을 정도	⦁공단 자연시료 채취는 최소 1회/50cm

- 터널부 구간 시추

* 암층심도(또는 최대 50m)까지 확인하고 필요한 실험(시료채취, 표준관입시험(시추공 내 1~1.5m 간격), 공내재하시험(PMT), 공내전단시험(BST), 시험굴조사(Test pit), 교란 및 불교란 시료 채취 등) 실시(일일보고서 제출). 시험의 종류는 사업실시기관 승인 하에 일부 수정 가능

- 기타 구조물 시추

* 기타 구조물은 시점부 역사, 각 승강장, 교량 확장/신설시 주교각 및 교대,  차량기지 등 포함

** 암층심도(또는 최대 50m)까지 확인하고 필요한 실험(시료채취, 표준관입시험(시추공 내 1~1.5m 간격), 공내재하시험(PMT), 공내전단시험(BST), 시험굴조사(Test pit), 교란 및 불교란 시료 채취 등) 실시(일일보고서 제출). 시험의 종류는 사업실시기관 승인 하에 일부 수정 가능

- 지상부 구간 시추

* 암층심도(또는 최대 50m)까지 확인하고 필요한 실험(시료채취, 표준관입시험(시추공 내 1~1.5m 간격), 공내재하시험(PMT), 공내전단시험(BST), 시험굴조사(Test pit), 교란 및 불교란 시료 채취 등) 실시(일일보고서 제출). 시험의 종류는 사업실시기관 승인 하에 일부 수정 가능

** 지상부 구간 2km당 1공을 기준으로 하되, 추후 과업진행 추진 상황 및 당행 및 수원국과의 협의를 통해 시추 간격은 조정 가능

※ 책임기술자는 시추 및 현장시험광경을 원근에 따라 1개소당 2매 이상, 실내시험은 종류별로 2매 이상 사진을 촬영하여 기록 사진첩을 작성

지형 및 토질조사, 수리․수문, 용지 및 지장물, 기상자료, 측량, 재료원 조사 및 조사보고서 작성 등

현지 건설단가 및 주요자재 수급여부, 현지 건설장비 수급현황 조사

- 현지조달 주요자재(골재, 시멘트 등)에 대한 재료원 및 조달거리 조사(석산, 주요자재 생산공장 유무 등)

현지 연간 시공가능기간 조사(기후 등 감안)

기타 설계 시에 필요한 현지 기초 조사자료 획득 및 검토

[Part 5]  기술적 타당성 검토

설계기준 및 절차 검토 (현지 하도급 포함 必)

사업대상 및 기술검토 항목/주안점 정의

해당국 설계기준 및 해당국에서 시행 또는 시행 중인 유사사업에 적용된 설계기준 조사 및 적용 기준 검토

- 수원국의 건설 및 운영에 관한 법률 및 지침 검토

사업수행을 위해 요구되는 선결절차 검토(정부승인, 부지확보 등)

□ 노선선정 및 계획 (현지 하도급 포함 必)

선로설계기준 정립 및 설명서 작성

노선 후보지 선정

- 사업실시예정지역 선정 : 우즈베키스탄 정부와 협의하여 대안노선을 검토하고 기초조사 결과를 바탕으로 1개 루트(안) 우선 확정

- 공사비, 주민이주, 민원, 환경사회영향, 현장여건 등을 고려 적정 후보지 선정

* 후보지별 장·단점 등 비교검토를 통해, 사업실시기관과 협의하여 선정하여야 함

노선계획

- 제안된 노선을 바탕으로 개략적인 선형개요도 작성

- 기술적 난점이 적은 루트, 공사비 최적화, 민원, 환경사회영향 최소화를 위한 루트 도출 (대안 노선에 대한 노선도/표준도 작성)

- 노선대안 분석은 1/10,000 지형도를 이용하여 개략 노선대를 검토하고, 선로 평면도는 1:10,000 축척으로 작성

- 종단면도를 수평 1:2,000, 수직 1:800 축척으로 작성

* 축척은 우즈베키스탄 정부 요구에 따라 변경될 수 있음

- Tashkent ~ Samarkand까지 고속철도 운행을 위한 적절한 노선계획를 구상하여야 하며, 대안별로 경제성 및 유지관리성을 고려하여 검토

- 시․종점쪽 연결부분은 교통량, 지형적인 여건, 수송거리, 기존 운행선의 지장유무 및 시공성, 장래확장 등을 감안하여 최적안을 도출

- 노선계획을 사업실시기관 및 우즈베키스탄 정부와 사전협의 하고, 지자체 등 관계기관과 협의하여 최적 노선 결정

- 최적노선 확정 후, 이에 대한 측량 및 지반조사를 시행하고 구조물 계획 수립

- 본 과업과 관련되는 철도건설계획과 주요 간선도로계획 등을 상세히 조사하여 노선계획에 반영 (고속철도 간 연결 및 환승계획 검토-해당시)

- 주변 도시계획 등 장래계획을 반영하여야 하며, 장래 연장운행 등을 고려하여 계획

정거장계획

- 정거장 입지 검토 및 정거장 위치 선정(지상지하 여부, 정거장 출입구 계획 포함)

정거장(승강장 등) 시설계획

- 정거장은 열차운영계획, 장래 개발계획, 새로운 역세권 형성, 타 교통수단과의 연계성 등을 고려하여 위치를 선정하여야 하며, 정거장 위치 선정의 적정성을 검토 (정거장 환승 및 직결방안 등 검토-해당시)

- 정거장의 규모는 열차운영, 장래 지역발전, 지역주민의 문화공간 제공, 시민편의시설 등을 감안한 적정 규모로 계획하고 개략적인 배선을 제시

- 정거장의 시설은 주변 교통 연계수단(Ride 등) 등을 검토

- 시․종점의 거점역은 장래 철도건설계획상 구내확장을 감안

- 시․종착역은 반복시설을 감안한 선형을 검토

□ 토공계획 (현지 하도급 포함 必)

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

토공설계

대성토 및 대절토 최소화와 토공량의 균형적인 배분

절토법면 경사는 지반조사결과에 따라 비탈면 안전검토 결과에 의해 결정

배수체계 검토

표준횡단, 본선 부속, 개천내기, 길내기, 구교 등 시설검토

연약지반을 고려한 차량기지 토공노반 계획

비탈면 보강공법 검토

□ 궤도계획 (현지 하도급 포함 必)

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

궤도설계

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

배선계획(정거장, 본선, 차량기지)

- 궤도구조형식 검토

- 궤도재료 선정

- 궤도부설공사 공종 및 최적의 궤도부설공사 방안 검토

□ 구조물(교량, 터널 등) 계획 (현지 하도급 포함 必)

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

교량계획

- 철도 교량신설 형식별 대안 검토

- 상부구조, 하부구조, 기초 형식검토 및 선정

- 고속주행 및 장대레일화 조건이 충족되고, 장대레일 설치가 가능한 교량형식 선정 및 경간분할 계획 수립

- 하천통과를 고려한 특수공법 검토

개착구조물 계획

- 개착식 BOX형 구조물 계획 검토

- 토류가시설 종류와 특징 비교 및 공법 선정

- 기존 철도시설 규격을 비교 검토

터널계획

- 본선터널 단면계획 및 형식 결정

- 지질, 선형, 주변현황, 건축한계에 적합한 최적단면 선정 및 공법 표준화

- 터널 굴착공법 검토 및 터널장비 운용계획

- 횡갱 및 집수정계획

- 터널 내부 기계/전기 시설, 안전시설, 대피로, 유지보수, 환기설비 등 계획

- 터널내 제반설비의 시설공간 및 유지관리에 필요한 유효폭 검토

- 소요 건축한계와 선형조건에 따른 확폭량 검토

- 터널은 선로용량을 감소시키지 않고 환기, 배수 등을 감안하여야 하며, 비상시 여객의 안전을 확보할 수 있도록 방재 시스템,  대피통로, 공동관로 등을 계획

최적 구조물 형식선정

- 공사비, 공사기간, 장·단점, 민원, 제한사항, 현장여건, 유지보수 용이성, 환경영향 등을 고려하여 교량 및 터널 공법 비교 검토

- 각종 구조물의 기본형식은 열차 안전운행, 유지관리, 소음․진동, 미관 및 경제성 등을 고려하고 주요 구조물은 비교안을 작성하여 사업실시기관 및 관계기관과 사전에 협의하여 결정

구조물 계획 유의사항

- 구조물 계획 시에는 지반조사 결과를 토대로 구조물계획을 하여야 하며, 연약지반이 예상되는 지역은 처리방안을 검토하고 이를 설계에 반영

- 터널 및 교량 등은 최적 규모로 계획하여 적정 사업비가 계상되도록 특히 유의

- 구조물 설치로 인하여 도로교통에 지장이 되거나 상하수도 등 지하매설물, 철탑, 전주, 가옥 등이 저촉 될 경우 처리방안을 검토 계획

- 철도와 도로가 평면 교차되는 곳은 도로 종류, 확장계획, 교통량 및 교통처리 등을 고려하여 위치, 폭, 형식, 설계하중 등을 관계기관과 협의 후 입체화 계획 수립

- 지진 등 각종 재해대책 수립 및 주변의 공사로 인한 환경이나 주민들의 피해를 최소화하는 방안 제시

- 지체․시각 장애인, 노약자를 위한 편의시설 계획을 반영한 구조물로 계획 수립

□ 차량기지 계획 (현지 하도급 포함 必)

기존 차량기지 활용 가능성 검토

차량기지 입지검토

차량기지 운영방안 검토

차량기지 시설계획 (연약지반 처리대책 고려)

- 규모 설정

- 차량검수 계획

- 차량배선 계획

- 부지정지계획, 기지내 도로계획, 기지내 우·배수 및 오·폐수 계획, 상수도(급수) 계획

입·출고선 계획

- 선로설계 제기준 정립

- 입출고선 선형계획

차량기지 개략사업비, 공사기간, 장·단점, 제한사항, 유지보수 용이성, 환경영향 검토

연약지반 처리계획

- 실시한 지반조사를 토대로 연약지반의 물리적·역학적 특성 등을 파악 및 분석

연약지반 판정기준 및 설계기준 정립, 안정성 검토

- 연약지반 설계기준에 의하여 쌓기 구조물의 안정성 확보를 위한 최적의 연약지반처리 대책공법을 선정

- 연약지반 개량공법(프리로딩, 치환, 고화처리) 비교 검토 및 대안 제시

□ 건축계획(정거장 및 차량기지) (현지 하도급 포함 必)

국·내외 사례조사 분석

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 부지에 적용되는 법적 규제(용적률, 건폐율, 고도제한 등) 분석

정거장 및 차량기지 건축 컨셉 도출

- 적용 가능한 친환경‧양성평등‧무장애 건축요소 제시(해당시)

정거장 및 차량기지 규모 및 부속건물 등 계획

정거장 및 차량기지 기능실 소요면적 산출, 배치 계획

관제센터 건설 관련계획 수립(수원국 정부와 논의 후 해당시)

건축 구조 및 설비 검토

- 사업부지 지반상태 및 지형 분석검토

- 건물 구내설비(전기, 기계, 소방 등) 계획수립(주요사양 제시, 소요용량 검토 등)

- 부지 내 기반시설(전력, 상하수도, 통신 등) 계획수립(인입계획, 설치구간, 설치 주체 등)

- 기본계획을 토대로 모델링 및 층별 평면도·조감도 작성

- 기초공법, 구조형식, 내외부 마감수준 계획안(현지 기후 고려)

□ 시스템계획 (현지 하도급 포함 必)

기계설비 계획

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 환기·제연 방식 및 시설 계획

- 정거장 및 차량기지 기계설비 계획

터널환기구 시설계획(필요시)

승강설비(E/V 및 E/S) 규모 산정 및 배치 계획

본선(터널, 교량) 기계설비 계획

배수설비 계획

지하수 활용계획

자동제어설비 검토

T.A.B 및 유지관리계획

전기설비 계획

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 수전변전소를 고려한 전력공급 계획 검토

- 전철, 전력 설비(수전/발전/전철용 변전/전차선로) 검토

- 건축물(정거장, 차량기지) 전력설비(송·변전/전기실/전력간선 및 동력/전등, 전열 및 조명/접지 및 피뢰) 검토

- 본선 전기설비(교량 점검등/교량 환기(콘센트) 전원/터널전기) 검토

- 기타 설비(보호계전 시스템/원방감시(SCADA) 제어) 검토

신호설비 계획

- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

- 수송수요와 열차운영계획에 근거한 최소운전시격 산출 및 최적의 신호체계 검토

운행최고속도를 고려한 신호시스템 검토

- 주요 신호장치(ATP, 연동장치, CTC 등)들의 설비방식 검토 및 최적의 신호장치 선정

* 신호방식 및 폐색방식 검토 및 선정

* 열차제어시스템 검토

* 연동방식 검토

* 본선 및 차량기지 신호설비 계획

* 정보통신설비, 전송망설비, 열차무선설비, 역무자동화설비 계획

* 통신유도 대책

안전성, 신뢰성 및 경제성 등을 고려한 최적의 신호시스템 도출 및 제시

철도교통·관제센터 및 예비관제센터 수용여부, 구축방안 검토

통신설비 계획

설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시

정보·통신설비, 전송망설비 검토

역무용 통신설비 및 열차무선설비 검토

역무자동화설비 검토

통신유도 대책

타 설비와의 인터페이스 검토

철도안전 시설 및 철도 부대시설 계획

해당국의 안전관련 규정 준수 및 사고예방방안 조사 및 계획 수립, 안전관리 기준 조사 및 세부계획 수립(설비, 교육, 점검방안 등), 안전관리 소요예산 산정

사업실행계획

사업추진 체계조직 및 운영조직 제안

해당 사업범위(안)내 효율성과 효과적인 Risk 관리 역량을 기준으로 EDCF 재원이 지원하는 scope와 수원국이 자체적으로 수행하는 scope간 구분(Role & Responsibility)

사업범위(안) 결정과 해당 사업범위내 EDCF/수원국간 scope 구분은 반드시 당행과 협의 후 결정하여야 함에 유념

시공시 공정지연, 비용초과를 최소화 할 수 있는 범위내에서 사업 구성요소 선정

컨설턴트 고용의 필요성, 컨설팅 과업범위(영문 TOR, SOW 포함), 인력투입계획(bar chart, 현지 하도급 활용계획 포함) 수립

설계, 본구매 입찰업무 지원, 시공감리별 투입인력 및 인력별 업무범위, 투입인력별 추천 자격/역할 등 기술적 TOR 작성(러시아/영문본) 작성

* 실시설계를 시공사가 수행하는 경우로서 컨설턴트가 수행하면 상기 및 이하 내용 일부 변경要

단계별 인력투입계획 작성 (현지 인력 투입계획 포함)

기타 컨설팅 업무(교육훈련 등) 필요성 검토

예상 사업실시기간 및 추진일정

사업지역별 감독, 감리, 인허가 절차, 관련 부처 및 승인 기간 등

예상 사업실시일정(Implementation schedule)

세부 공정계획

사업 기간의 적정성 분석

지역 여건, 주변환경, 경제성, 시설편의 등을 고려한 개발방안

시공 중 교통처리 방안 조사 및 계획 수립

경제성, 효율성, 안정성 및 이용자 편의를 고려한 건설방안 검토

주요기자재 조달방안 검토

Local 기업 주요기자재 생산 여부

수원국 기술기준 만족 기자재 범위 조사(현지, 제3국, 한국산 등)

수원국 기술기준 만족 국내/외 주요기자재 조달가능 현황 조사

한국기업의 유사사업 국제경쟁력 분석

주변국가 주요기자재 생산능력

건설장비 조달방안 검토

상기 분석을 통한 최적 조달방안 도출

기자재 통관 및 운송방안 검토

Foreign(Made in Korea/3rd Country) 기자재의 국경간 운송 방안

한국 및 제3국 → In-bound 운송방안, 내륙 운송방안 검토

기타 사업추진 권고사항 등

[Part 6]  환경사회영향 및 기후변화영향 분석

□ 환경사회영향 분석 (현지 하도급 포함 必)

환경사회영향 관련 현지 법령 검토 및 환경사회위험 현지 등급 분류(Screening)

대상국 환경법 등 현지 환경사회 법령상 선결사항 및 인허가 승인 절차, 이행 필요사항(주민공청회 실시, 영향평가 실시 및 보고서 제출 등) 등 분석

토지보상 및 주민이주 관련 현지 법령 및 절차 분석

사업실시기관의 환경사회영향평가 등 준비, 제출, 승인, 허가, 이행사항 등 단계별 필요조치 및 향후 일정 확인

현지 환경당국, 토지보상 및 주민이주 당국, 사업실시기관, 컨설턴트, 시공사 등 사업참여 주체별 역할 분석

EDCF Safeguard Policy 검토 및 환경사회위험 등급 분류(Categorization)

직접공사에 의한 환경영향 분석

간접적 영향에 의한 환경영향 분석(소음, 진동 등)

사회적 이주 여부 분석 및 대응계획 수립

예정부지內 가옥 이주, 보상 분석 및 기본계획 검토

* 토지수용 필요여부, 토지소유주 확인, 이주 체계 및 보상비용(해당시)

** 토지수용 넓이, 예상이주가옥 수(해당시)

사업지역별 토지보상 및 주민이주 소요비용 추산(토지소유자 조사)

현지 환경사회 관련 법규와 EDCF Policy간 갭 분석(Gap Analysis) 실시

환경영향평가보고서(ESIA;Environmental and Social Impact Assessment), 이주대책계획(RAP;Resettlement Action Plan), 토지수용계획(LAP;Land Acquisition Plan) 보고서 작성

사업시행 전·후 예상되는 환경사회 영향(Impact) 및 위험(Risk) 분석

건설 전(Pre-Construction), 건설(Construction), 운영(Operation) 단계별 분석

환경사회영향 및 위험분석에 따른 저감대책(Mitigation Measure) 수립

건설 전(Pre-Construction), 건설(Construction), 운영(Operation) 단계별 수립 또는 단계별 필요한 저감방안 목록 제시

환경사회영향 저감방안 및 모니터링 계획 수립

모니터링 요소별 담당 주체, 점검 주기 수립

환경사회영향 분석 결과 사업비용에 영향을 주는 요소 분석 및 반영

설계에 반영이 필요한 요소 도출 및 사업비용에 영향을 주는 요소 분석

유적지/문화재 발견시 보고절차(Chance Find Procedure) 조사

Stakeholder Meeting, Census Tagging and Interview Activity 등 환경사회영향 관련 현장조사 진행 (필요시)

□ 기후변화 영향 대응체계 분석 (현지 하도급 포함 必)

대상국의 기후변화 관련 현황 조사

- 대상국의 기후변화 관련 기초현황 조사 및 시사점 도출

· 대상국 기후변화 관련 법, 정책, 계획, 전략, 국가온실가스감축목표(NDC), 국가적응계획(NAP) 등 현황 분석

· 기후변화영향 관련 대상국 담당기관, 조직, 협력체계, 역량 수준 분석

· 대상사업의 대상국 NDC, NAP과의 부합성·관련성 분석 및 시사점

- 대상국의 기후변화 관련 산업동향 및 온실가스배출 관련 기초조사

· 대상국의 기후변화 완화 및 적응 기술에 대한 산업 적용 동향 분석

· 사업실시지역 및 인근 국가의 온실가스 배출계수 및 동종분야 온실가스 배출량 조사

기후위험 사전스크리닝 및 기후위험평가

- 기후변화가 사업(이용계층 포함)에 미치는 영향 및 사업이 기후변화에 미치는 영향을 종합적으로 스크리닝하여 사업의 기후위험수준 예비 진단

- 사업의 노출대상·위해 식별 및 평가

· 사업내용 분석을 통한 사업의 노출 대상 정의 및 노출정도 평가

· 사업부지 및 사업실시지역에 대한 기후 위해 현재 발생 빈도 조사 및 미래 발생가능성 평가

- 노출-위해 매트릭스 분석을 통한 기후변화 영향 수준 평가

- 사업의 기후 취약성 분석

· 사업 이해관계자 대상 기후위험 모니터링 및 관리 역량 검토 포함

- 사업의 최종 기후위험수준 도출결과 및 기후위험관리표 제시

기후위험 경감계획 도출

- 기후위험 경감계획 도출·제시
(복합사업의 경우 각 사업 분야별 경감계획 도출 및 제시 필요)

· 기후위험 경감계획(적응 및 완화 관점) 후보군 도출

· 도출된 경감계획별 사업 적용 가능성 검토(효과성 및 실행 가능성 검토)

· 경감계획별 사업비 변경 내역 분석

· 기후위험 경감계획 우선순위화

- 사업에 적용될 최종 기후위험 경감계획 도출

· 도출된 경감계획은 타당성조사 보고서 사업계획 챕터에 설계기준으로 제시 필요

< 기후위험 경감계획 (예시) >

- 신재생에너지 사용 등 에너지 고효율화 건물 건립

· 태양광패널 설치(전력·온수 공급), 에너지 고효율기자재 사용, LED 조명 사용 등

· Passive Building(단열재 등을 활용한 에너지절감, 자연채광을 위한 넓은 창문 등)

· Active Building(대기열 이용 heat pump, 스마트그리드 등)

· 대중교통(전기버스 등) 접근을 통한 온실가스 저감 가능 여부 등

- 기후변화에 따른 질병(열병, 감염병, 수인성 질병 등)에 대한 치료 프로그램 도입

기후관련 성과관리 계획수립

- 기후관련 예상 성과 측정결과(완화, 적응) 제시

· 완화사업일 경우, 사업운영시 예상 온실가스 감축량 산정 (산정기준 및 산정근거 포함, 필요시 툴킷사용)

- 성과관리 프레임워크에서 요구하는 기후성과 지표 관련 방안 제시(기초선, 목표치, 가정, 리스크, 관리방안 등)

※ 위 목차는 예시로, 용역 수행 과정에서 수정 가능

[Part 7]  사업비 산정

직접사업비(공사비+컨설팅비) 및 간접사업비 산정

* 중간보고시 사업비 산정 근거를 포함한 Excel File(Soft-file) 제출(우즈베키스탄 재무부 제출용)

* 직접사업비는 외화(한국산, 제3국산) 및 현지화 항목 및 비율을 명시하고, 상세 항목에 대한 재료비/노무비/장비비 등 외화 및 현지화 분류(제3국산 항목 국가분류 등)

(공사비) 주요 공종별 국내 및 현지시장 단가 조사

- 수요설비/인력, 기자재 종류, 규격, 수량, 표준단가 등

직접공사비(선로, 역사, 토공, 시스템 등) 산출

- 각 공종 또는 컴포넌트별 현지화/한국산(외화)/3국산(외화) 분리산출

재료비/노무비/경비 분리산출(필요시)

(컨설팅비) 과업범위 및 단계별 인력 투입계획 작성(bar-chart 기준)

- 기본계획 및 기본설계, 입찰지원, 공사감리, 용역완료 및 보고단계 등 단계별

컨설턴트 과업범위(SoW) 및 비용(추정 근거 포함)

- 단계별 Man-Month 및 비용산정, 출장횟수 및 항공료, 체제비, 현장조사 비용 등 산정

투입인력별 추천 자격/역할 등 기술적 TOR 작성(국/영/러)

노임단가 분석

- 한국 엔지니어, 현지 엔지니어/근로자 노임단가 조사후 단가적용

출장횟수 및 항공료, 체제비 산정

교육훈련비용 산정(사업범위에 따라 필요시)

완공후 수원국의 순조로운 운영을 위한 교육훈련 프로그램 및 훈련비용 산출

각종 안전시설 등 부대시설 계획 및 안전관리 소요예산

(간접사업비) 예비비, 사업관리비, 토지보상비, 세금 등 산정

- EDCF 및 사업국 기준에 따른 물량예비비 및 가격예비비 산정

- 용지비 및 지장물 이설비, 이주비용

- 사업관리비 및 차관취급수수료

총사업비 추정 (우즈벡 재무부 및 기타 부처 승인 기준 부합 필요)

사업비의 적정성 비교 검토 (중간보고 이후 우즈벡 재무부 및 기타 부처 의견 반영)

- 기 작성 F/S 보고서 내용 및 타 유사사업(한국 및 수원국)과 비 컴포넌트별로 건설단가 비교

- 비교 결과에 대한 논증

◦ 운영 및 유지보수 지원 비용 산정

수원국 세금 관련 체계 상세조사(관세, VAT, Withholding Tax 등) (현지 하도급 포함 必)

현지 세법에 따른 세금범위(항목, 세율 등) 및 세액에 대한 기초조사 보고서 별도제출

- 본 건 사업진행시 부과, 면제되는 세금, 제세공과금 등 규정

- 상기 조사된 세금 유관기관 사전협의를 통해 본 사업 세금관련 처리 방안 협의

건설공사 및 컨설팅시 법인 결합형태(법적결합 JV(현지법인화 or 파트너쉽) or 법적비결합 JV(컨소시엄 등))에 따른 세금/세율 조사

□ 사업비 항목별 구성 및 세부내역 작성

비용항목 구성(안)

구 분	EDCF			수원국	합 계
	외화(Korea)	제3국산	현지화(Local)
a. 직접공사비	ooo	ooo	ooo	-	ooo
b. 컨설팅비	ooo	ooo	ooo	-	ooo
직접사업비(a+b)	ooo	ooo	ooo	-	ooo
c.예비비	ooo	ooo	ooo	-	ooo
d.사업관리비	-	-	-	ooo	ooo
e.토지보상비	-	-	-	ooo	ooo
f.제세공과금	-	-	-	ooo	ooo
g.차관취급수수료	ooo	-	-	-	ooo
계	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo

* 제세공과금, 사업관리비, 토지보상비는 수원국 부담분

* 차관취급수수료는 EDCF(외화) 반영분

※ 모든 사업비는 한국산, 제3국산 및 Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

※ 모든 사업비는 한국산, 제3국산 및 Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

사업비 산정 기준

국내 및 현지 시장가격 조사 및 분석

적용환율

직접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

직접공사비

· 주요 공종별 단가

· 공사물량

컨설팅서비스 비용

· 설계 및 입찰지원 단계

· 시공감리 단계

간접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

예비비(Contingencies)

· 물량예비비(Physical Contingency)

· 가격예비비(Price Contingency)

토지보상 및 이주 비용

사업관리비 및 차관취급수수료

제세공과금(수원국 부담분과 한국 사업자 부담분 구분)

· 부가가치세, 관세, 법인세, 지방세, 개인소득세 등

· 과세, 면세, 대납, 환급 항목 조사 및 부과세금 산정

총사업비

유사사업 직접공사비 조사 및 건설단가 비교

한국 및 수원국 유사사업 건설단가 비교 조사

수원국 물가상승률 중 건설비 증가분 조사를 이용하여 사업기간 중 건설비 증가분 계산

연도별 자금집행 계획 작성(EDCF, 수원국 자체재원 등 구분)

[Part 8] 타당성 분석(기술적/경제적/재무적 등)

정책적 타당성 분석

지역균형 발전 측면에서 정책적 타당성 분석

정책의 일관성 및 추진의지 측면에서 정책적 타당성 분석

사업추진상의 위험요인 측면에서 정책적 타당성 분석

기술적 타당성 분석

사업 컴포넌트 구성, 추정사업비, 사업실시기간, 우리기업의 사업수행능력의 타당성 검토

컴포넌트별 기술적 타당성 분석

◇ (적용 세부기술 타당성 논증) 또한 적용 세부기술에 대해서는 해당 세부기술을 적용하는 것이 타당한지에 대해 검증하는 과정을 통해 분석

· 세부사업에 적용되는 기술은 여러 기술대안을 상정후에 대안간 장단점 분석을 통해서 본건사업에 적용한 기술의 타당성을 논증

본건사업을 추진하는 것이 기술적 관점에서 필요한지 논증

설계속도 및 기하구조 기준 적용 사유 논증

철로선형, 터널 및 철도 시공공법, 비탈면 처리공법, 연약지반 처리공법, 도입설비 등 적용 사유 논증(대안분석 실시)

적용기술에 대한 대안분석(복수안) 실시후 사업에 적용되는 기술 선정

※ 기술·공법 제시할 때에는 ①반드시 후보 기술·공법을 대상으로 대안분석을 실시한 후, ②가장 적절한 기술·공법을 제안하는 형태로 과업을 진행하여야 함에 유의(상기과정이 보고서에 기재되어 확인 가능해야함)

구 분	후보기술 1	후보기술 2	후보기술 3
기술요소1
기술요소2...
경제성
제 안	◎
제안사유	제안사유를 총괄적으로 기재(비교우위 등)

경제적 타당성 분석

분석방법론 사전정의, 분석방법 설정 및 가정사항 적정성 검토

경제성 분석

- 편익산정 : 직접편익(통행시간 절감, 차량운행비 절감, 교통사고감소 등), 간접편익(환경비용절감 등) 등

- 경제성(B/C, NPV, IRR) 분석

- 민감도 분석 : 비용증감, 편익증감, 할인율 증감에 대한 분석, 편익감소 및 비용증가 동시 발생 복합시나리오 포함

자본의 기회비용(할인율)은 9%를 적용

※ 경제적 타당성 분석은 Guidelines for the Economic Analysis of Projects(ADB) 및 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project(European Commission) 참고

성과품

타당성조사(우즈베키스탄 재무부 및 기타부처 제출 필요)

기본계획 보고서

구조 및 수리 계산서

터널해석보고서

수량산출서

단가산출서 및 설계예산서

설계기준 설명서

설계도면(Basic Plan)

부록

- 현황조사 보고서

- 측량조사 보고서

- 지반 및 토질 조사 보고서

- 교통조사 보고서

- 수리수문 검토보고서

- 용지 및 지장물조서 (용지도 포함)

사업비 재원조달 방안 분석

정부재원, 민간투자(PPP 포함), 양허성 차관(한국 EDCF 및 EDPF, 다자간 개발은행 지원), 수출금융 등 다양한 재원조달 방안 제시 및 효과적이고 타당성 있는 방안 제시

- 상기 다양한 재원조달 방안을 종합적으로 검토하고, 각 방식의 장단점 및 위험요소를 분석하여 최적의 조달방안 제시

[Part 9] 기타 EDCF 심사를 위한 항목

사업실시기관 현황

사업실시기관 개요, 조직 및 인력 현황(조직도 포함)

본 건 사업을 위한 사업실시조직(PMU or PIU) 구성 현황 분석 및 사업실시조직 구성 방안(지역별 조직, 인력 및 각 인력별 책임과 권한 정의)

사업수행체계 및 관련 부처 등과의 협력체계 등

사업실시기관의 행정지원 태도, 사업수행능력 검토, 사업관리 역량, 사업수행 경험

완공 후 유지관리기관 개요, 조직 및 인력, 예산 등

사업추진 준비상태

ODA 사업 추진 및 승인 절차(Loan 도입, 입찰, 계약 절차 및 관련 부처)

법적․행정적 내부승인절차, 사업시행을 위한 필요한 조치 및 완료여부, 현재까지 진행상황(인허가, 정부승인, 부지확보 등)

재원조달계획

컨설턴트 고용의 필요성, 컨설팅(설계 및 감리) 과업범위(영문 TOR, SOW 포함), 인력투입계획(bar chart) 수립

①F/S, ②기본/실시설계, ③구매조달(통관), ➃시공감리 각 과정별 인허가 절차, 기관 조사 및 검토

사업지역별 감독, 감리, 인허가 절차, 관련 부처 및 승인 기간 등

EDCF 사업비용 산정을 위한 외화 및 현지화 항목구성

직접사업비(직접공사비 및 컨설팅)에 대한 외화 및 현지화 항목 및 비율

상세항목에 대한 재료비/노무비/장비비 등의 외화 및 현지화 분류

제3국산 항목 및 국가 분류 등

구매계획

자재 및 물품의 구매적격국(외화, 현지화, 제3국산) 조사

국내 컨설팅 및 건설사 리스트 및 경쟁력

컨설턴트 및 본구매의 입찰방식 검토 및 구매 패키지 제시

□ 빈곤퇴치효과 분석

위험요소 분석 및 대응 방안

마커 분석(리우, 젠더, 및 정책마커)

기후변화(리우, 그린인덱스) 및 성평등(젠더) 영향분석 및 관리계획 수립

정책마커 및 지속가능개발목표(SDGs) 기여도 확인을 위한 자료 조사

(참고) SDGs 17개 목표

① 빈곤 종식 ② 기아 종식 ③ 보건 ④ 교육 ⑤ 양성평등 ⑥ 물과 위생 ⑦ 에너지 ⑧ 경제성장 ⑨ 지속가능한 인프라 및 산업화 ⑩ 불평등 해소 ⑪ 지속가능도시 ⑫ 지속가능소비･생산 ⑬ 기후변화 대응 ⑭ 대양･바다･해양자원 ⑮ 생태계･생물다양성 ⑯ 평화･제도(거버넌스) ⑰ 이행수단 및 글로벌 파트너십

< 주요 사업 분야별 목표 (예시) >

사업 분야	SDGs 목표	세 부 목 표

그린인덱스 분석

기후변화 완화 (예시 : 신재생에너지 활용, 가로수 조성 여부)

화석연료 대체, 에너지 효율화

탄소회수, 이용 및 저장

기후변화 적응

개인의 기후변화 대응력 강화, 인프라 회복적 증진

자연자원 생산성 제고, 자연 생태계 보존

순환경제

자원투입 절감, 자원순환율 제고

사회적 포용성

소득격차 해소, 지역균형 발전, 양성인지 제고

성과관리 프레임워크(Logical Framework) 수립(중간보고서 수록 필요)

※ EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) 내 「F/S 시행자를 위한  EDCF 성과관리 프레임워크 작성 가이드라인」 참조

중장기 효과, 산출결과, 산출물 간의 결과논리(Result Chain)가 반영된 성과지표 선정

목표 달성 여부, 진전사항을 측정할 수 있는 SMART(Specific, measurable, achievable, relevant, time bound) 지표 수립

기초선(Baseline) 조사

기초선 설정을 위한 문헌조사 및 데이터 수집 등

기초선 수준, 유사사업 평가결과 등을 토대로 목표치(Target) 설정

주요 리스크 검토 및 대응방안 수립

사업 시행 단계에 따른 지표의 모니터링 방안과 향후 성과관리 상 발생할 수 있는 문제점 및 대처방안 포함

중간보고회 이전 성과관리 프레임워크 초안 제출 및 중간보고회(또는 그 이전) 당행(경협평가부)과 의견 교환 세션 실시

성과관리 프레임워크(Logical Framework)

중장기효과1)
사업의 중장기 효과와 연관된 지속가능개발목표(SDGs) 또는 국가개발목표2)
구 분	지표			기초선			달성목표치			가정/리스크
산출결과3)
산출물4)
모니터링 지표
지표(예시)	달성률(예시)
	기초선		1년			2년		3년			종료선
컨설턴트 고용
본구매 구매계약
건축
기자재
연수
사업목표 주 수혜자
지표별 정의 및 관리
지표명		정의			자료원/ 자료수집방법				지표관리담당자

주 : 1) 사업의 파급효과로 발생한 상위의 장기적이고 유의미한 변화
2) 사업특수성, 수원국 요청 등 고려하여 별도의 성과지표(기초선, 달성목표치, 가정/리스크 포함) 수립으로 갈음 가능
3) 사업완공 시 산물출을 통해 주 수혜자가 누리는 직접적 혜택
4) 물리적인 사업완공 시 주 수혜자 앞 지원되는 생산물 및 서비스

(참고) 철도사업 부문 표준 성과지표 예시

디자인 요약 (Design Summary)	사업수행 목표/지표 (Performance Targets/Indicators)
중장기효과(Impact) 사업지역의 교통시스템 향상	사업지역 GDP % 증가 예상
	1인당 GDP 사업 전 대비 % 증가
	사업지역 절대빈곤율 % 감소
	사업지역 상수도, 전화, 전기 설치
교역량 증가	사업지역 교역량 % 증가
경제성장 가속화	사업지역 GDP % 증가
경제성장 및 빈곤감소	해외직접투자(FDI) % 증가
산출결과(Outcome) 사업지역에 효율적이고 안전한 철도교통시스템 개발	철도이용승객 % 증가
	화물 운송량 % 증가
	타지역과의 교통량 % 증가
	타지역과의 이동시간 % 단축
	교통비 % 감소
	교통사고 발생률 % 감소
	대기 중 이산화탄소 발생량 % 감소
지역경제 발전	지방 기업체 % 증가
	대기업 % 증가
	사업지역 근로자 % 증가
	사업지역 방문자(여행자) % 증가
재정상 안정적인 철도 운영	사업실시기관 재무비율 유지
	화물 운송량 완전 소화
철도교통 안전성 증가	철도사고 % 감소
철도관리기법 향상	철도법 까지 제정·시행
산출물(Output) 철도 인프라 및 관련시설 개선	승객운송 및 화물운송 % 증가
	철로 km 확장 및 개 역 신설
빈곤층에 대한 고용기회 확대	신규 일자리 개 신설
	노동자 평균임금 % 증가
철도운영 재정 확보	사업 참가자 보수 지급
	재정 관리를 위한 컨설턴트 고용

유사사업의 ODA 지원사례 조사

도로분야 ODA 지원사업 조사(지원기관, 규모, 사업내용, 사업비 등)

주요 공여기관 최근 10년간 지원현황 및 향후 지원계획

수원국에서 활동하는 주요 ODA 기관 도로분야 관련 주요활동

사업실행계획

사업실시기관의 계획 및 관련 사업(적용가능시) 과의 연계성을 고려한 사업추진일정 제시

본 사업이 우리나라에 미치는 효과

양국관계에 미치는 효과

우리기업에 미치는 효과

외화가득 효과

이전 단계 사업의 성과분석(해당시)

기타 항목

‘EDCF 분야별 모듈화 가이드’ 중에서 ‘도로’ 분야 작성(필요시)

OECD 상업성 여부 검토(필요시)

안전관리 기준, 관리계획 및 소요예산 산정

FSI(취약국 지수) 분석(필요시)

유무상 융합 사업기획

착수보고회, 중간보고회, 최종보고회에 유관 무상원조 시행기관 초청(유관기관 리스트 제공 예정)

동 사업을 위한 무상원조 시행기관과의 협업방안 협의 및 도출

무상원조 시행기관과 협의된 연계방안이 없는 경우에도 아래 내용 보고서에 포함

착수/중간/최종보고회 초청 및 참석한 무상기관 리스트

참석 무상기관과의 연계방안 논의 내용

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음

보고서 제출 일정 및 부수(러문은 수원국 협의내용에 따라 우즈벡어로 변경 가능)

산출물	제출시기	언어	부수
과업수행계획서 (Inception Report)	계약체결 후 7일 이내	영문, 러문	10, 10
노선선정 보고서	과업 착수 후 3개월 이내	영문, 러문	-
보고서 목차	과업 착수 후 3개월 이내	영문, 러문	-
현장조사 보고서 초안	과업 착수 후 3개월 이내	영문, 러문	-
중간보고서 초안 (Draft Interim Report)	과업 착수 후 6개월 이내	영문, 러문	10, 10
현장조사 보고서 최종1)	과업 착수 후 6개월 이내	영문, 러문	10, 10
중간보고서 최종 (Interim Report)	과업 착수 후 9개월 이내	영문, 러문	10, 10
최종보고서 초안 (Draf Final Report)	과업 착수 후 12개월 이내	영문, 러문	10, 10
기본계획 보고서	과업 착수 후 12개월 이내	영문, 러문	15, 15
최종보고서 (Final Report)	과업 착수 후 15개월 이내	영문, 러문	30, 30

1) 현장조사보고서(부록) : 현황조사, 측량, 지반, 교통, 수리수문, 용지 및 지장물조서

2) 러시아어 보고서는 수원국 현지 상황에 따라 우즈벡어로 변경 가능

4. 과업 세부추진계획

양국 간 분담사항

한국	우즈베키스탄
ㅇ타당성조사 및 기본계획 ∙우선 추진노선 일반현황, 교통시설 및 운영현황 검토 ∙현지 기술조사 및 분석 ∙교통수요예측 (노선대안, 시나리오) ∙노선 선정 및 기술 검토 ∙기본계획 ∙사업비 산정 ∙경제성 분석 ㅇ현지 보고회 ∙단계별 현지 보고회(3회)	ㅇ전반적인 행정지원 ∙우즈베키스탄 현지에 PIU (Project Implementation Unit)를 설치하고 프로젝트 책임자 지정 ∙인허가 절차 및 법적 문제 해결 ∙모든 행정 절차 및 경찰을 포함한 유관기관과의 협력 확보 ∙관련자료, 문서 및 통계 제공 ∙프로젝트 완료 후 장비의 유지보수 책임 ㅇ보고서 등에 대한 검토 ㅇ한국 기술자의 안전 확보 및 비자 등 필요한 지원

과업추진일정(준비 3개월 + F/S 15개월)

구 분	-			3M			6M			9M			12M			15M
Ⅰ. 과업준비
1. 실시협의
2. 과업수행기관 선정
Ⅱ. 타당성조사 및 기본계획
1. 기초자료 수집 및 분석
2. 장래 교통수요 예측
3. 대안설정 및 기술 검토
4. 경제적 타당성 검토
5. 조사 및 측량
6. 기본계획(Basic Plan)
7. 사업비 산정 및 실행계획
8. 재원조달 방안
9. 성과품 작성
Ⅲ. 진행현황 보고회 (3회)

F/S 지원예산 산출수량(안)

참여기술자 투입기간 세부사항

구 분		투입인원	총 투입기간		현지인력 참여
			합계주)	출장
사업관리자 (PM)		1명	13M/M	5회
부책임자		1명	10M/M	5회
분야별 참여 기술자	교통계획	2명	10M/M	3회
	철 도	1명	5M/M	3회	○
	구 조	1명	3M/M	3회	○
	토질 및 기초	1명	6M/M	3회	○
	터 널	1명	6M/M		○
	궤 도	-	-		○
	차량기지	1명	6M/M	3회	○
	건 축	-	-		○
	기계설비	-	-		○
	전기설비	-	-		○
	신호설비	-	-		○
	통신설비	-	-		○
	경제성	1명	4M/M	1회
	비용	-	-		○
	재원조달방안	2명	8M/M
	기후변화(환경)	1명	4M/M		○
	Safeguard	1명	4M/M		○
	통번역	-	-		○
합 계		14명	79M/M	29회

주) 본 과업 예산 산정을 위해 추정된 M/M로, 제안시 변경가능

* 현지인력 참여가 표시된 분야는 현지인력 투입계획 및 M/M 제시 필요

** 전반적으로 현지인력 선정 비중이 높은 사업으로 현지업체의 유사실적 보유 유무, 현지하도급 성과물 작성 및 조사품질관리 방안, 현지업체 선정 등을 다른 EDCF 제안서보다 상세하게 기재 필요

전문가 세부과업범위

구 분	과업수행내용
PM	- 사업총괄
부책임	- 재무 부분(경제성, 비용, 재원조달방안), 기후변화, Safeguard, 통번역, ODA 부문 총괄
교통계획	- 국가개발계획 및 교통관련계획 조사․분석 - 교통현황 조사, 여건분석 및 교통수요 예측
철도	- 철도 계획 수립 및 설계기준 정립 - 노선 및 선형검토, 토공계획 수립 - 기존선 운영실태 조사
구조	- 구조물 계획 수립 및 설계기준 정립 - 본선 구조물(교량, 개착구조물 등) 및 정거장 계획
토질 및 기초	- 지반 특성분석 및 지반조사 - 기초 공법 선정 및 설계
터널	- 터널 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시 - 터널계획(현지 하도급 업체 고용) - 본선터널 단면계획 및 형식 결정 - 지질, 선형, 주변현황, 건축한계에 적합한 최적단면 선정 및 공법 표준화 - 터널 굴착공법 검토 및 터널장비 운용계획 - 횡갱 및 집수정계획 - 터널 내부 기계/전기 시설, 안전시설, 대피로, 유지보수, 환기설비 등 계획 - 터널내 제반설비의 시설공간 및 유지관리에 필요한 유효폭 검토 - 소요 건축한계와 선형조건에 따른 확폭량 검토 - 터널은 선로용량을 감소시키지 않고 환기, 배수 등을 감안하여야 하며, 비상시 여객의 안전을 확보할 수 있도록 방재 시스템, 대피통로, 공동관로 등을 계획 - 지진 등 각종 재해대책 수립 및 주변의 공사로 인한 환경이나 주민들의 피해를 최소화하는 방안 제시 - 지체․시각 장애인, 노약자를 위한 편의시설 계획을 반영한 구조물로 계획 수립
궤도	- 궤도계획 (현지 하도급 포함 必) - 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시 - 배선계획(정거장, 본선, 차량기지) - 궤도구조형식 검토 - 궤도재료 선정 - 도부설공사 공종 및 최적의 궤도부설공사 방안 검토
차량기지	- 차량기지 시설 및 검수 계획
건 축	- 정거장 및 차량기지 국·내외 사례조사 분석 - 부지에 적용되는 법적 규제(용적률, 건폐율, 고도제한 등), 설계기준, 관련 제기준 분석 등 - 정거장 및 차량기지 건축 컨셉, 규모 및 부속건물 등 계획 - 기능실 소요면적 산출, 배치 계치 - 관제센터 건설 관련계획 수립(수원국 정부와 논의 후 해당시 - 사업부지 지반상태 및 지형 분석검토 - 건물 구내설비(전기, 기계, 소방 등) 계획수립(주요사양 제시, 소요용량 검토 등) - 부지 내 기반시설(전력, 상하수도, 통신 등) 계획수립(인입계획, 설치구간, 설치 주체 등) - 기초공법, 구조형식, 내외부 마감수준 계획안(현지 기후 고려)
기계설비	- 기계설비 관련 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시 - 환기·제연 방식 및 시설 계획 - 정거장 및 차량기지 기계설비 계획 - 터널환기구 시설계획(필요시) - 승강설비(E/V 및 E/S) 규모 산정 및 배치 계획 - 배선(터널, 교량) 기계설비 계획 - 배수설비 계획 - 지하수 활용계획 - 자동제어설비 검토 - T.A.B 및 유지관리계획
전기설비	- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시 - 수전변전소를 고려한 전력공급 계획 검토 - 전철, 전력 설비(수전/발전/전철용 변전/전차선로) 검토 - 건축물(정거장, 차량기지) 전력설비(송·변전/전기실/전력간선 및 동력/전등, 전열 및 조명/접지 및 피뢰) 검토 - 본선 전기설비(교량 점검등/교량 환기(콘센트) 전원/터널전기) 검토 - 기타 설비(보호계전 시스템/원방감시(SCADA) 제어) 검토
신호설비	- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시 - 수송수요와 열차운영계획에 근거한 최소운전시격 산출 및 최적의 신호체계 검토 - 운행최고속도를 고려한 신호시스템 검토 - 주요 신호장치(ATP, 연동장치, CTC 등)들의 설비방식 검토 및 최적의 신호장치 선정 * 신호방식 및 폐색방식 검토 및 선정 * 열차제어시스템 검토 * 연동방식 검토 * 본선 및 차량기지 신호설비 계획 * 정보통신설비, 전송망설비, 열차무선설비, 역무자동화설비 계획 * 통신유도 대책 - 안전성, 신뢰성 및 경제성 등을 고려한 최적의 신호시스템 도출 및 제시 - 철도교통·관제센터 및 예비관제센터 수용여부, 구축방안 검토
통신설비	- 설계기준 정립, 적용 법규 및 관련 제기준 제시 - 정보·통신설비, 전송망설비 검토 - 역무용 통신설비 및 열차무선설비 검토 - 역무자동화설비 검토 - 통신유도 대책 - 타 설비와의 인터페이스 검토
경제성분석	- 편익 산정 및 경제성 분석 등
비용	- 총 공사비 및 사업비 산출 등
재원조달 방안	- 사업의 규모 및 지역적 특성, 경제적 여건에 따라 조달방안 선택 - PPP 및 재정사업 등의 규모에 따른 경제적 편익 표시
기후변화 (환경)	- 잠재적 위험 및 취약성 식별 - 적응 및 완화 전략 개발
Safeguard	- 대상국 환경법 등 현지 환경사회 법령상 선결사항 및 인허가 승인 절차, 이행 필요사항(주민공청회 실시, 영향평가 실시 및 보고서 제출 등) 등 분석 - 현지 환경당국, 토지보상 및 주민이주 당국, 사업실시기관, 컨설턴트, 시공사 등 사업참여 주체별 역할 분석 - EDCF Safeguard Policy 검토 및 환경사회위험 등급 분류(Categorization) - 직접공사/간접적 영향에 의한 환경영향 분석(소음, 진동 등) - 사회적 이주 여부 분석 및 대응계획 수립 - 예정부지內 가옥 이주, 보상 분석 및 기본계획 검토 * 토지수용 필요여부, 토지소유주 확인, 이주 체계 및 보상비용(해당시) ** 토지수용 넓이, 예상이주가옥 수(해당시) - 사업지역별 토지보상 및 주민이주 소요비용 추산(토지소유자 조사) - 현지 환경사회 관련 법규와 EDCF Policy간 갭 분석(Gap Analysis) 실시 - 환경영향평가보고서(EIA), 이주대책계획(RAP), 토지수용계획(LAP) 보고서 작성 - 건설 전(Pre-Construction), 건설(Construction), 운영(Operation) 단계별 분석 및 필요한 저감방안 목록 - 환경사회영향 및 위험분석에 따른 저감대책(Mitigation Measure) 수립 - 모니터링 요소별 담당 주체, 점검 주기 수립 - 유적지/문화재 발견시 보고절차(Chance Find Procedure) 조사 - Stakeholder Meeting, Census Tagging and Interview Activity 등 환경사회영향 관련 현장조사 진행 (필요시)
통번역	- 보고서 및 전문적인 대화의 품질을 보장하는 통번역 * 통번역 학과 4년제 대학 졸업 또는 이에 상응하는 학위 보유자 건설 등 관련 업무에 대한 통번역 실무 3년 이상 보유자 우대
계

5. 과업 수행방법

□ 과업수행 원칙

◦ 본 과업은 관련 규정 및 계약조건과 당행(또는“발주자”)의 지시에 따라 수행하여야 함

◦ 사업수행책임자(PM)는 모든 현장활동 및 출장결과보고를 포함한 당행 및 사업실시기관과의 회의에 참석하여 직접 보고를 원칙으로 하며, 전체 과업범위에 대해 검토 및 감독을 이행해야 함(원칙적으로 기타 인력이 주도하여 보고 불가)

- 당행 및 사업실시기관과의 주요한 업무관련 모든 연락(메일, 전화 등)의 Contact Point는 PM이 주도(부득이한 경우 주요 분야 분책이 대행)

- PM은 과업이행에 대한 공정보고를 매주 이행하여야 함(금주 진행사항 및 차주 예정사항)

◦ 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적·기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

◦ 국외출장을 위한 여행자 보험을 가입토록 하고, 보상한도 및 범위가 일정 수준 이상으로 설정될 수 있도록 함. 아울러, ‘국외 체류시 안전매뉴얼’에 따라 안전지침, 위기상황대처 및 여행경보제도 안내를 통한 안전관리 자체 교육 필요

◦ 해당 사업의 특성상, 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 사업수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 상호 간 협의하에 사업범위에 포함할 수 있음

◦ 선정된 제안사(또는“수급자”)의 PM은 본 과업에 따른 모든 업무를 발주자와 협의하여 시행하여야 하며(필요시 사업실시기관과도 협의), 용역 성과품은 발주자와 협의 후 제출하여야 함

◦ 현장조사를 포함한 주요 과업내용은 사업실시기관과의 상호협의를 통해 진행하고, 결과물에 대해 사업실시기관의 동의가 도출되어야 함

- 사업실시기관 동의 증빙서류를 포함한 최종보고서 제출을 과업 완료시점으로 함

- 최종보고서 제출시 성과물에 대한 사업실시기관의 동의 의사가 포함된 증빙서류(공문 또는 회의록(양자서명 必) 등)를 제출해야 함

- 현지출장 및 상주업무와 관련하여 최종보고서 제출전(잔금지급 전) 개인별 ‘출입국에 관한 사실증명서’ 원본 및 ‘여권 해당부분 사본’ 동시 제출

- 현장조사, 자료수집, 유관기관 및 사업실시기관과의 실시간 협의를 위해 제안서에 지정된 1인 이상이 현장에 10M/M(300M/D) 이상 상주*(주요 현장조사기간 중 필수 상주)하도록 해야 하며, 주요 참여인력(PM, 부PM)은 5회 이상 현지출장(착수보고, 현장조사, 중간보고, 사업비를 포함한 사업계획(안) 협의, 최종보고 등) 필요** 및 단계별 주요 협의내용에 대한 회의록 작성

* 상주기간 중 국내보고를 위한 귀국은 일수에서 제외하며, 연속하여 210일 상주(현장조사 기간 필수 포함) 권고(현지상주 최소단위는 1개월이며 2인 이상 분할로 수행은 가능)

** PM 및 부PM은 5회, 기후 분야 분책 및 전담참여자는 각 3회 이상 현지출장 실시 필요하며, 기타 분책 및 전담은 F/S 수행계획에 따라 현장조사, 계획수립(설계 포함) 및 주요 내용 협의 등에 필요한 출장 실시(4회 이하) 가능

- 기후 분야 분책 투입은 각 4M/M 이상 제안

- 현지 상주는 전담인력이 실시함이 원칙이나, 제안서 ‘인력운영계획’에 별도 제안시에는 기타인력도 참여 가능

- 출장과 현지상주 일수는 구분하여 산정할 것

- 조세제도 등 법령, 자료수집(통계, 건설단가 등), 현장조사(측량, 지질/지반, 수질, 환경사회(토지수용, 주민이주 포함)), 사업실시기관과의 협의 및 의사결정 등을 위한 현지업체 활용 필요(현지업체 고용시, 당행의 하도급 계약체결 사전승인 필요)

* 과업초기(1 ~ 3개월차) 주요사항 협의 후 현지업체와 계약체결 필요(상세 현장조사 계획서는 1차 현지출장 이후 제출하고, 현장조사는 중간보고서 제출전까지 완료를 원칙으로 함)

- 사업실시기관 요청에 따라 원활한 업무협의 및 현장중심의 과업 수행 강화를 위해 Local Team Leader 제안 필수

- 성과 도출을 위한 추가적인 현지출장 비용은 계약상대자가 부담함

◦ Pandemic 등 대외적 리스크 및 수원국 상황을 고려한 수행계획(조사방법, 출장계획, 사업실시기관 협업 및 Local 기업 활용방안 포함)이 제안되어야 함

◦ EDCF 사업 특성상 수원국 중요사항 결정지연 등으로 인해 과업지연이 빈번함을 인지하고, 과업지연 예상시 당행 앞 과업중단 요청 필요(이로 인한 과업기간 연장시 용역비 추가지급은 없으며, 과업기간 연장에 따른 적절한 인력투입계획 수정이 필요함)

□ 품질 및 하자보증

◦ 수급자는 성과물의 품질을 높이기 위하여 당행의 요구를 최대한 반영하여야 함

◦ 특히, 과업수행 과정 및 수요분석 및 적용기술 등 성과물의 적정성 검증을 위해 당행은 과업수행기간내 별도 자문위원의 선임을 요구할 수 있음

◦ 수급자가 공급한 성과물의 품질 및 하자보증기간은 12개월로 함

- 최종보고서 제출 후 수원국 승인 중 요청에 의해 수급자 앞 일부 내용의 수정을 요구할 수 있음

◦ 성과물 품질 제고를 위해 수급자 비용으로 관련 분야 전문가 3인 이상으로 구성된 외부자문위원단*을 구성해야 하며, 당행 참관하에 주요 보고서에 대한 자문회의(중간 및 최종보고회)를 개최해야 함(자문위원 선정 시, 당행 사전 동의 필요)

* 자문위원 선정은 과업수행 단계에서 실시(기술제안서에 자문위원 제안 불요)

□ 책임 및 보안

◦ 과업 수행과정 중 취득한 정보에 대해 보안을 유지하여야 하며, 이에 따른 문제발생시 계약상대자가 모든 민·형사상 책임을 짐

◦ 과업에 의해 개발된 산출물의 원본 파일을 제출하여야 하며, 수급자는 사업결과물을 다른 어떤 목적(논문, 학술지, 보도자료 포함)으로도 활용할 수 없음

□ 과업수행계획서(영·러문) 작성 및 변경

◦ 계획서 내용

- 과업목표 및 범위 : 제안요청서 및 수급자의 기술제안서

- 과업수행기간 : 착수일로부터 15개월

- 추진 일정계획 및 보고계획

- 계약협상 시 과업수행계획서에 포함하기로 상호 협의된 사항

◦ 발주자의 승인

- 수급자는 과업수행계획서에 대한 발주자의 승인을 얻은 후 과업에 착수하고, 부득이한 사유로 변경하고자 할 경우에도 발주자의 승인을 얻어야 함

6. 성과품 납품 및 보고서 관련 사항

□ 성과품 납품

◦ 성과품은 계약내용 및 발주자가 제시한 형식에 맞추어 제출하여야 함

◦ 발주자는 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 경우 추가 산출물을 요구할 수 있으며, 수급자는 이에 응하여야 함

◦ 산출물의 규격은 A4(좌철)로 함(요약본 별도)

□ 보고서 제출 일정 및 부수

산출물	제출시기	언어	부수
과업수행계획서 (Inception Report)	계약체결 후 7일 이내	영문, 러문	10, 10
노선선정 보고서	과업 착수 후 3개월 이내	영문, 러문	-
보고서 목차	과업 착수 후 3개월 이내	영문, 러문	-
현장조사 보고서 초안	과업 착수 후 3개월 이내	영문, 러문	-
중간보고서 초안 (Draft Interim Report)	과업 착수 후 6개월 이내	영문, 러문	10, 10
현장조사 보고서 최종1)	과업 착수 후 6개월 이내	영문, 러문	10, 10
중간보고서 최종 (Interim Report)	과업 착수 후 9개월 이내	영문, 러문	10, 10
최종보고서 초안 (Draf Final Report)	과업 착수 후 12개월 이내	영문, 러문	10, 10
기본계획 보고서	과업 착수 후 12개월 이내	영문, 러문	15, 15
최종보고서 (Final Report)	과업 착수 후 15개월 이내	영문, 러문	30, 30

◦ 보고서 목차 제출 : 착수 후 3개월 이내

◦ 최종보고서 제출시, 사업범위 및 추정사업비(currency portion 포함) 등 사업의 주요 사항에 대해 사업실시기관 앞 사전 동의를 득하고 관련 증빙자료를 함께 제출하여야 하며, 증빙자료의 내용 및 형식은 발주자와 사전협의를 통해 확정함

◦ 최종보고서는 영·러문 요약본(30 ~ 40쪽 이내)을 포함

◦ 보고서 제출 부수 및 형태 관련 사항은 당행, 사업실시기관과 별도로 협의하여 조정 가능

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

□ 일반사항

◦ 제안참가 업체는 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 하며, 본 제안요청서상 요구하는 과업내용과 이에 대한 용역결과가 제시되어야 함

◦ 입찰공고 및 제안요청서에 명시되지 않은 기타의 사항에 대하여는 당행에서 정하는 바에 따름

◦ 제안서에 서명날인이 필요한 곳은 제안사나 그의 권한을 적법하게 위임받은 대리인이 자필로 서명하거나 입찰참가 등록 시 제출한 인감(또는 사용인감)으로 날인되어야 하며, 행간에 쓴 것이나 지운 것, 덮어쓴 것 등은 정정 날인되었을 경우에만 유효함

◦ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 당행의 입증요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외함은 물론 계약 후에도 계약해지와 함께 인적․물적․기간적 손실에 따른 손해배상이 청구될 수 있음

◦ 제안서는 본 지침서의 양식 및 기재순서에 따라 작성하여야 하며, 각 페이지에 일련번호를 부여하고 목차항목에 해당 일련번호 기재

◦ 제안서의 내용 중 평가항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주

◦ 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 제출한 후 수정이나, 추가 또는 대체할 수 없음

◦ 모든 평가항목의 평가 적용 기준시점은 따로 정하지 않는 한 공고일자를 기준으로 함

◦ 제안서의 내용 중 기술자의 경력사항, 기관실적에 대하여 원본 1부는 발행기관이 확인 날인한 것으로 제출(‘원본대조필’한 사본도 인정)

◦ 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, ‘할 수도 있다’, ‘고려할 수 있다’ 등의 추상적인 표현은 제안하지 않은 것으로 간주

◦ 제안서 제출자는 대표이사 또는 그 위임을 받은 자로 함

◦ ‘재무구조 및 경영상태’ 평가를 위한 신용평가등급 확인서 제출(‘원본대조필’)

◦ 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 하며 제출된 평가 자료는 일체 반환하지 않음

□ 제안서의 서명 및 효력

◦ 제출된 제안서의 내용은 당행이 요청하지 않은 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시의 계약조건의 일부로 간주함

◦ 제안내용에 대한 확인 필요 시, 입찰참가자에게 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

◦ 본 제안에 의한 성과물은 별도의 명시가 없는 한 당행이 소유권을 가짐

□ 보안 요구사항

◦ 제안자는 당행으로부터 배부받은 제안요청서, 각종 자료 및 제안 과정에서 얻은 정보를 당해 제안 외의 목적으로 사용할 수 없음

◦ 용역수행 중 또는 용역완료 후 용역에 관한 일체의 사항이 외부에 누설되는 일이 없도록 당행의 보안규정을 철저히 준수하여야 하며 용역의 성과물을 사전승인 없이 용역 목적 이외에 사용할 수 없음

◦ 기타 보안과 관련되는 사항이 발생되었을 경우 또는 발주처가  요구하는 경우에는 이에 따라야 함

◦ 낙찰자는 계약 시 용역 참여인원 전원에 대한 보안교육 및 보안 관리에 철저를 기하도록 하고 용역 착수와 동시에 보안각서를 자필로 작성하여 서명한 후 제출하여야 함

2. 제안서 목차

I. 사업내용, 대상국의 이해 1. 사업내용의 이해 가. 사업의 목적 나. 사업의 범위 다. 사업의 기대효과 2. 사업대상국의 이해 가. 대상국 일반현황 및 관련 계획 나. 사업대상지역 특성 등 II. F/S 수행계획 1. F/S 실행계획 가. 추진전략 및 운영계획 나. 추진일정 2. 항목별 조사방법 가. 분야별 세부 조사계획 및 방법 나. 기술적․경제적 타당성분석 방안 다. 현장조사 방안 및 국내외 협력기관 활용계획 3. 수원국 소통계획 가. 현지상주 계획 나. 수원국과의 협의채널 구축 방안 4. 현지 협력사 활용계획 5. 기후변화영향 대응체계 적용계획 6. 위험요소 분석 및 대책 7. F/S 관리방안 8. 영·러문보고서 작성계획 가. 영·러문보고서 전문인력 활용계획 나. 영·러문보고서 감수계획 9. 영·러문보고서 전문인력	III. 조직ㆍ인력 현황 및 운용계획 1. 인력운용계획 가. 과업수행조직(실제참여자 기준) 나. 업무분담계획 다. 현지 및 국내 인력투입계획 (현지 출장계획 및 상주인원 지정) 2. 투입인력의 경험 및 능력 가. 유사사업 수행경험 나. 대상국 경험 다. 주요 경력 및 학위 라. 어학 능력 IV. 원조효과성 제고를 위한 독창적인 아이디어 및 방안 등

3. 제안서 항목별 작성 방법

1) 제안서 본문

작 성 항 목		작 성 내 용	비 고
Ⅰ. 사업내용 및 대상국의 이해
1. 사업내용의 이해 가. 사업의 목적 나. 사업의 범위 다. 사업의 기대효과		- 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 사업의 목적, 범위를 요약하여 기술 - 사업의 기대효과를 요약하여 기술
2. 사업대상국의 이해 가. 대상국 일반현황 및 관련 계획 나. 사업대상지역 특성		- 대상국 현황/개발계획/정책 및 해당 산업 분야 동향 기술 - 사업대상지역의 기능 및 특성 등을 요약하여 기술
Ⅱ. F/S 수행계획
1. F/S 실행계획
가. 추진전략 및 운영계획		- 본 사업 및 과업 특성, 제한된 시간, 예산 및 인적자원을 고려한 체계적인 F/S 추진전략 및 운영 방안 등
나. 추진일정		- 과업별 수행계획, 세부 추진일정
2. 항목별 조사방법		- 본 과업수행을 위해 필요하다고 판단되는 자료 확보 계획
가. 분야별 세부조사 계획 및 방법		- 과업별 세부조사 방법 및 계획
나. 기술적․경제적 타당성 분석방안		- 기술적, 재무적/경제적, 정책적 타당성 분석방안 제시
다. 현장조사 방안 및 국내외 협력기관 활용계획		- 효율적인 과업수행 및 성과물의 품질제고를 현장조사방안 및 계획을 제시하고, 활용 가능한 현지 및 국내 기관과의 협업내용 등 기술
3. 수원국 소통계획
가. 현지상주 계획		- 상주 제안인력의 경험 및 역량, 주요 수행업무 등 현지 활동계획, 상주 일정
나. 수원국과의 협의 채널 구축 방안		- 사업실시기관 의사결정 체계, 이해당사자 간(수은, 컨설턴트, 사업실시기관, 사업 수혜자, 영향주민 등) 협의채널 구성 및 정기/비정기 활동계획 등
4. 현지 협력사 활용계획		- 자료수집, 현장조사, 시설기본계획 수립, 사업비 산출 등을 위한 현지 협력사 참여의 필요성 - 구체적인 수행업무 및 협력사 관리 및 활용방안 - 현지 인력(local staffs) 운용계획 - 해당 기관의 경험, 보유인력 및 수행능력 등 기술
5. 기후변화영향 대응체계 적용계획		- 기후위험평가, 기후위험경감계획 및 성과측정방안 수립 등
6. 위험요소 분석 및 대책		- 과업수행 중 발생 가능한 위험요소 분석 및 해결방안 제시
7. F/S 관리방안		- 수행 일정, 인력, 위험, 보안, 각종 보고서 및 성과물 등 관리방안 제시 - 각종 보고 계획(당행, 수원국 사업실시기관 등) - 수원기관 기술자 또는 현지 업체 기술자에 대한 우리나라 기술홍보 - F/S 관련 자료에 대한 품질 및 하자 보증 방안 - 보안 준수 방안 등
8. 영·러문보고서 작성계획
가. 영·러문보고서 전문인력 활용계획		- 각 분야별 참여인력을 활용한 단계별 영문보고서 작성방안 등을 영·러문으로 작성
나. 영·러문보고서 감수계획		- 성과물의 번역 및 검수절차, 단계별 일정 및 번역품질(해당 섹터 및 개발협력 분야 전문용어 적정성 포함) 제고를 위한 감수계획 등을 영·러문으로 작성
9. 영문보고서 전문인력		- 통번역 전문가의 자격 및 경력, 통번역 전문가 활용계획 등 기술
Ⅲ. 조직‧인력 현황 및 운용계획
1. 인력운용계획
가. 과업수행조직	- 참여 조직도 및 전문가 투입계획 (경제/재무분석, 기후변화, 통번역 분야 참여기술자는 타 기관의 외부전문가 활용 가능함)		서식 7
나. 업무분담계획
다. 현지 및 국내 인력투입 계획	- 분야별, 단계별 과업수행을 위한 국내 및 현지 인력투입 세부 계획(Man-Month 포함) - 현지출장계획 및 상주인력 제시 - 현지 하도급 인력(Local Team Leader 등) 투입 계획 포함
2. 투입인력의 경험 및 능력
가. 유사사업 수행경험	- 본 과업 내용을 명확히 이해하고, 분야별 실제 투입인력의 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요경력, 학위 및 어학 능력 등 과업수행에 필요한 사항 * 별첨서식에 목차 내용 포함되게, 상세하게 기술 - 증빙서류는 별첨(유사사업 수행실적 증빙서류에는 각 유사사업 기재 순서대로 표시 후 번호 부여) - 참여인력의 이력 사항<서식 9>은 PM, 분야별 책임자와 전담참여자, 통번역 전문가, Local Team Leader를 제외한 인력에 대하여는 요약 기재 가능하며, 최근 10년간 유사사업 수행경험 기술		서식 8 서식 9
나. 대상국 경험
다. 주요 경력 및 학위
라. 어학 능력
Ⅳ. 원조 효과성 제고를 위한 독창적인 아이디어 및 방안 등
	- 원조의 효과성 제고 방안, 완공 후 사업의 지속가능성 향상 방안, TOR에 대한 의견/제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적‧독창적 제안/과업수행방안, 사업별 특수사항 등

2) 제안서 첨부물

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
1. 일반현황 및 연혁	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 자본금 및 매출액 (최근 3년 평균치) 등을 정확히 작성	서식 4
2. 조직 및 인력현황	- 제안사의 조직 및 인원 현황 작성	서식 5
3. 회사 유사사업 수행실적	- 제안사의 회사 유사사업 수행실적 (용역구분, 용역명, 개요, 기간, 계약금액, 발주처 등) 작성	서식 6
4. 과업수행 조직 및 업무분장	- 제안사의 실제 투입인력을 기준으로 과업수행 조직 (참여인력, 각사별 업무분장, 투입인력별 투입 Man-Month 등) 작성	서식 7
5. 참여인력의 자격사항 요약	- 참여인력의 자격사항 (분야, 성명, 연령, 기술등급, 중복건수 등) 작성	서식 8
6. 참여인력의 이력사항	- 전체 참여인력에 대해 최근 10년간 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요 경력 및 학위, 어학능력 등 이력사항 제출 ※ 국내 비전담 참여인력은 요약기재 가능(제출은 필수) ※ 각종 증빙서류는 별첨 (유사사업 수행실적 증빙서류에는 각 유사사업 기재 순서대로 표시 후 번호 부여)	서식 9

4. 기술제안서 작성지침

□ 제안서 본문과 첨부물은 합쳐서 양면 제본하여 한 권으로 제출

◦ 제안서 본문(양면 20장 이내, 제목·목차·간지 등 제외) 및 제안서 첨부물(양면 25장 이내)은 합하여 한 권으로 제출

◦ 첨부물은 (별첨)의 제출서류목록 중 「서식 4, 5, 6, 7, 8, 9」를 의미

◦ 제안서 본문 및 첨부물은 ᄒᆞᆫ글(hwp)로 작성하며, 글자크기 본문기준 13포인트, 글꼴 휴먼명조(영문글꼴 Times New Roman), 줄간격 160%, 좌우여백 25mm, 상하여백 각각 20mm, 15mm로 작성

◦ 표 안의 글자크기는 12포인트 사용 가능(단, 서식6, 서식 9, 서식 24는 글자크기의 제한 없음)

◦ A4 용지(백상지, 일반 복사용지) 세로로 작성

- A4로 작성하지 못하는 경우 A3를 A4 사이즈로 접어서 붙이며, 이 경우 2페이지로 간주(A3 최대 6페이지(3장)까지 허용)

□ 각종 증빙서류는 별권으로 제본하여 제출(바인더 등 부피가 큰 도구사용금지)

◦ 사업수행실적 관련 실적증명서는 발주처가 발급한 실적증명서 또는 해외건설협회 등 관련 기관이 발급한 증명서를 의미함.

- 단, 민간거래 실적은 실적증명서를 비롯해 세금계산서 및 계약서 사본(인감으로 원본대조필)을 첨부하여야 함.

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 실적증명서는 서식 6의 유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 용역 종류, 용역기간, 지분금액에 형광펜으로 표시

◦ 해당분야 조직․인력․기술․지식 보유현황 관련 증명서는 관련 협회 또는 기관에서 발급한 경력증명서를 의미함.

- 단, 등록되지 않은 자는 본 제안요청서에 첨부된 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’을 참조하여 제안사의 대표이사가 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서, 발주처 등이 발행한 유사사업 수행증명서 등을 이용하여 평가

- 경력증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 경력증명서는 서식 9의 국내외 유사업무 수행경험 실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 사업명, 분야, 발주자, 담당업무에 형광펜으로 표시

□ 각종 증빙서류는 서류 각 장에 원본대조필(인감 날인)해야 하는 것이 원칙이나, 증빙서류 원본대조필 확인 문서(서류 List 포함)를 제출함으로써 대체 가능

□ 제안서는 과다한 비용이 지출되는 오프셋 인쇄 등 금지(컬러프린터 출력은 가능하나 컬러 인쇄물은 3페이지 이내로 제한하며, A3의 경우에도 1페이지로 간주하고 인쇄용지는 일반 사무용지(A4 : 80g/m2이내, A3 : 75g/m2이내)로 한정)

□ 입찰참가자격 증명서류 및 기타 서류는 서류 형태(낱장)로 제출(제안서 및 증빙서류 등에 포함하여 제본하지 말 것)

5. 가격제안서 작성방법

□ 가격제안서는 조달청 나라장터에 전자입찰서로 제출하며, 제출 시 제안금액에 대한 상세내역(산출내역서 및 산출근거)을 첨부

□ 제안금액은 부가가치세 등 제세를 포함하여 제시(면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함하여 제시)

□ 제안금액 상세내역 산출내역서 작성방법

◦ 직접인건비, 제경비, 기술료, 직접경비를 구분하여 작성하고 세부 산출근거 제시(중도 정산사유 발생시 근거자료)

- 제경비 : 직접인건비의 110% 이내

- 기술료 : (직접인건비 + 제경비)의 30% 이내

- 직접경비 : 출장경비, 자료수집비, 보고서 작성비 등 실경비

별첨 : 제출서류목록 및 관련 서식

(별 첨)

제출서류목록

구   분

제   목

부수

비   고

담당

①

입찰참가

자격증명 서    류

입찰참가신청서

1부

「서식 1」 참조

대표사

입찰 대리인 재직증명서 사본

1부

대표사

조달청 경쟁입찰참가자격 등록증

1부

나라장터 홈페이지

각사

서약서

1부

「서식 2」 참조

각사

입찰보증금 지급각서

1부

「서식 3」 참조

공동

사업자등록증 사본

1부

원본대조필

각사

법인인감증명서

1부

각사

사용인감계

1부

각사

법인등기부등본

1부

각사

국세 및 지방세 완납 증명서

1부

각사

신용평가등급 확인서

1부

원본대조필

각사

②

기술

제안서

기술제안서 본문

8부

USB 메모리 1 Set 별도 제출

(PDF 및 한글(.hwp) 형식)

-

첨

부

물

일반현황 및 연혁

「서식 4」 참조

각사

조직 및 인력 현황

「서식 5」 참조

각사

유사사업 수행실적

「서식 6」 참조

각사

과업수행 조직 및 업무분장

「서식 7」 참조

공동

참여인력의 자격사항(요약)

「서식 8」 참조

공동

참여인력의 이력사항

「서식 9」 참조

공동

③

증빙 서류

경력증명서(관련협회 등 발행)

1부

원본대조필

※기술제안서와

별권으로 제본

-

기술용역이행 실적증명서

1부

④

기타 서류

청렴계약 이행서약서

1부

「서식 12」 참조

각사

독립성 확약서

1부

「서식 13」 참조

각사

정보 비공개 동의서

1부

「서식 14」 참조

각사

개인정보 수집·이용 동의서

1부

「서식 15」 참조

각사

퇴직자 영입현황 확인서

1부

「서식 16」 참조

각사

신규 입찰자 확인서(최근 2년 실적)

1부

「서식 17」 참조

각사

신규 입찰자 확인서(계약실적)

1부

「서식 18」 참조

각사

EDCF 부정당업자 제재(제재중)

1부

「서식 19」 참조

각사

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

1부

「서식 20」 참조

각사

인권보호 서약서

1부

「서식 21」 참조

각사

조세포탈 여부 확인 서약서

1부

「서식 22」 참조

각사

제안서 작성지침 미준수 자가진단표

1부

「서식 23」 참조

공동

정량평가 자가진단표

1부

「서식 24」 참조

※USB에도 저장하여 제출

공동

공동수급표준협정서

(공동이행방식)

1부

기획재정부 ‘계약예규’,

8. 공동계약운용요령 참조

공동

중소기업 확인서(중소벤처기업부 발급)

1부

중소기업인 경우에 제출

각사

장애인기업, 사회적기업, 여성기업, 창업기업 확인서(해당부처 발급 및 확인문서)

1부

해당 기업인 경우에 제출

각사

당행 컨설턴트 Pool 등록 확인자료

1부

EDCF 홈페이지 컨설턴트 정보관리 캡처화면 제출

각사

※ 신청서류 중 사본 제출시에는 “원본대조필”이라고 명기하고, 인감(또는 사용인감)을 날인하여 제출하고, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

※ ④기타서류 중 해당 없는 경우는 ‘해당없음’을 표시하고 제출(임의 누락 금지)

※ 법인인감증명서 및 법인등기부등본은 최근 3개월 이내 발급된 서류 제출

※ ①입찰참가자격 및 ④기타는 서류형태, ②기술제안서 및 ③증빙서류는 책자로 제출

(서식 1)

입 찰 참 가 신 청 서

신

청

인

상호 및 법인명칭

법인등록번호

주            소

전 화  번 호

대     표     자

생 년 월 일

입찰

개요

입찰공고(지명) 번호

-

입 찰  일 자

입  찰  건  명

「사 업 명」F/S 용역

입

찰

보

증

금

납          부

․보증금율 : 25/1,000이상

․보 증 액 : 입찰예정금액의 1,000분의 25이상

․보증금납부방법 : (작성예시) 입찰보증금 지급각서 제출

납 부 면 제 및

지  급  확  약

(작성 예시, 불필요시 삭제 요망)

․본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 은행에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 확약합니다.

입찰참여

대리인․사용인감

본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성 명 :

생년월일 :

본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감          (인)

귀 행의 「사 업 명」F/S 용역 입찰에 참가하고자 귀 행의 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류

2. 기타 공고로서 정한 서류

20  년  월   일

상호 및 법인명칭 :                                                                  신청인 :            (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 2)

서  약  서

회사명:

주  소:

본인은 「사 업 명」F/S 용역에 참가함에 있어 귀 은행이 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .   .    .

상호 및 법인명칭	:

대표자	성         명	:              (인)

생   년   월  일	:

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 3)

입찰보증금 지급각서

입 찰 건 명	: 「사 업 명」 F/S 용역

입 찰 일 자	: 20  .   .   .

입찰예정금액	: 사업예산 이내 (서식 10 및 11에 따름)

입찰 보증금	: 입찰예정금액(또는 입찰예정금액의 지분율 분담분에 해당하는 금액)의 1,000분의 25이상

당사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조에 의한 귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 즉시 현금으로 납부할 것을 확약하며, 이에 각서를 제출합니다.

20  년   월    일

주          소 :

상호 및 법인명칭 :

대    표    자 :             (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조(입찰보증금)

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제3의 규정에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 법 제9조 제3항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

(서식 4)

일반현황 및 연혁(참여사)

회  사  명

대 표 자

사 업 분 야

주       소

사업자등록번호

전화번호

회사설립연도

해당부문 종사기간

재무제표

(최근 3년 평균치)

총자산

자기자본

매출액

당기순이익

주요연혁

일반현황(현지업체)

회  사  명

대 표 자

사 업 분 야

주       소

전 화 번 호

회사설립연도

주요연혁

주요실적

전문역량(전문인력 보유현황 등)

(서식 5)

조직 및 인력 현황

□ 조직도

□ 인력 현황

직무

분야

계

임원/

관리자

PM

영업/

기타

계

(서식 6)

유사사업 수행실적(각 참여사별 작성)

상호 및 법인명칭 : (예, A사)

유 사 사 업 수 행 실 적

No.

구 분

(타당성 조사, 기본설계 등)

용역명

용역개요

용역기간

계약금액

(천원)

발주처

책임 기술자

비 고

(해외)

1

타당성조사

[A1]ㅁㅁㅁ

전체금액

(지분율, 지분금액))

2

타당성조사

1,000,000

(60%, 600,000)

해외

계

00건

총

00건

해외

기본설계

기본설계

해외

계

00건

총

00건

해외

합계

00건

총

00건

해외

※  1. ① 사업수행실적(p.12)에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외

2. 국내 및 해외사업(정부 및 민간 구분) 구분하여 소계를 상단에 기재

3. 발주처 또는 실적증빙기관이 발행한 실적증명서 미첨부시 실적 불인정

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필할 것)도 가능하며, 민간거래 실적은 세금계산서 및 낙찰을 증명할 수 있는 계약서 사본(인감으로 원본대조필) 첨부할 것

- 각 실적증명서는 유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 사업명, 수행기간, 사업내용, 실적금액 등 주요내용은 형광펜으로 표시할 것(실적평가시 형광펜 표시된 부분을 검토할 예정)

- 민간투자사업의 설계를 수행한 실적은 사업시행자 지정공문 사본, 시행허가 및 실시계획 승인 근거서류, 공사금액을 알 수 있는 서류, 사업시행자와 설계용역사 간에 체결한 계약서류 사본, 사업시행자가 확인한 설계완료 증빙자료 등 제출 필요

4. 공동도급에 의한 실적의 경우 계약금액 항목에 총 계약금액 및 지분율 따른 자사 계약 금액만 기재(비고에 지분율도 표시)

5. 다른 통화(원화 이외)로 계약 체결된 해외실적의 경우, 해당 실적 계약일 기준환율(KEB 하나은행 고시 매매기준율) 적용

(서식 7)

과업수행 조직 및 업무분장

국내 참여 조직

사업수행책임자(PM)

성명 (0 MM)

부책임자

성명 (0 MM)

- 전담 (정량평가 대상)

교통

(분책)

교통

(분참)

철도

구조

토질·지반

차량기지

경제성

터널

재원조달

(분책)

재원조달

(분참)

기후변화

사회환경

(A ENG)

(B ENG)

(B ENG)

(A ENG)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

- 비전담 (정성평가 대상, 한국인력, 자율분야)

비용

철도

구조

터널

기계

전기

신호

통신

건축

○○

(A ENG)

(B ENG)

(B ENG)

(A ENG)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

성명

(0 MM)

-

성명

(0 MM)

-

-

-

-

-

-

-

현지 참여 조직

Local Team Leader

성명 (0 MM)

- 비전담 (정성평가 대상)

철도

구조

토질·지반

터널

궤도

차량기지

건축

기계

전기

신호

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

통신

비용

기후변화

Safeguard

통번역

(영-러)

△△

○○

□□

△△

○○

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

(회사명)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

성명

(0 MM)

참고) 1. 위의 그림과 동일하게 단위업무별로 세분화하여 작성

- PM, 교통(분책), 철도 분야 인력은 반드시 대표사소속

2. JV 구성시 대표사 포함 최대 4개사까지로 제한됨(현지하도급은 제외, 3개사 이내 권고)

- 단, 부책임자, 경제, 재원조달, 기후변화 인력은 외부기관 인력 제시 가능

- 재원조달방안,경제 인력은 교통관련 사업 재무성분석 경험자 및 회계사 자격을 보유한자, 법인 또는 법인소속 으로 제시 必

3. 참여자별 참여기간(M/M) 명시

4. 현지상주 관련하여, 지반조사/측량 기간중 토질지반 또는 구조/터널 등 관련분야 인력이 필수로 상주해야 하며, 필요시 주요분야 인력과 분할 상주
- 주요분야 외 타인력 상주사유 있을시 당행 승인 하에 예외적용

5. PM은 영어 구사능력이 우수한 자를 지정

6. 현지하도급  보란색음영 ‘      ’ 부분 분야는 필수 제안

(서식 8)

참여인력의 자격사항(예시)

구분

분야별

성명

참여직위

(분책 or 참여)

연령

(세)

기술

등급

최종

학력

자격증

담당

업무

비고 (중복건수)

전담 참여

PM

-

부PM

-

교통계획

분책

참여

철도

분책

토  목

(구조)

분책

토  목

(토질/지반)

분책

차량기지

분책

경제성

참여

터널

참여

재원조달

분책

참여

기후변화

분책

사회환경

분책

비전담 참여

철도

-

(분야 1)

-

(분야 2)

-

...

Local

하도급

참여

Team Leader

-

(분야 1)

-

...

(참고)

1. 서식 7 과업수행조직 및 업무분장에 명시된 국내인력(PM + 부PM + 전담 12인 총14인)(정량평가)과, 현지인력(Local Team Leader + 필수분야 15인 총 16인)(정성평가)은 과업에 필수참여, 추가 분야 또는 추가 인력은 비전담으로만 제안(최대 10인 이내) 가능

2. 작성기준일 : 입찰공고일 현재

3. 기술등급 : 본 제안요청서 첨부 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’ (“외부전문가 고용기준” (별표 3) 용역대가 지급기준 및 방법참조)에 따라 기술자별 기술등급 및 해당 사유 간략 기재

(예) 기술사(건축사), 특급기술자(석사 10년), 고급기술자(석사 6년) 등

4. 각종 증빙서류(PQ 확인서, 경력증명서 등)는 별도 제출 (통번역 전문가 필수 제출서류 포함)

5. 사업수행책임자(PM), 부PM 및 분야책임자는 제안서 제출일 현재 참여 중 또는 참여 예정 중복참여건수를 비고에 명기해야 함 (정성평가 ‘인력운용계획’에서 평가 예정 및 PM 대면평가시 업무중복에 대한 질의 가능)

(서식 9)

참여인력의 이력사항

성    명

(국문)

생 년 월 일

(사진첨부 필수)

(영문)

(한문)

직장주소

자택주소

연락처

전화 :                  / 휴대전화 :

e-mail :

학    력

학    교    명

학 과(전 공)

졸업일

논   문   명

고등학교

학사과정

석사과정

박사과정

직장경력

회   사   명 (기 관 명)

근 무 기 간

직    위

담   당   업   무

00.0.~00.0.

(0년0개월)

총 근무기간

년  개월

자 격 증

자   격   증   명

취  득  년  월  일

발   행   기   관

외

국

어

구    분

읽    기

쓰    기

말 하 기

A : Native speaker와 같이 자유로운

구사 (통역자격 수준)

B : 일상생활은 물론 전문적 내용에 대해서도 구사가능

C : 일상생활에 지장 없음

D : 사전이 있으면 의사소통가능

유사업무

수행경험

No.

사 업 명 (조사명)

대상국

분야

기   간

발주자명

담당

업무

00.0.~00.0.

(0년0개월)

해외근무

경력 또는

출장경력

No.

업 무 명

국 명

기 간

담  당   업  무

참고사항

※ 발주자의 평가기준에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외

- 국내 비전담 참여인력에 대해서는 요약기재 가능(제출은 필수)

※ 유사업무 수행경험은 p.15 ‘유사사업 인정범위’ 표에 따라 제안한 담당분야 업무에 해당하는 실적만 기재(담당 업무와 관련 없는 실적은 평가대상에서 제외)하며, 이력서 ‘분야’란에 담당했던 업무 분야 기재(본 F/S에 제안된 분야와 유사사업 수행실적 업무 분야가 일치해야 실적으로 인정됨)

※ 발주처 또는 실적증빙기관이 발행한 유사사업 실적증명서 별도 제출(제안서의 유사사업 수행경험 기재 순번과 동일한 번호의 견출지 부착 및 사업명, 수행기간, 사업내용, 실적금액 등 주요사항이 식별 가능하도록 형광펜으로 표시할 것, 실적평가 시 형광펜 표시된 부분을 검토할 예정)

※ 이력사항에 미기재된 유사사업 수행경험은 실적증빙을 제출하여도 실적으로 불인정

※ 유사업무 수행경험 작성시 발주기관명과 함께 발주처 담당자 및 연락처를 같이 기재할 것(단, 발주처 발급 실적증명서를 제출한 사업은 기재 생략 가능)

(서식 10)

용역비 산출내역서

1. 사 업 명 :「사 업 명」F/S 용역

2. 입찰일자 : 20  년   월   일

○ 용역비 산출내역서

(단위 : 원)

연 번

항      목

금                액

1

직접 인건비

2

제  경  비

3

기  술  료

4

직접 경비

국 외 여 비

현 지 상 주

현지조사비

(컨설팅)

현지조사비

(측량 및 지반조사)

<항목별 기입>

...

보고서 작성

자문위원회

소   계

5

손해배상공제

6

부가가치세(  %)

합   계

※ 각 항목별 세부 산출근거 첨부(현장조사 항목별 금액 분리 기재)

※ 제경비 : 직접인건비의 110% 이내, 기술료 : (직접인건비+제경비)의 30% 이내

주  소 :

상  호 :

대표자 :           (인)

(서식 11)

용역비 세부 산출근거

○ 사업 용역비 세부 산출근거(예시)

(단위 : 원)

구       분

합   계

산     출    근    거

합       계

1. 직접인건비

계

기술사

특급

고급

(...)

2. 제경비

계

직접인건비의 110% 이내

3. 기술료

계

(직접인건비+제경비)의 30% 이내

4.

직

접

경

비

계

국외여비

소계

항공료

00회×항공료

체재비

출장 : 00일×00회×일체재비

상주 : 00일×일체재비

(...)

현지조사비

소계

보고서작성

소계

인쇄비

00부×000장×단가

번역비

000장×단가

교열비

000장×단가

(...)

자문위원회

2회×00인×단가

<항목별 기입>

소계

<항목별 기입>

소계

5. 엔지니어링 손해배상공제료

6. 부가가치세

(서식 12)

청렴계약 이행서약서(계약상대자용)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하고자 한국수출입은행(이하 “귀행”이라 한다)에서 시행하는 모든 공사, 용역, 물품구매 등과 관련하여 당사 임직원과 대리인(이하 “임직원 등”이라 한다)은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에서 특정인의 낙찰을 위하여 담합하거나 입찰가격협정을 한 것이 사실로 드러날 경우 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참가하지 않겠으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 귀행이 공정거래위원회에 신고하여 과징금 등이 부과되더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익(이하 “뇌물 등”이라 한다)을 제공하지 않겠으며 이를 위반하였을 때는 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참여하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 귀행이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하고 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사 임직원 등이 관계 임직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에게 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 하도급자가 뇌물 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 때에는 그러한 행위에 당사의 책임이 없는 경우라 하더라도 귀행의 지시에 따라 하도급계약을 해제 또는 해지하도록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며 당사가 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 귀행의 조치와 관련하여 당사는 귀행을 상대로 손해배상 청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 13)

독립성 확약서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역을 수행함에 있어 관계 법규의 위반이 없이 용역수행을 위한 독립성을 확보하였음을 확약합니다.

20  년    월    일

상  호(법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 14)

정보 비공개 동의서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제 3자에게 일체 누설하지 않겠으며, 제안서에 명시한 보안방침 및 귀행의 보안정책을 철저히 이행할 것을 확약합니다.

20  년    월    일

상 호 (법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 15-1) 대표사

입찰평가를 위한 개인정보 수집·이용 동의서

한국수출입은행은「사 업 명」F/S(타당성조사) 용역 입찰평가를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 하는 바,「개인정보보호법」등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집·이용 동의

[개인정보 수집‧이용 목적]

○ 입찰절차의 진행 및 업체선정 과정에서 필요한 정보 확인 등

[수집‧이용하는 개인정보의 항목]

○ 제안업체 대표자 성명, 생년월일, 성별, 주소

○ 입찰참가 신청 제출 대리인의 성명, 생년월일, 전화번호, 이메일, 소속/직책, 재직기간

(대표자 및 대리인의 개인정보 외 참여인력의 개인정보는 제안업체에서 자체적으로 ‘개인정보 제3자 제공 동의’를 받아 한국수출입은행 앞 제공하는 정보임.)

[개인정보 보유 및 이용 기간]

○ 본 동의서가 작성된 때로부터 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간(5년)까지

[동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익]

○ 위 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나 동의하지 않은 경우, 본 입찰의 계약체결 대상에서 제외함.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                (동의하지 않음 ☐  동의함 ☐)

20   년

월

일

성명 :

(서명)

한국수출입은행 귀중

(서식 15-2) 참여사

입찰평가를 위한 개인정보 수집·이용 동의서

한국수출입은행은「사 업 명」F/S(타당성조사) 용역 입찰평가를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 하는 바,「개인정보보호법」등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집·이용 동의

[개인정보 수집‧이용 목적]

○ 입찰절차의 진행 및 업체선정 과정에서 필요한 정보 확인 등

[수집‧이용하는 개인정보의 항목]

○ 제안업체 대표자 성명, 생년월일, 성별, 주소

[개인정보 보유 및 이용 기간]

○ 본 동의서가 작성된 때로부터 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간(5년)까지

[동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익]

○ 위 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나 동의하지 않은 경우, 본 입찰의 계약체결 대상에서 제외함.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                (동의하지 않음 ☐  동의함 ☐)

20   년

월

일

성명 :

(서명)

한국수출입은행 귀중

(서식 16)

퇴직자 영입현황 확인서

- 공고번호 :

- 입찰(계약)건명 :

1. 상기 입찰(계약)건과 관련하여 당사는 한국수출입은행의 퇴직자* 영입 근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

성   명

고용일자

담당업무

* 한국수출입은행 퇴직 후 2년이 경과하지 않고 고용한 경우만 해당

2. 한국수출입은행의 퇴직자를 영입한 경우에는 귀행의 내규에 따라 계약의 상대방 자격을 제한하는 은행의 규정을 따르겠습니다.

본건 입찰 또는 계약을 수행함에 있어 상기의 사항을 준수할 것을 확약하며, 만일 상기 신고사항과 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 17)

신규 입찰자 확인서

(최근 2년 이내 EDCF F/S 계약실적이 없는 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 과거 EDCF F/S 수주실적이 있으나 아래표와 같이 입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

□ 미해당

입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

◦ 가장 최근 EDCF F/S 계약건명 및 해당건 계약 연월일

(가장 최근 건부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

가장 최근 EDCF F/S 계약건명

계약 연월일

비 고

1

2

3

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 18)

신규 입찰자 확인서

(신규입찰자용 - EDCF F/S 계약실적 전무)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

한편, EDCF 사업타당성조사(F/S) 입찰에는 참여하였으나, 계약자로 선정되지 않은 건은 아래표와 같습니다.

□ 미해당

입찰공고일자 기준 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

◦ 가장 최근 EDCF F/S 입찰 참여건 기재

(가장 최근 건부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

가장 최근 EDCF F/S 입찰 참여건명

계약 연월일

비 고

1

2

3

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 19)

EDCF 부정당업자 제재 확인서

(입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재 중인 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, 아래 표와 같이 EDCF 부정당업자 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받고있는 입찰자임을 알려드리며, 그에 따라 평가기준에 의거 본건 입찰에 불이익이 존재함을 인지하고 있습니다.

□ 미해당

입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재가 아닌 경우

◦ 입찰공고일자 기준, EDCF 제재 또는 MDB 상호제재 진행 사항

(가장 최근 건부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

제재 발생 사업명

제재 기간

제재 처분일

제재 사유

1

2

3

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 20)

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

당사는 금번 EDCF F/S 용역업무를 수주할 경우

1. EDCF F/S 용역 수행 완료 후 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 평가되는 것을 충분히 숙지하고 있습니다.

2. 또한, 사후적으로 (고의 또는 중과실 등의 사유로) F/S가 부실로 확인되는 경우 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 재평가될 수 있음을 충분히 숙지하고 있습니다.

3. 상기 평가 및 재평가 결과는 평가 후 2년간 당사가 다른 F/S 용역 입찰 참여시 귀행의 F/S 제안서 기술평가에서 가감점(건별 ±2점 이내, 누계 ±4점 이내)으로 반영·활용됨을 충분히 이해하고 이에 동의합니다.

귀행의 F/S 용역 평가 및 타 F/S 용역 입찰자 심사시 평가결과 활용  (가감점 적용) 등의 조치와 관련하여 당사가 귀행을 상대로 손해배상을   청구하거나 민‧형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .   .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 사업협력부장 귀하

(서식 21)

인권보호 서약서(계약상대자용)

당사는 한국수출입은행의 인권경영 관련 원칙과 정책에 적극 호응하고자,         (계약명)      계약 참여에 있어 아래와 같이 인권의 존중·증진을 다짐합니다.

1. 우리는 인권에 대한 UN의 세계인권선언 등 국제기준 및 규범을 지지하고 준수한다.

2. 우리는 모든 경영활동에서 인권침해를 사전에 예방하며, 적극적인 구제를 위해 노력한다.

3. 우리는 고용에 있어 성별, 연령, 인종, 장애, 종교, 정치적 성향과 출신지역 등에 따른 일체의 차별을 금지하며 다양성을 존중한다.

4. 우리는 결사 및 단체교섭의 자유를 보장한다.

5. 우리는 아동노동, 강제노동을 금지하며 보건, 안전, 근무시간 등과 관련하여 국제노동기구(ILO)가 권고하고 국가가 비준한 모든 노동원칙을 준수한다.

6. 우리는 협력사 등 공급망과 상생 발전을 위해 노력하며, 인권경영을 실천할 수 있도록 지원하고 협력한다.

7. 우리는 지역사회에서 지역주민의 인권이 침해되지 않도록 유의한다.

8. 우리는 국내외 환경관련 법규를 준수하고, 환경보호 및 오염방지와 기후변화 위기 대응을 위해 노력한다.

9. 우리는 고객의 만족과 개인정보 보호를 위해 노력한다.

10. 인권과 관련된 부정적 영향이 발생한 경우, 이를 시정하기 위해 적극 노력한다.

위 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 이를 지키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.                  2024.    .    .

서약자(회사대표자):               (인)

한국수출입은행장 귀하

(서식 22)

조세포탈 여부 확인 서약서

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조의5 및
같은 법 시행령 제12조 제5항에 따른 서약서

당사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 제1항에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각 호의 사유로 유죄 판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 경우에는 계약을 해제ㆍ해지하는 등 불이익을 감수하겠으며, 같은 법 시행령 제76조 제2항 제1호 가목에 따라서 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.

1. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억 원 이상인 자

2. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 감면받거나 면탈하거나 환급받은 세액이 5억 원 이상인 자

3. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억 원 이상인 자

4. 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조 제1항에 따른 금액을 초과하는 자

5. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조 제1항 제3호에 해당하는 자

20  .   .   .

서약자(회사대표자) :          (인)

한국수출입은행장 귀하

(서식 23)

제안서 작성지침 미준수 여부 자가진단표

확인 항목

자가진단 체크

예

아니오

□ 제안서 본문 또는 첨부물 작성 페이지 수 위반(페이지당 0.25점 감점)

* 위반 페이지가 4페이지를 초과하는 경우 결격 처리

□ A3용지 페이지수 제한 위반(페이지당 0.25점 감점)

* 위반 페이지가 4페이지를 초과하는 경우 결격 처리

□ 컬러인쇄물 페이지수 제한 위반(페이지당 0.25점 감점)

* 위반 페이지가 4페이지를 초과하는 경우 결격 처리

□ 제안서상 자체 자문위원 명단 기재(0.25점 감점)

□ 과다한 비용이 지출되는 인쇄물(오프셋 인쇄 등) 제출 또는 인쇄용지 규격 위반(0.25점 감점)

□ 제안서 목차상 작성항목 또는 작성내용 누락(0.25점 감점)

* 제안서 본문 및 첨부물 모두 해당

□ 제안서 목차상 기재순서 위반(0.25점 감점)

* 제안서 본문 및 첨부물 모두 해당

□ 제안서 서식 위반(0.25점 감점)

* 제안요청서에 수록된 서식 1 ~ 22 기준

□ 제안서 내 페이지번호 누락(0.25점 감점)

* 제안서 본문 및 첨부물 모두 해당

□ 기타 입찰제안서에 명시된 제안서 작성지침 위반(건별 0.1점 감점)

- 각종 증명서의 유효기간 경과 또는 요구한 기한 이전 발행

- 실적평가 관련 평가대상과 무관한 실적 제출 또는 요구서류가 제출되지 않은 경우

- 참여인력의 타사업 중복 참여여부 미기재

- 제안요청서에서 허용하지 않은 분야의 외부전문가 제안

- 출장횟수 및 상주기간 등 요구된 인력투입계획 위반

- 전담 및 비전담 참여자수 초과 등

감점 합계(최대 2.0점 한도)

* 제안서 접수당시 위반사항이 확인되는 경우, 마감시한 이내에서 위반사항 보완 후 제출(예, 페이지수 초과시 본문 및 첨부물 일부 제거 후 제출) 가능

* 제안서 접수 이후 평가과정 중 확인된 위반사항은 항목별 감점기준에 따라 처리됨.

년   월   일

작성기관 :        , 작성자 직함 :     , 작성자 성명:           (인)

(서식 24)

정량평가 자가진단표

별도 엑셀파일 송부
(작성 후 Soft-file로 제출)

(참고 1)

참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표

참여업체수

A등급

B등급

C등급

D등급

E등급

계

1

-

-

-

-

-

(절대평가)

2

1

1

0

0

0

2

3

1

1

1

0

0

3

4

1

2

1

0

0

4

5

1

3

1

0

0

5

6

2

2

1

1

0

6

7

2

3

1

1

0

7

8

2

3

2

1

0

8

9

2

4

2

1

0

9

10

2

4

3

1

0

10

11

2

5

3

1

0

11

12

2

5

3

2

0

12

13

2

6

3

2

0

13

14

3

6

3

2

0

14

15

3

6

3

2

1

15

16

3

6

4

2

1

16

17

3

6

4

3

1

17

18

4

6

4

3

1

18

19

4

6

5

3

1

19

20

4

6

5

4

1

20

(참고 2)

참여인력의 등급 및 자격기준

기준

구분

기술자격 및 경험기준

학력 및 경험기준

기  술  사

․ 기술사/건축사

-

특급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 13년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

고급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 박사학위를 가진 자

․ 석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

중급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 4년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

초급기술자

․ 기사자격을 가진 자

․ 산업기사자격을 가진 자

․ 석사학위를 가진 자

․ 학사학위를 가진 자

․ 전문대학을 졸업한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

(안내사항)

가격입찰서에 엔지니어링 손해배상공제 보험금액 반영 必

(안내사항)

가격입찰서는 당행 앞 미제출

반드시 가격산출근거서를 첨부하여 나라장터에 업로드

가격입찰서에 엔지니어링 손해배상공제 보험금액 반영 必

(안내사항)

1. 공동이행방식

: 공동수급체 구성원이 일정 출자비율에 따라 연대하여 공동으로 계약을 이행하는 공동계약

2. 구성원 수 및 최소지분율

- 5개 이하의 업체 또는 기관

- 기관별 최소지분율 10% 이상

(업체 앞 안내사항)

사업부 요청에 따라, 기존대비 수원국 소통계획, 현지 협력사 활용계획 배점 상향 및 부사업수행책임자 배점

항목 신설 확인하여, 제안서 제출

(업체 앞 안내사항)

현지 업체를 활용한 현장 조사방안 등 상세 기재

(적격한 현지 업체 선정, 현지 업체 유사실적 보유, 현지 하도급 과업지시 및 성과품 관리방안 등)

(업체 앞 안내사항)

‘MDB 유사사업 경험’은 보유 시 이력서에 명시하고 개인 참여를 증명할 수 있는 자료는 필요 시 별도 제출바람

(업체 앞 안내사항)

실적증명서 외에 충족요건 증명 할수 있는 추가자료 제출 필요

(예, 보고서 목차, 발췌본 등)

(업체 앞 안내사항)

기업에서 제안하는 형태의 F/S, M/P 등이 해당

(업체 앞 안내사항)

금액기준이며, 실적사업의 규모(시설용량 등)와는 상관없음

(업체 앞 안내사항)

(업체 앞 안내사항)

해당 확인서 미제출 실적은 인정 하지 않음(경력사항 확인서, 경력증명서 둘 다 제출)

(업체 앞 안내사항)

은행에서 요구하는 과업범위(안)로 향후 보고서 목차는 이를 바탕으로 하되, F/S 수행기관과 당행, 수원국간 협의를 통해 목차 수정 또는 보완 가능

(업체 앞 안내사항)

본건 과업은 기본적으로 영어로 수행하며(중간보고 및 최종 보고 영어로 수행), 수원국 내부 F/S 승인을 위하여 과업 전기간 러시아어 전문가 활용 필요

(업체 앞 안내사항)

- 중간보고서 제출 전까지 시행 후 결과물 별도 제출

- 현장조사 계획을 제안서에 명시

- 현지 하도급 예정시 대상 후보업체, TOR 배포 및 견적 접수일정, 수행 및 보고서 작성일정을 포함하고(일정 수립시 현지 기후 제약사항 반영 필요), 현장 관리감독 등을 통한 현지 하도급 업체 품질관리방안 기재 필요.

→ 입찰사 상주인력/ 출장일정과 연계

- 하도급업체가 이미 확정된 경우, 해당업체의 개요(업력, 직원수 등), 유사과업 수행사례, 장비 보유현황 등 기술

(업체 앞 안내사항)

수출입은행 담당자와 해당내용 쓰기전 내용에 대한 협의 필요

(사업부 수정사항) 성과관리프레임워크 설정기준 개정(안) 반영

(업체 앞 안내사항)

‘24년 기준 우즈베키스탄은 해당사항 없음

(업체 앞 안내사항)

연수 제외 후 현지 보고회 3회로 증가(착수, 중간, 최종)

(안내사항)

- 사업관리능력 및 사업이해도 부족, 참여도 저조 등은 PM 교체 사유*에 해당함

* 업무 전가, 현지출장 및 주요 보고회 미참석, 타용역 중복 참여 등으로 과업참여 저조 등

(업체 앞 안내사항)

제안서 인력투입계획에 필수 반영

(업체 앞 안내사항)

제안서 인력투입계획에 필수 반영

(업체 앞 안내사항)

기후대응 관련 과업 포함에 따른 조치

4. F/S과업범위 참고

------------

-현지 하도급 예정시 상세작성

-대상업체, TOR배포 및 견적접수일정, 수행 및 보고서 작성일정을 포함하고(일정 수립시 현지 기후 제약사항 반영)

-현지 팀리더와 설계업체 그리고 현장조사 하도급업체의 Role& Responsibility 명시

-현장 관리감독 등을 통한 현지 하도급 업체 품질관리방안 기재 >>입찰사 상주인력/출장일정과 연계

-하도급업체가 이미 확정되어 있는 경우, 해당업체의 개요(업력, 직원수 등), 유사과업 수행사례, 장비 보유현황 등 기술

------------

-현지 세무법인 하도급을 통한 세금체계 조사 계획 포함

(안내사항)

① 및 ④는 제본하지 말고,

각각 낱장 형태로 제출할 것

(안내사항)

Part1. 회사 및 개인의 기술용역이행 실적증명서는 각 사별로 앞부분에 모두 첨부한 후,

A회사실적 : A1~A10

A소속 개인실적 : A11~A20

B회사실적 : B1~B10

B소속 개인실적 : B11~B20)

Part2. 개인별 ‘PQ서류/분야별참여기술인명단/건설기술인 경력증명서’는 해당항목 우측에 Part1의 실적번호(ex,A5~A14)를 기재하고, 주요사항 하이라이트 기재

(안내사항)

해당 업체 대표가 입찰을 위해서 소속직원들 정보를 취합하여 제출하는 것으로 간주하여,

각사 대표자 및 입찰서 제출 대리인 정보만 수집

(안내사항)

간지 없이 순서대로 제출

대표사의 대표자를 의미함

공동도급의 경우,

1) 대표사가 전체에 대하여 지급각서를 제출, 또는

2) 각 참여사가 날인하여 제출 가능

참여사별로 작성

(안내사항)

F/S사가 제안하는 현지업체별로 작성하고, 제시된 항목은 예시로서 내용은 자유롭게 기술

참여사별로 작성

(안내사항)

본 서식6 용역명 앞에 사업번호 [A1], [A2] 등을 기재하고,

해당 실적증빙서류(발주처 발행, 해건협 등)에 동일번호[A1], [A2] 견출지 부착

(안내사항)

실적증명서상 기재되어 있는 용역사별 계약금액(지분율 고려)과 일치 필요

(업체 앞 안내사항)

경력 및 실적 정량평가 대상

(업체 앞 안내사항)

경력 및 실적 정성평가 대상

-유사사업 수행실적 및 증빙서류 제출

표에 제시된 분야는 예시이며, 입찰참여업체가 재구성 가능

하도급 필수 참여 분야(pg00)참고하여, 조직 구성 제안 요청

(업체 앞 안내사항)

정성평가 대상(참여자 간주)

-이력서 첨부 必

(실적증명서 첨부는 선택사항)

-중복입찰 가능

(업체 앞 안내사항)

계획된 기간 중, 참여 예정인 모든 용역(당행 발주 포함 모든 용역) 건수에 대해 명기

(업체 앞 안내사항)

평가기준보다 실적건수는 여유있게 기재 권장(예, 10건이 만점 기준에 해당하더라도 10건 이상 기재)

(업체 앞 안내사항)

국내에서 수행한 해외사업 수행실적이 아닌,

‘해외상주’ ‘장기출장’ 또는 ‘해외연수’ 등 경력만 기재

(필요시 출입국증명원 등 증빙자료 추가 요청)

(업체 앞 안내사항)

인쇄비 등

(업체 앞 안내사항)

최소한 당행에서 요구한

2회 * 3인 비용을 포함한 금액

(업체 앞 안내사항)

대표사(주관사) 작성 서식

(업체 앞 안내사항)

대표사만 해당되는 내용

(업체 앞 안내사항)

참여사 작성 서식(각 참여사별로 작성)

(업체 앞 안내사항)

i) 해당사항 없을시,

“해당사항 없음”으로 기재 후 제출

ii) 해당사항 있을시,

퇴직자의 업무가 계약/입찰과 무관함을 증빙할 수 있는 서류 제출 필요

ex) 조직도 및 개인업무분장 등

(업체 앞 안내사항)

2년내 실적이 없는 경우는, 2년 이상 경과한 실적을 최근순으로 기재

(업체 앞 안내사항)

작성후 soft-file(엑셀파일) 또한 USB에 수록하여 제출