「탄자니아 잔지바르 MICE 건립사업」

타당성조사(F/S) 용역을 위한

제 안 요 청 서 (RFP)

(재공고)

2025. 8.

－ 목   차 －

Ⅰ. 제안 안내

1. 용역 개요

2. 사업 추진 일정

Ⅱ. 제안 일반사항

1. 입찰 및 계약 방법

2. 입찰공고

3. 입찰 참가자격

4. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

5. 입찰시 유의사항

6. 제안서 평가방법

7. 협상대상자 선정 및 협상 절차

8. 최종낙찰자 유의사항

9. 기타사항

10. 용역결과 평가/활용

Ⅲ. 대상사업 개요 및 용역 과업범위

1. 당행 발주 용역 추진배경 및 목적

2. 본 사업 추진배경

3. 용역 대상 사업개요

4. 용역 과업범위

5. 과업 수행방법

6. 성과품 납품 및 보고서 관련 사항

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

2. 제안서 목차

3. 항목별 작성방법

4. 제안서 작성지침

5. 가격제안서 작성방법

[별첨] : 제출서류 목록 및 관련 서식

Ⅰ. 제안 안내

용역개요

□ 과 업 명 : 「탄자니아 잔지바르 MICE 건립사업」타당성조사(F/S) 용역

□ 과업기간 : 착수일로부터 8개월

□ 사업예산 : 1,048,000,000.-원(부가세, 손해배상보험공제료 포함)

사업 추진 일정

입찰의향을 비대면으로 표명하여 입찰참여 의향 표시

재공고 입찰로서 입찰설명회는 생략

입찰참여 의향자는 아래와 같이 사업자등록증 사본을 제출

- 제출기한 : 2025. 9. 5.(금), 18:00시

- 제출방식 : E-mail (제목: [용역사명] ‘입찰건명’ 참여의향 확인‘)

- 담당자 : 조경래 책임심사역(☎ 02-6255-5092, whrudfo4@koreaexim.go.kr)

김민재 심사역(☎ 02-3779-6792, mj.kim4023@koreaexim.go.kr)

제출기한 내 사업자등록증 사본을 제출한 입찰참여 의향자 앞 i) 정량평가 자가진단 Excel 파일 및 ii) 제안서 작성시 유의사항을 e-mail로 송부 예정

※ 제출기한 내 사업자등록증 사본 제출 여부는 입찰 자격과 무관

기술제안서 제출 (직접 방문접수 必)

제출기한 : 2025. 9. 24.(수) 17:00시 (★★가격입찰 마감일 하루 전까지 제출★★)

제출장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비 (고객접견실)

제출서류 : 입찰참가신청서 및 관련 서류 (붙임 참조)

가격입찰

입찰기간 : 2025. 9. 18.(목) 10:00시 ~ 2025. 9. 25.(목) 17:00시

입찰장소 : 국가종합전자조달시스템(조달청 나라장터)

가격입찰 시 가격산출근거서 파일(서식 10 및 11)을 첨부

개찰일시 : 제안서 기술평가 후 개찰

면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함한 금액으로 제출

※ 본 입찰의 가격입찰은 전자입찰로만 가능하며, 가격입찰서와 기술제안서 중 어느 하나라도 미제출 시에는 입찰 무효처리됨(가격입찰서와 제안서는 순서에 상관없이 제출 가능)

※ 입찰 참가자는 총 예산 기준으로 가격을 투찰해야 함.

Ⅱ. 제안 일반사항

입찰 및 계약 방법

□ 입찰 방법 : 제한경쟁입찰

□ 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약방식

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제43조 및 "협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규 제721호, 2024. 9. 13. 일부개정)”에 의거, “협상에 의한 계약방식”을 적용

입찰공고

□ 공고방법 : 국가종합전자조달시스템(조달청 나라장터)와 당행 홈페이지 공고

□ 공고기간 : “입찰공고”에 의함

입찰 참가자격

□ 공통사항

◦ 입찰마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 유자격자

◦ 입찰마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한 부정당업자에 해당되지 않고,「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의해 입찰참가자격이 제한되지 않는 업체 또는 기관

◦ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(조달청고시 제2024-29호, 2024. 12. 9.)에 의하여 입찰일 전일까지 조달청 경쟁입찰참가자격 등록을 마친 업체 또는 기관

◦ 공동도급이 가능하며, 이 경우 “공동계약운용요령(기획재정부 계약예규 제715호, 2024. 9. 13)”에 명시된 공동이행방식 적용

- 단, 공동도급의 경우 제안요청 설명회 참석, 혹은 입찰 의사를 전달한 업체 또는 기관에 한하여 대표사 자격이 부여되며, 그렇지 않은 업체 또는 기관은 공동도급의 대표사가 아닌 참여사로만 입찰 참여 가능

◦ 입찰등록(제안서 제출) 마감일 기준 당행 컨설턴트 Pool의 ‘토목’, ‘건축’ 분야에 등록된 업체 또는 기관

- Pool 등록방법 : 당행 EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) -「사업(입찰)정보」-「해외원조시장 입찰정보」-「컨설턴트 신청/관리」메뉴 이용

- 공동도급의 경우, 모든 구성원이 당행 Pool에 등록되어 있어야 함

□ 실적 및 역량

◦ 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 다음 중 하나 이상의 유사사업 컨설팅업무* 수행실적 1건 이상 보유 업체 또는 기관

※ 참여사는 아래의 분야별 요구조건을 모두 충족하여야 하며, 요구되는 실적은 공동도급을 통해 보완 가능

[MICE 계획 분야]

◦ MICE 시설 기획(컨벤션센터, 전시장, 복합문화공간 등)

◦ 상업단지 인프라 구축(상업단지, 상업특구 등)

◦ 도시개발 기획(복합도시개발, 신도시개발, 스마트시티 등)

[건축 분야]

◦ 공공 서비스 복합시설 건설(문화센터, 공연장, 컨벤션 복합시설 등)

→ 건축법 시행령 [별표 1] 5. 문화 및 집회시설’에 해당하는 건축물 건설

* 컨설팅업무 : 예비타당성조사, 타당성조사, 기본계획, 실시계획, 기본설계 또는 상세설계 등(단, 단순 기술검토, 심사, 현장 기초조사(측량/지질조사 등), 수량·도면작성 용역, 시공감리, 교육 및 연수, 발전방안 또는 정책 컨설팅, 연구용역, 교통/환경 등 영향평가용역, 마스터플랜 등은 원칙적으로 제외하되, (개념)설계, 사양검토, 물량 및 사업비 산정 등의 세부 과업내용을 포함하는 경우 인정 가능

입찰참가 등록 및 제안서 제출

□ 제출기한 : “입찰공고”에 의함

□ 접수장소 : 한국수출입은행 본점 1층 로비(고객접견실)

□ 구비서류 : “입찰 참가서류” 및 “제안서류” 참조

□ 제출방법 : 참가서류를 구비하여 직접 방문접수(우편접수 불가)
※ 당행 1층 도착 후 아래 담당자 앞 연락

□ 문    의 : 조경래 책임심사역(☎ 02-6255-5092, whrudfo4@koreaexim.go.kr)

김민재 심사역(☎ 02-3779-6792, mj.kim4023@koreaexim.go.kr)

입찰시 유의사항

□ 공동수급체의 대표자가 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 상태인 경우에는 해당 공동수급체의 결격사유로 평가하며(제안서 평가를 종료 후 평가 당시 그 결격사유가 있었던 사실이 확인된 경우이거나 제안서 평가 종료 후부터 계약체결 전까지 결격사유가 발생하고 해소되지 않은 경우에도 같다), 공동수급체 구성원 중 부도, 부정당업자제재, 영업정지, 입찰무효 등의 상태인 자가 있는 경우에는 제안서 평가를 할 수 있다. 이 경우 출자비율 또는 분담비율은 입찰서 제출 마감일 전날까지 확정ㆍ제출된 비율로 하며, 결격사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율을 남은 구성원에게 배분하지 않는다.

◦ 위에 따라 공동수급체를 평가할 경우 결격사유 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율을 전체 사업에 대한 비율로 환산하여 기술능력평가점수에서 환산 비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다. 다만, 제안서 평가를 종료 후 평가당시 그 결격사유가 있었던 사실이 확인된 경우에는 감점처리한 후 재산정한 점수로 평가 절차를 다시 진행한다.

□ 당행 계약관련 내규에 의거하여 계약의 투명성 및 공정성을 위하여 아래 각 호에 해당하는 업체는 계약상대자가 될 수 없음(단, 사업목적 달성을 위한 불가피한 경우는 예외로 함)

당행을 퇴직한 후 2년이 지나지 않은 퇴직자를 고용한 업체로서, 퇴직자가 당행의 입찰 또는 계약과 직접 관련된 업무를 담당하고 있는 업체

당행의 현직 임직원이 설립한 업체

◦ 위에 따라 계약 상대자의 자격이 제한되는 기간은 아래와 같음.

퇴직자가 당행을 퇴직한 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체와의 고용관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

현직 임직원이 당행을 퇴직하는 날로부터 2년이 되는 날 또는 업체에 대한 지배관계가 종료되는 날 중 빠른 날까지

※ 서식 16 「퇴직자 영입현황 확인서」제출

□ 본 입찰은 전자입찰 입찰자 신원확인제도가 적용됨에 따라 공고에 참가하고자 하는 전자입찰자는, “국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정” 제13조 7항에 따라, 동 규정 제2조 제1항 제16호에 따른 개인인증 수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참가하여야 함.

□ 당행이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자는 입찰참가자격이 결격 처리됨

□ 기타 입찰등록 마감일 현재 당행 규정 및 국가계약법상 하자가 있거나, 전국은행연합회의 “신용정보관리규약”에서 정하는 연체, 대위변제･대지급, 부도, 관련인에 의한 신용거래정보 및 금융질서문란정보의 등록대상자, 국세 및 지방세 체납기관 등은 입찰에 참가할 수 없음

□ 국가계약법 제27조, 동법 시행령 제76조에 따른 부정당업자(입찰참가자격 제한) 상태인 자는 동 입찰에 참여 불가

□ 국가계약법 제27조의5 및 동법 시행령 제12조 제3항에 따라 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 동 입찰에 참여 불가

◦ 입찰자는 동법 시행령 제12조 제3항 각 호에 해당하지 아니한다는 서약서를 입찰시 제출하며, 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약의 해제‧해지를 당할 수 있고 부정당업자 입찰참가자격제한처분을 받을 수 있음

□ 입찰보증금의 납부 및 귀속

◦ 입찰보증서의 보증기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제55조(보증보험증권등에 의한 보증금 납부)에 따라 보증기간의 초일은 입찰서 제출마감일 이전이어야 하며, 보증기간의 만료일은 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후 일자이어야 함

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제37조(입찰보증금) 제2항에 따라 입찰보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부해야 하며, 동시행령 제3항에 해당하는 기관은 지급각서(서식 3) 제출로 입찰보증금 면제 가능

◦ 낙찰자가 정당한 사유 없이 소정기일 내에 계약을 체결하지 않을시 입찰보증금은 당행으로 귀속됨

□ 입찰무효

◦「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제11조에서 정한 유효한 입찰이 성립되지 않거나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조 및 동법 시행규칙 제44조, 기획재정부 계약예규 제759호 「용역입찰유의서」 제12조의 규정에 해당하는 입찰은 무효로 함

□ 기타사항

◦ 제안기관은 본 사업에 대한 제반사항을 사전에 충분히 숙지하고 제안에 임한 것으로 간주함

◦ 제안요청서의 내용과 상이하거나 제안요청서에 누락되어 있어도 본 사업의 수행에 필수적인 요건 또는 중요한 내용이라고 판단될 경우 제안자는 제안서에 그 내용을 기술하고 보완 대책 또는 해결방안을 제시하여야 함. 이 경우 구체적인 시행방안을 제시하여야 하며 이에 대한 제반비용은 제안자가 부담함

◦ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

◦ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

◦ 제안서는 허위나 단순 예상으로 작성하여서는 아니 되며, 모든 기재 사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 경우 심사대상에서 제외될 수 있음

◦ 사업자 선정과 관련한 제안요청 설명회(서면 또는 유선 질의응답 포함)에서 논의·답변 및 제안한 내용은 제안서와 동일한 법적 효력을 가짐

◦ 당행의 사전 승인을 득한 기준 소요 인력으로 사업을 시행하여야 하며, 변동이 있을시 필히 사전에 승인을 얻은 후 참여시켜야 함

□ 본 용역에 고용된 업체(관계회사 포함)는 당해 사업의 공급자(Contractor, Construction Contractor) 참여에 제한될 수 있음. 다만, 일괄수주방식의 사업에 컨설턴트로서의 역할만을 수행할 목적으로 참여하는 경우에는 그러하지 아니함

제안서 평가방법

□ 평가위원회 구성

◦ 당행 내규에 따라 평가위원회를 구성

◦ 정량평가는 제안서 및 증빙서류를 기반으로 입찰 담당부서에서 평가

□ 평가분야별 배점

◦ 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하며, 기술ㆍ가격평가 비중은 기술평가(90%) + 입찰가격 평가(10%)임

※ EDCF 사업 특성상 수원국에 대한 경험 및 이해, 해외 현장여건을 고려한 적정 사업계획 수립 및 사업실시기관과의 협의 등 기술능력이 사업수행에 중요한바, 기획재정부 계약예규 ‘협상에 의한 계약체결기준’ 제7조 제2항에 의거, 기술능력평가 배점을 20점 가산 조정하여 기술능력평가 배점을 90점, 입찰가격평가 배점을 10점으로 정함

□ 기술평가

◦ 기술능력평가는 세부항목별로 5등급(A, B, C, D, E)으로 평가하고, 이를 합산하여 제안서별로 점수 산정

◦ 평가등급별 점수

구 분	A	B	C	D	E
점 수	배점의 100%	90%	80%	70%	60%
(예시) 배점 10점	10	9	8	7	6

◦ 정량평가는 유사사업 수행실적, 참여인력의 경력 등에 대해 항목별 정량평가 세부평가기준을 적용

◦ 정성평가는 입찰참여 기관수에 따른 등급배분표(참고 1)를 이용하여 상대평가

- PM 대면평가는 제출한 입찰제안서 각 항목에 대해 사업이해도, 수행계획 등에 관한 질의응답을 실시하여 평가위원들이 절대평가함

- PM 대면평가 항목 중 ‘영어구사능력’ 항목(대면평가 총 10점 중 4점 배정), PM의 영어 Presentation*(별도 PPT 자료 필요) 실시 후 질의응답으로 진행

* 제안서 실행계획 및 용역수행 주안점 발표

□ 입찰제안서 세부평가기준

1) 기술능력평가 세부평가항목 및 배점

구분	평가항목		세부평가항목	배 점	비 고
정량평가	용역수행 실적		용역수행 건수	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
			용역수행 금액	4.0	최근 10년간 유사용역 수행 금액
			해외용역수행 건수	2.0	최근 10년간 해외용역 수행 건수
			소 계	10.0
	참여인력의 경험		PM 자격	1.0	기술자등급 평가
			PM 경력	2.0	해당분야 업무수행 년수
			PM 실적	2.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
			참여기술자 경력	5.0	해당분야 업무수행 년수
			참여기술자 실적	5.0	최근 10년간 유사용역 수행 건수
			소 계	15.0
	재무구조 및 경영상태		신용평가등급	5.0	신용조회사* 또는 신용평가사**가 제안서 접수 마감일 기준 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음), 또는 기업신용평가등급 *「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8항의 3의 업무를 영위하는자 **「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3의 업무를 영위하는 자
	정량평가 소계			30.0
정성 평가	서면평가	사업내용 이해		3.0	사업 대상국 이해, 사업의 목적, 범위, 기대효과, 사업관련 수원국내 개발계획 검토 등
		사업수행계획 (F/S 수행 계획)	F/S 실행계획 및 관리방안	9.0	F/S 추진전략 및 운영계획, 추진일정, 보고계획, 예상 위험요소 분석 및 대응방안, 사후관리, 보안준수 방안 등
			항목별 조사방법 및 현지 협력사 활용계획	9.0	분야별 조사계획 및 방법, 타당성분석 방안, 현지 하도급사 활용 계획
			수원국 소통계획	3.0	현지상주 계획의 적정성 및 수원국과의 협의채널 수립
			기후변화영향 대응체계 적용계획	3.0	기후위험평가, 기후위험경감계획 및 성과측정방안 수립 등
			소 계	24.0
		인력 현황 및 운용 계획	인력운용계획	9.0	참여조직도 및 전문가 투입계획(영문보고서 전문인력 제외)
			투입인력의 경험 및 능력	8.0	유사사업 수행경험, 대상국 경험 등(영문보고서 전문인력 제외)
			영문보고서 전문인력 및 작성계획	3.0	영문통번역 전문가 자격 및 경력1, 2), 영문보고서 작성 및 감수 계획, 세부 영역별 영문보고서 작성 관련 제안사항
			소 계	20.0
		추가 제안		3.0	원조효과성 제고 방안, TOR 관련 의견/제안사항, 사업별 특수사항 관련 추가 제안의 적절성 및 실현 가능성 등
	PM 대면평가		사업이해도	2.0	사업의 목적, 범위, 대상국에 대한 이해 등
			수행역량	2.0	사업 수행역량 등
			위험요소 관리능력	2.0	위험요소 대응 역량 등
			영어구사능력	4.0	영어 Presentation 진행
			소 계	10.0
	정성평가 소계			60.0
기술평가 합계				90.0

주: 1) 자격 및 경력 요건 : (필수) 통번역대학원 졸업자(수료는 미인정, 학위증 제출), (우대) ①3년 이상 번역업무 경험자, ②유관업무분야(개발협력학, 개발경제학, 국제학, 경영, 경제 등) 전공자, ③영어권 대학 학사 이상 학위소유자 및 원어민, ④개발협력 유관기관 근무 경력자, ⑤개발협력 사업 통번역 경력자

2) 상기 필수 자격 요건 미충족시 해당 입찰 참여기관(대표사 및 참여사) 일괄 결격 처리

※ 정량평가 가·감점표

구분	평가항목		세부평가항목	배 점	비 고
정량평가 1)	가점	중소기업		(1.0)	중소기업 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여
		신규 입찰자		(0.5)	EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점 부여
				(1.0)	입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여
		약자 기업2)	장애인기업 및 사회적기업3)	(0.3)	장애인기업, 장애인고용 우수기업 또는 사회적기업 인증을 받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.3점 가점
			여성기업3)	(0.3) (0.5)	존속기간 3년 미만의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.3점 가점 존속기간 3년 이상의 여성기업 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		창업기업2)		(0.5)	창업기업 확인서를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점
		MDB 유사사업 경험		(1.0)	최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 참여실적에 따라 최대 1.0점 가점
	감점	EDCF 부정당업자 제재 (MDB 제재 포함)		(△3.0)	입찰공고일 기준 EDCF 부정당업자로 제재를 받고 있는 입찰자는 지분율에 따라 최대 3.0점 감점
		제안서 작성지침 미준수		(△2.0)	입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 건별 0.25점(최대 2.0점) 감점
	가감점	F/S 용역 평가결과		(4.0~ △4.0)	입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점

※ 단, 가점·감점을 포함한 정량평가 점수는 정량평가 배점한도 이내로 제한

주: 1) 약자기업 및 창업기업 가점은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 중소기업자간 제한경쟁입찰, 지명경쟁입찰, 또는 「소프트웨어 진흥법」에 따라 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 제한되는 경우에 적용

2) 약자기업 세부평가 항목은 중복하여 평가할 수 없으며, 그 중 높은 평점 한 가지만 적용

3) EDCF F/S 용역 평가는 「EDCF F/S 용역 평가업무 매뉴얼」에 따라 실시

2) 항목별 정량평가 기준

① 수행사 사업수행실적(10점)

- 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 다음 중 하나 이상의 유사사업 컨설팅업무* 수행 건수(4점), 금액(4점) 및 해외 용역수행 건수(2점) 평가

※ 참여사는 아래의 분야별 요구조건을 모두 충족하여야 하며, 요구되는 실적은 공동도급을 통해 보완 가능

[MICE 계획 분야]

◦ MICE 시설 기획(컨벤션센터, 전시장, 복합문화공간 등)

◦ 상업단지 인프라 구축 기획(상업단지, 상업특구 등)

◦ 도시개발 기획(복합도시개발, 신도시개발, 스마트시티 등)

[건축 분야]

◦ 공공 서비스 복합시설 건설(문화센터, 공연장, 컨벤션 복합시설 등)

→ 건축법 시행령 [별표 1] 5. 문화 및 집회시설’에 해당하는 건축물 건설

* 컨설팅업무 : 예비타당성조사, 타당성조사, 기본계획, 실시계획, 기본설계 또는 상세설계 등(단, 단순 기술검토, 심사, 현장 기초조사(측량/지질조사 등), 수량·도면작성 용역, 시공감리, 교육 및 연수, 발전방안 또는 정책 컨설팅, 연구용역, 교통/환경 등 영향평가용역, 마스터플랜 등은 원칙적으로 제외하되, (개념)설계, 사양검토, 물량 및 사업비 산정 등의 세부 과업내용을 포함하는 경우 인정 가능

(i) 용역수행 건수
	5건이상			5건미만 ~ 4건이상	4건미만 ~ 3건이상	3건미만 ~ 2건이상	2건미만
	4.0			3.6	3.2	2.8	2.4
(ii) 용역수행 금액*
		15억원이상		15억원미만 ~ 10억원이상	10억원미만 ~ 5억원이상	5억원미만 ~ 2억원이상	2억원미만
		4.0		3.6	3.2	2.8	2.4
		* 공동도급 실적은 참여지분율을 고려한 실계약금액만 평가
(iii) 해외 용역수행 건수**
			2건이상	2건미만 ~ 1.5건이상	1.5건미만 ~ 1건이상	1건미만 ~ 0.2건이상	0.2건미만
			2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
			** 준공건수별 참여지분율을 고려한 해당 용역비에 따라 가중치 부여 - 2억원 이상 : 100% - 1억원 이상 ～ 2억원 미만 : 80% - 5천만원 이상 ～ 1억원 미만 : 60% - 3천만원 이상 ～ 5천만원 미만 : 40% - 3천만원 미만 : 20%

※ 참고사항 (유사사업 수행실적 관련)

[과거 수행실적 산정]

1. 공동도급으로 수행한 실적금액은 참여지분율을 고려한 금액만 인정

- 단, 규모(㎡ 등)는 참여지분율과 관계없음

2. 공동도급으로 수행한 실적건수는 참여지분율을 고려한 건수만 인정

- 단, 해당 업무 분야를 단독으로 수행한 경우 참여지분율*에 관계없이 1건으로 인정. 이 경우, 공동도급 수행실적에 해당 분야의 수행업무(단독수행 or 참여지분율*에 따른 수행업무)를 증빙할 수 있어야 함

* 수행한 실적의 참여지분율(본 사업 참여지분율 아님)

3. 실적증명서 상 과거 실적 금액이 원화가 아닌 다른 통화(USD 등)로 명시되어 있는 경우, 입찰공고일 기준 환율(하나은행 고시 매매기준율) 적용

4. 외부(타 기관)로부터 과업을 수주하여 직접 과업을 수행하고 타 기관 앞 용역 성과를 제공한 실적만 인정

- 내부자체 수행실적 및 발주처로서 사업관리 성격의 수행실적은 인정하지 않음

- 타 기관과의 협약/위탁/대행사업이나 본건 용역 입찰의 공동수급체 구성원을 위해 수행된 실적은 인정되지 않음

- 제출 실적에 대해서는 용역내용 확인이 가능한 발주처가 발급한 실적증명서를 첨부해야 함

5. 복수의 전문 분야가 복합된 실적의 경우는 각 1건으로 평가

- 증명서 등을 통해 복수의 분야가 복합되어 있음을 확인될 수 있어야 하며, 각각의 실적금액만 인정

6. 동일 사업임에도 다년간 수행한 사업(연차계약 포함)의 경우, 단일 실적(1건)으로 실적 인정

7. 해외 용역수행 실적은 준공건수별 참여지분율을 고려한 당해 용역비에 따라 가중치 부여

8. 본 사업 입찰공고일 기준으로 현재 수행 중인 용역은 유사실적에서 제외되나, 전체 용역이 완료되지 않았더라도 유사사업 수행실적 인정기준에 부합하는 실적이 완료된 경우, 이를 증빙할 수 있는 자료를 제출하면 해당 실적은 인정함.

(단, 인정되는 실적금액은 인정기준에 부합하는 실적에 한하며, 분리가 어려울 경우에는 실적건수만 인정)

9. 민간부문 발주실적의 경우 아래의 방법으로 증빙

구분	제출 증빙서류
국내 [(a) 또는 (b)]	⒜ 발주처의 용역이행 실적증명서 및 세금계산서
	⒝ 용역 계약서 및 세금계산서
해외 [(a) 또는 (b)]	⒜ 해외건설협회 등의 실적 증명서 및 용역 계약서
	⒝ 발주처의 용역이행 실적증명서 및 용역 계약서

10. 개별 실적에 대한 인정 여부는 제안서 평가과정에서 결정하므로, 그 이전 답변 불가하며, 본 제안서 요구 실적과 무관한 실적 제출은 감점 대상이 될 수 있는바 유의 필요(서식 21, 제안서 작성지침 위반사항(예시) 자가진단표 참조)

11. 기본 및 실시설계가 함께 포함된 실적의 경우 개별 실적이 아닌 단일 실적(1건)으로 인정

12. 설계․시공 일괄입찰 및 대안입찰, 기본/실시설계 기술제안에 참여하여 낙찰자로 결정된 경우와 ｢사회기반 시설에 대한 민간투자법｣에 의한 사업시행자가 발주한 설계용역을 수행한 경우에는 수행실적으로 인정

- 단, 낙찰자가 아닌 설계보상 대상자로 결정된 경우도 인정하되, 실적 요구조건을 충족하더라도 건수 및 금액에 대하여 80%만 인정. 설계보상 대상자는 증빙서류(설계보상 대상자 선정공문 등) 제출 필요(증빙서류 미제출시 서류 보완요청 없이 실적 불인정)

[금번 입찰시 실적 산정방법]

1. 금번 입찰에 공동도급으로 참여하는 경우, 평가대상항목 건수/금액/해외 결과(점수)를 아래 수식에 따라 합산

- 유사사업 수행실적 점수 = [MICE 계획] 점수(50%) + [건축 계획] 점수(50%)

* 상기의 수식 및 비율은 공동도급사 간 실제 참여지분율 구성과는 관련 없음

- 동일 분야에 복수의 기업이 공동으로 참여 또는 참여기업이 복수의 분야에 수행실적을 제출하는 경우, 참여지분율(동일업종 참여지분율 합을 100%로 합산)을 고려하여 실적 산정(공동수급 약정서에 참여사별 담당 업무범위 명시 필수)

<참고> 유사사업 수행실적 산정방법

(예시) 용역수행 건수 및 금액(i, ii번 평가항목)

○ A사 실적 : ⓐ 타당성조사 1건(과거 참여 지분율 30%, 총계약금액 1억원)

ⓑ 상세설계 1건(과거 참여 지분율 20%, 총계약금액 2억원)

① A사 용역수행건수 : (1건 × 30%) + (1건 × 20%) = 0.5건

② A사 용역수행금액 : (1억원 × 30%) + (2억원 × 20%) = 0.7억원

○ B사 실적 : ⓐ 타당성조사 1건(과거 참여 지분율 60%, 총계약금액 1억원)

ⓑ 기본설계 1건(과거 참여지분율 30%, 총계약금액 3억원)

③ B사 용역수행건수 : (1건 × 60%) + (1건 × 30%)  = 0.9건

④ B사 용역수행금액 : (1억원 × 60%) + (3억원 × 30%) = 1.5억원

(예시) 평가항목 산출예시(i, ii번 평가항목)

구 분 (참여지분율, 담당분야)	유사사업 수행실적(용역수행 건수)
	MICE(50%)	건축(50%)
Q사 (30%, ITS)	5건	-
W사 (20%, ITS)	10건
E사 (10%, ICT)	-	5건
R사 (40%, ICT)	-	15건
개별 인정건수	(5건×30%/(30%+20%) +(10건×20%/(30%+20%)) = 7건	(5건×10%/(10%+40%)) +(15건×40%/(10%+40%)) = 13건
개별 점수	X점	Y점
합산 점수	X점×50% + Y점×50% = Z점

예시) 해외 용역수행 건수(iii번 평가항목)

○ C사 실적 : 해외 상세설계 1건(과거 참여 지분율 30%, 총계약금액 5억원)

- C사 해외 용역수행 건수

: 5억원 × 30% = 1.5억원 → 1건 × 80%(1억원 이상 ~ 2억원 미만) → 0.8건

○ D사 실적 : 해외 타당성조사 1건(과거 참여 지분율 100%, 총계약금액 3억원)

해외 기본설계 1건(과거 참여지분율 20%, 총계약금액 4억원)

- D사 해외 용역수행 건수

: 3억원 × 100% = 3억원 → 1건 × 100%(2억원 이상) → 1건

4억원 × 20% = 0.8억원 → 1건 × 60%(5천만원 이상 ~ 1억원 미만) → 0.6건

◦ 본건 사업에 C사 50% 및 D사 50%로 공동도급 참여

⇒ C사 및 D사 공동수급에 따른 용역수행건수 : 0.8건 × 50% + 1.6건 × 50% = 1.2건

※ 상기 예시는 유사사업 수행실적 산정방법에 대한 안내이며, 본건 제안서 정량평가시에는 본 제안요청서 상의 참여분야 및 비중이 적용됨(MICE, 건축)

② 참여인력의 경력 및 유사사업 수행실적(15점)

- 사업수행책임자(5점) 및 참여기술자(10점)의 자격, 해당 분야 경력, 실적(입찰공고일 기준 최근 10년간 국내외 유사사업 중 준공된 컨설팅용역) 건수에 대한 평가

(i) PM 자격
		기술사 및 특급기술자				고급기술자		중급기술자		초급기술자
		1.0				0.9		0.8		0.7
(ii) PM 경력
		15년이상			15년미만 ~ 13년이상		13년미만 ~ 11년이상		11년미만 ~ 9년이상		9년미만
		2.0			1.8		1.6		1.4		1.2
(iii) PM 실적
			10건이상		10건미만 ~ 7건이상		7건미만 ~ 5건이상		5건미만 ~ 3건이상		3건미만
			2.0		1.8		1.6		1.4		1.2
(iv) 참여기술자 경력(분야별 책임기술자)
				8년이상	8년미만 ~ 7년이상		7년미만 ~ 5년이상		5년미만 ~ 3년이상		3년미만
				5.0	4.5		4.0		3.5		3.0
(v-1) 기후변화 외 분야별 참여기술자 실적 [총 4.5점]
				8건이상	8건미만 ~ 7건이상		7건미만 ~ 5건이상		5건미만 ~ 3건이상		3건미만
				4.5	4.2		3.8		3.4		3.0
(v-2) 기후변화 분야 참여기술자 실적 [총 0.5점]
				6건 이상	6건 미만 ~ 5건 이상		5건 미만 ~ 3건 이상		3건 미만 ~ 2건 이상		2건 미만
				0.50	0.45		0.40		0.35		0.30

※ 참고사항

1. PM 및 분야별 책임기술자만 정량평가 대상이며, 분야별 전담기술자 및 비전담 참여인력(경제재무분석, 환경사회영향 및 영문보고서 전문인력)은 정성평가(조직·인력 현황 및 운영계획) 대상임

2. 정량평가 대상 참여인력은 관련 협회 또는 기관에서 발행한 “경력증명서”에 의해 평가하되, 등록되지 않은 자는 본 제안요청서에 첨부된 ‘(참고2) 참여인력의 등급 및 자격기준’을 참조하여 제안사의 대표이사가 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서 등을 이용하여 평가

3. 대학교에 소속된 교수 및 부교수는 기술사와 동일한 등급으로 인정하며, 조교수 이하는 ‘(참고2) 참여인력의 등급 및 자격기준’을 참조하여 소속 기관의 장이 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서 등을 바탕으로 등급 평가

4. 정량평가 대상 참여인력의 해당분야 경력(년수)은 경력증명서에 명시된 전문분야별 참여일수 또는 기타 증빙자료에 명시된 경력일수를 고려하여 평가

5. 전담 참여인력의 해당분야 실적(건수) 인정범위는 아래와 같음

분 야	유사사업 인정범위
1. PM(MICE)	‘①사업수행실적’에서 규정한 과업으로 한정하며, 본건 사업에 제안된 담당분야(역할)와 관련된 실적 ※ 공동도급으로 참여하는 경우 사업수행책임자(PM)는 공동수급표준협정서에 명시된 대표사/주관사에 소속되어야 함
2. 건축계획
3. 토목
4. 환경사회	정성평가 ‘조직·인력현황 및 운용계획’의 ‘투입인력의 경험 및 능력’ 항목에서 평가(참여인력의 경험(정량평가)에서 제외)
5. 경제재무
6. 기후변화	국내외 기후변화대응1) 관련 용역2) 수행실적 1) 기후위험 분석(잠재 온실가스 감축량 산정(산정 툴킷 모델 수립도 인정) 또는 기후 위해, 취약성, 노출 분석) 또는 기후위험 경감계획 수립 또는 기후 성과관리(평가) 중의 하나 이상의 요소를 포함한 용역에 한정 2) ① 국내외 그린사업 및 국제감축사업(CDM 등) 관련 연구용역(컨설팅), 마스터플랜, 타당성 조사, 발굴, 실행, 성과평가, ② 기후변화 대응(TCFD(Take Force on Climate-related Financial Disclosure), 탄소중립전략, GCF(Green Climate Fund) Funding Proposal 작성, 배출권거래제, 온실가스목표관리제, 기후변화적응 등) 컨설팅 등

6. 분야별 책임기술자에 대한 평가는 아래 가중치를 적용하여 산출한 결과를 합산

기술사 및 특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	기타
1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

- 분야별 책임기술자가 아닌 전담기술자는 자격등급별 가중치 미적용

- 참여기술자의 평가는 각 참여자별 건수/경력을 평균하여 계산하며, 1인 최대 8년/8건 초과 시에도 8년/8건으로 인정(단, 기후변화 분야는 최대 8년/6건 초과시 8년/6건으로 인정)

* 예) 분책(특급)의 경력년수 12년 x 고급(90%) = 10.8년 → 8년 인정

분책(특급)의 실적건수 10건 x 고급(90%) = 9건 → 8건 인정

전담(중급)의 경력년수 11년 → 8년 인정

7. 발주처에서 컨설팅 용역을 직접 수행하지 않고, 용역을 발주하여 고용한 컨설턴트가 컨설팅 업무 및 감독업무를 수행한 사업은 참여인력 실적에서 제외함. 단, 발주처에 소속되어 감독업무를 수행한 실적의 경우, 해당 건에 사업수행책임자(PM)로 참여한 경우에 한하여 업무의 유사성을 고려하여 인정함(분야별 책임기술자 및 전담참여자로 참여한 경우에는 실적으로 인정하지 않음)

③ 재무구조 및 경영상태 (5점)

구 분		A등급	B	C	D	E
신용 평가 등급*	회 사 채	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
	기업어음	A2- 이상	A2- 미만 A3- 이상	A3- 미만 B 이상	B-	C 이하
	기업신용평가	A- 이상	A- 미만 BBB- 이상	BBB- 미만 BB- 이상	BB- 미만 B- 이상	CCC+ 이하
등급별 배점		5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
*「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8항의 3 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 3에 의해 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간내에 있는 회사채(또는 기업어음) 또는 기업신용평가 등급 - 공동수급의 경우 각 구성원별 신용평가등급에 해당되는 점수에 참여비율을 곱하여 합산 - 신용평가등급 서류 미제출 또는 유효기간이 만료된 등급 서류 제출시 최저 등급으로 평가

3) PM 대면평가 기준

구 분	A등급 (최우수)	B등급 (우수)	C등급 (보통)	D등급 (미흡)	E등급 (부족)
사업이해도	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
수행역량	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
위험요소 관리능력	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2
영어 구사능력	4.0	3.6	3.2	2.8	2.4
계	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

◦ PM 대면평가는 ‘참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표(참고1)’ 적용하지 않고 절대평가 실시

◦ PM 대면평가는 제출된 제안서에 대한 평가위원들의 질문으로 진행

- PM 대면평가 시 사업내용 관련 원활한 질의응답을 위해 제안사의 선택에 따라 PM 외 최대 2인의 분야책임자 배석 가능

- PM 대면평가 시 영어 Presentation 및 질의응답은 아래와 같은 방식으로 진행

· 10분간 PM이 영어 Presentation* 실시

* 표지 포함 최대 6장 자유형식 발표자료(A4 단면 기준, MS PowerPoint 활용하여 컬러 작성) 허용 : 제안사가 출력물(7부, 미제본)를 준비하여 PM 대면평가 당일 평가위원 앞 배포

· 영어 Presentation 이후 영어 또는 한국어로 질의응답 25분 실시

* 제안서 실행계획 및 용역수행 주안점 발표

◦ PM 대면평가 일정은 제안서 마감 후 개별 통보 예정

◦ 당행이 인정하는 불가피한 사유*에 해당하지 않는 경우, PM이외 대리인 참석시 해당 평가항목은 최저등급을 적용하며, 평가 불참시는 0점으로 처리

* 사망, 천재지변 등(출장, 휴가 등의 사유는 불인정)

4) 가산·감점 부여기준

◦ (가감점 일반) 가점감점을 포함한 정량평가 점수는 배점한도(30점)를 초과하지 아니함

◦ (중소기업 가점) 중소기업* 지분율에 따라 최대 1.0점 가산점 부여(정량평가)

중소기업 가점 = 1.0(점) × [eqn: {중소기업``지분율(%)} over {100(%)}]

*「중소기업기본법」에서 정의하는 중소기업을 의미함

◦ (신규 입찰자 가점)

i) EDCF F/S 계약실적이 있되, 입찰공고일 기준 최근 2년간 EDCF F/S 계약실적이 없는 입찰자의 지분율에 따라 최대 0.5점 가점 부여

미수주자 가점 = 0.5(점) ×  [eqn: {미수주자``지분율(%)} over {100(%)}]

ii) 입찰공고일 기준 EDCF F/S 계약실적이 전무한 입찰자의 지분율에 따라 최대 1.0점 가점 부여

신규입찰자 가점 = 1.0(점) × [eqn: {신규``입찰자``지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (장애인기업 및 사회적기업 가점) 장애인기업*, 장애인고용 우수기업** 또는 사회적기업*** 인증을 받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.3점

* 장애인기업활동 촉진법에서 정한 기업으로서, 중소벤처기업부 장관(위임받은 자를 포함)에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

** 장애인고용촉진 및 직업재활법 제24조에 따른 장애인고용 우수사업주로 해당부처에 의해 확인된 경우로서 확인문서가 입찰공고일 기준 유효해야 하며 유효기간이 정해지지 아니한 경우 2년 이내 확인 받은 것에 한함.

*** 고용노동부장관(또는 위임 받은 자)으로부터 사회적기업 인증을 받은 기업

장애인·사회적기업 가점 = 0.3(점) ×[eqn: {장애인````또는````사회적기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (여성기업 가점) 존속기간*이 확인되는 여성기업**의 지분율에 따라 최대 0.3점(존속기간 3년 미만) 혹은 0.5점(존속기간 3년 이상)

* 법인인 경우 법인등기부등본, 개인사업자인 경우 사업자등록증상 여성대표자로서 그 유지기간(연속되어 있어야함)을 확인하여 평가

**「여성기업 지원에 관한 법률」및 같은 법 시행령에 따라 중소벤처기업부 장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘여성기업 확인서’를 발급받은 기업으로서 (중소기업제품 공공구매종합 정보망에 등재된 자료로 확인), 그 존속기간을 확인할 수 있는 기업

(i) 존속기간 3년 미만 여성기업 가점 = 0.3(점) × [eqn: {여성기업```지분율(%)} over {100(%)}]

(ii) 존속기간 3년 이상 여성기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {여성기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (창업기업 가점) 창업기업* 확인서**를 발급받은 기업의 지분율에 따라 최대 0.5점

*「중소기업 창업 지원법령」제9조의 4(창업기업의 확인 등) 및 동 시행령 8조의 5에 따라 중소벤처기업부장관(위임받은 자를 포함)에 의해 ‘창업기업 확인서’를 발급받은 기업

** 확인서는 입찰공고일 기준 유효해야 하며, 유효기간이 정해지지 아니한 경우 입찰공고일 전일부터 기산하여 2년 이내 확인받은 것에 한함. (단, 사후관리 등을 통하여 유효기간이 연장되는 경우 그 기간까지를 유효기간에 포함)

창업기업 가점 = 0.5(점) × [eqn: {창업기업```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (MDB 유사사업 경험 가점) 최근 10년간 PM의 다자개발은행(MDB) 유사사업 컨설팅 참여* 건수에 따라 최대 1.0점 가점 부여

* PM의 실적증명서 상 MDB 유사사업 참여 여부가 명시/확인되지 않는 경우, 이를 증명할 수 있는 별도 증빙자료 제출 필요

MDB 유사사업 경험 가점 = PM의 MDB 유사사업 참여실적에 따른 구간별 가점

참여사업 건수	점 수
5건 이상	1.0점
4.0건 이상 5.0건 미만	0.8점
3.0건 이상 4.0건 미만	0.6점
2.0건 이상 3.0건 미만	0.4점
1.0건 이상 2.0건 미만	0.2점

◦ (EDCF 부정당업자 제재 감점) 입찰공고일 기준 i)EDCF 부정당업자*로 제재를 받고 있는 입찰자 또는 ii)다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받고 있는 입찰자는 그 지분율에 따라 최대 3.0점 감점

* EDCF 부정당업자 제재기준이 정하는 부패 또는 부정행위에 관여했다고 인정되는 기업, 기관, 단체

EDCF 부정당업자 제재 감점 = 3.0(점) × [eqn: {부정당업자```등```지분율(%)} over {100(%)}]

◦ (제안서 작성지침 미준수 감점) 입찰제안서에서 요구한 제안서의 규격, 형식 등에 부합하지 않는 경우 최대 2점 감점(서식 23 ‘제안서 작성지침 미준수 여부 자가진단표’ 건별 0.25점, 기타의 경우 0.1점 감점)

◦ (F/S 용역 평가결과 가감점) 입찰공고일 기준 최근 2년 이내 EDCF F/S 과업수행에 대한 평가*결과 입찰자별 합산 가감점 및 지분율에 따라 최대 ±4.0점 가감점

* 재평가를 포함하며 재평가시 기존 평가 결과는 제외

F/S 용역 평가결과 가감점 = Σ 입찰자별 가감점 × [eqn: {입찰자별```지분율(%)} over {100(%)}]

5) 가격평가 기준

◦ 입찰가격평가는 계약예규(협상에 의한 계약체결 기준)상 입찰가격 평점계산식을 이용하여 평가

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점`=`입찰가격평가~배점한도` TIMES ` LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

* 당해입찰가격: 당해 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]
[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-당해입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의70%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

* 당해입찰가격: 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의
100분의 70 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* Software 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함
하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

◦입찰가격 평점계산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

협상대상자 선정 및 협상 절차

□ 협상대상자 선정

◦ 제안요청서에 부합하는 제안서를 제출한 제안자의 기술능력 평가점수(90점) 기준으로 85% 이상 득점한 업체를 협상적격자로 선정하고, 협상적격자 중 기술과 가격의 합산점수가 가장 높은 순으로 협상에 의하여 선정

※ 과제의 특성상 상당한 수준의 전문지식과 기술이 필요하며, 용역 결과물의 질적 우수성 확보에 주안점을 두고자 기재부 계약예규 538호 「협상에 의한 계약체결 기준」제7조 제2항에 의거, 기술능력평가 배점을 20점 가산 조정하여 기술능력평가 배점을 90점, 입찰가격평가 배점을 10점으로 정함

※ 기술능력 평가점수 76.5점(90점의 85%) 미만의 업체는 가격평가 대상에서 제외

※ 기획재정부 계약예규 중 ‘협상에 의한 계약체결기준’ 제9조에 따라 협상적격자 앞 서면 통보

◦ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

◦ 협상대상자 중 기술‧가격의 종합평점이 가장 높은 자를 우선협상대상자로 지정하여 협상하고 결렬시 차순위와 협상

□ 협상절차

◦ 협상은 당행이 정하는 절차와 일정에 따라 진행됨

◦ 협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 실시하며, 협상기간 내에 협상대상자와 협상이 성립된 경우 최종낙찰자로 선정하고 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함

◦ 협상은 기술 조건 합의 및 당행이 요구하는 사항에 근거하여 진행

◦ 협상 중 제안자는 당행의 자료 요구에 성실히 응해야 하며, 만약 제안자가 정당한 사유없이 동 요구 자료를 제출하지 못하거나 제출을 거부하는 경우 당행은 동 제안자를 협상대상에서 제외할 수 있음

◦ 협상대상자가 협상에 불성실하게 임하거나 협상을 고의로 지연시키는 등 문제가 있다고 판단될 경우 당행은 협상이 결렬된 것으로 간주

◦ 협상이 성립되지 않을시 차 순위 협상적격자와 협상을 실시

◦ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음

□ 협상내용과 범위

◦ 협상대상자가 제안한 사업추진 계획 및 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 본 입찰제안서에 명시되지 않은 사항이 주요 현안이 되는 경우 상호협의에 의하여 결정

◦ 가격협상 기준 가격은 당행 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 하되, 기술협상에서 제안내용의 가감조정이 있는 경우 제안가격을 가감 조정할 수 있음

최종낙찰자 유의사항

□ 당행은 과업수행 내용*을 수시로 확인할 권한을 가지며, 용역사는 이에 적극 협조해야 함

* 인력투입현황, 과업수행현황 및 기타 확인이 필요한 사항

□ 용역사는 중요 결정사항이 있을 경우, 수시로 당행과 협의하고 당행의 요청시 관련 보고회를 실시하여야 하며, 당행의 요구를 충분히 반영하여야 함

□ 계약체결 후 7~14일 이내에 보안각서 및 기타 필요한 서류를 첨부한 “과업수행계획서(Inception Report)”를 작성하여 당행의 승인을 받은 후 과업에 착수하여야 함

□「엔지니어링산업진흥법」에 의거, 모든 용역 참여사는 과업수행에 필요한 손해배상보험(공제)에 가입하고 용역 완료 전 관련 서류를 당행에 제출하여야 함.

□「인지세법」에 의거, 용역사는 계약체결시 계약서 작성 및 소유에 따른 수입인지를 당행에 제출하여야 함.

- 해당 법령에 의거, 계약서 원본(Original) 부수에 따라 개별 납부

· 예) 3개사 참여 JV = 수입인지 3개 원본 요청(인지세 각사 개별 납부)

□ 용역사는 당행의 요청시 용역 추진내용을 보고하며 각 과업성과물에 대한 보고회를 실시하며, 최종보고는 용역 완료 전에 실시함을 원칙으로 함

□ 하자보증기간(완료 후 12개월) 중 본 용역과 관련된 사항에 대하여 재검토와 보완이 필요한 경우 비용청구 없이 즉시 시정조치 하여야 하며 보완 결과를 서면으로 제출하여야 함

□ 용역수행 중 용역사의 귀책사유로 발생한 모든 문제에 대한 책임은 용역사에 있으며, 당행이 입은 손해에 대하여 배상하여야 함

□ 본 용역수행 중 투입인력은 교체할 수 없는 것을 원칙으로 하되 퇴직, 질병 등 부득이한 사유 발생 시에는 당행과 협의하여 승인을 득한 후 동급 상당의 인력으로 교체하여야 함

□ 본 용역수행 과정에서 취득하거나 생산한 각종 조사자료 및 일체의 산출물은 당행의 소유이며, 당행의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없음

기타사항

□ 중소기업이 입찰에 참여한 경우 중소벤처기업부에서 발급한 ‘중소기업 확인서(공공기관 입찰확인용)’ 사본을 제출할 것

□ 장애인기업, 장애인고용 우수기업, 사회적기업 인증은 관계기관이 발급한 확인서, 인증서 등 공적 서류 사본을 제출할 것

□ 제안서 평가에 있어서 불명확한 부분이 있거나 보완설명이 필요한 경우 제안서 설명을 요청할 수 있으며 해당기관은 이에 응하여야 함

□ 제출된 제안서 및 관련서류 일체는 반환되지 않으며 제안요청서, 입찰유의사항 등을 숙지한 후 입찰에 참여할 것

□ 필요한 경우 당행은 제안서 제출 마감 전까지 입찰과 관련된 내용에 대하여 수정‧변경할 수 있음

용역결과 평가/활용

□ 용역 완료 후 1개월 이내, 내부기준에 따라 용역 참여인력·보고서 품질·용역관리 등에 대한 평가가 이뤄지며, 동 평가결과가 후속 EDCF F/S 입찰평가시 가감점에 반영됨

□ 공동도급의 경우, 공동평가 예정

<평가점수별 가감점 매칭>

평가점수	가감점
-100점 이상 ~ -80점 이하	-2점
-80점 초과 ~ -60점 이하	-1.5점
-60점 초과 ~ -40점 이하	-1점
-40점 초과 ~ -20점 이하	-0.5점
-20점 초과 ~ +20점 이하	0점
+20점 초과 ~ +40점 이하	+0.5점
+40점 초과 ~ +60점 이하	+1점
+60점 초과 ~ +80점 이하	+1.5점
+80점 초과 ~ +100점 이하	+2점

Ⅲ. 용역 대상 사업 및 과업범위

당행 발주 용역 추진배경 및 목적

□ 대외경제협력기금(EDCF) 지원 대상사업에 대한 EDCF 주도의 사업발굴을 통한 사업 진행과정에 대한 투명성 및 공정성 제고

□ 지원 요청사업에 대한 기본계획 검토, 사업타당성조사 및 기본 설계개념 도출을 통한 원활한 사업추진 도모

※ EDCF F/S 현장성 강화 등을 통한 내실화를 위해 아국 컨설턴트의 현지상주 의무화, 현지 컨설팅 업체 고용을 통한 현지 조사 강화, 보고서 내용에 대한 외부전문가 검토실시 등을 시행

본 사업 추진배경

□ 탄자니아 잔지바르 정부는 자체개발계획인 ‘Zanzibar Development Plan (2021-2026)’에 따라 국제 무역 활성화, 관광업 증대, 일자리 창출 등을 목적으로 ‘잔지바르 MICE 건설사업’에 대한 F/S 지원을 요청

3. 용역 대상 사업개요

□ 사업 목적

◦ 잔지바르 관광산업 촉진 및 국제회의 유치 등을 통한 국내외 경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업실시지역

◦ 탄자니아 잔지바르 푼바 경제자유구역(Fumba Free Economic Zone)

※ 구체적인 사업지, 사업환경 등은 F/S를 통해 확인 예정

□ 사업실시기관 : 탄자니아 잔지바르 무역‧산업개발부(Ministry of Trade and Industrial Development Zanzibar)

□ 용역대상 사업 범위(Phase 1)

구 분	항 목
본구매	◦ 연회장, 회의실 등을 포함한 컨벤션센터 및 전시관 건립 ◦ 주변 상업지구 및 인프라 구축
컨설팅서비스	◦ 기본·상세설계, 본구매 입찰지원, 공사감리 등

※ 사업 범위는 수원국-수은간 협의 등에 따라 변동 가능성 존재

□ : 본 용역대상 사업범위

□ 추정사업비 : 125백만불 (차관신청 예상금액 : 미정)

※ 수원국 추정치로, 향후 F/S 결과에 따라 변경 가능

4. 용역 과업범위

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음.

※ F/S 과업수행 시 아래의 자료 참고 필요

- EDCF F/S 작성지침(’24. 3월)

◦ EDCF 홈페이지(www.edcfkorea.go.kr) -「정보공개」-「서류/서식」- 13번 게시물(EDCF Feasibility Study Guideline) 참고

[Part A] 추진 배경 및 기대효과

□ 사업추진 배경 및 필요성 검토

◦ 사업추진 배경 및 필요성

- 사업 관련 현황, 문제점, 수요 분석

- 사업추진의 정책 또는 법률적 근거

- 사업추진을 위한 준비 현황

□ 사업목적

◦ 성과관리 프레임워크와 연계되는 사업목적 제시

□ 사업지원 시 기대효과 분석

◦ 사업지원 시 기대효과

- 국가적 측면

- 사업지역적 측면

◦ 우리나라에 미치는 효과

- 양국관계에 미치는 효과

- 우리기업에 미치는 효과

- 외화가득효과

□ 사업지원의 타당성

◦ 지역균형 발전·수원국 내부 정책 정합성, 일관성, 추진 의지 및 현황 측면에서 정책적 타당성 분석

◦ 국제개발사업 측면에서 정책적 타당성 분석

◦ 지속가능한 개발 사업의 관점에서 동 사업의 EDCF 지원 적합성

[Part B] 현황 조사

□ 수원국 일반현황 조사

◦ 수원국 일반현황(국가 인구, 경제 등 사회경제 지표 조사)

◦ 수원국 사업실시지역 현황(인구, 경제 등 사회경제 지표 조사)

◦ 국가 산업화, 개발계획 현황

- 탄자니아 국가개발계획(Tanzania Development Plan 등)

- 잔지바르 개발계획(Zanzibar Development Plan 등)

- 관련 분야 Master Plan 등 수원국 작성 각종 계획서 검토

◦ 사업실시지역 지역개발계획 현황(Regional Development Plan 등)

□ 관련분야 일반현황 조사

◦ 자연환경 : 아래 사항 등에 대한 조사·분석 및 공신력 있는 자료를 토대로 잠재력 및 저해요소를 파악하여 기초자료로 활용

- 지형 : 경사도, 표고 등

- 생태계 : 동·식물 분포 및 서식현황 등

- 자연자원 : 산림, 생태자연도 등

◦ 인문·사회환경

- 지목, 용도, 이용현황, 소유 및 권리현황

- 인프라 현황 : 교통, 기반시설, 상하수도, 전력, 가스, 통신, 폐기물, ICT 등

- 산업환경의 변화 및 산업입지 환경 등의 분석

- 인구, 토지이용 등 사회 및 경제 현황, 사회경제 지표 조사

◦ 개발여건

- 지역기본계획, 지역관리계획, 도시계획 등 상위계획 검토 후 정합성 및 연관성과 개발 장애요소 등을 조사·분석

- 컨벤션센터 및 상업지구 개발에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 기타 사업추진 관련 법규 및 규칙검토

- 상업지구 개발에 관한 인허가 절차 조사

- 대상지 현황 및 입지잠재력 분석

- 현지 기업 조사 및 기술력 검토

◦ F/S 수행에 필요한 현지 기초조사

- 지형, 지질, 하천현황 자료 수집(지형측량 조사 실시)

- 유역 개황(유역 현황, 하천 현황, 수리‧수문, 기후 및 기상, 지형 등)

- 주변 교통, 상하수도, 전력계통, 가스, 통신, 폐기물 처리 현황 조사

- 홍수 및 침수 피해현황, 하천관리 시설 이용 및 운영 현황

- 측량조사 및 지질, 지반, 수질 조사 등

- 사업지역 인근 발전소 및 송변전망 현황 등

- ICT 관련 현황, 법률 및 제도 조사 등

- 지장물 및 구조물 조사(지하매설물, 지상지장물 및 장애물 조사)

- 주요 기자재 조달 경로(현지 생산여부 등)

- 현지 토목, 공사재료 조달처 및 그 경로

- 건설자재, 재료 품질 확인, 검토

- 공사기기 및 장비 이동경로 배치계획, 스케줄 등 최적 운용계획

- 주변 민가 등에 주는 영향조사, 영향정도 조사

- 사업 시설물과 주변과의 인터페이스, 경계점, 책임분기점 조사

- 기타 자료수집 및 기본계획 수립을 위한 관련기관과 협의

◦ 수원국내 주요 컨벤션센터 및 전시관 시설 현황조사

- 건축현황(준공일, 공법, 주요 특징 등), 규모 및 시설 현황

- 운영 체계 및 현황, 인력수준, 교육훈련 현황, 이용료·임대료, 최근 3년 재무 및 재정지원 지원현황, 유지관리 현황

- 장비, 기자재, 전산시스템의 보유 및 운영 현황, 유지보수 조직, 절차 및 현황

◦ 잔지바르내 주요 업무, 상업시설 현황조사

◦ 관련 분야 국가정책 및 개발계획(M/P, 기본계획 등 포함), 관련 예산

- 수원국 연도별(최근 3년) 동분야 예산규모 및 사용현황 분석 포함

- 예산 확대 가능성 검토

◦ 관련 분야 주요 법령 및 기준

◦ 관련 기관(중앙정부 및 지자체) 및 조직, 예산운영 현황

◦ 유사사업 조사

- 기지원 EDCF 사업의 성과분석 및 시사점 도출(사전 관리계획 수립 등)

- 주요 공여기관의 기지원사업 분석, 지원 예정사업 조사 및 T/A 보고서 주요 내용 검토(지원기관, 규모, 사업내용, 사업비 등)

□ 사업실시기관 현황 및 사업수행체계

◦ 사업실시기관(PEA) 외 사업 유관기관(도로, 전력, 상하수도, 가스, 통신, 폐기물 등 본건사업 유관기관) 도출 및 연관 관계 분석(조직도 포함)

◦ 관련 부처/기관 등과의 협력체계

◦ 사업실시기관(PEA) 수행조직 및 사업수행체계 확인 必

- 사업실시주체 확인

- PEA內 별도 사업관리조직(PMU) 구성계획 및 유관기관 협업체계

- 담당 업무, 조직 및 인력 구성, 예산‧집행 현황, 운영‧유지보수 체계 등

- 유사사업 실시경험(자금지원 주체, 사업비 포함) 및 수행능력

◦ 사업추진 준비상태 : 법적․행정적 내부승인절차 완료여부, 사업시행을 위한 필요한 조치 및 완료여부, 진행상황 등

◦ 사업실시기관의 사업수행능력, 사업관리 역량, 지원 태도

- 기수행 사업현황 및 소속 인력들의 사업 수행능력 검토

◦ 완공 후 유지운영기관 및 운영관리계획(운영 자금 및 조직, 인원, 유지보수 등) 조사

◦ 사업실시기관 및 유지관리업무 운영기관 앞 교육훈련의 필요성 등

◦ 관련 법·규정, 인허가 절차, 관련 부처 및 승인 기간 등 검토

◦ ODA 사업 추진 및 승인 절차(Loan 도입, 입찰, 계약 절차 및 관련 부처)

□ 기수행 유사사업 분석(Lessons Learned from Previous similar projects)

◦ 수원국·他개발도상국·국내에 기완공 또는 건립 중인 유사사업의 계획, 사업자선정, 공사 및 운영단계까지 진행현황 및 문제점 분석을 통한 교훈 도출

◦ 기수행 유사사업 교훈으로부터의 사전 관리계획 수립

◦ 사업실시기관 또는 他원조기관·MDB 발주의 유관·유사사업 분석

◦ 수원국 자체 타당성조사 보고서 등 본건 기존 분석자료 검토를 통한 사업수행방안 도출(필요시)

◦ 본건 사업 계획시 고려해야 하는 시사점 제시

□ 수원국 세금 관련 체계 상세조사(현지 세무법인 고용 必)

수원국 현지 세법에 따른 세금범위(세금항목, 세율 등) 및 세액 조사

- 수원국 세금*체계 분석

* 부가세, 관세, 소득세, 원천징수세 등 직간접 발생 세금 중심

- 외국인 투자 사업 세금체계(VAT, Tariff, Income Tax, Withholding Tax 등) 분석

- 외국기업 현지 공사 시 적용되는 세금 관련 법․제도 분석 및 외국인 근무자가 지급해야 하는 세금 관련 법․제도 분석 포함

- EDCF 사업에 대한 컨설턴트/본구매 사업자(현지 하도급 업체 포함)의 세금 범위 및 면세/환급 가능 여부 조사 포함

- EDCF 사업에 대한 과세항목(비면세 항목) 조사, 부과세금 산정

외국기업의 현지사업장 형태*(현지법인, 지사, 사무소 등), 법인결합형태(법적결합 JV(현지법인화 or 파트너쉽) or 법적비결합 JV(컨소시엄 등))별 부과 세금**/세율 확인

* 세금청산에 유리한 프로젝트 오피스 설립 가능여부 검토

** 현지 법인/개인소득세 및 한국 외국납부세액공제 포함

EDCF 컨설턴트/본구매 사업자 앞 대금 지급시 세금혜택 관련 세부절차 조사(구비서류, 신청절차, 처리기간 등)

수원국 내 他 ODA 사업*의 세금 관련 사례** 조사

* WB, ADB, JICA 등 양허성 차관 사업 중심

** 현지 세금(혜택 또는 부과 항목), 부과세금 차관액 포함 여부, 입찰제안요청서 작성 방식 등

기존 EDCF 사업 진행 중 세금 관련 분쟁 사례 조사

◦ 수원국 세금 체계 및 대금 지급 절차를 고려한 EDCF 차관공여계약서 및 입찰제안요청서 상 세금항목 반영안 제시*

* 사업실시기관, 현지 세무당국 등 확인 필요

◦ 세금, 제세공과금 조사사항을 바탕으로 사업비 테이블 마련

◦ 탄자니아 내에서 컨설팅서비스, 본구매 업무 수행시 Work permit 관련 조사

□ 본건 사업진행시 부과, 면제되는 세금, 제세공과금 등 규정

◦ 과세항목(비면세 항목) 조사 및 부과세금 산정

◦ 면세, 대납, 환급 항목 조사

◦ 세금, 제세공과금 조사사항을 바탕으로 사업비 테이블 마련

[Part C] 사업추진 기본방향

□ 기본 실시계획 검토 및 제시

◦ 기본계획안 작성

- 수요 분석

· 사업대상지역 분석(경제, 인구 등)

· 사업부지 및 규모의 적정성 검토(접근성, 인근 유사시설 등과의 연계 검토)

· 수원국 정부 요구사항, 상업수요 등 검토기반 시설 기능 및 규모 산정

- 기본방향 설정

· 사업대상지 위치 적정성 검토 및 대안 제공(필요시)

· 사업부지 측량, 지질조사, 지장물현황 등 현장조사

· 사업규모를 산정하고 이에 따라 사업개요, 토지이용계획을 수립

· 향후 여건 변화 등을 고려하여 합리적, 효율적 개발계획 제시

· 공간구조 계획

· 해당지역에 적합한 개발기법 및 방향에 따른 기능별 공간배분 계획

· 컨벤션 센터 및 전시관 외에 도입 가능한 상업, 업무, 공원⋅녹지공간 등을 효율적이고 합리적으로 배분

· 각종 도시계획관련 지표설정

· 관계법령 및 기준에서 제시하는 계획지표 준수

· 공공시설체계 계획

· 공공시설의 입지를 공간구조 및 토지이용체계에 적합하도록 배치

· 구역 내 이용인구, 밀도, 이용권 등 수요를 충분히 고려한 공공시설의 배치

· 현행 제도에 근거한 공공시설규모 및 기준을 설정

· 공원․녹지‧가로 체계 계획

· 주변 자연환경을 충분히 고려한 환경친화적인 공원⋅녹지체계 구축

· 지형⋅지세 및 구역 내⋅외의 자연환경과 조화되는 오픈스페이스를 계획하여 여가 공간 제공

· 공급처리시설체계 계획

· 교통, 상․하수도 및 배수계획, 전력, 통신계획 등에 관한 상위계획상의 지표 및 계획인구에 따른 수요를 검토하여 계획에 반영하고, 인접관련시설 등을 고려하여 합리적․경제적인 공급처리시설 체계를 구축

· 단지정지 및 토공계획

· 도로 및 블록 토공계획

· 도로, 도로망, 포장 및 가로등 계획

· 연약지반 처리대책

· 상수공급 계획, 상수도, 상수관 및 급수망, 급수 계획

· 우수배제 계획

· 오수배제 계획

· 하수도, 하수처리 계획, 하수관 계획

· 구조물 계획

· 배전변전소 및 배전망, 배전 계획

· 가스 가압설비 및 가스망, 가스 공급 계획

· 전화, 정보통신망 공급 계획

· 컨벤션 센터 및 전시관의 펜스 및 방벽(wall), 보안, 출입 계획

· 행정동 등 사회인프라 계획

◦ 사업현실화를 위한 방안제시

◦ PMU 구성 안 마련

□ 구축공사를 위한 기본계획 검토 및 수립

◦ 사업실시기관/유관기관 scope 사이의 구축공사(도로, 상수도, 전력, 가스, 통신 등) 책임분기점 도출

◦ 현지 설계기준 검토(도로, 상수도, 전력, 가스, 통신) 및 적용 기준 설정

- 탄자니아 설계 기준 및 적용 기준 검토

- 인근 유사 도로/상수도/전력/가스/통신 상세 조사(Type, 관리주체 등)

- 탄자니아 정부 예산으로 기 실시한 F/S 적정성 검토(필요시)

◦ 사업수행을 위한 선결절차 검토(정부승인, 부지확보 등)

◦ 지역 여건, 주변환경, 경제성, 시설편의 등을 고려한 개발방안

- 시공 중 교통처리 방안 조사 및 계획 수립

- 경제성, 효율성, 안정성 및 이용자 편의를 고려한 건설방안 검토

- MICE 2단계 사업(주거지구 등)으로의 확장성 고려

◦ 시설 기본계획

- 컨벤션센터 및 전시관, 상업지구, 업무지구, 공원 등 포함

- 사업추진 기본방향 설정(사업우선순위 검토 및 조정방안 제시)

- 계획구역 설정

◦ 시공단계 안전관리방안

◦ ①F/S, ②기본/실시설계, ③구매조달, ➃시공감리 각 과정별 인허가 절차, 유관 기관, 소요 기간 조사 및 검토

◦ 컨설턴트 고용의 필요성, 컨설팅 과업범위, 인력투입계획(bar chart) 수립

◦ 본사업자 선정 방식 등 구매절차 수립

◦ 공정별 소요비용 및 연도별 자금지출 계획

◦ 소요 설비, 기자재의 종류, 규격, 수량, 단가 및 구매 계획

◦ 해당국의 안전 관련 규정 준수, 사고 예방방안 조사 및 계획 수립

- 안전관리 기준 조사 및 세부계획 수립(설비, 교육, 점검방안 등)

- 안전관리 소요예산 산정

◦ 상수도 시설 기본계획 검토

- 용수 수요 예측(생활 및 공업용수 수요, 첨두부하율)

- 목표수질 설정 및 수리권 확보 검토

- 최적 취수지점, 취수형식 및 용량 검토

- 도수관로 노선계획 수립, 경제적 관경 및 관종 선정

- 정수처리시설 위치 및 시설물 배치계획 수립, 단위공정 선정(필요시)

- 정수장 후단 송배수관 연결 및 급수계획 검토(필요시)

- 처리시설내 전력인입, 운영자동화 수준 검토

- 기타 장래 확장에 필요한 기술적 검토 등

◦ 하수처리 시설 기본계획 검토

- 오수관 설치계획 수립

- 폐기물 수거 및 관리방안 검토

◦ 도로 시설 기본계획 검토

- 최적 도로 선형 결정

- 도로 건설방안, 배수계획, 포장형식 검토

- 부대시설물 설치계획 수립

- 진입도로 설치여부 조사 및 본공사시 사용도로 소재파악

◦ 전력 시설 기본계획 검토

- 예상 수요량 분석

- 설계기준 조사, 설정 및 재료원(재생에너지 포함) 조사

- 최적 송전선로 경과지 설정 및 경과권한(보상, 이주 등) 확보 검토

- 최적 전력계통 연계지점, 연계형식 및 송전용량 검토

- 기타 부대시설물 설치계획

◦ 가스공급 기본계획 검토

◦ 정보통신 설비 기본계획 검토

- 예상 수요량 분석

- 설계기준 조사, 설정 및 재료원 조사

- ICT 장비 및 네트워크 기본설계(장비 목록, 사양 및 수량 등)

- 부대 시설물 설치계획

◦ 컨벤션센터 및 전시관, 업무지구, 상업지구 건설 기본계획 검토

- 업종별 입주업체, 근무인원, 소요공간 등 수요 분석

- 랜드마크 건물 계획(plan), 구조, 개념설계, Layout Plan 제시(조감도 포함), 대안비교, 필요 기능 도출 등

- 기초 인프라 용량의 적정성, 필요용량 산출

- 건물 시설‧설비, 기자재의 종류, 기준, 주요사양, 규격, 수량, 단가 및 구매계획, 배치계획 검토

- 기타 장비‧집기류 종류, 규격, 수량 및 단가 산출

◦ 업무지구, 상업지구 건물 임대 세부계획 수립

◦ 보안설비 기본설계(장비 목록, 사양 및 수량 등 포함)

◦ 교육 및 훈련계획(시운전 및 역량강화 등)

- 주요 기자재 및 소프트웨어 등 사용자 교육, 재교육, 보수교육 실시 방안 포함

◦ 지속가능한 개발을 반영한 완공 후 운영 및 유지관리계획

◦ 유지보수 지원방안(완공 후 운영 전문가 현지 파견 등)

- 주요 기자재, 필수 부품‧소모품의 유지관리 방안 포함

- 주요 기자재 사용연수를 고려한 중장기 기자재 교체 계획 수립 및 비용 산정

- 운영 및 유지보수를 위한 연도별 필요재원 추정 및 재원조달 방안 검토(최소 5년 이상 추정에 따른 수익 및 운영비용 비교 분석 및 부족한 재원 확보 방안 제시 필요)

- 동 시설 개원전 시뮬레이션 및 시범운영기간 중 인력 배치방안 포함

◦ 해당국의 안전관련 규정 준수 및 사고예방을 위한 현지 및 우리나라 안전관리 기준 조사 및 실행 세부계획 수립(설비, 교육, 점검방안 등)

◦ 예상 사업기간(Implementation schedule) 및 세부 추진일정

◦ 기타 사업추진 권고사항 등

◦ MICE 조성계획과 부대인프라 구축계획을 연계한 종합계획(일정 등)

◦ 단계별 사업추진 로드맵 제시를 통해 사업추진에 따른 리스크 최소화

- MICE 2단계 사업과의 추후 연계방안 검토

◦ 효율적인 계획의 집행을 위하여 법적, 제도적 지원책을 검토

◦ 가시성 제고 방안 검토 및 제시

- 기념비‧현판 설치, 도로‧건물명 제정, 설계시 한국형 인테리어 등 가시성 제고 방안 검토 및 수원국과 협의 필요

□ 사업의 타당성 검토

◦ 당해 사업의 전 과정을 대상으로 기술․환경․사회․재원․용지․교통 등 필요한 요소를 고려하여 발생하는 비용을 토대로 평가하고, 가장 합리적인 대안을 선정, 결론 도출

□ 주요기자재 조달방안 검토

◇ 기자재 원산지는 수급의 용이성, 시공의 편리성, 완공후 유지보수의 수월성을 최우선으로 고려하여 선정

· 기자재 원산지 선정은 후보안을 대상으로 대안분석을 실시하여 선정하여야 함

◦ 수원국 기술기준 조사(technical codes & standards)

- 자체기준 보유현황 및 국제규격 준용 필요여부 등

◦ Local 기업 주요기자재 생산여부

◦ 수원국 기술기준 만족 기자재 범위 조사(현지, 제3국, 한국산 등)

◦ 수원국 기술기준 만족 국내/외 주요기자재 조달가능 현황 조사

◦ 한국기업의 유사사업 국제경쟁력 분석

◦ 주변국가 주요기자재 생산능력

◦ 소요 설비, 수량 단가 검토

◦ 건설장비 조달방안 검토

◦ 상기 분석을 통한 최적 조달방안 도출

□ 기자재 통관 및 운송방안 검토

◦ Foreign(Made in Korea/3rd Country) 기자재의 국경 간 운송 방안

◦ 한국 및 제3국 → In-bound 운송방안, 내륙 운송방안 검토

□ 운영관리(O&M) 현황 조사

◦ 수원국 O&M 관련 법 체계, 일반현황 조사

- 법 체계(법령 및 하위 규정 등) 및 건물(기자재 등) O&M 일반현황 조사

◦ 수원국 O&M 아웃소싱 사례 조사

- MICE 시설 운영 현황, 정부(지방포함) 이외 공기업 및 민간 사업자 등 별도 O&M 운영형태 사례 조사

□ 대상사업 운영관리(O&M) 계획 분석

◦ 대상사업 O&M 계획안 분석

- O&M 조직 및 인력, 연도별 예산 등에 대한 적정성 확인

- 건물 유형 및 사용 기자재에 부합하는 기술 노하우 보유 여부 확인

◦ 대상사업 O&M 개선점 파악

- 아국 O&M 방식과 비교, 보완사항 분석, 단기·중장기 개선사항 제안 등

□ 대상사업 운영관리(O&M) 사업화 방안 제시 등

◦ 차관지원을 통한 O&M 사업화 모델 제안

- 대상사업 O&M 중 아웃소싱 가능한 범위 파악(아국기업 참여 고려)

- 아웃소싱을 통한 발생효과(비용절감, 기술전수 등) 분석

- O&M 사업화 추진을 위한 방안 제시(계약형태, 인력 및 장비 투입 확보방안, 예상비용 등)

◦ 무상원조를 통한 O&M 관련 지원방안 검토

- 수원국 체질개선(법률, 시스템 등) 및 역량강화(전문가 양성) 방안 제시

[Part D] 기후변화영향 대응체계 적용

□ 대상국의 기후변화 관련 현황 조사

대상국의 기후변화 정책관련 기초현황 조사 및 시사점

- 대상국 기후변화 관련 법, 정책, 계획, 전략, 국가온실가스감축목표(NDC), 국가적응계획(NAP) 등

- 기후변화대응 관련 대상국 담당기관, 조직, 협력체계, 역량 수준 분석

- 대상사업의 대상국 NDC, NAP과의 부합성·관련성 분석 및 시사점

대상국의 기후변화 관련 산업동향 및 온실가스배출 관련 기초조사

- 대상국의 기후변화 완화 및 적응 기술에 대한 산업 적용 동향 분석

- 사업실시지역 및 인근 국가의 온실가스 배출계수 및 동종분야 온실가스 배출량 조사

기후위험평가

사업의 노출대상·위해 식별 및 평가

- 사업내용 분석을 통한 사업의 노출 대상 정의 및 노출 정도 평가

- 사업실시지역에서 식별된 노출 대상에 가해질 수 있는 위해 식별, 위해 별 현재 발생 빈도 조사 및 미래 발생 가능성 평가

노출-위해 매트릭스 분석을 통한 기후변화 영향 수준 평가

사업의 기후 취약성 분석

- 사업 이해관계자 대상 기후위험 모니터링 및 관리 역량 검토 포함

- 노출별 위해에 따른 영향과 각 사업 분야별 사업추진 기본방향(사업계획, 적용될 설계기준 등)에 따른 취약성 분석

사업의 기후위험 도출 및 기후위험 관리표 제시

사업의 최종 기후위험등급 분류(고위험, 중위험, 저위험)

※ 중간보고회 이전 기후위험 평가 결과 초안 제출, 중간보고회 또는 그 이전 당행(경협평가부)과 의견 교환을 위한 세션 실시

※ 노출 식별, 영향 및 취약성 분석은 사업 분야별 전문가(토목, 건축, 시스템 등)와 협업을 통해 도출되어야 함

기후위험 경감계획 도출

기후위험 경감계획 후보군 도출

(복합사업의 경우 각 사업 분야별 경감계획 도출 및 제시 필요)

- 사업 분야별 전문가 : 기후위험 경감계획(완화 및 적응 관점) 후보군 도출

- 기후전문가 : MDBs 등 국제기구 또는 국내의 유사 사업에 적용된 경감계획 List 작성, 사업 분야별 전문가가 도출한 경감계획 정리 및 후보군 도출

기후위험 경감계획 후보군 우선 순위화 및 채택

- 사업분야별 전문가와 기후전문가가 협업을 통한 도출된 경감계획별 사업 적용 가능성 검토(효과성 및 실행가능성 검토)

- 경감계획 후보군 우선 순위화 및 사업에 반영할 경감계획 채택

- 채택된 경감계획은 F/S 보고서 사업추진 기본방향(사업계획 챕터)에 사업 분야별 설계기준으로 제시

기후금융 규모 산출

- 사업 분야별 전문가 : 채택된 기후위험 경감계획별 추정사업비 산출

- 기후전문가 : 사업 분야별 전문가가 산출한 추정사업비 등을 근거로 사업의 기후금융 규모 산출(완화 및 적응 각각 산정)

- 경감계획 적용에 따른 사업비 변경내역 분석, F/S 보고서 사업비 요약 Table에 주석으로 기후변화영향 대응체계 적용에 따른 사업비 변동분 기재

기후관련 성과관리 계획수립 및 리우마커 분석

기후관련 예상 성과 측정결과(완화, 적응) 제시

- 완화 사업일 경우, 사업운영시 예상 온실가스 감축량 산정(방법론 출처, 세부 산정식 및 데이터 출처 포함, 필요시 툴킷 사용)

성과관리 프레임워크 내 기후사업 성과지표 제시(기초선, 목표치, 가정, 리스크, 관리방안 등)

사업의 리우마커(기후변화 완화 및 적응) 부여 가능성 검토

[Part E] 기술적 타당성

□ 컴포넌트별 기술적 타당성 분석

◇ (적용 세부기술 타당성 논증) 또한 적용 세부기술에 대해서는 해당 세부기술을 적용하는 것이 타당한지에 대해 검증하는 과정을 통해 분석

· 세부사업에 적용되는 기술은 여러 기술대안을 상정 후에 대안 간 장단점 분석을 통해서 본건 사업에 적용한 기술의 타당성을 논증

◦ 본건 사업을 추진하는 것이 기술적 관점에서 왜 필요한지 논증

◦ 기술적 타당성 구조 기준 적용 사유 논증

◦ 건설공법 또는 적용 가능 복수의 안 제시하고 본건 사업에 적용하는 사유 논증(대안분석 실시)

- 적용기술에 대한 대안분석(복수안) 실시후 사업에 적용되는 기술 선정

※ 기술·공법 제시할 때에는 ①반드시 후보 기술·공법을 대상으로 대안분석을 실시한 후, ②가장 적절한 기술·공법을 제안하는 형태로 과업을 진행하여야 함에 유의(상기 과정이 보고서에 기재되어 확인 가능해야 함)

구 분	후보기술 1	후보기술 2	후보기술 3
기술요소1
기술요소2...
경제성
제 안	◎
제안사유	제안사유를 총괄적으로 기재(비교우위 등)

◦ 해당 사업범위(안) 내 효율성과 효과적인 Risk관리 역량을 기준으로 EDCF 재원이 지원하는 Scope과 수원국이 자체적으로 수행하는 Scope 간 구분

- 사업범위(안) 결정과 해당 사업범위내 EDCF/수원국 간 scope 구분은 반드시 당행과 협의 후 결정하여야 함에 유념

- 시공시 공정지연, 비용초과를 최소화 할 수 있는 범위 내에서 사업 구성요소 선정

[Part F] 사업비

□ 직접사업비(직접공사비+컨설팅비) 및 간접사업비 산정
(Excel형태의 Soft-file 제출)

◦ 총사업비 추정, 소요재원조달 방안, 연차별 자금 투입계획을 수립

◦ 직접공사비 주요 공종별 국내 및 현지시장 단가 조사

- 소요설비/인력, 기자재의 종류, 규격, 수량, 단가 및 구매계획 등

◦ 직접공사비 산출

- 각 공종 또는 컴포넌트별 현지화/한국산/3국산 분리산출

- 재료비/노무비/경비 분리산출(필요시)

◦ 컨설턴트 과업범위 및 각 단계별 인력 투입계획 작성(bar-chart)

- 현장조사 단계

- 실시설계 단계

- 입찰지원 및 계약체결 지원 단계

- 시공감리 단계

- 유지보수 단계

- 용역완료 및 완공보고 단계 등

◦ 컨설턴트 과업범위 및 비용(추정 근거 포함)

- 기본설계, 입찰지원, 공사감리 등 단계별 Man-Month 및 비용산정

- 투입인력별 추천 자격/역할 등 기술적 TOR 작성

◦ 노임단가 분석

- 한국 엔지니어, 현지 엔지니어/근로자 노임단가 조사 후 단가적용

- 출장횟수 및 항공료, 체제비 산정

◦ 교육훈련비용 산정(사업범위에 따라 필요시)

- 완공후 수원국의 순조로운 운영을 위한 교육훈련 프로그램 및 훈련비용 산출

◦ 각종 안전시설 등 부대시설 계획 및 안전관리 소요예산

◦ EDCF 및 사업국 기준에 따른 물량예비비 및 가격예비비 산정

◦ 차관취급수수료

◦ 제세공과금 (관세, VAT, Withholding Tax 등)

◦ 사업관리비

◦ 용지보상 및 이주비용

◦ 총 추정사업비 산정

◦ 운영 및 유지보수 지원 비용 산정

◦ 사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

□ 사업비 항목별 구성 및 세부내역 작성

비용항목 구성(안)

구 분	EDCF			수원국	합 계
	외화(Korea)	제3국산	현지화(Local)
a. 직접공사비	ooo	ooo	ooo	-	ooo
b. 컨설팅비	ooo	ooo	ooo	-	ooo
직접사업비(a+b)	ooo	ooo	ooo	-	ooo
c.예비비	ooo	ooo	ooo	-	ooo
d.사업관리비	-	-	-	ooo	ooo
e.토지보상비	-	-	-	ooo	ooo
f.제세공과금	-	-	-	ooo	ooo
g.차관취급수수료	ooo	-	-	-	ooo
간접사업비 (c+d+e+f+g)	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo
계	ooo	ooo	ooo	ooo	ooo

* 제세공과금, 사업관리비, 토지보상비는 수원국 부담분

* 차관취급수수료는 EDCF(외화) 반영분

※ 모든 사업비는 한국산, 제3국산 및 Local 구매 원산지에 따라 Item 및 금액을 분리하여 산정 필요

◦ 사업비 산정기준

◦ 국내 및 현지 시장가격 조사 및 분석

◦ 적용환율

◦ 직접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

- 직접공사비

· 주요 공종별 단가

· 공사물량

- 컨설팅서비스 비용

· 설계 및 입찰지원 단계

· 시공감리 단계

◦ 간접사업비 (외화(국산, 3국산), 현지화 구분)

- 예비비(Contingencies)

· 물량예비비(Physical Contingency)

· 가격예비비(Price Contingency)

- 용지보상 및 이주비용

- 사업관리비 및 차관취급수수료

- 제세공과금(수원국 부담분과 한국 사업자 부담분 구분)

· 부가가치세, 관세, 법인세, 지방세, 개인소득세 등

◦ 총사업비

□ 재원조달 방안 및 연도별 자금집행 계획 수립(EDCF, 수원국 자체 재원 등 구분)

□ 유사사업 및 유사 ODA분야 사업비 비교

◦ 한국 및 수원국 유사사업 직접공사비 및 건설단가 조사 비교

◦ 유사 ODA분야 규모당 직접공사비, 컨설팅서비스 비용 비교로 사업비 적정성 검토

[Part G] 정책적·경제적·재무적 타당성

□ 정책적 타당성 분석

◦ 국가개발계획 부합 여부 및 법률적, 제도적 타당성

◦ 사업의 필요성 및 기대효과, 정책적 우선순위

◦ 부대인프라(도로, 상수도, 전력, 가스, 통신) 지원 당위성

◦ 사업실시구간의 적정성

□ 경제적 타당성 분석

◦ 본 사업 시행으로 발생하게 되는 직접 및 간접편익을 검토

◦ 분석방법론 사전정의 및 가정사항 적정성 검토

◦ Without Project 분석

- 단순히 본건 사업이 추진되지 않은 시나리오가 아니라, 본건 사업이 추진되지 않더라도 수원국에서 실시했을 법한 사업이 Without Project에 해당

◦ 본건 사업으로 인한 사회적 비용, 편익 분석

- 국민, 국가적 비용, 편익 측면 감안

- 국가 발전, 국가도로망 마스터플랜 등을 반영한 경제성 분석 실시

◦ E-B/C, EIRR, E-NPV 등 분석

◦ 경제성 민감도 분석(할인율 등 주요 변수에 대한 민감도)

※ 경제적 타당성 분석은 Guidelines for the Economic Analysis of Projects(ADB) 및 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project(European Commission) 참고

□ 재무적 타당성 분석

◦ 분석방법론 사전정의, 분석방법 설정 및 가정사항 적정성 검토

◦ 수원국 자체자금/EDCF loan에 따른 시나리오별 F-NPV, F-IRR, PI (Profit Index) 산정

◦ 민감도 분석(수입/비용 등 주요 변수에 대한 민감도)

- 비용증감, 수입증감, 할인율 증감에 대한 분석

- 수입감소 및 비용증가 동시 발생 복합시나리오 포함

◦ 각 시설별 투자회수전략 수립 및 분석 평가

□ OECD 상업성 분석

◦ OECD Arrangement 상 구속성 원조의 차관 제공사항(상업성 여부)을 참고하여 해당사업의 상업성 검토

- CIRR 산정

- OECD Ex Ante Guidance 상 판정 기준을 참고

- 현금흐름 분석

- 상업성이 없을시 비상업성에 대한 체계적인 논증

※ Excel 형태의 경제적 타당성 분석, 재무적 타당성 분석, OECD 상업성 분석 soft-file 제출

□ 사업의 규모, 범위 및 사업기간의 적정성(사업목적 및 기대효과 측면)

□ 추정사업비 적정성 분석

◦ 각 항목별 추정사업비(외화 및 현지화 구분)의 적정성(수원국, 인접국 등의 유사사업 규모 및 사업비와 비교 검토)

□ 사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

[Part H] 환경사회영향

□ 환경사회위험등급 분류를 위한 기초 조사

◦ 사업지 인근 환경사회 현황에 대한 문헌조사

- 위치 및 기후, 강수량, 풍속 및 풍향

- 보존지역, 문화유산, 생태계

- 환경질(수질, 대기질 등) 관련 적용 가능 기준 또는 규정

- 사회경제적 조건(인구, 고용, 소득, 토지사용, 민족 구성 등) 등

◦ 수원국 제출 EDCF Safeguard Policy Appendix 1 Screening Form관련 내용 조사 및 작성 지원

- 중간보고 전 환경사회위험등급 분류 예정

- Screening Form 작성 지원

□ 수원국 환경사회 관련 Framework 분석

◦ 환경 분야

- 수원국 ESIA 관련 법, 기준, 업무처리절차(통상적인 기간 포함) 파악 및 제시

- 현지 법령상 환경사회 등급분류 제시

- 현지 환경법령상 선결사항 및 본건 사업과의 부합여부

- 향후 수원국 ESIA 승인을 위한 필요사항 점검*

* 협의 등을 통해 현지 당국 승인 가능할 경우에는 수원국 ESIA 승인 지원 과업 포함

◦ 사회 분야

- 사업에 대한 토지 및 이주 관련 규정(보상 및 생계회복 등) 조사

- 토지소유권 제도 관련 규정 조사

- 유적지/문화재 발견시 보고절차(Chance Find Procedure) 조사

- 현지 사회법령상 선결사항 및 본건 사업과의 부합여부

◦ EDCF Safeguard Policy(2020)와 수원국의 환경, 사회 기준과의 Gap 분석

- Gap 발생시 수원국과 협의를 통하여 Gap-filling 방안 제시

□ 대안(Alternatives) 분석

◦ 사업 실시 전과 후 시나리오에 대한 대안 비교

◦ 환경사회 측면에서 설계 시나리오별 대안 비교

□ ESIA 스코핑(Scoping) 실시

◦ 대안별 환경(수질, 대기, 토양, 생활환경, 자연환경 등 포함) 및 사회분야(토지수용 및 이주, 빈곤, 원주민 등) item에 대한 중요도 판단

- 주요 환경사회 item에 대한 현황 제시

- 건설 전/건설 중 및 운영단계별로 나누어 중요도 표시

◦ Scoping 과정에서 이해관계자 협의 (필요시)

- 이해당사자(NGOs, 영향주민, 종사자, 관련 정부기구 등) 앞 환경·사회적 영향에 대한 공청회 또는 면담 실시

- 민원사항 확인 및 민원처리절차 마련

□ 주요 환경사회 item에 대한 계획 수립

◦ 주요 환경사회 item에 대한 현장 조사 계획 수립

◦ 주요 환경사회 item에 대해 사업단계별 예상되는 부정적 영향과 그에 대한 저감방안 및 관리계획 제시

◦ 모니터링 방법(모니터링 지표), 장소, 주기, 비용, 책임 주체 명시

[Part I] 기타 EDCF 심사를 위한 항목

□ 구매계획

◦ 한국산 기자재 및 용역의 공급가능성, 외화가득효과

- Local 및 제3국산 구매 자재･장비･공사 등 필요성 및 금액

- 도급사(건설사 등) 수주 경쟁력, 제작사 국제 경쟁력 등

◦ 국내 기업의 사업수행능력 및 참여가능성, 현지 참여가능 기업 및 기술 수준 등

◦ 한국기업의 유사사업 국제경쟁력 분석

◦ 컨설턴트 및 본구매의 입찰방식 검토 및 구매패키지 제시

□ 성과관리 프레임워크(Logical Framework) 수립(1차 출장완료 후 초안 제출)

◦ 중장기 효과, 산출결과, 산출물 간의 결과논리(Result Chain)가 반영된 성과지표* 선정

* 목표 달성여부, 진전사항을 측정할 수 있는 SMART(Specific, measurable, achievable, relevant, time bound) 지표 수립

◦ 기초선(baseline)설정을 위한 문헌조사 및 데이터 수집

◦ 기초선 수준, 유사사업 평가 결과 등을 토대로 목표치(target) 설정

◦ 주요 리스크 검토 및 대응방안 수립

* 사업 시행 단계에 따른 지표의 모니터링 방안과 향후 성과관리 상 발생할 수 있는 문제점 및 대처방안 포함

◦ 중간보고회 이전 성과관리 프레임워크 초안 제출 및 중간보고회 (또는 그 이전) 당행(경협평가부)과 의견 교환 세션 실시

성과관리 프레임워크(Logical Framework)

구 분	지표			기초선			달성목표치			가정/리스크
중장기효과1)
산출결과2)
산출물3)
모니터링 지표
지표(예시)	달성률(예시)
	기초선		1년			2년		3년			종료선
컨설턴트 고용
본구매 구매계약
건축
기자재
연수
...
사업목표 : 주 수혜자 :
지표별 정의 및 관리
지표명		정의			자료원/ 자료수집방법				지표관리담당자

주 : 1) 사업완공 후 발생한 모든 효과(의도하지 않은 부정적 효과 포함)

주 : 2) 사업 완공 시 산출물을 통해 주 수혜자가 누리는 직접적 혜택

주 : 3) 물리적인 사업 완공 시 주 수혜자 앞 지원되는 생산물 및 서비스

□ OECD DAC 정책마커 분석

◦ 리우마커 영향분석 및 관리계획 수립

- 기후변화 완화/적응 요소 포함 가능성 및 적정성 분석, 관련 현지법 조사

· (기후변화 완화) 입주시 친환경 기업에 인센티브 부여, 입주기업 앞 ESG 가이드라인 수립, 관련 컨설팅 실시, 저탄수 운영 매뉴얼 배포, 고효율 조명 대여, 컨벤션센터에 기후변화 관련 컨퍼런스 기획·도입

· (기후변화 적응) 기후변화 적응 관련 컨퍼런스 개최 지원, MICE 내 긴급 재난대피소 설치, 기후변화 대응 재난시스템 도입

◦ 젠더마커(양성평등) 영향분석 및 관리계획 수립

- 상업지구 운영방침에 여성기업 최소비율 또는 기업내 직급별 여성 고용 최소비율 설정, 컨벤션센터의 양성평등 관련 행사에 우선권부여 등

◦ 기타 정책마커* 검토

* 환경지원, 민주적/포용적 거버넌스, 모자보건증진, 재난위험 경감, 장애인 권리, 영양

- 컨벤션센터의 기후변화 대응 관련 행사 유치 지원

- 내진설계, 대피소 설치, 재난위험 관련 교육·훈련 실시

- 경사로 등 장애인 배려시설 설치

◦ 해당 사업의 마커부여 가능성 검토 및 성과관리 프레임워크 반영

□ 그린인덱스 사업기획

◦ 동 사업의 기후변화대응 사업 여부 판별 및 방안 제시

◦ 4개 평가지표에 따른 사업분석 및 사전 평가

- 기후변화 완화

· 화석연료 대체, 에너지 효율화

· 탄소회수, 이용 및 저장

- 기후변화 적응

· 개인의 기후변화 대응력 강화, 인프라 회복력 증진

· 자연자원 생산성 제고, 자연 생태계 보존

- 순환경제

· 자원투입 절감, 자원순환율 제고

- 사회적 포용성

· 소득격차 해소, 지역균형 발전, 양성인지 제고

◦ 동 사업의 기후 요소를 적극 반영하도록 하는 방안 제시

- 그린인덱스 평가점수 제고 방안

· (화석연료 대체) 태양광을 통한 전력 및 온수 공급 가능성 검토

· (에너지 효율화) 에너지 절약 설비·기자재 공급 가능성 검토

· (인프라 회복력 증진) 설계에 기후요소(재난대피소 등) 반영 가능성 검토

· (자원 순환율 제고) 기존시설 또는 재활용, 폐자원 활용 가능성 검토

· (소득격차 해소) MICE 구축에 따른 저소득층 또는 기후변화로 인해 생계가 어려워진 가계의 예상 수혜 수준 분석

- 성과 프레임워크 설정시, 그린인덱스를 확인할 수 있는 지표 제시 등

□ 지속가능개발목표(SDGs) 기여도 검토

(참고) SDGs 17개 목표

① 빈곤 종식, ② 기아 종식 ③ 보건, ④ 교육, ⑤ 양성평등, ⑥ 물과 위생, ⑦ 에너지, ⑧ 경제성장, ⑨ 지속가능한 인프라 및 산업화, ⑩ 불평등 해소, ⑪ 지속가능도시, ⑫ 지속가능소비･생산, ⑬ 기후변화 대응, ⑭ 대양･바다･해양자원, ⑮ 생태계･생물다양성, ⑯ 평화･제도(거버넌스), ⑰ 이행수단 및 글로벌 파트너십

< 주요 사업 분야별 목표 (예시) >

마 킹		마킹 사유
SDG 목표	세부 목표
17개 목표 중 선택 (다수 선택 가능)	SDG 목표별 세부목표 중 선택 (다수 선택 가능)

□ 사업 타당성 총괄 분석(총괄 논증)

◦ 사업 규모 및 범위의 적정성

◦ 사업비의 적정성(기작성 F/S 보고서 내용 및 타 유사사업과 비교)

◦ 기술적, 경제적, 재무적 및 정책적 타당성

◦ 환경사회적 타당성

◦ 사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

◦ 사업의 적정성 및 기대효과

◦ 사업지역의 적정성

◦ 사업규모 및 범위의 적정성

◦ 사업 기간의 적정성

◦ 추정사업비(외화 및 현지화 구분)의 적정성(수원국, 인접국 등의 유사사업 규모 및 사업비와 비교 검토)

◦ 부지매입 및 거주자 이주계획 검토

◦ 사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

◦ 대상사업의 지속가능성

◦ 경제성 및 민감도 분석

◦ 환경영향관련법 및 진행상태, 환경영향등급 등 검토

◦ 대상사업의 주민이주, 토지보상 등 규정

◦ 사업수행 여건, 위험요소 분석 및 대응방안

□ 유무상 융합 사업기획

◦ 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회에 유관 무상원조 시행기관 초청 (유관기관 리스트 제공 예정)

◦ 동 사업을 위한 무상원조 시행기관과의 협업방안 협의 및 도출

◦ 무상원조 시행기관과 협의된 연계방안이 없는 경우에도 아래 내용을 보고서에 포함

- 착수/중간/최종보고회 초청 및 참석한 무상기관 리스트

- 참석 무상기관과의 연계방안 논의 내용 등

□ 기타 EDCF 심사를 위한 F/S 항목

◦ 사업수행을 위해 요구되는 선결절차 기재(예, 정부승인, 부지확보 등)

◦ 사업추진 시 예상되는 문제점 및 해결방안 제시

◦ 기자재, 장비 등 가격조사(견적 입수 내역) 내역(별도 제출)

◦ 기타 EDCF 심사수행에 필요한 내용

◦ 동종분야 사후평가의 교훈 및 제언사항

※ 과업내용은 F/S 수행 과정에서 당행 및 수원국 사업실시기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음

5. 과업 수행방법

□ 과업수행 원칙

◦ 본 과업은 관련 규정 및 계약조건과 당행(“발주자”)의 지시에 따라 수행하여야 함

◦ 사업수행책임자(PM)는 모든 현장활동 및 출장결과를 포함한 당행 및 사업실시기관과의 모든 회의에 참석하여 보고해야 하며, 전 과업범위에 대해 검토 및 감독을 이행해야 함(원칙적으로 기타 인력이 주도하여 보고 불가)

- 당행 및 사업실시기관과의 주요한 업무관련 모든 연락(메일, 전화 등)의 Contact Point는 PM이 주도(부득이한 경우 주요분야 분책이 대행)

◦ 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적·기술적 제반비용과 문제처리는 계약상대자가 부담함

◦ 과업은 현장 중심으로 수행되어야 하며 주요 결과물은 수원국 정부 및 사업실시기관과의 협의 및 합의가 도출되어야 함

- 수원국 사업실시기관 동의 증빙자료를 포함한 최종보고서 제출을 과업 완료시점으로 함

- 현지출장 및 상주업무와 관련하여 잔금지급 전까지 개인별 ‘출입국에 관한 사실증명서’ 원본 및 ‘여권 해당부분 사본’ 제출

- 현장조사, 자료수집, 유관기관 및 사업실시기관과의 실시간 협의를 위해 제안서에 지정된 1인이 현장에 3M/M 이상(90 calendar-day) 상주*(주요 현장조사기간 중 상주 필수)

* 상주기간 중 국내보고를 위한 귀국은 일수에서 제외하며, 현지상주 최소단위는 1개월 이며 2인 이상 분할로 수행은 가능

· 현지상주인력은 전담인력이 실시함이 원칙이나, 제안서 ‘인력운영계획’에 별도 제안시에는 비전담인력도 참여가능. 단, 과업일시중지사유 발생시 또는 당행과 사전 합의시를 제외하고는 현지상주 최소단위는 1개월이며 분할상주가 가능하나 동시에 1인만 상주(이 경우 추가 항공료는 용역사 부담)

- PM 4회 이상, 분책 각 2회 이상, 전담참여자 각 2회 이상(환경사회, 기후변화 분야 인력의 경우 각 1회 이상) 현지출장(착수보고, 현장조사, 중간보고, 사업비를 포함한 사업계획(안) 협의, 최종보고 등) 필요 및 단계별 주요 협의내용에 대한 회의록 작성

· 비전담 인력은 F/S 수행계획에 따라 현장조사, 계획수립(설계 포함) 및 주요 내용 협의 등에 필요한 출장 실시

· 출장인력은 보고회 참석 및 현장조사 보완업무를 수행해야 함

- 출장과 현지상주 일수는 구분하여 산정할 것

- 성과 도출을 위한 추가적인 현지출장 비용은 계약상대자가 부담함

◦ 주요 현장조사(경과지, 측량, 지반 등)는 사업실시기관과 협의가 완료된 후 실시해야 하며, 반드시 중간보고서 제출 전 완료되어야 함.

- 각종 법규확인, 적용 제세공과금 조사, 각종 현장조사[경과지 조사, 측량, 지형/지반, 환경/사회(현황조사, 토지수용, 주민이주범위 조사 등] 지원을 위한 현지업체 활용 가능(현지업체 고용시, 당행 앞 하도급 계약체결 사전 승인 필요)

- 따라서, 과업 초기(1~3개월차) 주요사항(경과지, 사업부지 등)을 협의하고 현장조사업체와 계약체결 필수

- 현장조사를 위한 하도급 활용은 필수이며, 착수보고서 제출 시 상세 현장조사(경과지, 측량, 지반조사 등) 및 세무법인 활용계획 제출

◦ 국외출장을 위한 여행자 보험을 가입토록 하고, 보상한도 및 범위가 일정 수준 이상으로 설정될 수 있도록 함. 아울러, ‘국외 체류시 안전매뉴얼’에 따라 안전지침, 위기상황대처 및 여행경보제도 안내를 통한 안전관리 자체 교육함

◦ 해당 과업의 특성상, 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 과업 수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 과업범위에 포함시킬 수 있음

◦ 선정된 제안사(이하 “수급자”)의 과업수행책임자는 본 과업에 따른 모든 업무를 발주자와 (필요시 사업실시기관과) 협의하여 시행하여야 하며, 용역 성과품에 관한 사항은 발주자와 협의 후 발간하여야 함

◦ EDCF 사업 특성상 수원국 중요사항 결정지연 등으로 인해 과업지연이 빈번함을 인지하고, 과업지연 예상시 당행 앞 과업중단 요청 필요. 이로 인한 과업기간 연장시 용역비 추가지급은 없으며, 과업기간 연장에 따른 적절한 인력투입계획 수정이 필요함

□ 품질 및 하자보증

◦ 수급자는 성과물의 품질을 높이기 위하여 당행의 요구를 최대한 반영하여야 함

◦ 특히, 과업수행 과정 및 수요분석 및 적용기술 등 성과물의 적정성 검증을 위해 당행은 과업수행기간 내 별도 자문위원의 선임을 요구할 수 있음

◦ 수급자가 공급한 성과물의 품질 및 하자보증기간은 12개월로 함

- 최종보고서 제출 후 수원국 승인 중 요청에 의해 수급자 앞 일부 내용의 수정을 요구할 수 있음

◦ 성과물 품질 제고를 위해 수급자 비용으로 관련 분야 전문가 3인 이상으로 구성된 외부자문위원단*을 구성해야 하며, 당행 참관하에 주요 보고서에 대한 자문회의(중간보고회 및 최종보고회)를 개최해야 함(자문위원 선정 시, 당행 사전 동의 필요)

* 자문위원 선정은 과업수행 단계에서 실시(기술제안서에 자문위원 제안 불요)

◦ 각종 보고서의 영문본 작성은 수급자 자체 수행이 가능하나, 당행검토 후 전문 번역업체/번역가 앞 의뢰를 지시할 수 있음.

□ 책임 및 보안

◦ 과업 수행 과정 중 취득한 정보에 대해 보안을 유지하여야 하며, 이에 따른 문제 발생 시 계약상대자가 모든 민·형사상 책임을 짐

◦ 과업에 의해 개발된 산출물의 원본 파일을 제출하여야 하며, 수급자는 사업 결과물을 다른 어떤 목적(논문, 학술지, 보도자료 포함)으로도 활용할 수 없음

□ 과업수행계획서(영문) 작성 및 변경

◦ 계획서 내용

- 과업목표 및 범위 : 제안요청서 및 수급자의 기술제안서

- 과업수행기간 : 착수일로부터 8개월

- 추진 일정계획 및 보고계획

- 계약협상 시 과업수행계획서에 포함하기로 상호 협의된 사항

◦ 발주자의 승인

- 수급자는 과업수행계획서에 대한 발주자의 승인을 얻은 후 과업에 착수하고, 부득이한 사유로 변경하고자 할 경우에도 발주자의 승인을 얻어야 함

6. 성과품 납품 및 보고서 관련 사항

□ 성과품 납품

◦ 성과품은 계약내용 및 발주자가 제시한 형식에 맞추어 제출하여야 함

◦ 발주자는 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 경우 추가 산출물을 요구할 수 있으며, 수급자는 이에 응하여야 함

◦ 산출물의 규격은 A4(좌철)로 함(요약본 별도)

□ 보고서 제출 일정 및 부수

보 고 서	제출 일정	비 고
착수보고서 (Inception Report)	계약체결 후 7일 이내	(국문, 영문)
중간보고서 (Interim Report)	착수 후 4개월 이내	(국문, 영문)
최종보고서(초안) (Draft Final Report)	착수 후 7개월 이내	(국문, 영문, 요약본도 작성)
최종보고서 (Final Report)	착수 후 8개월 이내	(국문) 10부 + USB 메모리 6개 (영문) 20부 + USB 메모리 10개

보고서 목차(국문 및 영문) : 착수 후 1개월 이내 Soft Copy제출

최종보고서 제출시, 사업범위 및 추정사업비(currency portion 포함) 등 사업의 주요 사항에 대해 사업실시기관 앞 사전 동의를 득하고 관련 증빙자료를 함께 제출하여야 하며, 증빙자료의 내용 및 형식은 발주자와 사전협의를 통해 확정함

최종보고서는 현장조사 자료, 사업비(엑셀), 사업비 근거자료, 경제·재무·상업성 검토 엑셀 파일과 전체 요약본(30쪽 이내)을 포함

※ 보고서 제출부수 및 USB 메모리 제출개수는 당행, 사업실시기관 및 수급자와 별도로 협의하여 조정 가능

Ⅳ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 작성 관련 유의사항

□ 일반사항

◦ 제안참가 업체는 제안요청서의 내용을 충분히 숙지하고 이를 준수하여야 하며, 본 제안요청서상 요구하는 과업내용과 이에 대한 용역결과가 제시되어야 함

◦ 입찰공고 및 제안요청서에 명시되지 않은 기타의 사항에 대하여는 당행에서 정하는 바에 따름

◦ 제안서에 서명날인이 필요한 곳은 제안사나 그의 권한을 적법하게 위임받은 대리인이 자필로 서명하거나 입찰참가 등록 시 제출한 인감(또는 사용인감)으로 날인되어야 하며, 행간에 쓴 것이나 지운 것, 덮어쓴 것 등은 정정 날인되었을 경우에만 유효함

◦ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 당행의 입증요구에 입증하지 못하는 경우 평가대상에서 제외함은 물론 계약 후에도 계약해지와 함께 인적․물적․기간적 손실에 따른 손해배상이 청구될 수 있음

◦ 제안서는 본 지침서의 양식 및 기재순서에 따라 작성하여야 하며, 각 페이지에 일련번호를 부여하고 목차항목에 해당 일련번호 기재

◦ 제안서의 내용 중 평가항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않은 경우 해당사항이 없는 것으로 간주

◦ 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 제출한 후 수정이나, 추가 또는 대체할 수 없음

◦ 모든 평가항목의 평가 적용 기준시점은 따로 정하지 않는 한 공고일자를 기준으로 함

◦ 제안서의 내용 중 기술자의 경력사항, 기관실적에 대하여 원본 1부는 발행기관이 확인 날인한 것으로 제출(‘원본대조필’한 사본도 인정)

◦ 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, ‘할 수도 있다’, ‘고려할 수 있다’ 등의 추상적인 표현은 제안하지 않은 것으로 간주

◦ 제안서 제출자는 대표이사 또는 그 위임을 받은 자로 함

◦ ‘재무구조 및 경영상태’ 평가를 위한 신용평가등급 확인서 제출(‘원본대조필’)

◦ 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 하며 제출된 평가 자료는 일체 반환하지 않음

◦ Pandemic, 대내외적 리스크, 등 및 수원국 상황을 고려한 수행계획(실행계획, 조사방법, 사업실시기관 협업 및 Local 기업 활용방안 포함) 및 조직·인력 운용 계획 등이 제안되어야 함*

* 현지 하도급 활용은 필수이며, 현지 하도급에 대한 아래 내용을 제안서에 포함 필요

- 현지 하도급 활용 및 협업 방안 제안 필요(단순 자료수집 및 현장 조사외 주요 사안에 대한 사업실시기관과의 협의, 계획수립 등에 현지 협력사의 적극 활용을 권장)

- 조직 및 인력 현황(서식4, 5 참조)

- 사업수행능력(유사사업 및 사업실시기관 발주 사업 등 주요 수행경험 기술)(서식6 참조)

- 투입 인력 이력서 첨부(서식9 참조)

□ 제안서의 서명 및 효력

◦ 제출된 제안서의 내용은 당행이 요청하지 않은 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시의 계약조건의 일부로 간주함

◦ 제안내용에 대한 확인 필요 시, 입찰참가자에게 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

◦ 본 제안에 의한 성과물은 별도의 명시가 없는 한 당행이 소유권을 가짐

□ 보안 요구사항

◦ 제안자는 당행으로부터 배부받은 제안요청서, 각종 자료 및 제안 과정에서 얻은 정보를 당해 제안 외의 목적으로 사용할 수 없음

◦ 용역수행 중 또는 용역완료 후 용역에 관한 일체의 사항이 외부에 누설되는 일이 없도록 당행의 보안규정을 철저히 준수하여야 하며 용역의 성과물을 사전승인 없이 용역 목적 이외에 사용할 수 없음

◦ 기타 보안과 관련되는 사항이 발생되었을 경우 또는 발주처가  요구하는 경우에는 이에 따라야 함

◦ 낙찰자는 계약 시 용역 참여인원 전원에 대한 보안교육 및 보안 관리에 철저를 기하도록 하고 용역 착수와 동시에 보안각서를 자필로 작성하여 서명한 후 제출하여야 함

2. 제안서 목차

I. 사업내용 이해 1. 사업의 목적 및 범위 2. 대상국 현황 및 관련 개발계획 3. 사업의 기대효과 II. 용역수행계획 1. F/S 실행계획 및 관리방안 가. F/S 추진전략 및 운영계획 나. 추진일정 및 보고계획 다. 위험요소 분석 및 대응방안 라. 사후관리 및 보안준수 방안 2. 항목별 조사방법 및 현지 협력사 활용계획 가. 분야별 세부 조사계획 및 방법 나. 기술적ㆍ경제적 타당성분석 방안 다. 현지 하도급사 활용 계획 3. 수원국 소통계획 가. 현지상주 계획 나. 수원국과 협의채널 수립 방안 4. 기후변화영향 대응체계 적용계획	III. 인력 현황 및 운용계획 1. 인력운용계획 가. 과업수행조직(실제참여자 기준) 나. 업무분담계획 다. 현지 및 국내 인력투입계획 2. 투입인력의 경험 및 능력 가. 유사사업 수행경험 나. 대상국 경험 다. 주요경력 및 학위 라. 어학능력 3. 영문보고서 전문인력 및 작성계획 가. 통번역전문가 자격 및 경력 나. 영문보고서 작성 및 감수 계획 다. 영문보고서 작성 관련 제안사항 IV. 추가 제안 1. 원조효과성 제고 방안 2. 사업범위 관련 의견 또는 제안 3. 사업별 특수사항 관련 제안 등

3. 제안서 항목별 작성 방법

1) 제안서 본문

작 성 항 목		작 성 내 용	비 고
Ⅰ. 사업내용 이해
1. 사업의 목적 및 범위		- 제안요청 내용을 명확하게 이해하고, 본 사업의 목적, 범위를 요약하여 기술
2. 대상국 현황 및 관련 개발계획		- 대상국 현황/개발계획/정책 및 해당 산업 분야 동향 기술
3. 사업의 기대효과		- 사업의 기대효과를 요약하여 기술
Ⅱ. 용역수행계획
1. F/S 실행계획 및 관리 방안
가. F/S 추진전략 및 운영계획		- 본 사업 및 과업 특성, 제한된 시간, 예산 및 인적자원을 고려한 체계적인 용역 추진전략 및 운영 방안 등
나. 추진일정 및 보고계획		- 과업별 수행계획, 세부 추진 및 보고 일정
다. 위험요소 분석 및 대응방안		- 과업수행 중 발생 가능한 위험요소 분석 및 해결방안 제시
라. 사후관리 및 보안준수 방안		- 수행 일정, 인력, 위험, 보안, 각종 보고서 및 성과물 등 관리방안 제시 - 각종 보고 계획(당행, 수원국 사업실시기관 등) - 수원기관 기술자 또는 현지 업체 기술자에 대한 우리나라 기술홍보 - 용역 관련 자료에 대한 품질 및 하자 보증 방안 - 보안 준수 방안 등
2. 항목별 조사방법 및 현지 협력사 활용계획
가. 분야별 세부조사 계획 및 방법		- 과업별 세부조사 방법 및 계획 - 본 과업수행을 위해 필요하다고 판단되는 자료 확보 계획
나. 기술적․경제적 타당성 분석방안		- 기술적, 재무적/경제적, 정책적 타당성 분석방안 제시
다. 현지 하도급사 활용 계획		- 자료수집, 현장조사, 시설기본계획 수립, 사업비 산출 등을 위한 현지 협력사 참여의 필요성 - 구체적인 수행업무 및 협력사 관리 및 활용방안 - 현지 인력(local staffs) 운용계획 - 해당 기관의 경험, 보유인력 및 수행능력 등 기술
라. 현장조사 방안 및 국내외 협력기관 활용계획		- 효율적인 과업수행 및 성과물의 품질제고를 현장조사방안 및 계획을 제시하고, 활용 가능한 현지 및 국내 기관과의 협업내용 등 기술
3. 수원국 소통계획
가. 현지상주 계획		- 상주 제안인력의 경험 및 역량, 주요 수행업무 등 현지 활동계획, 상주 일정
나. 수원국과의 협의 채널 구축 방안		- 사업실시기관 의사결정 체계, 이해당사자 간(수은, 컨설턴트, 사업실시기관, 사업 수혜자, 영향주민 등) 협의채널 구성 및 정기/비정기 활동계획 등
4. 기후변화영향 대응체계 적용계획		- 기후위험평가, 기후위험경감계획 및 성과측정방안 수립 등
Ⅲ. 인력 현황 및 운용계획
1. 인력운용계획
가. 과업수행조직	- 참여 조직도 및 전문가 투입계획 · ①환경사회, ②경제재무 ③기후변화, ④비전담 중 일부 전문가(건축, 기계, 전기, 정보통신, 통번역)는 타 기관의 외부전문가 활용 가능함. 이들에 대한 관리와 성과물 책임 및 성과물에 대한 사후지원은 용역수행 계약자 책임)		서식 7
나. 업무분담계획
다. 현지 및 국내 인력투입 계획	- 분야별, 단계별 과업수행을 위한 국내 및 현지 인력투입 세부 계획(Man-Month 포함) - 현지출장계획 및 상주인력 제시 - 현지 하도급 인력 투입 계획 포함
2. 투입인력의 경험 및 능력
가. 유사사업 수행경험	- 본 과업 내용을 명확히 이해하고, 분야별 실제 투입인력(현지 하도급 투입인력 포함)의 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요경력, 학위 및 어학 능력 등 과업수행에 필요한 사항 * 별첨서식에 목차 내용 포함되게, 상세하게 기술 - 증빙서류는 별첨(유사사업 수행실적 증빙서류에는 각 유사사업 기재 순서대로 표시 후 번호 부여) - 참여인력의 이력 사항<서식 9>은 PM, 분야별 책임자와 전담참여자, 통번역 전문가, Local Team Leader를 제외한 인력에 대하여는 요약 기재 가능하며, 최근 10년간 유사사업 수행경험 기술		서식 8 서식 9
나. 대상국 경험
다. 주요 경력 및 학위
라. 어학 능력
3. 영문보고서 전문인력 및 작성계획
가. 통번역전문가 자격 및 경력	- 통번역 전문가의 자격 및 경력, 통번역 전문가 활용계획 등 기술
나. 영문보고서 작성 및 감수계획	- 성과물의 번역 및 검수절차, 단계별 일정 및 번역품질(해당 섹터 및 개발협력 분야 전문용어 적정성 포함) 제고를 위한 감수계획 등을 영문으로 작성
다. 영문보고서 작성 관련 제안사항	- 각 분야별 참여인력을 활용한 단계별 영문보고서 작성방안 및 제안사항 등을 영문으로 작성
Ⅳ. 추가 제안
	- 원조의 효과성 제고 방안, 완공 후 사업의 지속가능성 향상 방안, TOR에 대한 의견/제안사항, 사업 성공을 위해 필요한 혁신적‧독창적 제안/과업수행방안, 사업별 특수사항 등

2) 제안서 첨부물

작 성 항 목	작 성 내 용	비 고
1. 일반현황 및 연혁	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 자본금 및 매출액 (최근 3년 평균치) 등을 정확히 작성	서식 4
2. 조직 및 인력현황	- 제안사의 조직 및 인원 현황 작성	서식 5
3. 회사 유사사업 수행실적	- 제안사의 회사 유사사업 수행실적 (용역구분, 용역명, 개요, 기간, 계약금액, 발주처 등) 작성	서식 6
4. 과업수행 조직 및 업무분장	- 제안사의 실제 투입인력을 기준으로 과업수행 조직 (참여인력, 각사별 업무분장, 투입인력별 투입 Man-Month 등) 작성	서식 7
5. 참여인력의 자격사항 요약	- 참여인력의 자격사항 (분야, 성명, 연령, 기술등급, 중복건수 등) 작성	서식 8
6. 참여인력의 이력사항	- 전체 참여인력에 대해 최근 10년간 유사사업 수행경험, 대상국 경험, 주요 경력 및 학위, 어학능력 등 이력사항 제출 ※ 통번역 외 비전담 참여인력은 요약기재 가능(제출은 필수) ※ 각종 증빙서류는 별첨 (유사사업 수행실적 증빙서류에는 각 유사사업 기재 순서대로 표시 후 번호 부여)	서식 9

4. 기술제안서 작성지침

□ 제안서 본문과 첨부물은 합쳐서 양면 제본하여 한 권으로 제출

◦ 제안서 본문(양면 16장 이내, 제목·목차·간지 등 제외) 및 제안서 첨부물(양면 18장 이내)은 합하여 한 권으로 제출

◦ 제안서 첨부물은 (별첨)의 제출서류목록 중 「서식 4, 5, 6, 7, 8, 9」를 의미하며, 다만 서식 9(참여인력의 이력사항)는 참여인원을 고려 첨부물 18장 제한에 포함하지 않음

◦ 제안서 본문 및 첨부물은 ᄒᆞᆫ글(hwp)로 작성하며, 글자크기 본문기준 13포인트, 글꼴 휴먼명조(영문글꼴 Times New Roman), 줄간격 160%, 좌우여백 25mm, 상하여백 각각 20mm, 15mm로 작성

◦ 표 안의 글자크기는 12포인트 사용 가능(단, 서식6, 서식 9, 서식 24는 글자크기의 제한 없음)

◦ A4 용지(백상지, 일반 복사용지) 세로로 작성

- A4로 작성하지 못하는 경우 A3를 A4 사이즈로 접어서 붙이며, 이 경우 2페이지로 간주(A3 최대 6페이지(3장)까지 허용)

◦ 작성항목 중 해당사항이 없는 경우, 작성항목 목차는 그대로 유지하고, 내용 작성 부문에 “해당사항 없음”으로 기술하여야 함

□ 각종 증빙서류는 별권으로 제본하여 제출(바인더 등 부피가 큰 도구사용금지)

◦ 사업수행실적(회사실적) 관련 실적증명서는 발주처가 발급한 실적증명서 또는 해외건설협회 등 관련기관이 발급한 증명서를 의미함.

- 단, 민간거래 실적은 발주처의 실적증명서와 함께 용역계약서와 세금계산서 첨부

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 실적증명서는 서식 6의 유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 용역 종류, 용역기간, 지분금액에 형광펜으로 표시

◦ 해당분야 조직․인력․기술․지식 보유현황 관련 증명서는 관련 협회 또는 기관에서 발급한 경력증명서를 의미함.

- 단, 분야 특성에 따라 등록되지 않은 자는 본 제안요청서에 첨부된 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’을 참조하여 제안사의 대표이사가 날인한 이력서, 경력증명서, 재직증명서, 발주처 등이 발행한 유사사업 수행증명서 등을 이용하여 평가

- 경력증명서는 사본(인감으로 원본대조필)도 가능

- 경력증명서는 서식 9의 국내외 유사업무 수행경험 실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착 및 사업명, 분야, 발주자, 담당업무에 형광펜으로 표시

□ 각종 증빙서류는 서류 각 장에 원본대조필(인감 날인)해야 하는 것이 원칙이나, 증빙서류 원본대조필 확인 문서(서류 List 포함)를 제출함으로써 대체 가능

□ 제안서는 과다한 비용이 지출되는 오프셋 인쇄 등 금지(컬러프린터 출력은 가능하나 컬러 인쇄물은 용지 크기에 관계없이 단면 3페이지 이내로 제한하며, A3의 경우에도 1페이지로 간주하고 인쇄용지는 일반 사무용지(A4 : 80g/m2이내, A3 : 75g/m2이내)로 한정)

□ “입찰참가자격 증명서류” 및 “기타 서류”는 서류 형태(낱장)로 제출(제안서 및 증빙서류 등에 포함하여 제본하지 말 것)

5. 가격제안서 작성방법

□ 가격제안서는 국가종합전자조달시스템(조달청 나라장터)에 전자입찰서로 제출하며, 제출 시 제안금액에 대한 상세내역(산출내역서 및 산출근거)을 첨부

□ 제안금액은 부가가치세 등 제세를 포함하여 제시(면세사업자라 하더라도 부가가치세를 포함하여 제시)

□ 제안금액 상세내역 산출내역서 작성방법

◦ 직접인건비, 제경비, 기술료, 직접경비를 구분하여 작성하고 세부 산출근거 제시(중도 정산사유 발생시 근거자료)

- 제경비 : 직접인건비의 110% 이내

- 기술료 : (직접인건비 + 제경비)의 40% 이내

- 직접경비 : 출장경비, 자료수집비, 보고서 작성비 등 실경비

별첨 : 제출서류목록 및 관련 서식

(별 첨)

제출서류목록

구   분

제   목

부수

비   고

담당

①

입찰참가

자격증명 서    류

입찰 대리인 재직증명서 사본

1부

대표사

사용인감계

1부

각사

법인인감증명서

1부

각사

법인등기부등본

1부

각사

입찰참가신청서

1부

「서식 1」 참조

대표사

서약서

1부

「서식 2」 참조

각사

입찰보증금 지급각서

1부

「서식 3」 참조

공동

사업자등록증 사본

1부

원본대조필

각사

조달청 경쟁입찰참가자격 등록증

1부

나라장터 홈페이지

각사

국세 및 지방세 완납 증명서

1부

각사

신용평가등급 확인서

1부

원본대조필

각사

②

기술

제안서

기술제안서 본문

8부

USB 메모리 1 Set 별도 제출

(PDF 및 한글(.hwp) 형식)

-

첨

부

물

일반현황 및 연혁

「서식 4」 참조

각사

조직 및 인력 현황

「서식 5」 참조

각사

유사사업 수행실적

「서식 6」 참조

각사

과업수행 조직 및 업무분장

「서식 7」 참조

공동

참여인력의 자격사항(요약)

「서식 8」 참조

공동

참여인력의 이력사항

「서식 9」 참조

공동

③

증빙 서류

경력증명서(관련협회 등 발행)

1부

원본대조필

※기술제안서와

별권으로 제본

-

기술용역이행 실적증명서

1부

④

기타 서류

청렴계약 이행서약서

1부

「서식 12」 참조

각사

독립성 확약서

1부

「서식 13」 참조

각사

정보 비공개 동의서

1부

「서식 14」 참조

각사

개인정보 수집·이용 동의서

1부

「서식 15」 참조

각사

퇴직자 영입현황 확인서

1부

「서식 16」 참조

각사

신규 입찰자 확인서(최근 2년 실적)

1부

「서식 17」 참조

각사

신규 입찰자 확인서(계약실적)

1부

「서식 18」 참조

각사

EDCF 부정당업자 제재(제재중)

1부

「서식 19」 참조

각사

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

1부

「서식 20」 참조

각사

인권보호 서약서

1부

「서식 21」 참조

각사

조세포탈 여부 확인 서약서

1부

「서식 22」 참조

각사

제안서 작성지침 미준수 자가진단표

1부

「서식 23」 참조

공동

정량평가 자가진단표

1부

「서식 24」 참조

※ 엑셀파일 별도송부 예정,

USB에 저장하여 제출

공동

공동수급표준협정서

(공동이행방식)

1부

기획재정부 ‘계약예규’,

8. 공동계약운용요령 참조

공동

중소기업 확인서(중소벤처기업부 발급)

1부

중소기업인 경우에 제출

각사

장애인기업, 사회적기업, 여성기업, 창업기업 확인서(해당부처 발급 및 확인문서)

1부

해당 기업인 경우에 제출

각사

당행 컨설턴트 Pool 등록 확인자료

1부

EDCF 홈페이지 컨설턴트 정보관리 캡처화면 제출

각사

※ 신청서류 중 사본 제출시에는 “원본대조필”이라고 명기하고, 인감(또는 사용인감)을 날인하여 제출하고, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

※ ④기타서류 중 해당 없는 경우는 ‘해당없음’을 표시하고 제출(임의 누락 금지)

※ 법인인감증명서 및 법인등기부등본은 최근 3개월 이내 발급된 서류 제출

※ “①입찰참가자격” 및 “④기타”는 서류형태, 반면 “②기술제안서”는 책자, “③증빙서류”도 책자로 제출

(서식 1)

입 찰 참 가 신 청 서

신

청

인

상호 및 법인명칭

법인등록번호

주            소

전 화  번 호

대     표     자

생 년 월 일

입찰

개요

입찰공고(지명) 번호

-

입 찰  일 자

입  찰  건  명

「사 업 명」F/S 용역

입

찰

보

증

금

납          부

․보증금율 : 50/1,000이상

․보 증 액 : 입찰예정금액의 1,000분의 50이상

․보증금납부방법 : (작성예시) 입찰보증금 지급각서 제출

납 부 면 제 및

지  급  확  약

(작성 예시, 불필요시 삭제 요망)

․본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 은행에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 확약합니다.

입찰참여

대리인․사용인감

본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성 명 :

생년월일 :

본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감          (인)

귀 행의 「사 업 명」F/S 용역 입찰에 참가하고자 귀 행의 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류

2. 기타 공고로서 정한 서류

20  년  월   일

상호 및 법인명칭 :                                                                  신청인 :            (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 2)

서  약  서

회사명:

주  소:

본인은 「사 업 명」F/S 용역에 참가함에 있어 귀 은행이 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .   .    .

상호 및 법인명칭	:

대표자	성         명	:              (인)

생   년   월  일	:

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 3)

입찰보증금 지급각서

입 찰 건 명	: 「사 업 명」 F/S 용역

입 찰 일 자	: 20  .   .   .

입찰예정금액	: 사업예산 이내 (서식 10 및 11에 따름)

입찰 보증금	: 입찰예정금액(또는 입찰예정금액의 지분율 분담분에 해당하는 금액)의 1,000분의 50이상

당사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조에 의한 귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 즉시 현금으로 납부할 것을 확약하며, 이에 각서를 제출합니다.

20  년   월    일

주          소 :

상호 및 법인명칭 :

대    표    자 :             (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

※ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조(입찰보증금)

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제3의 규정에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 법 제9조 제3항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

(서식 4)

일반현황 및 연혁(참여사)

회  사  명

대 표 자

사 업 분 야

주       소

사업자등록번호

전화번호

회사설립연도

해당부문 종사기간

재무제표

(최근 3년 평균치)

총자산

자기자본

매출액

당기순이익

주요연혁

일반현황(현지업체)

회  사  명

대 표 자

사 업 분 야

주       소

전 화 번 호

회사설립연도

주요연혁

주요실적

전문역량(전문인력 보유현황 등)

(서식 5)

조직 및 인력 현황

□ 조직도

□ 인력 현황

직무

분야

계

임원/

관리자

PM

영업/

기타

계

(서식 6)

유사사업 수행실적(각 참여사별 작성)

상호 및 법인명칭 : (ex, A사)

유 사 사 업 수 행 실 적

No.

구 분

(FS,기본,실시설계)

용역명

용역개요

용역기간

계약금액

(천원)

발주처

책임 기술자

비 고

(해외)

A1

타당성조사

ㅁㅁㅁ

전체금액

(지분율, 지분금액)

A2

타당성조사

ㅂㅂㅂ

1,000,000

(60%, 600,000)

해외

계

00건

총

00건

해외

기본설계

기본설계

해외

계

00건

총

00건

해외

합계

00건

총

00건

해외

※ 1. ‘입찰제안서 세부평가기준’에 명시된 수행실적 중 발주자의 평가기준에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외(명백히 해당되지 않는 실적의 경우 제안서 작성지침 미준수로 간주하여 감점대상)

2. 해외·국내 실적을 분리하고, 각각 (예비)타당성조사, 기본(실시)계획, 기본설계, 실시(상세)설계. 총 4가지로만 구분하여 분야별 합계를 하단에 기재

3. 발주처 또는 실적증빙기관이 발급한 실적증명서 미첨부시 실적 불인정

- 실적증명서는 ①유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호(용역사별로 A1, A2 또는 B1, B2 등) 견출지를 부착하고 ②용역종류(예:타당성조사, 기본설계 등), 용역기간, 지분금액, 적용기술 등 중요사항에 형광펜으로 표시 할 것 (실적평가시 형광펜 표시된 부분만 검토될 예정)

- 기본설계, 상세설계 용역과 감리용역을 동시에 수행한 건에 대해서는 지분을 반영한 설계용역의 금액만을 분리하여 제시

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필할 것)도 가능하며, 민간거래 실적은 발주처의 용역이행 실적증명서와 더불어 용역계약서 및 세금계산서 첨부

- 해외실적의 경우 해외건설협회 또는 발주처에서 발급한 실적증명서와 더불어 용역계약서 첨부 제출한 사업에 한하여 실적을 인정함.

4. 공동도급의 경우 계약금액 항목에 전체금액과 지분율에 따른 금액을 같이 기재 (계약금액에 지분율 표시)

5. 다른 통화(원화 이외)로 계약 체결된 해외실적의 경우, 해당 실적 계약일 기준환율(KEB 하나은행 고시 매매기준율) 적용

(서식 7)

과업수행조직 및 업무분장

사업수행책임자(PM)

소속기관 성명 (0 MM)

MICE

건축

(건축계획)

건축

(유틸리티)

토목

경제재무

환경사회

기후변화

영문

보고서

시설 운영 계획, 관련 법적 요건, 설계 기준 등

배치계획, 공간 활용 계획 등

전기, 통신, 수도 및 기반시설

지반 안정성 및 기초 설계, 교통, 주차, 배수 등 부대시설

경제적, 재무적, 정책적 타당성 검토

환경사회 영향 검토

기후위험 사전스크리닝, 기후위험 경감방안 도출

보고서 영문번역

- 분야별 책임자(분책) (정량평가 대상)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

- 전담 참여자(전담) (정성평가 대상)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

- 비전담 (정성평가 대상)

추가 제안 가능 (최대 3인 이내)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

소속기관

성명

(0 MM)

※ 비전담 인력은 서식 8에 표시하였음

※ 참고

1. 위의 그림과 동일하게 단위업무별로 세분화하여 작성

- PM은 대표사 소속, 음영부분 인력은 참여사 소속이어야 함. 비음영부분 인력은 참여사 소속이 아닌 외부전문가 활용 가능함. 비음영부분 인력에 해당하는 업무범위는 하도급 형태로도 수행 가능하며, 추후 동 용역 계약 체결 후 당행의 하도급 계약체결 사전 승인 필요

2. PM 및 분책이 정량평가 대상

- 전담 및 비전담 참여자는 정성평가 대상(개인별 실적 증빙자료 제출 필요 없음)

3. 참여인력 참여 지위(분야별 책임자, 전담 참여자, 비전담 참여자) 필수 명시

4. 참여인력별 소속회사, 성명, 참여 제안기간(M/M)를 명시

5. 필수 최소 제안인력은 PM(1인), 분책(5인), 전담(3인), 비전담(3인)으로 총 12인

6. 음영부분 분야는 과업범위를 감안하여 제안사 판단에 따라 추가 제안 가능 (최대 3인 이내)

(서식 8)

참여인력의 자격사항(예시)

구분

분야별

성명

소속기관

연령

(세)

기술

등급

최종

학력

자격증

담당

업무

비고 (중복건수)

전담 참여

PM

MICE

건축 계획

건축 유틸리티

토목

...

비전담 참여

(기타 1)

(기타 2)

...

Local

하도급

참여

(기타 1)

(기타 2)

...

참고)  1. 작성기준일 : 입찰공고일 현재

2. 기술등급 : 본 제안요청서 첨부 ‘(참고 2) 참여인력의 등급 및 자격기준’에 따라 기술자별 기술등급 및 해당 사유 간략 기재

예) 기술사(정보통신기술사), 특급(석사 10년), 고급(석사 6년)

3. 각종 증빙서류(경력증명서 등)는 별도 제출

(영문보고서 전문인력 필수 제출서류 포함)

4. 사업수행책임자(PM) 및 분야책임자는 제안서 제출일 현재 참여 또는 참여자로 제안된 중복 참여건수를 비고에 명기해야 함

5. 정성평가 ‘인력운용계획’에서 평가 예정 및 PM 대면평가시 업무중복에 대한 과업수행 우려사항 질의 가능

(서식 9)

참여인력의 이력사항

성    명

(국문)

주 민 등 록 번 호

(뒷자리 *로 표시)

(사진첨부 필수)

(영문)

*******

(한문)

직장주소

자택주소

연락처

전화 :                  / 휴대전화 :

e-mail :

학    력

학  교  명

학과 (전공)

졸업일

논 문 명

고등학교

학사과정

석사과정

박사과정

직장경력

회 사 명 (기관명)

근무기간

직 위

담 당 업 무

00.0.~00.0.

(0년0개월)

총 근무기간

년  개월

자 격 증

자  격  증  명

취 득 년 월 일

발 행 기 관

외

국

어

구분

읽기

쓰기

말하기

A : Native speaker와 같이 자유로운

구사 (통역자격 수준)

B : 일상생활은 물론 전문적 내용에 대해서도 구사가능

C : 일상생활에 지장 없음

D : 사전이 있으면 의사소통가능

유사업무

수행경험

No.

사 업 명 (조사명)

대상국

분야

기   간

발주자명

담당

업무

1

[A1]~~~~

00.0.~00.0.

(0년0개월)

2

[A3]~~~~

3

[A6]~~~~

4

[A7]~~~~

5

6

7

8

9

10

해외근무

경력 또는

출장경력

No.

업 무 명

국 명

기 간

담  당   업  무

1

2

3

4

5

6

참고사항

[Notes]

1. 입찰제안서 세부평가기준’에 명시된 수행실적 중 입찰공고일 기준 최근 10년간 수행한 발주자의 평가기준에 부합되는 실적만 작성하며, 현재 수행중인 용역은 제외(명백히 해당되지 않는 실적의 경우 제안서 작성지침 미준수로 간주하여 감점대상)

2. 실적증빙기관 또는 발주처가 발급한 실적·경력증명서 미첨부시 실적 불인정

- 실적증명서는 ①유사사업실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지를 부착하고 ②용역종류(예:타당성조사, 기본설계 등), 용역기간, 지분금액, 적용기술 등 중요사항에 형광펜으로 표시 할 것 (실적평가시 하이라이트 표시된 부분만 검토될 예정)

- 실적증명서는 사본(인감으로 원본대조필할 것) 제출 가능

3. 비전담 참여인력의 경우도 제출해야 하며, 필요시 요약기재 가능

4. PM의 경우 참고사항에 중복사업 개요(사업명, 과업종류, 발주자, 사업기간), 역할(PM/분책/실무자 등) 등 기재

5. 이력사항에 미기재된 유사사업 수행경험은 실적증빙을 제출하여도 실적으로 불인정

(서식 10)

용역비 산출내역서

1. 사 업 명 :「사 업 명」F/S 용역

2. 입찰일자 : 20  년   월   일

○ 용역비 산출내역서

(단위 : 원)

연 번

항      목

금                액

1

직접 인건비

2

제  경  비

3

기  술  료

4

직접 경비

국 외 여 비

현 지 상 주

현지조사비

<항목별 기입>

...

...

보고서 작성

자문위원회

소   계

5

손해배상공제

6

부가가치세(  %)

합   계

※ 각 항목별 세부 산출근거 첨부(현장조사 항목별 금액 분리 기재)

※ 제경비 : 직접인건비의 110% 이내, 기술료 : (직접인건비+제경비)의 40% 이내

주  소 :

상  호 :

대표자 :           (인)

(서식 11)

용역비 세부 산출근거

○ 사업 용역비 세부 산출근거(예시)

(단위 : 원)

구       분

합   계

산     출    근    거

합       계

1. 직접인건비

계

기술사

특급

고급

(...)

2. 제경비

계

직접인건비의 110% 이내

3. 기술료

계

(직접인건비+제경비)의 40% 이내

4.

직

접

경

비

계

국외여비

소계

항공료

00회×항공료

체재비

출장 : 00일×00회×일체재비

상주 : 00일×일체재비

(...)

현지조사비

소계

보고서작성

소계

인쇄비

00부×000장×단가

번역비

000장×단가

교열비

000장×단가

(...)

자문위원회

2회×00인×단가

<항목별 기입>

소계

<항목별 기입>

소계

5. 엔지니어링 손해배상공제료

1단계 = 순계약금액*×기본요율

2단계 = 순계약금액×0.16%

6. 부가가치세

(서식 12)

청렴계약 이행서약서(계약상대자용)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하고자 한국수출입은행(이하 “귀행”이라 한다)에서 시행하는 모든 공사, 용역, 물품구매 등과 관련하여 당사 임직원과 대리인(이하 “임직원 등”이라 한다)은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에서 특정인의 낙찰을 위하여 담합하거나 입찰가격협정을 한 것이 사실로 드러날 경우 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참가하지 않겠으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 귀행이 공정거래위원회에 신고하여 과징금 등이 부과되더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익(이하 “뇌물 등”이라 한다)을 제공하지 않겠으며 이를 위반하였을 때는 입찰참가자격제한 통지서에 명시된 바에 따라 최대 2년 동안 귀행이 시행하는 입찰에 참여하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 귀행이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하고 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 당사 임직원 등이 관계 임직원에게 뇌물(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에게 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 하도급자가 뇌물 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 때에는 그러한 행위에 당사의 책임이 없는 경우라 하더라도 귀행의 지시에 따라 하도급계약을 해제 또는 해지하도록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며 당사가 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 귀행의 조치와 관련하여 당사는 귀행을 상대로 손해배상 청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 13)

독립성 확약서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역을 수행함에 있어 관계 법규의 위반이 없이 용역수행을 위한 독립성을 확보하였음을 확약합니다.

20  년    월    일

상  호(법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 14)

정보 비공개 동의서

본인은 귀행의 □사 업 명□ F/S 용역과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제 3자에게 일체 누설하지 않겠으며, 제안서에 명시한 보안방침 및 귀행의 보안정책을 철저히 이행할 것을 확약합니다.

20  년    월    일

상 호 (법인명) :

주          소 :

대    표    자 :            (인)

사업자등록번호 :

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 15-1) 대표사

입찰평가를 위한 개인정보 수집·이용 동의서

한국수출입은행은「사 업 명」F/S(타당성조사) 용역 입찰평가를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 하는 바,「개인정보보호법」등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집·이용 동의

[개인정보 수집‧이용 목적]

○ 입찰절차의 진행 및 업체선정 과정에서 필요한 정보 확인 등

[수집‧이용하는 개인정보의 항목]

○ 제안업체 대표자 성명, 생년월일, 성별, 주소

○ 입찰참가 신청 제출 대리인의 성명, 생년월일, 전화번호, 이메일, 소속/직책, 재직기간

(대표자 및 대리인의 개인정보 외 참여인력의 개인정보는 제안업체에서 자체적으로 ‘개인정보 제3자 제공 동의’를 받아 한국수출입은행 앞 제공하는 정보임.)

[개인정보 보유 및 이용 기간]

○ 본 동의서가 작성된 때로부터 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간(5년)까지

[동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익]

○ 위 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나 동의하지 않은 경우, 본 입찰의 계약체결 대상에서 제외함.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                (동의하지 않음 ☐  동의함 ☐)

20   년

월

일

성명 :

(서명)

한국수출입은행 귀중

(서식 15-2) 참여사

입찰평가를 위한 개인정보 수집·이용 동의서

한국수출입은행은「사 업 명」F/S(타당성조사) 용역 입찰평가를 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 하는 바,「개인정보보호법」등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

개인정보 수집·이용 동의

[개인정보 수집‧이용 목적]

○ 입찰절차의 진행 및 업체선정 과정에서 필요한 정보 확인 등

[수집‧이용하는 개인정보의 항목]

○ 제안업체 대표자 성명, 생년월일, 성별, 주소

[개인정보 보유 및 이용 기간]

○ 본 동의서가 작성된 때로부터 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간(5년)까지

[동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익]

○ 위 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나 동의하지 않은 경우, 본 입찰의 계약체결 대상에서 제외함.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?                (동의하지 않음 ☐  동의함 ☐)

20   년

월

일

성명 :

(서명)

한국수출입은행 귀중

(서식 16)

퇴직자 영입현황 확인서

- 공고번호 :

- 입찰(계약)건명 :

1. 상기 입찰(계약)건과 관련하여 당사는 한국수출입은행의 퇴직자* 영입 근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

성   명

고용일자

담당업무

* 한국수출입은행 퇴직 후 2년이 경과하지 않고 고용한 경우만 해당

2. 한국수출입은행의 퇴직자를 영입한 경우에는 귀행의 내규에 따라 계약의 상대방 자격을 제한하는 은행의 규정을 따르겠습니다.

본건 입찰 또는 계약을 수행함에 있어 상기의 사항을 준수할 것을 확약하며, 만일 상기 신고사항과 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 17)

신규 입찰자 확인서

(최근 2년 이내 EDCF F/S 계약실적이 없는 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 과거 EDCF F/S 수주실적이 있으나 아래표와 같이 입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

□ 미해당

입찰공고일자 기준 최근 2년간 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

◦ 가장 최근 EDCF F/S 계약건명 및 해당건 계약 연월일

(가장 최근 건부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

가장 최근 EDCF F/S 계약건명

계약 연월일

비 고

1

2

3

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 18)

신규 입찰자 확인서

(신규입찰자용 - EDCF F/S 계약실적 전무)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적이 없음을 확인하며, 만일 이와 다른 사실이 발견될 경우, 계약을 해제 또는 해지함에 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

한편, EDCF 사업타당성조사(F/S) 입찰에는 참여하였으나, 계약자로 선정되지 않은 건은 아래표와 같습니다.

□ 미해당

입찰공고일자 기준 EDCF 사업타당성조사(F/S) 용역 계약실적 보유

◦ 가장 최근 EDCF F/S 입찰 참여건 기재

(가장 최근 건부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

가장 최근 EDCF F/S 입찰 참여건명

계약 연월일

비 고

1

2

3

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 19)

EDCF 부정당업자 제재 확인서

(입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재 중인 경우)

- 입찰(계약)건명 :

- 해당사항 여부 체크(택 1)

□ 해당

당사는 동 건의 입찰공고일자 기준, 아래 표와 같이 EDCF 부정당업자 제재를 받고 있는 입찰자 또는 다자개발은행(MDB)으로부터 부패행위와 사실왜곡 등 부정당행위로 인하여 상호제재(Cross Debarment)를 받고있는 입찰자임을 알려드리며, 그에 따라 평가기준에 의거 본건 입찰에 불이익이 존재함을 인지하고 있습니다.

□ 미해당

입찰 공고일자 기준 EDCF 부정당업자 제재 또는 MDB 상호제재가 아닌 경우

◦ 입찰공고일자 기준, EDCF 제재 또는 MDB 상호제재 진행 사항

(가장 최근 건부터 최대 3건 기재. 기재사항 없다면 기재란에 ‘해당없음’ 기재)

구 분

제재 발생 사업명

제재 기간

제재 처분일

제재 사유

1

2

3

20  .    .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 20)

F/S 용역 평가·활용 동의 확약서

당사는 금번 EDCF F/S 용역업무를 수주할 경우

1. EDCF F/S 용역 수행 완료 후 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 평가되는 것을 충분히 숙지하고 있습니다.

2. 또한, 사후적으로 (고의 또는 중과실 등의 사유로) F/S가 부실로 확인되는 경우 당사 또는 컨소시엄의 용역활동(결과물 포함)이 귀행에 의해 재평가될 수 있음을 충분히 숙지하고 있습니다.

3. 상기 평가 및 재평가 결과는 평가 후 2년간 당사가 다른 F/S 용역 입찰 참여시 귀행의 F/S 제안서 기술평가에서 가감점(건별 ±2점 이내, 누계 ±4점 이내)으로 반영·활용됨을 충분히 이해하고 이에 동의합니다.

귀행의 F/S 용역 평가 및 타 F/S 용역 입찰자 심사시 평가결과 활용  (가감점 적용) 등의 조치와 관련하여 당사가 귀행을 상대로 손해배상을   청구하거나 민‧형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .   .    .

상  호(법  인  명) :

서약자(회사대표자) :                 (인)

한국수출입은행 경협구매부장 귀하

(서식 21)

인권보호 서약서(계약상대자용)

당사는 한국수출입은행의 인권경영 관련 원칙과 정책에 적극 호응하고자,         (계약명)      계약 참여에 있어 아래와 같이 인권의 존중·증진을 다짐합니다.

1. 우리는 인권에 대한 UN의 세계인권선언 등 국제기준 및 규범을 지지하고 준수한다.

2. 우리는 모든 경영활동에서 인권침해를 사전에 예방하며, 적극적인 구제를 위해 노력한다.

3. 우리는 고용에 있어 성별, 연령, 인종, 장애, 종교, 정치적 성향과 출신지역 등에 따른 일체의 차별을 금지하며 다양성을 존중한다.

4. 우리는 결사 및 단체교섭의 자유를 보장한다.

5. 우리는 아동노동, 강제노동을 금지하며 보건, 안전, 근무시간 등과 관련하여 국제노동기구(ILO)가 권고하고 국가가 비준한 모든 노동원칙을 준수한다.

6. 우리는 협력사 등 공급망과 상생 발전을 위해 노력하며, 인권경영을 실천할 수 있도록 지원하고 협력한다.

7. 우리는 지역사회에서 지역주민의 인권이 침해되지 않도록 유의한다.

8. 우리는 국내외 환경관련 법규를 준수하고, 환경보호 및 오염방지와 기후변화 위기 대응을 위해 노력한다.

9. 우리는 고객의 만족과 개인정보 보호를 위해 노력한다.

10. 인권과 관련된 부정적 영향이 발생한 경우, 이를 시정하기 위해 적극 노력한다.

위 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 이를 지키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.                  20  .    .    .

서약자(회사대표자):               (인)

한국수출입은행장 귀하

(서식 22)

조세포탈 여부 확인 서약서

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조의5 및
같은 법 시행령 제12조 제5항에 따른 서약서

당사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 제1항에 따른 조세포탈 등을 한 자가 아님을 서약합니다. 만일 다음 각 호의 사유로 유죄 판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않는 사실이 발견된 경우에는 계약을 해제ㆍ해지하는 등 불이익을 감수하겠으며, 같은 법 시행령 제76조 제2항 제1호 가목에 따라서 부정당업자의 입찰참가자격제한 처분을 받겠습니다.

1. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급·공제받은 세액이 5억 원 이상인 자

2. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 감면받거나 면탈하거나 환급받은 세액이 5억 원 이상인 자

3. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급·공제 세액이 5억 원 이상인 자

4. 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조 제1항에 따른 금액을 초과하는 자

5. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조 제1항 제3호에 해당하는 자

20  .   .   .

서약자(회사대표자) :          (인)

한국수출입은행장 귀하

(서식 23)

제안서 작성지침 미준수 여부 자가진단표

확인 항목

자가진단 체크

예

아니오

□ 제안서 본문 또는 첨부물 작성 페이지 수 위반(페이지당 0.25점 감점)

* 위반 페이지가 4페이지를 초과하는 경우 결격 처리

□ A3용지 페이지수 제한 위반(페이지당 0.25점 감점)

* 위반 페이지가 4페이지를 초과하는 경우 결격 처리

□ 컬러인쇄물 페이지수 제한 위반(페이지당 0.25점 감점)

* 위반 페이지가 4페이지를 초과하는 경우 결격 처리

□ 제안서상 자체 자문위원 명단 기재(0.25점 감점)

□ 과다한 비용이 지출되는 인쇄물(오프셋 인쇄 등) 제출 또는 인쇄용지 규격 위반(0.25점 감점)

□ 제안서 목차상 작성항목 또는 작성내용 누락(0.25점 감점)

* 제안서 본문 및 첨부물 모두 해당

□ 제안서 목차상 기재순서 위반(0.25점 감점)

* 제안서 본문 및 첨부물 모두 해당

□ 제안서 서식 위반(0.25점 감점)

* 제안요청서에 수록된 서식 1 ~ 24 기준

□ 제안서 내 페이지번호 누락(0.25점 감점)

* 제안서 본문 및 첨부물 모두 해당

□ 기타 입찰제안서에 명시된 제안서 작성지침 위반(건별 0.1점 감점)

- 각종 증명서의 유효기간 경과 또는 요구한 기한 이전 발행

- 실적평가 관련 평가대상과 무관한 실적 제출 또는 요구서류가 제출되지 않은 경우

- 참여인력의 타사업 중복 참여여부 미기재

- 제안요청서에서 허용하지 않은 분야의 외부전문가 제안

- 출장횟수 및 상주기간 등 요구된 인력투입계획 위반

- 전담 및 비전담 참여자수 초과 등

감점 합계(최대 2.0점 한도)

* 제안서 접수당시 위반사항이 확인되는 경우, 마감시한 이내에서 위반사항 보완 후 제출(예, 페이지수 초과시 본문 및 첨부물 일부 제거 후 제출) 가능

* 제안서 접수 이후 평가과정 중 확인된 위반사항은 항목별 감점기준에 따라 처리됨.

년   월   일

작성기관 :        , 작성자 직함 :     , 작성자 성명:           (인)

(서식 24)

정량평가 자가진단표

평가부문

평가항목

배점

실적

A사

(60%)

B사

(40%)

합계

(가중평균)

평가점수

업체 사업수행

실적

용역수행 건수

4

건수

00건

00건

00건

00점

용역수행 금액

4

금액

(백만원)

00원

00원

00원

00점

해외 용역수행 건수

2

건수

00건

00건

00건

00점

참여인력

경험

PM 자격

1

등급

특급기술자

00점

PM 경력

2

연수

00년

00점

PM 실적

2

건수

00건

00점

참여기술자 경력

5

연수

(최대 8년)

실제

인정

비고(등급 가중치)

책임 1(분야, 성명, 등급)

17.0

8.0

17.0×100%(기술사)

00점

책임 2(분야, 성명, 등급)

8.0

7.2

8.0×90%(특급)

00점

책임 3(분야, 성명, 등급)

6.0

5.4

6.0×90%(특급)

00점

전담 1(분야, 성명)

7.5

7.5

-

00점

전담 2(분야, 성명)

9.4

8

-

00점

전담 3(분야, 성명)

5.7

5.7

-

00점

소 계 (산술평균)

00

00년

00점

참여기술자 실적

5

건수

(최대 7건)

실제

인정

비고(등급 가중치)

책임 1(분야, 성명, 등급)

13

8

13×100%(기술사)

00점

책임 2(분야, 성명, 등급)

7

6.3

7×90%(특급)

00점

책임 3(분야, 성명, 등급)

19

8

19×90%(특급)

00점

전담 1(분야, 성명)

16

8

-

00점

전담 2(분야, 성명)

5

5

-

00점

전담 3(분야, 성명)

6

6

-

00점

소 계 (산술평균)

00

00건

00점

A사 (60%)

B사 (40%)

평가점수

재무구조 및 경영상태

신용평가등급

5

신용

등급

개별점수

개별점수

00점

가산점, 감점

(정량평가 배점 한도내)

중소기업 가점

(+1)

중소기업 여부

해당여부

해당여부

00점

신규 입찰자 가점(1)

(+0.5)

2년간 수주 없음

해당여부

해당여부

00점

신규 입찰자 가점(2)

(+1.0)

신규 입찰자 여부

해당여부

해당여부

00점

약자기업

장애인기업 및 사회적 기업

(+0.3)

공적 증빙

해당여부

해당여부

00점

여성기업

(+0.3)

(+0.5)

존속기간 확인

해당여부

해당여부

00점

창업기업

(+0.5)

창업기업 확인서

해당여부

해당여부

00점

MDB 유사사업 경험(PM)

(+1.0)

최근 10년

00건

00건

00점

EDCF 부정당업자 제재(1)

(-3.0)

제재 기간

해당여부

해당여부

00점

제안서 작성지침 미준수

(-2.0)

개별점수

개별점수

00점

F/S 용역결과 평가

(+4.0~-4.0)

최근 2년 평가

개별점수

개별점수

00점

총    계

가산점 포함하여 30점 이내

00점

※ 업체의 사업수행실적, 재무 및 경영상태는 공동도급으로 참여할 경우, 참여지분율을 고려한 건수(과거 참여지분율 감안한 실적), 금액(과거 참여 지분율 감안한 금액), 등급(재무등급)을 적시하고, 공동도급 구성원별로 유사사업 수행실적에 참여비율을 곱하여 산정한 후, 가산점 여부 등을 감안하고 합산(표 안 붉은색은 작성예시)

※ 분야별 참여인력 경력 및 실적은 각 참여자별(책임은 등급별 가중치를 곱한 값) 1인 최대 8년, 7건 초과시 8년/7건으로 인정

※ 공동도급 구성원 수에 따라, 칸을 추가 또는 삭제하여 기입

년     월     일

작성기관 :          , 작성자 직함 :       , 작성자 성명:           (인)

(참고 1)

참여업체수에 따른 정성평가 등급배분표

참여업체수

A등급

B등급

C등급

D등급

E등급

계

1

-

-

-

-

-

(절대평가)

2

1

1

0

0

0

2

3

1

1

1

0

0

3

4

1

2

1

0

0

4

5

1

3

1

0

0

5

6

2

2

1

1

0

6

7

2

3

1

1

0

7

8

2

3

2

1

0

8

9

2

4

2

1

0

9

10

2

4

3

1

0

10

11

2

5

3

1

0

11

12

2

5

3

2

0

12

13

2

6

3

2

0

13

14

3

6

3

2

0

14

15

3

6

3

2

1

15

16

3

6

4

2

1

16

17

3

6

4

3

1

17

18

4

6

4

3

1

18

19

4

6

5

3

1

19

20

4

6

5

4

1

20

(참고 2)

참여인력의 등급 및 자격기준

기준

구분

기술자격 및 경험기준

학력 및 경험기준

기  술  사

․ 기술사/건축사

-

특급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 13년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

고급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 박사학위를 가진 자

․ 석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

중급기술자

․ 기사자격을 가진 자로서 4년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 산업기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자,

․ 학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

초급기술자

․ 기사자격을 가진 자

․ 산업기사자격을 가진 자

․ 석사학위를 가진 자

․ 학사학위를 가진 자

․ 전문대학을 졸업한 자

․ 고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자

(안내사항)

가격입찰서에 엔지니어링 손해배상공제 보험금액 반영 必

(안내사항)

비대면 입찰참여 의향을 표시한 회사만이 JV대표사 자격이 주어짐

(입찰마감일 전까지 참여의향을 밝히지 않은 회사는 참여사로만 용역참가 가능)

(안내사항)

1. 대면으로 제출한 경우, e-mail로 별도 송부 필요 없음

(안내사항)

- 반드시 가격산출근거서를 첨부하여 나라장터에 업로드

- ‘직접경비’는 항목별 상세내역 Break down하여 기재 必

- 가격입찰서에 엔지니어링 손해배상 공제 보험금액 반영 必

(안내사항)

1. 공동이행방식

: 공동수급체 구성원이 일정 출자비율에 따라 연대하여 공동으로 계약을 이행하는 공동계약

- 구성원수 : 4개 이하

(3개사 이하 권고)

2. 최소지분율

- 구성원별 최소지분율 10% 이상

3. 대표사가 최대 지분 보유

(안내사항)

입찰 마감일까지 공동수급체 모든 개별 구성원이 필히 등록해야 전산적으로 입찰 참여 처리 가능

(안내사항)

’25.6.25자 시행된 EDCF F/S 제안서 평가업무 매뉴얼 개정 사항 반영.

자세한 사항은 본 제안요청서 16페이지 참고

(안내사항)

‘MDB유사사업’ 경험 증명 의무는 입찰사에 있음에 따라, 증빙서류 상에 반드시 여부 별도 명시

(명시하지 않을 시 불인정, 증명하지 못하는 경우 불인정)

- ①MDB 직접발주 유사사업 컨설팅용역 또는 ②MDB Loan에 기반하여 수원국이 발주한 유사사업 컨설팅용역이 그 대상임

- PM의 실적증명서와 함께 MDB 유사사업 경험임을 증빙할 수 있는 원본대조필 된 문서 첨부 필수(PM의 실적증명서에 첨부, 형광펜으로 마킹)

- 유사사업 컨설팅 용역에 한정함

- 점수 = 0.2점 × 인정건수

(안내사항)

이 경우, 실적증명서 외 충족요건 증명할 수 있는 추가자료 제출 필요

(예: 보고서 목차, 발췌본 등)

담당 분야가 명시된 공동수급협정서 사본 등과 같이 참여사별 과업내용이 명확히 확인 가능한 증빙서류 첨부 필수

(누락 또는 내용 확인 불가시 지분율을 고려한 건수만 인정)

예시)

A, B, C가 본건 입찰의 공동수급체 구성원이면서, A가 발주한 용역을 B가 수행한 경우, 해당 실적은 인정되지 않음

예) B사업 컨설팅 용역(1차년도), (2차년도), (3차년도)

→ 1건만 인정

예) 전체 과업범위(설계 1억+감리 1억) 중 설계만 완료된 경우, 설계 완료에 대한 증빙자료 제출시 설계 부분에 대한 실적(1억) 인정 가능

예) D사업 입찰(일괄 or 대안)에 참여하여 낙찰자로 결정되지는 않았으나 설계보상 대상자로 선정된 경우(설계보상 금액 2억원)

→ 0.8건 및 1.6억원으로 인정

유의사항

(안내사항)

개략적으로 제안서 마감일로부터 10일 전후입니다. 일정 참고 부탁드립니다.

(안내사항)

정부 유관부처에서 발급하는 정식 확인서 제출 대상

(안내사항)

최신 계약예규 해당 산식에 따름

(안내사항)

계약예규 개정으로 최저입찰가 비율 상향(60% → 70%)

(안내사항)

(중요) 착수보고서는 기 제출했던 ‘제안서’를 재구성하는 수준이 아니라,

-제안서 내용을 바탕으로

-각 세부항목별 목표시기, 과업종류별로 해당 과업을 어떻게 수행할 예정인지에 대해,

-상세한 FS공정표 및 항목별 실행계획을 작성해야 합니다.

-또한, III-6.의 보고서제출계획 일정을 수립해야 합니다.

(안내사항)

F/S 수행사 앞 제공하는 ‘성과관리 프레임워크 작성 가이드라인’ 참고

관공서 기록, 주민조사 등을 통해 사업지역 가구(가장) 여성비율, 주민 여성 성비 등 조사

(안내사항)

- 사업관리능력 및 사업이해도 부족, 참여도 저조 등은 PM 교체 사유*에 해당함

* 업무 전가, 현지출장 및 주요 보고회 미참석, 타용역 중복 참여 등으로 과업참여 저조 등

(안내사항)

현지상주 1인 3M/M 이상이나, 2인 분할 수행가능(최소단위 1개월)

연속해서 3개월이 아니어도 되며 용역 기간 중 합산하여 3개월 조건

- 상주기간은 bar chart에 출장기간과 구분되어 기재되고 출장기간과 구분되어 카운팅

- 상주업무는 용역초기 자료수집, 현장조사, 하도급선정/관리 등에 필요하니 제안서 작성시 참고

(안내사항)

- 인력별 출장횟수 최소요건 확인

- 최소 출장횟수는 다음과 같음

· PM – 4회 이상

· 분책 – 각 2회 이상

· 전담 – 각 2회 이상

비전담 출장 가능하나, PM, 분책, 전담인력 출장횟수 카운트에 포함되지 않음

상주기간과 출장일정은 별도관리, 별도점검 됨. M/M 수치와 bar chart상 상주기간과 출장은 구분되어 표시되어야 하며, 별도로 관리됨

(안내사항)

- 세무법인 활용계획 포함, 현장조사 가격제안서 반영 필요

(안내사항)

’25.6.25자 시행된 EDCF F/S 제안서 평가업무 매뉴얼 개정 사항 반영

(안내사항)

다음페이지“ 3. 제안서 항목별 작성방법”상 작성요령을 숙지하셔서 본 목차를 제안서에 빠짐없이 기재 부탁드립니다.

(안내사항)

’25.6.25자 시행된 EDCF F/S 제안서 평가업무 매뉴얼 개정 사항 반영

(안내사항)

효율적인 평가를 위해 필히 요청 드립니다.

(안내사항)

효율적인 평가를 위해 필히 요청 드립니다.

(안내사항)

제안서 제출 전 누락된 항목이 없는지 점검하는 측면에서 체크리스트로 활용하여 자가진단 하시기를 권고드립니다.

(안내사항)

“①” 과 “④”는 제본하지 않고,

간지를 제외한, 각각 낱장 형태로 순서대로 제출

- 반면, “②”와 “③”는 책자로 제출

(안내사항)

가격제안서는 포함하지 않음

(안내사항)

구성은 다음과 같음

Part1. 회사 및 개인의 기술용역이행 실적증명서는 각 사별로 앞부분에 모두 첨부한 후,

A회사실적 : A1~A10

A소속 개인실적 : A11~A20

B회사실적 : B1~B10

B소속 개인실적 : B11~B20로 넘버링, 인덱스 처리

Part2. 개인별 실적증명서에는 해당 실적증명서 우측상단에 Part1의 대응되는 인덱스(ex,A5~A14)를 기재하고, 주요사항 하이라이트 처리

(안내사항)

해당 업체 대표가 입찰을 위해서 소속직원들 정보를 취합하여 제출하는 것으로 간주하여,

각사 대표자 및 입찰서 제출 대리인 정보만 수집

(안내사항)

서식은 누락없이, 해당사항이 없으면 ‘해당사항 없음’이라 서식내 기재 후 제출하시면 됩니다.

(안내사항)

간지 없이 순서대로 제출

(안내사항)

대표사의 대표자를 의미합니다.

(안내사항)

각 참여사가 기재 및 날인하여 제출

(안내사항)

공동도급의 경우,

1) 대표사가 전체에 대하여 지급각서를 제출, 또는

2) 각 참여사가 날인하여 제출 가능

(안내사항)

참여사별로 작성

(안내사항)

F/S사가 제안하는 현지업체별로 작성하고, 제시된 항목은 예시로서 내용은 자유롭게 기술

(안내사항)

참여사별로 작성

(안내사항)

본 서식6 No.에 각 회사별 실적번호 [A1], [A2], [B1], [B2] 등을 기재하고,

해당 실적증빙서류(발주처 발행, 해건협 등)에 동일번호[A1], [A2] 견출지 부착

(안내사항)

실적증명서상 기재되어 있는 용역사별 계약금액(지분율 고려)과 일치 필요

(안내사항)

총계 및 해외만 입력

(안내사항)

- (예비)타당성조사, 기본계획, 기본설계, 실시(상세)설계 총 4가지로만 분류

2가지 이상의 과업이 하나의 실적에 포함된 경우, 상위단계 용역으로 분류

타당성+기본설계 => 기본설계

기본+실시설계 => 실시설계

(안내사항)

실제 업무 수행인력 제시 필수

- 참여도가 낮다고 판단될 경우 교체 또는 제외 예정

- 제시된 전담인력이 주도적 용역참여 필요(메일/유선 연락, 당행/실시기관과 협의 등)

- 비전담 또는 비공식 참여인력을 통한 용역수행 불인정

(유의사항)

참여사 소속 여부를 확인할 수 있는 재직 증빙 제출 필수

(재직증명서, 협회 경력확인서, 건강보험 자격득실 확인서 등)

(안내사항)

계획된 기간 중, 참여 예정인 모든 용역(당행 발주 포함 모든 용역) 건수에 대해 명기

(중복 건수를 누락하여 기재했을 경우 감점 처리)

(안내사항)

자택주소는 ‘동’ 단위 까지만 기재

(안내사항)

평가기준보다 실적건수는 여유있게 기재 권장(가령, 10건이 만점 기준에 해당하더라도 10건 이상 기재)

(안내사항)

A1-A2-A3 가능한 사업번호 순서대로 작성

(안내사항)

국내에서 수행한 해외사업 수행실적이 아닌,

‘해외상주’ ‘장기출장’ 또는‘해외연수’ 등 경력만 기재

(필요시 출입국증명원 등 증빙자료 추가 요청)

(안내사항)

인쇄비 및 번역비 포함*

*용역사 자체 통번역전문가를 통한 번역을 기본으로 하나, 번역 퀄리티 검토 후 필요시 외부 용역 고용 요청 예정

(안내사항)

하단에 표기된 항목은 필수 작성

(해당 없을시 빈칸 기재)

(안내사항)

반드시 하단 양식 준용하여 상세작성

(안내사항)

제안서상 제시된 최소 횟수이상

(출장횟수 + 상주횟수)

(안내사항)

- 회사 내 통번역 인력를 통한 번역시 예상 비용 또는

- 외부 통번역사 고용시 예상 비용

(안내사항)

- 최소한 당행에서 요구한 2회 * 3인 비용을 포함한 금액

(안내사항)

본 용역은 손해배상보험(공제) 가입대상임.

엔지니어링 손해배상보험(공제)관련 법령에 의한 보험 가입금액

단, 순계약금액= 표 1~4의 합

(안내사항)

요율은 예시임

(안내사항)

대표사(주관사) 작성 서식

(안내사항)

대표사만 해당되는 내용

(참여사의 경우 해당 문구 삭제된 다음페이지 양식 제출)

(안내사항)

참여사 작성 서식(각 참여사별로 작성)

(안내사항)

해당사항 없을시,

“해당사항 없음”으로 기재 후 제출

해당사항 있을시,

퇴직자의 업무가 계약/입찰과 무관함을 증빙할 수 있는 서류 제출 필요

ex) 조직도 및 개인업무분장 등

(안내사항)

2년 내 실적이 없는 경우에는 2년 이상 경과한 실적을 최근순으로 기재

(안내사항)

‘23. 10. 신규서식 추가된 부분입니다.

(안내사항)

작성 후 soft-file(엑셀파일) 또한 USB에 수록하여 제출